Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-5476/2019

г. Липецк

14 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 26.09.2019.

Решение изготовлено в полном объеме 14.10.2019. 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

администрации сельского поселения Большеполянский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 399554 Липецкая область, Тербунский район, с.Большая поляна, ул.Почтовая, д.56)

к обществу с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 398016, 

<

...>)

об устранении недостатков выполненных работ,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность №137  от 17.07.2019,

от ответчика: представитель не явился.

УСТАНОВИЛ:

администрация сельского поселения Большеполянский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области (истец) обратилась с исковым заявлением к ООО «Стимул групп» об устранении недостатков выполненных работ.

Определением от 29.05.2019 суд принял данное заявление к рассмотрению, возбудил производство по делу.

Суд определением от 03.09.2019 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял к рассмотрению изменение предмета исковых требований: обязать ООО «Стимул групп» в срок не позднее тридцати календарных дней со дня вступления в законную силу судебного акта, принятого по настоящему делу, устранить на объекте следующие недостатки, указанные в дефектном акте от 20.08.2019:

1. Протекание кровли в осях 3,3/1-Б над актовым залом;

2. Замокание внутренних и наружных стен в осях 3,3/1-Б в актовом зале;

3. Замокание одной потолочной плиты ARMSTRONG размером 0,6м/0,6м в гардеробе;

4. Течь в системе водоснабжения калорифера в гардеробе;

5. Неисправности систем оповещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения во всех местах установки;

6. Вертикальные и горизонтальная трещины на поверхности стен в актовом зале:

6.1. Вертикальная трещина в месте примыкания стены по оси Б и стены по оси 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 2,9 м);

6.2. Вертикальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 1,92 м);

6.3. Горизонтальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 1,6 м);

7. Установить часть пластикового напольного плинтуса:

7.1. В актовом зале по осям В и 3/1 общей протяженностью 1,66м,

7.2. В артистической на дверном откосе (слева при входе) по длине 0,35 м;

8. Смонтировать стальной регистр отопления в электрощитовой;

9. Установить источник бесперебойного питания в электрощитовой;

10. Смещение и деформацию потолочных плит ARMSTRONG 0,6м/0,6м, смещение светильников:

10.1. В тамбуре - смещение 1,3 плиты справа от входа (не установлены в места установки), смещение светильника;

10.2. В электрощитовой - деформация 0,5 плиты над входом, смещение первого от входа светильника;

10.3. В читальном зале - смещение 2 плит в двух противоположных от входа углах;

11. Неровности поверхности и неоднородность прокрашивания на всех стенах на площади 24,7м2 в электрощитовой, оштукатурить дверные откосы в электрощитовой;

12. Отслоение штукатурного слоя, загрязнения (после проведения работ):

12.1. В топочной — точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения по всей поверхности стен, загрязнение потолка в местах проведения сварочных работ, загрязнения плиточного покрытия пола на площади 1,5 м2;

12.2. В техническом помещении - точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения по всей поверхности стен, точечные отслоения поверхности потолочного покрытия по всей площади потолка;

13. Заштукатурить крепления входной двери в техническом помещении;

14. Установить в соответствии с проектной документацией двери с противопожарными свойствами в электрощитовой и читальном зале;

15. Восстановить отклеившийся пластиковый дверной наличник по длине 11,4 погонных метров в коридоре;

16. Восстановить дверную ручку в сан. узле для посетителей;

17. Устранить люфт дверных ручек во всех помещениях;

18. Закрепить фурнитуру поручней для инвалидов в сан. узле для инвалидов;

19. Установить сантехнику для инвалидов в сан. узле для инвалидов;

20. Устранить колебание поручней входных групп №1,2,3,4 и пандуса при опирании на них;

21. Восстановить отклеившийся пластиковый уголок оконного откоса на длине 1 погонный метр в верхней части окна в сан. узле для инвалидов, устранить следы монтажной пены в сан. узле для инвалидов;

22. Заделать щель (Длина/Ширина, м) 1/0,03 по ширине окна под подоконной доской в сан. узле для инвалидов;

23. Заделать монтажные швы по всему периметру витража тамбура входа

№ 1;

24. Устранить деформацию порогов тамбура входа № 1 при нагрузке на них;

25. Устранить заклинивание двери (при её открывании/закрывании) о верхнюю часть пластиковой рамы в тамбуре входа № 1;

26. Устранить неплотность стыков составных частей металлического нащельника на фасаде по периметру здания;

27. Смонтировать водосточную систему с козырька крыльца входа № 1;

28. Заделать уплотняющей прокладкой и герметиком в соответствии с проектом деформационные швы по периметру здания;

29. Выполнить в топочной систему отопления в соответствии с проектной документацией;

30. Устранить неисправность запорной арматуры в топочной;

31. Восстановить герметичность мест соединения труб системы водопровода в районе присоединения пожарного водопровода в топочной;

32. Устранить неисправность потолочного светильника справа от входа в топочной;

33. Восстановить отсутствующие участки общей длиной 8,6 м водосточного желоба кровли по периметру здания;

34. Восстановить отслоившийся штукатурный слой на торцах ступеней, подпорных стен на площади:

- вход № 4 - 2,32 м2,

- вход № 3 - 1,75 м , -вход№2-3,05 м2,

- вход № 1 - 2,27 м2,

- пандус - 11,95 м2;

35. Устранить сколы и трещины плитки (размер плитки 300*300мм) на ступенях входных групп:

- вход №4 — 6 шт.,

- вход №3 — 4 шт.;

36. Установить указанное в проекте алюминиевое реечное потолочное покрытие вместо ARMSTRONG в сан. узлах;

37. Обеспечить функционирование системы пожаротушения в техническом помещении;

38. Заделать места входов инженерных коммуникаций в стены по периметру здания;

39. Смонтировать металлическую лестницу на чердак в читальном зале;

40. Установить 1/3 плитки на стене сан. узла (помещение № 16 лист 7 тома 3 340-16-АР) справа от входа над канализационной трубой.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте его проведения.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещена арбитражным судом в сети «Интернет».

При таких обстоятельствах, на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившегося лиц.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) 23.05.2017 заключен муниципальный контракт № 01463000151700000-0130675-02 на строительство объекта «Сельский дом культуры на 100 мест в селе Большая Поляна Тербунского района Липецкой области» (далее - Контракт).

В соответствии с п. 11.1, 11.2 Контракта Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ в течение 5 лет с даты подписания акта приёмки приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

Акт приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 был подписан сторонами 26 декабря 2017 года.

16 января 2019 года в ходе проверки построенного объекта истцом совместно с ОКУ «УКС Липецкой области» и директором МБУК ПЦК и Д с. Большая Поляна составлен акт о выявленных дефектах, о дате составления акта ответчик был извещен письмом №5 от 14.01.2019.

22 января 2019 года ответчику направлено требование об устранении выявленных недостатков.

20 августа 2019 года истцом составлен повторный акт о выявленных дефектах объекта строительства, выводы которого явились основанием для исковых требований.

Подрядчику направлена досудебная претензия от 02.04.2019 г. № 134 с приложением копии акта проверки от 13.03.2019.

Невыполнение ответчиком своих обязательств по устранению недостатков послужило основанием для обращения истца в суд.

Проанализировав условия заключенного между сторонами Контракта, суд приходит к выводу, что по своей правовой природе он является государственным контрактом на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, и взаимоотношения сторон должны регулироваться нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Заказчик также вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (п.3 ст. 724 ГК РФ).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (статья 310 ГК РФ).

Письма о выявленных дефектах направлены истцом в адрес ответчика в пределах гарантийного срока.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Какие-либо доказательства, позволяющие суду прийти к выводу о              недостоверности заключения эксперта, сторонами в материалы дела не представлено, ходатайств о назначении судебной экспертизы стороны не заявили, ответчиком выводы экспертного заключения не оспорены.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку ответчик доказательств, подтверждающих, что выявленные дефекты (недостатки) произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации, не представил, а также не представил доказательств, освобождающих его от исполнения принятого на себя обязательства, суд приходит к выводу, что требование истца о безвозмездном устранении недостатков является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд с учетом требований истца устанавливает срок устранения недостатков 30 дней с даты вступления решения в законную силу.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит уплате государственная пошлина в сумме 6000 руб.

Руководствуясь статьями  110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки работ, указанные в дефектном акте от 30.08.2019, по муниципальному контракту №014630000151700000-0130675-02, в помещениях объекта «Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с.Большая Поляна Тербунского района Липецкой области» а именно: 

1. Протекание кровли в осях 3,3/1-Б над актовым залом;

2. Замокание внутренних и наружных стен в осях 3,3/1-Б в актовом зале;

3. Замокание одной потолочной плиты ARMSTRONG размером 0,6м/0,6м в гардеробе;

4. Течь в системе водоснабжения калорифера в гардеробе;

5. Неисправности систем оповещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения во всех местах установки;

6. Вертикальные и горизонтальная трещины на поверхности стен в актовом зале:

6.1. Вертикальная трещина в месте примыкания стены по оси Б и стены по оси 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 2,9 м);

6.2. Вертикальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 1,92 м);

6.3. Горизонтальная трещина на стене по оси Б между осями 3 и 3/1 шириной раскрытия до 2 мм (длина трещины 1,6 м);

7. Установить часть пластикового напольного плинтуса:

7.1. В актовом зале по осям В и 3/1 общей протяженностью 1,66м,

7.2. В артистической на дверном откосе (слева при входе) по длине 0,35 м;

8. Смонтировать стальной регистр отопления в электрощитовой;

9. Установить источник бесперебойного питания в электрощитовой;

10. Смещение и деформацию потолочных плит ARMSTRONG 0,6м/0,6м, смещение светильников:

10.1. В тамбуре - смещение 1,3 плиты справа от входа (не установлены в места установки), смещение светильника;

10.2. В электрощитовой - деформация 0,5 плиты над входом, смещение первого от входа светильника;

10.3. В читальном зале - смещение 2 плит в двух противоположных от входа углах;

11. Неровности поверхности и неоднородность прокрашивания на всех стенах на площади 24,7м2 в электрощитовой, оштукатурить дверные откосы в электрощитовой;

12. Отслоение штукатурного слоя, загрязнения (после проведения работ):

12.1. В топочной — точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения по всей поверхности стен, загрязнение потолка в местах проведения сварочных работ, загрязнения плиточного покрытия пола на площади 1,5 м2;

12.2. В техническом помещении - точечные отслоения штукатурного слоя, загрязнения по всей поверхности стен, точечные отслоения поверхности потолочного покрытия по всей площади потолка;

13. Заштукатурить крепления входной двери в техническом помещении;

14. Установить в соответствии с проектной документацией двери с противопожарными свойствами в электрощитовой и читальном зале;

15. Восстановить отклеившийся пластиковый дверной наличник по длине 11,4 погонных метров в коридоре;

16. Восстановить дверную ручку в сан. узле для посетителей;

17. Устранить люфт дверных ручек во всех помещениях;

18. Закрепить фурнитуру поручней для инвалидов в сан. узле для инвалидов;

19. Установить сантехнику для инвалидов в сан. узле для инвалидов;

20. Устранить колебание поручней входных групп №1,2,3,4 и пандуса при опирании на них;

21. Восстановить отклеившийся пластиковый уголок оконного откоса на длине 1 погонный метр в верхней части окна в сан. узле для инвалидов, устранить следы монтажной пены в сан. узле для инвалидов;

22. Заделать щель (Длина/Ширина, м) 1/0,03 по ширине окна под подоконной доской в сан. узле для инвалидов;

23. Заделать монтажные швы по всему периметру витража тамбура входа № 1;

24. Устранить деформацию порогов тамбура входа № 1 при нагрузке на них;

25. Устранить заклинивание двери (при её открывании/закрывании) о верхнюю часть пластиковой рамы в тамбуре входа № 1;

26. Устранить неплотность стыков составных частей металлического нащельника на фасаде по периметру здания;

27. Смонтировать водосточную систему с козырька крыльца входа № 1;

28. Заделать уплотняющей прокладкой и герметиком в соответствии с проектом деформационные швы по периметру здания;

29. Выполнить в топочной систему отопления в соответствии с проектной документацией;

30. Устранить неисправность запорной арматуры в топочной;

31. Восстановить герметичность мест соединения труб системы водопровода в районе присоединения пожарного водопровода в топочной;

32. Устранить неисправность потолочного светильника справа от входа в топочной;

33. Восстановить отсутствующие участки общей длиной 8,6 м водосточного желоба кровли по периметру здания;

34. Восстановить отслоившийся штукатурный слой на торцах ступеней, подпорных стен на площади: 

- вход № 4 - 2,32 м2,

- вход № 3 - 1,75 м, -вход№2-3,05 м2,

- вход № 1 - 2,27 м2,

- пандус - 11,95 м2;

35. Устранить сколы и трещины плитки (размер плитки 300*300мм) на ступенях входных групп:

- вход №4 — 6 шт.,

- вход №3 — 4 шт.;

36. Установить указанное в проекте алюминиевое реечное потолочное покрытие вместо ARMSTRONG в сан. узлах;

37. Обеспечить функционирование системы пожаротушения в техническом помещении;

38. Заделать места входов инженерных коммуникаций в стены по периметру здания;

39. Смонтировать металлическую лестницу на чердак в читальном зале;

40. Установить 1/3 плитки на стене сан. узла (помещение № 16 лист 7 тома 3 340-16-АР) справа от входа над канализационной трубой.

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже, через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия.

Дата изготовления решения суда в полном объеме считается датой принятия решения.

Судья                                                                                                              Крылов А.Г.