6/2019-134056(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-12791/2019

г. Ярославль

07 ноября 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального учреждения  "Родной город" городского поселения Ростов (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Компсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о обязании устранить недостатки в выполненных работах по муниципальному  контракту № 1005023 от 17.07.2018 года.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Комсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения  суда в законную силу устранять недостатки в выполненных работах но  муниципальному контракту N 1005023 от 17.07.2018 года:  

Наименовани 

е 

гарантийного  

объекта 

Мероприятие устранения замечаний по дефектам элементов  существующей дороги и площадок  

Дворовая  

территория  

дома № 1  

Вывезти/убрать, расположенный за бортовым камнем проездов и  парковок асфальтобетонный лом, полученный при демонтаже.  Заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии проездов.  

Посадить, саженцы березы (5 шт) и кустов сирени (10 шт).  

Произвести обратную засыпку грунта с обратной стороны бордюра  до уровня верха бордюра  

Устранить многочисленные просадки на тротуаре в центральной  части дворовой территории (через детскую площадку), устранить  разрушение кромок тротуара.  

Вывести/убрать с территории детской площадки многочисленный  мусор в виде асфальтобетонного лома, щебня и .т.д.  

Обеспечить доступ к закатанному люку смотрового колодца  фекальной канализации в торце дома № 1, в соответствии с  ГОСТом  

Произвести обустройство отмостки в торце лома № 1  из асфальтобетона бетона.  

Дворовая  

территория  

дома № 5  

Вывезти убрать, расположенный за бортовым камнем проездов и  парковок асфальтобетонный лом, полученный при демонтаже.  

Заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии проездов.  

Произвести обратную засыпку грунта с обратной стороны бордюра  до уровня верха бордюра.  

Произвести устройство водоотводного лотка в месте образования  лужи (глубиной около 10 см.) на протяжении 30 м у первого  подъезда.  

За бортовым камнем проездов присутствуют отвалы грунта после  разработки основания под бортовой камень.  

Восстановить асфальтобетонное покрытие на парковке. 

Дворовая  

территория  

дома № 8  

Устранить перепад высот между уровнем тротуара и  существующем основанием.  

Вывезти за бортовым камнем проездов и парковок  присутствует асфальтобетонный лом, полученный при демонтаже  покрытий.  

Заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии проездов.  

Произвести обратную засыпку грунта с обратной стороны бордюра  до уровня верха бордюра.  

Восстановить просадку тротуара от дома № 8 к дому № 7 до  отметки земляного полотна.  

Устранить на асфальтобетонном покрытии проезда разрушения в  виде шелушения покрытия и выпадения зерен щебня.  

Убрать мусор (витки) после спила деревьев. 

Обработать все стыки сопряжения полос асфальтобетонного  покрытия.  

Дворовая  

территория  

дома № 3  

Вывезти/убрать, расположенный за бортовым камнем проездов и  парковок асфальтобетонный лом, полученный при демонтаже  покрытий.  

Заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии проездов.  

Произвести обратную засыпку грунта с обратной стороны бордюра  до уровня верха бордюра.  

Установить ранее существующий декоративный забор палисадника  после установки бортовых камней на прежнее место  

Устранить перепад высот между уровнем тротуара и  основанием (существующим), устранить разрушение кромки  тротуара  

Устранить просадку люка смотрового колодца ливневой  канализации относительно покрытия проезда  

Устранить нарушения геометрии (просадки) у тротуара за  пределами двора вдоль дома № 3.  

Устранить перепад высот между уровнем тротуара и  основанием (существующим).  

Устранить усадку обратной засыпки с обратной стороны бортового  камня.  

Устранить завышение люка смотрового колодца ливневой  канализации у дома № 9.  

Устранить разрушение стыков смежных полос асфальтобетонного  покрытия.  

Восстановить у дома № 9 (вход в магазин «Атрус»  поврежденное существующее а/б покрытие входной группы.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Компсервис" в доход  федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист  выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Танцева В.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.05.2019 10:21:47

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна