И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 г. Москва                                                                                      Дело № А40-107004/23-151-858

06.09.2023 года                                                                             

Резолютивная часть решения объявлена 16.08.2023

Решение в полном объеме изготовлено 06.09.2023

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ИНЖСТРОЙСИТИ» (ОГРН: 1155047013846)

к ответчику: ООО «МАГНУМ» (ОГРН: 1027708019130)

о взыскании 3 954 479,40 руб.

при участии

от истца: Смольская Е.А. по доверенности от 01.09.2022

от ответчика: представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №21/12/20 от 20.12.2020 в размере 3 900 650 руб. 42 коп., неустойку за период с 24.12.2022 по 10.05.2022 в размере 53 828 руб. 98 коп.    

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «ИнжСтройСити» (Истец, Подрядчик) и ООО «МАГНУМ» (Ответчик, Заказчик) 21 декабря 2020 года был заключён договор подряда № 21/12/20. (далее Договор подряда).

В соответствии с и. 2.1. Договора подряда Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство но выполнению монолитных работ (далее - Работ) на объекте: «Строительство бассейна для государственного профессионального образовательною учреждения «МУССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» Москомсиорта, расположенного но адресу: г. Москва ул. Лескова, д. 25А.

Перечень, объем и стоимость работ указаны в приложении № 1 к Договору подряда.

Согласно п. 3.1 Договора подряда договорная цена составляет 125 295 197.64 руб., окончательная цена формируется на основании подписанных КС-2, КС-3.

Срок работ (п.п. 5.1-5.2 Договора подряда) - начало работ 25.12.2020 г., окончание работ 30.08.2021.

Дополнительным соглашением №1 от 27.08.2021 г. к Договору подряда была изменена (уменьшена) цена договора подряда и по итогу составила 105 170 796, 39 руб., (п.2) и изменены сроки окончания работ до 30 декабря 2022 г. (п.3), а также подписана ведомость догов цепы (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1).

Все остальные условия Договор подряда оставлены без изменений.

По условиям договора подряда Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, (и. 5.4)

Согласно н. 4.1.1 - 4.1.2 Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 37 588571 руб. и 25 059 047 руб.

В соответствии с п. 4.1.3 подписанные Сторонами документы КС-2 и КС-3 служа сторонам для целей расчетов между Сторонами за выполненные за определенный период объемы работ.

Спортивный комплекс, в том числе бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения «МУССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» Москомсиорта, расположенного по адресу: г. Москва ул. Лескова, д. 25А, введен в эксплуатацию, открытие нового спортивного комплекса осуществлял мэр г. Москвы С. Собянин (информация с официального сайта мэра Москвы от 07.04.2023г. (https://www.mos.ru).

В ходе выполнения работ Истцом были выставлены Ответчику следующие счета на оплату: № 1 от 11.01.2021 г. (аванс) на сумму 37 588 571 руб. № 17 от 16.04.201 (аванс) на сумму 25 059047 руб. Счета за выполнение СМР но договору подряда - № 22 от 26.04.2021г., № 24 от 11.05.2021г., № 27 от 31.05.2021г., № 28 от 10.06.2021, № 29 от 29.06.2021г., № 31 от 16.07.2021г., № 33 от 27.07.2021г., № 38 от 11.08.2021г., № 42 от 18.08.2021г. (оплата материалов), № 46 от 20.08.2021г., № 52 от 15.09.2021 г., № 55 от 25.10.2021 г.

09.02.2021 года Ответчиком п/п № 919 на основании счета №1 от 11.01.2021 г. ошибочно была переведена частичная оплата авансового платежа в размере 10 000 000 руб, ООО «ИнжСтройСити» указанный авансовый платёж вернул как ошибочный но письму ООО «МАГНУМ» № 115 от 17.02.2021 г., что подтверждается п/п № 81 от 17.02.2021 на сумму 10 000 000 руб. (Приложение к иску п. 11).

ООО «МАГНУМ» авансовый платеж по счету №1 от 11.01.2021 г. оплатил полностью 16.02.2021 г., что подтверждается п/п 1152 от 15.02.2021 г. сумма платежа 37 588 571 руб.

Всего ООО «ИнжСтройСити» было выполнено, а ООО «МАГНУМ» принято без замечаний, фактически выполненных работ по Договору подряда на общую сумму 105 170 796, 39 руб., (без учета ошибочно перечисленного и возвращённого платежа в 10 000 000 руб.) что подтверждается следующими документами: Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 01.04.2021 г. за отчетный период с 25.12.20-01.04.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 01.04.2021 г. за отчетный период с 25.12.20-01.04.2021г. На общую сумму 2 895 407,24 руб. 2.   Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 2 от 26.04.2021 г. за отчетный период с 02.04.2021 г. -26.04.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 26.04.2021 г. за отчетный период с 02.04.2021 г. -26.04.2021г. На общую сумму 11 911 725,24 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 №3 от 26.05.2021 г. за отчетный период с 27.04.2021 г. -26.05.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 от 26.05.2021 г. за отчетный период с 27.04.2021 г. -26.05.2021г. На общую сумму 9 253 807,14 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 4 от 10.06.2021 г. за отчетный период с 27.05.2021 г. -10.06.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 10.06.2021 г. за отчетный период с 27.05.2021 г. - 10.06.2021г. На общую сумму 8 655393,44руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 №5 от 25.06.2021 г. за отчетный период с 11.06.2021 г.-25.06.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 5 от 25.06.2021 г. за отчетный период с 11.06.2021 г. -25.06.2021г. На общую сумму 6 709396,43 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 6 от 16.07.2021 г. за отчетный период с 26.06.2021 г.-16.07.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 6 от 16.07.2021 г. за отчетный период с 26.06.2021 г.-16.07.2021г. На общую сумму 12 582 610,54 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 7 от 27.07.2021 г. за отчетный период с 17.07.2021 г. -27.07.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3  № 7 от 27.07.2021 г. за отчетный период с 17.07.2021 г.-27.07.2021г. На общую сумму 2 961 334,58 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 8 от 09.08.2021 г. за отчетный период с 28.07.2021 г. -09.08.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 8 от 09.08.2021 г. за отчетный период с 28.07.2021 г.-09.08.2021г. На общую сумму 9 476 616,14 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 9 от 20.08.2021 г. за отчетный период с 10.08.2021 г. -20.08.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 9 от 20.08.2021 г. за отчетный период с 10.08.2021 г. -20.08.2021г. На общую сумму 9 360 693,30 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 10 от 13.09.2021 г. за отчетный период с 21.08.2021 г.-13.09.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 10 от 13.09.2021 г. за отчетный период с 21.08.2021 г. -13.09.2021г. На общую сумму 12 862 434,83 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 11 от 24.09.2021 г. за отчетный период с 14.09.2021 г. -24.09.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 11 от 24.09.2021 г. за отчетный период с 14.09.2021 г.-24.09.2021г. На общую сумму 5 275 330,19 руб. Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 12 от 25.10.2021 г. за отчетный период с 25.09.2021 г. -25.10.2021г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 12 от 25.10.2021 г. з отчетный период с 25.09.2021 г. -25.10.2021г. На общую сумму 12 785 819,40 руб.  Актом о приемки выполненных работ КС-2 № 13 от 09.12.2022 г. за отчетный период с 26.10.2021 г. -09.12.2022г. подписанный Заказчиком без замечаний. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 13 от 09.12.2022 г. за отчетный период с 26.10.2021 г. - 09.12.2022г.  На общую сумму 440 227, 92 руб.

Всоответствие с условиями Договора подряда «ст.4 Порядок расчетов», оплата фактически выполненных работ производится после подписания сторонами КС-2 и КС-3 в течение 10 рабочих дней (и.4.1.2).

Истцом и Ответчиком на период взаимных расчетов 2021 года был подписан акт сверки на 21.12.2021 г., согласно которому установлена сумма задолженности в пользу ООО «ИнжСтройСити».

За период 2022 года Истцом были полностью закончены подрядные работы, Ответчик частично погасил имеющуюся по Договору подряда задолженность. Срок оплаты по Договору подряда наступил.

Истец вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором ( п.5.4.).

09 декабря 2022г. Сторонами был подписан Акт приема-передачи результатов выполненных работ, согласно которому Ответчик признал, что качество выполненных работ соответствует условиям договора и проектной документации, а также признал, что в пользу ООО «ИнжСтройСити» подлежит выплата в размер 3 900 650 (три миллиона девятьсот тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 42 коп. за выполненные работы.

До настоящего времени Ответчик окончательную оплату за выполненные и сданные работы не произвел, сумму долга не погасил.

Сторонами был подписан Акт сверки расчетов на 31.12.2022 г., где сумма долга Ответчика составляет 3 900 650, 42 руб.

Задолженность ООО «МАГНУМ» в пользу ООО «ИнжСтройСити» за фактически выполненные работы по Договору подряда № 21/12/20 от 21.12.2020 г. составляет 3 900 650 (три миллиона девятьсот тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 42 коп.

07 сентября 2022 года между Обществом с ограниченной ответственностью «АльТа групп» (далее – Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «СК2505» (далее – Ответчик) заключен договор № 07/09-22 на оказание услуг по предоставлению строительной спецтехники (далее – Договор).

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330,  421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждает обоснованность требований истца о взыскании задолженности.

Рассмотрев расчет неустойки суд признает его методологически и арифметически верным. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 10, 12, 309, 310, 330,  421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «МАГНУМ» (ОГРН: 1027708019130) в пользу ООО «ИНЖСТРОЙСИТИ» (ОГРН: 1155047013846) задолженность в размере 3 900 000 руб., неустойку в размере 53 828 руб. 98 коп., а также расходы по оплате  госпошлины в размере 42 772 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 Судья             К.В. Вольская