АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru

http://krasnodar.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

арбитражного суда первой инстанции

дело №А32-13029/2019

г. Краснодар           «17» июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2019 года.

Решение суда в полном объеме изготовлено 17 июля 2019 года.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи О.П. Миргородской, при ведении протокола помощником судьи Гоовым Н.Ю., рассмотрев материалы производства по делу № А32-13029/2019

по исковому заявлению НКО «Фонд капитального ремонта МКД», (ИНН 

<

***>), г. Краснодар

к ООО «Петрокстим», (ИНН 

<

***>), г. Армавир

о взыскании штрафных санкций в размере 644 742 рублей 54 копеек.

при участии в судебном заседании:

от истца:  представитель по доверенности по доверенности ФИО1

от ответчика:  представитель не явился.

УСТАНОВИЛ:

НКО «Фонд капитального ремонта МКД» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ООО «Петрокстим» (далее – ответчик) о взыскании штрафных санкций в размере 644 742 рублей 54 копеек.

Судебное заседание проведено с перерывом в порядке статьи 163 АПК РФ с 11.07.2019 по 16.07.2019.

В судебное заседание явку представителя обеспечил только истец, ответчик, при этом, уведомлен надлежащим способом о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 АПК РФ.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца.

В судебном заседании истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 629 424 рублей 44 копеек.

Ходатайство судом было рассмотрено и удовлетворено, как основанное на положении статьи 49 АПК РФ.

Суд, заслушав представителя истца, изучив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В 2017 году между некоммерческой унитарной организацией «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ответчиком заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Краснодарском крае:

-договор № РТС223А171294(Д)/020ПД/17-КП54 от 03.11.2017 (далее - Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, в том числе, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, цена договора, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет 1 181 487 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят семь) рублей 73 копеек;

- договор № РТС223А171449(Д)/025ПД/17-КП54 от 17.11.2017г., по выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Горького, д. 1, -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Союзная, д. 76, -внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Фрунзе, д. 85, составляет 1 271 555 (один миллион двести семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 44 копейки.

-  договор № РТС223А171028(Д)/005ЦД/17- КП54 от 15.09.2017г., на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, цена договора, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет 11 885 304 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста четыре) рубля 56 копеек.

- договор № РТС223А170374(Д)/221ПД/17- КП90 от 22.05.2017г., на выполнение работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, цена договора, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет 313 238 (триста тринадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 14 копеек.

В соответствии с условиями заключенных договоров истец принимает на себя обязательство принять и оплатить ответчику выполненные им работы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, а ответчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с графиком выполнения работ и в установленные сроки.          

Согласно условиям договора, ответчик должен выполнить работы в течение определённого количества дней, в соответствии с п.4.2 Договоров и техническим заданием.

По договору № РТС223А171294Ш/020ПД/17-КП54 от 03.11.2017, согласно п. 4.3, срок начала выполнения работ: с момента подписания договора.

Согласно п. 4.4 договора, срок окончания выполнения работ по договору: не позднее 40 календарных дней со дня заключения договора, т.е. 12.12.2017.

Однако, в установленный договором срок обязательства по проведению капитального ремонта многоквартирного дома ответчиком не выполнены.

Работы выполнены и приняты заказчиком согласно комиссионных актов 04.04.2018, 18.04.2018.

Количество дней просрочки с 13.12.2017 по 17.04.2018 года составляет 126 календарных дней.

Истец исчислил неустойку на момент завершения работ, которая составила 83 022,23 рубля 23 копеек.

По договору № РТС223А171449(Д)/025ПД/17-КП54 от 17.11.2017, согласно п. 4.2., продолжительность производства работ по этапам на Объекте(-ах) определяется Графиком производства работ. Срок выполнения работ по настоящему Договору до 40 календарных дней со дня передачи площадки. Срок окончания работ на Объектах определен 31.12.2017.

Работы на объекте Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Союзная, д. 76, выполнены и приняты 26.12.2017.

Работы на объекте Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Фрунзе, д. 85, выполнены и приняты 09.04.2018.

Работы на объекте Краснодарский край,  Отрадненский район,  ст.  Отрадная,  ул. Горького, д. 1, выполнены и приняты 25.06.2018.

Таким образом, размер неустойки на момент выполнения работ составляет 105 110,02 (сто пять тысяч сто десять) рублей 02 копейки.

По договору № РТС223А171028ШУ005ПД/17-КП54 от 15.09.2017, согласно п. 4.3 договора, срок начала выполнения работ по договору: с момента подписания договора.

В соответствии с п. 4.4 договора, срок окончания выполнения работ по настоящему договору с учетом заключенных дополнительных соглашений определен 13.11.2017.

Работы выполнены и приняты заказчиком 16 ноября 2018 года.

Количество дней просрочки с 14.11.2017 по 16.11.2018 года составляет 367 календарных дней.

Истец исчислил неустойку на 19.11.2018, которая составила 425 208 рублей 62 копейки.

По договору № РТС223А170374ГДУ22ШД/17-КП90 от 22.05.2017

Окончание срока выполнения работ согласно п. 1.4.2 договора определен не позднее 45 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Объект передан Подрядчику 24.05.2017 на основании акта открытия объекта (акта передачи к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда). Срок окончания работ-07.07.2017.

Однако, в установленный договором срок обязательства по проведению капитального ремонта многоквартирного дома не выполнены.

Работы выполнены и приняты заказчиком согласно комиссионного акта 05.10.2017.

Количество дней просрочки по срокам выполнения работ на Объекте с 08.07.2017 по 04.10.2017 составляет 89 календарных дней.

Истец исчислил неустойку на момент завершения работ, которая составила 16 083 рубля 57 копеек.

Полагая, что работы выполнены с просрочкой, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ.

Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

При решении вопроса об обоснованности заявленных требований суд руководствуется следующим.

Договорные правоотношения сторон, по своей правовой природе относятся к договору подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. 

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Изучив условия договора, а также представленные в дело документы установил, что работы были выполнены с нарушением срока, установленного договорами.

Суд проверил расчет неустойки, выполненный истцом, и признал его верным.

Принимая во внимание ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по выполнению работ, подлежит применению предусмотренная договорами ответственность за неисполнение обязательства в размере 629 424 рублей 44 копеек.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 123, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Петрокстим», г. Армавир (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Краснодар (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере  629 424 рубля 44 копейки  и 15 588 рублей расходов по оплате госпошлины.

Возвратить Некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», г. Краснодар (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 307 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 1450 от 18.03.2019.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

СудьяО.П. Миргородская