1259/2020-192209(4) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 29 июля 2020 года 

по делу А33-19379/2019 Красноярск 

29 июля 2020 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Георг" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.10.2007, г. Красноярск) 

в течение 10 дней с момента выступления решения суда в законную силу устранить дефекты,  

обнаруженные в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Красноярск, 

ул. Александра Матросова, д. 4, выполнив следующие работы:  

1. Произвести отчистку лестничных клеток подъездов №№ 1-12, отчистку стеклопакетов  

и отливов от краски и штукатурки (в соответствии с актами проведения  

плановых/внеплановых мероприятий по осмотру жилого фонда от 18.10.2019, 15.11.2019);  

2. Восстановить водосточную воронку и закрепить ее к желобу водоотлива, которая  

расположена на стилобатной части здания, в районе организации «Красноярское ЦАВС»;  

3. Выполнить работы по восстановлению окрасочного слоя стен в подъезде № 12  

многоквартирного дома № 4 по ул. Александра Матросова в г. Красноярске: 

- окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных  

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% - 290,2 м2;  

4. Произвести отчистку от бетона придомовой территории многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: 

<

...>;  

5. Выполнить работы по оштукатуриванию откосов оконных блоков первого этажа со  

стороны двора (при условии демонтажа решеток): 

- ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону  

цементно-известковым раствором с земли и лесов - 5,6 м2; 

- огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  

простых с земли и лесов - 7 м2; 

- шпаклёвка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  

простых с земли и лесов - 7 м2; 

- окраска фасадов акриловыми составами с земли и лесов вручную по  

подготовленной поверхности -7 м2; 

6. Произвести удаление наплывов штукатурки на выступающие фрагменты цокольного  

этажа с последующей окраской очищенных мест; 7. Ремонт бетонных козырьков над входами в подъезды № 5-12; - разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 120,6 м2; 

- демонтаж выравнивающих стяжек толщиной до 30 мм - 120,6 м2;  - устройство выравнивающих стяжек толщиной до 30 мм - 120,6 м2;  

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковёр готовой  

эмульсией битумной - 120,6 м2; - устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя - 120,6 м2; 

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и  

парапетам высотой до 600 мм без фартуков - 44,8 м2; 

- очистка в ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых красок с земли и лесов88,17 м2;  

- огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  

простых с земли и лесов - 88,17 м2; 

- шпаклёвка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками  

простых с земли и лесов - 88,17 м2; 

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности вручную - 88,17 м2.  

8. Произвести установку оцинкованных отливов по первому этажу дворовой части  

фасада (при условии демонтажа решеток): - демонтаж отливов оконных - 3,46 м2; - монтаж отливов оконных - 3,46 м2; 9. Произвести установку: - аншлагов с наименованием улицы и нумерацией дома в количестве 2 штук; 

- информационных таблиц с указанием управляющей организации многоквартирного  

дома, указанием квартир и подъездов в количестве 12 штук. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Георг" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.10.2007, г. Красноярск) 

в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилищные  

системы Красноярска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 07.12.2007,  

г. Красноярск) 6 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

Судья О.С. Щёлокова