АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-12719/2024

11 февраля 2025 года

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2025 года. Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н. Арнгольд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 506 590 руб. 41 коп., 

в отсутствие в судебном заседании представителей сторон.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском к администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее по тексту - ответчик) о взыскании 506 590 руб. 41 коп., в том числе 181 479 руб. 41 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств по контракту от 12.04.2024 № 0380200000124001248, 121 797 руб. 64 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств по контракту от 12.04.2024 № 0380200000124001250, 203 313 руб. 36 коп. неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств по контракту от 12.04.2024 № 0380200000124001251.

Стороны в судебное заседание не направили своих представителей, будучи надлежащим образом извещёнными о времени и месте судебного разбирательства. 

В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие представителей сторон.

Исследовав представленные в дело доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.04.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт №0380200000124001248, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика своими силами выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Пушкина (протяженностью 381 м и шириной 6м), и своевременно сдать результаты работ заказчику,  а заказчик – принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1. контракта).

12.04.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт №03802000001240012550, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика своими силами выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Ленина (протяженностью 315 м и шириной 6м), и своевременно сдать результаты работ заказчику, а заказчик – принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1. контракта).

12.04.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт №0380200000124001251, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика своими силами выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Комсомольская (протяженностью 414 м и шириной 6м), и своевременно сдать результаты работ заказчику, а заказчик – принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1. контракта).

В соответствии с пунктом 1.2. контрактов срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25.07.2024. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

Цена контракта составила 2 868 003 руб. 56 коп. (пункт 2.1 контракта №0380200000124001248). 

Цена контракта составила 1 740 407 руб. 40 коп. (пункт 2.1 контракта №03802000001240012550). 

Цена контракта составила 3 0001 193 руб. 32 коп. (пункт 2.1 контракта №03802000001240012551). 

Оплата производится путём перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счёт подрядчика, указанный в настоящем контракте, безналичным путём в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного в электронной форме с использованием ЕИС, к такому документу прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью (пункт 2.7. контрактов).

Согласно пунктам 5.10, 5.11. контрактов в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Исполняя условия контрактов, истец выполнил работы по контракту №0380200000124001248 на сумму 2 843 996 руб. 06 коп., о чем сторонами подписан акт о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 1, по контракту № 03802000001240012550 на сумму 1 740 074 руб. 33 коп., о чем сторонами подписан акт о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 3, по контракту № 03802000001240012551 на сумму 2 979 874 руб. 09 коп., о чем сторонами подписан акт о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 2.

Платёжными поручениями от 07.08.2024 № 13365, от 27.11.2024 № 440430 ответчик оплатил работы по контракту № 0380200000124001248 на сумму 2 843 996 руб. 06 коп.

Платёжными поручениями от 07.08.2024 № 13363, от 27.11.2024 № 440431 ответчик оплатил работы по контракту № 0380200000124001250 на сумму 1 740 407 руб. 40 коп.

Платёжными поручениями от 07.08.2024 № 13364, от 27.11.2024 № 440933 ответчик оплатил работы по контракту № 0380200000124001250 на сумму 2 979 874 руб. 09 коп.

В связи с несвоевременной оплатой работ по контрактам, истец направил ответчику претензию от 28.11.2024 с требованием оплаты нестойки.

Неисполнение обязательств по оплате неустойки послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Оценив доводы искового заявления и представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

Заключённые между сторонами контракты по своей правовой природе являются договорами подряда, правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Между сторонами отсутствует спор по объёму и качеству выполненных подрядчиком работ. 

Истец выполнил работы по контракту № 0380200000124001248 на сумму 2 843 996 руб. 06 коп., что подтверждается актом о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 1, по контракту № 03802000001240012550 на сумму 1 740 074 руб. 33 коп., что подтверждается актом о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 3, по контракту №03802000001240012551 на сумму 2 979 874 руб. 09 коп., что подтверждается актом о приёмке выполненных работ от 26.07.2024 № 2.

Ответчик оплатил выполненные работы по контракту № 0380200000124001248 на сумму 2 843 996 руб. 06 коп., что подтверждается платёжными поручениями от 07.08.2024 №13365, от 27.11.2024 № 440430, по контракту № 0380200000124001250 на сумму 1 740 407 руб. 40 коп., что подтверждается платёжными поручениями от 07.08.2024 № 13363, от 27.11.2024 № 440431, по контракту № 0380200000124001250 на сумму 2 979 874 руб. 09 коп., что подтверждается платёжными поручениями от 07.08.2024 № 13364, от 27.11.2024 №440933.

Истцом заявлено требование о взыскании 181 479 руб. 41 коп. неустойки по контракту № 0380200000124001248 за период 09.08.2024 по 27.11.2024, 121 797 руб. 64 коп. неустойки по контракту № 0380200000124001250 за период 09.08.2024 по 27.11.2024, 203 313 руб. 36 коп. неустойки по контракту № 03802000001240012551 за период 09.08.2024 по 27.11.2024.

В силу части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Расчёт неустойки, представленный истцом, проверен судом и признан арифметически верным.

На основании вышеизложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию         506 590 руб. 41 коп. неустойки.  

Государственная пошлина по делу в сумме 30 330 руб. уплачена истцом при подаче иска платежным поручением от 17.12.2024 № 328. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 30 330 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 166 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить иск: 

взыскать с администрации Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 506 590 руб. 41 коп. неустойки, а также 30 330 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 17.12.2024 № 328.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба  подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья                                                                                                                                  Н.Ю. Ишь