1058/2023-224584(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-10798/2023

г. Хабаровск

14 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2023 года.  В полном объеме решение изготовлено 14 ноября 2023 года.  

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «Проект Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Озерное» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; адрес: 680042, 

<

...>)  

о взыскании 1 670 000 руб. 00 коп. при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 07.11.2023,  ФИО3 генеральный директор,  

от ответчика – не явились, 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Проект Дальний Восток» (далее –  истец, ООО «Проект Дальний Восток») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского  края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Озерное» (далее – ответчик,  ООО «Озерное») о взыскании 2 170 000 руб. 00 коп. долга по оплате оказанных услуг по  договору от 25.07.2021 № 05/2021-ПИР.  

Определением суда от 14.07.2023 исковое заявление принято, возбуждено  производство по делу № А73-10798/2023, назначено предварительное судебное заседание  на 25.09.2023 в 16 часов 40 минут.  

Определением от 25.09.2023 дело назначено к судебному разбирательству на  08.11.2023 на 15 часов 00 минут.  

Ответчик явку своего представителя в судебное не обеспечил, извещен о времени и  месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121, 123 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем  размещения сведений в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном  заседании в отсутствие не явившегося ответчика.  

В судебном заседании представитель истца в связи с частичной оплатой  ответчиком долга, на основании статьи 49 АПК РФ заявил об уменьшении размера  исковых требований до 1 670 000 руб. 00 коп.  

Уменьшение размера исковых требований судом принято к рассмотрению,  поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.  

Представители истца поддержали уточнённые исковые требования, в обоснование  привёл обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.  

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный суд  установил следующие обстоятельства.  

Между ООО «Озерное» (далее - заказчик) и ООО «Проект Дальний Восток» (далее  - исполнитель) заключён договор от 25.07.2021 № 05/2021-ПИР, по условиям которого  исполнитель обязался по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить  работы по разработке проектной документации, не требующей возведения объектов  капитального строительства (технический проект) «Опытно-промышленная отработка  месторождения «Озерное» подземным способом» (далее - работы) и сдать заказчику  результаты выполненных работ в два этапа.  

Работы первого этапа – подготовка проектной документации (пункт 1.2 договора).  

Работы второго этапа – разработка проектной документации (пункт 1.3 договора). 

Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ по  договору в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре (пункт 1.7 договора).  

Согласно пункту 2.1 договора, исполнитель обязуется приступить к выполнению  работы по договору в срок не позднее чем через 1 рабочий день после даты подписания  сторонами договора и передать заказчику результаты выполненных работ в срок не  позднее 5 календарных месяцев.  

Первый этап – 1 месяц с даты подписания настоящего договора (пункт 2.2  договора).  

Второй этап – 5 месяцев с даты подписания настоящего договора (пункт 2.3  договора).  

Пунктом 3.1 договора установлена стоимость работ по договору в размере  10 850 000 руб. 00 коп.  

Разделом 4 договора предусмотрен порядок и условия расчетов по договору. Заказчик обязуется произвести оплату по договору в следующем порядке: 

- Уплатить исполнителю денежные средства в виде аванса в размере 30% от общей  стоимости в размере 3 255 000 руб. 00 коп., в срок не позднее 3 банковских дней с даты  подписания сторонами настоящего договора;  

- Оплатить исполнителю в счет оплаты работ денежные средства в размере 20% от  общей стоимости в размере 2 170 000 руб. 00 коп., в течение 5 банковских дней с даты  приемки заказчиком результатов выполненных работ по договору 1-го этапа (с даты  подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ 1-го этапа);  

- Оплатить исполнителю в счет оплаты работ денежные средства в размере 20% от  общей стоимости в размере 2 170 000 руб. 00 коп., в течение 5 банковских дней с даты  приемки заказчиком результатов выполненных работ по договору 2-го этапа (с даты  подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору 2- го этапа);  

- Оплатить исполнителю в счет оплаты работ денежные средства 30% от общей  стоимости в размере 3 255 000 руб. 00 коп., в течение 5 банковских дней с даты приемки  заказчиком результатов выполненных работ по договору в целом (с даты подписания  сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору в целом).  

Как следует из материалов дела, на основании акта приемки-сдачи выполненных  работ от 20.01.2023 ООО «Проект Дальний Восток» был выполнен второй этап работ и  передан заказчику посредством электронной почты акт выполненных работ.  

Кроме того, посредством электронной почты ООО «Проект Дальний Восток»  также был передан ООО «Озерное» счет № 1 от 19.01.2023 на оплату выполненных работ  на сумму 2 170 000 руб. 00 коп.  

Поскольку ООО «Озерное» оплату выполненных ООО «Проект Дальний Восток»  работ не произвело в полном объеме, на стороне ответчика образовалась задолженность в  размере 1 670 000 руб. 00 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи  49 АПК РФ).  

ООО «Проект Дальний Восток» направило в адрес ООО «Озерное» претензии от  10.04.2023 № 10/2023 и 14.05.2023 № 12/2023 с требованием об оплате выполненных  работ  

ООО «Озерное» требования претензии оставило без ответа и удовлетворения.  

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Проект  Дальний Восток» в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.  

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришёл к  следующим выводам.  

Правоотношения сторон регулируются общими обязательственными нормами,  изложенными в первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ), и специальными нормами параграфа 4 главы 37 ГК РФ (Подряд на выполнение  проектных и изыскательских работ).  

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных  изыскательских работ подрядчик (проектировщик) обязуется по заданию заказчика  разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а  заказчик обязуется принять и оплатить их результат.  

В силу пункта 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных  и изыскательских работ подрядчик обязан:  

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на  проектирование и договором;  

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при  необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и  органами местного самоуправления;  

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты  изыскательских работ.  

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).  

Истцом представлены в материалы дела надлежащие доказательства выполнения  работ по договору от 25.07.2021 № 05/2021-ПИР и передачи результата работ ответчику.  

Факт приемки ООО «Озерное» выполненных работ по договору от 25.07.2021 №  05/2021-ПИР подтверждается актом приемки выполненных работ.  

Задолженность ООО «Озерное» перед ООО «Проект Дальний Восток» по оплате  выполненных работ по договору составляет 1 670 000 руб. 00 коп.  

Доказательства оплаты долга в указанном размере ответчик не представил,  возражения на иск не заявил, обстоятельства, изложенные в иске, не оспорил и не  опроверг.  

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона  в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не  вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований.  

При таких обстоятельствах, исковое требование ООО «Проект Дальний Восток» о  взыскании с ООО «Озерное» основного долга в размере 1 670 000 руб. 00 коп. подлежит  удовлетворению.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в  соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, учитывая, что истцом уплачена  государственная пошлина в размере 33 850 руб. 00 коп. (платежные поручения № 156 от  14.09.2023, № 37 от 05.07.2023).  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Озерное» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Проект Дальний Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг по  договору от 25.07.2021 № 05/2021-ПИР в размере 1 670 000 руб. 00 коп. и судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 850 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин