АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-29187/24

г. Уфа

24 января 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 26.12.2024

Полный текст решения изготовлен 24.01.2025

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кабировой Н.В., рассмотрев дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Нефтехимремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭлектроСетьИнвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени в размере 127 083 201 руб. 12 коп.

по встречному иску:

общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроСетьИнвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Нефтехимремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени за нарушение сроков оплаты по спецификациям № 29 от 21.06.2021г., № 74 от 30.09.2021г., № 86 от 15.11.2021г.. № 87 от 28.10.2021г., № 94 от 17.12.2021г., № 99 от 22.12.2021г., № 100 от 17.12.2021г., № 116 от 25.03.2022г. в размере 39 284, 44 евро, по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения суда, по спецификациям № 88 от 18.11.2021г., № 92-1 от 15.12.2021г., №97 от 07.12.2021г. в размере 4 816, 13 доллара США, по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения суда, по спецификациям № 67 от 28.10.2021г., 135 от 28.07.2022г., № 136 от 29.12.2022г., № 137 от 10.02.2023г. в размере 1 130 602,67 руб.

при участии в судебном заседании:

от ООО "Нефтехимремстрой" - ФИО1 по доверенности от 25.10.2024г. №245; ФИО2 по доверенности от 25.10.2024г. № 244; 

от ООО "ЭлектроСетьИнвест" по первоначальному иску – ФИО3 по доверенности от 04.10.2024г. № 23;

ООО «Нефтехимремстрой» (далее – ООО «НХРС», Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО «Электросетьинвест» (далее – ООО «ЭСИ», Ответчик) о взыскании пени в размере 127 083 201 руб. 12 коп.

ООО «ЭСИ» (далее – Истец по встречному иску) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан со встречным исковым заявлением к ООО «НХРС» (далее – Ответчик по встречному иску) о взыскании пени в размере 5 844 761 руб. 32 коп.

К судебному заседанию, назначенному на 23.12.2024г., от Истца поступили возражение на отзыв Ответчика, платежные поручения с отметкой об исполнении, пояснения, возражение на встречное исковое заявление.

От Ответчика поступили дополнение к отзыву с приложением, уточнение к встречному иску, контррасчет.

Согласно уточненному встречному исковому заявлению, требования увеличены до 11 080 014 руб. 66 коп.

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнение встречного искового заявления принято Арбитражным судом Республики Башкортостан.

Руководствуясь ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании 23.12.2024г. был объявлен перерыв до 26.12.2024г.,13-30 час.

После окончания перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

От ООО "ЭлектроСетьИнвест" поступило ходатайство об истребовании доказательств. Руководствуясь статьей 66 АПК РФ, исходя из фактических обстоятельств рассматриваемого спора, суд отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств.

В судебном заседании 26.12.2024г. Истец поддержал исковые требования, встречные исковые требования не признал, в случае взыскания неустойки просил применить положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Ответчик требования не признал по доводам, изложенным в отзыве, и дополнениях к нему, согласно которым Истец не доказал просрочку поставки, не представил доказательств зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка поставщика, сослался на недопустимость установления в договоре двойной ответственности за одно и тоже нарушение. Просил, в случае взыскания неустойки, применить положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 18.12.2020г. между обществом с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой (Покупатель) был заключен договор поставки №331-ЭСИ (далее – Договор поставки), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар) и относящиеся к нему документы. Количество поставляемого Товара, его номенклатура (ассортимент), цена Товара, требования к качеству, срок (период) поставки, порядок оплаты и иные условия поставки согласуются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору (далее - Спецификации), являющихся его неотъемлемыми частями. 

В соответствии с п. 2.1. Договора поставки, поставка Товара осуществляется отдельными партиями на условиях, установленных настоящим Договором, и в соответствии с согласованной на каждую партию Товара Спецификацией. 

В соответствии с п. 2.1. Договора поставки, Спецификации на каждую партию Товара должны содержать: количество и номенклатуру (ассортимент) подлежащего поставке Товара; срок (период) поставки Товара, порядок поставки Товара и вид транспортировки; цену за единицу Товара и общую сумму к оплате; порядок оплаты; гарантии; способ доставки; место доставки; ссылку на документ (ГОСТ, ТУ и др.), подтверждающий качество Товара; иные условия, согласованные Сторонами. Спецификации оформляются в письменном виде по форме, установленной Покупателем, за подписью уполномоченных представителей Сторон с проставлением печатей Сторон. Поставщик предоставляет документы, предусмотренные для данного вида Товара законодательством РФ и заводом изготовителем. 

В соответствии с п. 2.6. Договора поставки, обязательство по поставке считается исполненным Поставщиком с момента передачи товара, всех относящихся нему принадлежностей, подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД) и при наличии следующих документов: оригинала ТОРГ-12 (УПД); оригинала счет фактуры (УПД); документов, подтверждающих факт доставки (1-T, квитанция перевозчика, железнодорожная квитанция и иные документы, подтверждающие факт доставки товара); технической документации, паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации и иных документов, подтверждающих качество товара. 

В соответствии с п. 3.5. Договора поставки, Поставщик обязан не позднее даты поставки Товара в пункт назначения, передать Покупателю (Грузополучателю) все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет в надлежащем порядке осуществить приемку и/или эксплуатацию и/или монтаж и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или совершить иные действия в отношении Товара. В случае выявления отсутствия одного из относящихся к Товару документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить недостающие документы в согласованный Сторонами срок. Непредоставление относящихся к Товару документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае принятия Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием относящихся, документов право собственности на Товар не переходит к Покупателю. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю со дня представления всего пакета документов.

В соответствии с п.7.2 Договора поставки, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного Товара.

В соответствии с пунктом 7.5 Договора поставки, за просрочку оплаты Товара Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной оплаты.

В соответствии с пунктом 7.7. Договора поставки, в случае, если Товар не будет поставлен (полностью или частично), Поставщик уплатит Покупателю пени за период пользования авансом (предоплатой) 0,1% от суммы аванса (предоплаты) за каждый день до момента поставки Товара или возврата суммы неиспользованного аванса.

Сторонами подписаны следующие спецификации к Договору поставки:

1) № 4 от 02.03.2021 на сумму 67 320,00 евро;

2) № 27 от 27.05.2021 на сумму 134 448,00 евро;

3) № 29 от 21.06.2021 на сумму 21 300,00 евро;

4) № 52 от 16.07.2021 на сумму 58 806,00 евро;

5) № 63 от 11.08.2021 на сумму 7 110 600,00 руб.;

6) № 67 от 28.10.2021 на сумму 2 946 000,00 руб.;

7) № 72 от 23.09.2021 на сумму 20 040,00 евро;

8) № 74 от 30.09.2021 на сумму 1 466 232,00 евро;

9) № 86 от 15.11.2021 на сумму 852 114,00 евро;

10) № 87 от 28.10.2021 на сумму 1 092 675,60 евро;

11) № 88 от 18.11.2021 на сумму 782 244,00 долл. США;

12) № 92-1 от 15.12.2021 на сумму 32 730,00 долл. США;

13) № 93 от 15.11.2021 на сумму 835 740,00 евро;

14) № 94 от 17.12.2021 на сумму 187 867,12 евро;

15) № 97 от 07.12.2021 на сумму 54 840,00 долл. США;

16) № 99 от 22.12.2021 на сумму 702 988,54 евро;

17) № 100 от 17.12.2021 на сумму 1 722 856,40 евро;

18) № 101 от 17.12.2021 на сумму 166 161,60 евро;

19) № 116 от 25.03.2022 на сумму 24 365,52 евро;

20) № 135 от 28.07.2022 на сумму 6 624 794,40 руб.;

21) № 136 от 29.12.2022 на сумму 12 344 200,80 руб.;

22) № 137 от 10.02.2023 на сумму 1 385 328,00 руб.;

23) № 139 от 09.01.2023 на сумму 552 710,40 руб.; далее – Спецификации.

23.11.2023г. Общество «НХРС» направило претензию в адрес ООО «ЭСИ» № 01/327/1 об оплате пени в соответствии с п. 7.2, 7.7. Договора поставки в связи с неоднократным нарушением сроков поставки, установленных в спецификациях, которая была оставлена без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «НХРС» к ООО «ЭСИ» с исковым заявлением по настоящему делу в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Ответчик по первоначальному требованию обратился в суд с встречным иском (с учетом уточнения, в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ) о взыскании неустойки, предусмотренной п. 7.5 Договора поставки, за несвоевременную оплату в размере 11 080 014 руб. 66 коп. по Спецификациям № 4 от 02.03.2021г., № 27 от 27.05.2021г., № 29 от 21.06.2021г., № 74 от 30.09.2021г., № 86 от 15.11.2021г., № 87 от 28.10.2021г., № 93 от 15.11.2021г., № 94 от 17.12.2021 г., № 99 от 22.12.2021г., № 100 от 17.12.2021г., № 101 от 17.12.2021г., № 116 от 25.03.2022г., № 88 от 18.11.2021г., № 92-1 от 15.12.2021г., № 97 от 07.12.2021г., № 63 от 11.08.2021г., № 67 от 28.10.2021г., № 135 от 28.07.2022г., № 136 от 29.12.2022г., № 137 от 10.02.2023г.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает исковое заявление, встречное исковое заявление, подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

В соответствии со ст. 8 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом. 

В силу ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредставления доказательств. 

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса РФ).

 В соответствии с пунктами 1, 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» арбитражный суд, рассматривающий иск о взыскании, обязан проверить и установить обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, по собственной инициативе. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных правовых актах определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ). Поскольку исследуемый Договор поставки и Спецификации к нему содержат все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствуют требованиям закона о форме и содержании, подписаны сторонами, в процессе исполнения договора у сторон не возникало вопросов о его заключенности, оснований для критической оценки Договора поставки и подписанных Спецификаций у суда не имеется. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

На основании пункта 1 статьи 486 и пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом или договором и не вытекает из существа обязательства; покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

В силу пункта 1 статьи 457 Гражданского кодекса РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Проверив расчеты Истца по первоначальному требованию, Истца по встречному исковому заявлению, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания пени по п. 7.2, 7.5, 7.7. Договора поставки.

Вместе с тем, суд признает ошибочным расчет Истца по первоначальному иску в части определения количества дней просрочки поставки Товара, предусмотренного Спецификацией №72, поскольку Истцом не учтено, что согласно п. 4 Спецификации № 72, срок поставки исключает праздничные дни.

Кроме того, в отношении расчета по п. 7.7 Договора поставки по Спецификации № 74 Истцом указана сумма аванса 733 116,00 евро, тогда как с учетом п. 3.1. Дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2021г. к Спецификации № 74 сумма аванса составила 146 623,20 евро.

В соответствии с п. 2.6. Договора поставки, обязательство по поставке считается исполненным Поставщиком с момента передачи товара, всех относящихся нему принадлежностей, подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД) и при наличии следующих документов: оригинала ТОРГ-12 (УПД); оригинала счет фактуры (УПД); документов, подтверждающих факт доставки (1-T, квитанция перевозчика, железнодорожная квитанция и иные документы, подтверждающие факт доставки товара); технической документации, паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации и иных документов, подтверждающих качество товара.

Таким образом, стороны установили в договоре момент, когда обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными в полном объеме, а именно с момента подписания товарной накладной, при наличии счета-фактуры (УПД), технической документации и иных документов, подтверждающих качество Товара. В отсутствии товарной накладной и акта приема-передачи технической документации, обязательство Поставщика не считается исполненным, у покупателя отсутствуют основания для оплаты поставленного Товара, а у Поставщика соответственно не возникает право требования оплаты.

Следовательно, верным по п. 7.2., 7.7. Договора поставки будет являться расчет пени до момента предоставления Ответчиком всей необходимой технической документации Истцу и подписания между сторонами товарной накладной. 

Вместе с тем, расчет Истца в части исчисления пени в соответствии с п.7.2. и 7.7. Договора поставки произведен на дату подписания товарной накладной без учета подписания акта приема-передачи технической документации.

Исходя из того, что такой расчет не нарушает законных прав Ответчика, в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело исходя из заявленного предмета и основания иска и не вправе самостоятельно выходить за пределы заявленных требований, суд расчет Истца признается арифметически верным.

Суд также не находит оснований для расчета просрочки по п.7.5. Договора поставки в отношении оплаты, предусмотренной по факту готовности Товара к отгрузке, а также расчета начисления пени с момента окончания срока для выборки Товара в связи со следующим. 

По своей правовой природе оплата, предусмотренная по факту готовности Товара к отгрузке, является авансовым платежом.

Исходя из правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570, от 15.08.2016 № 305-ЭС16-4576, от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570, от 29.08.2019 № 304-ЭС19-7209, начисление неустойки на сумму не выплаченного в срок аванса по общему правилу запрещено, если иное не установлено законом или явно выражено в соглашении сторон, тогда как п. 7.5. Договора поставки предусмотрена пеня за просрочку оплаты Товара, а не за просрочку предварительной оплаты.

Доводы Ответчика со ссылкой на положения ст.515 Гражданского кодекса РФ, о том, что обязательство по поставке является выполненным с момента отправки уведомления о готовности товара к отгрузке и окончания срока для выборки Товара суд признает несостоятельными с силу следующего.

Во встречном исковом заявлении Общество «ЭСИ» исчисляет пени за просрочку оплаты (п.7.5. Договора поставки) в отношении окончательного расчета за поставку (п.3.3. Спецификаций) с даты окончания срока для выборки Товара Покупателем по Спецификациям №52 от 16.07.2021г., №93 от 15.11.2021г.

В отзыве на исковое заявлении Ответчик оспаривает расчет Истца, поскольку Истец считает неустойку до даты подписания товарной накладной, а Ответчик полагает, что неустойку необходимо начислять с даты направления уведомления о готовности товара к отгрузке и окончания срока для выборки Товара Покупателем.

Между тем, как следует из Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» в соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 Гражданского кодекса РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. 

Применяя названные положения, судам следует учитывать, что норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило.

Следовательно, стороны вправе самостоятельно установить в договоре момент, когда обязательства поставщика по поставке считаются исполненными надлежащим образом.

Кроме того, ст.515 Гражданского кодекса РФ не подлежит применению в настоящем споре, поскольку распространяет свое действие только на случаи, когда выборка товаров покупателем происходит в месте нахождения поставщика. В настоящем споре выборка товаров производится не по месту нахождения Поставщика, а на производственном объекте, принадлежащем Покупателю, куда Поставщик поставляет Товар.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство об истребовании из МИФНС России № 22 по Московской области сданные ООО «НХРС» расчеты страховых взносов за 3,4 кварталы 2021г, 1,2,3,4 кварталы 2022г., 1,2 кварталы 2023г. 

В обоснование указанного ходатайства Обществом «ЭСИ» указано, что уведомления о готовности товара к отгрузке отправлялись на электронную почту сотрудников ООО «НХРС», в подтверждение своего довода Ответчик отмечает, что информацию о том, что указанные лица являлись работниками Истца, можно получить из налогового органа. 

Кроме того, в указанном ходатайстве Ответчик просит истребовать в Управлении Росреестра по Республике Башкортостан выписки в отношении земельного участка с кадастровым номером 02:59:050204:16 с указанием собственника, зарегистрированных обременений в период с 2021-2023гг. и копий зарегистрированных договоров аренды за период 2021-2023гг.

Ответчик указывает, что указанные документы опровергнут довод Истца о том, что склад ООО «НХРС» находился на удалении от склада ООО «ЭСИ».

Поскольку в соответствии с п. 2.6 Договора поставка считается исполненной Поставщиком с момента передачи товара, всех относящихся нему принадлежностей, подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД) и при наличии следующих документов: оригинала ТОРГ-12 (УПД); оригинала счет фактуры (УПД); документов, подтверждающих факт доставки (1-T, квитанция перевозчика, железнодорожная квитанция и иные документы, подтверждающие факт доставки товара); технической документации, паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации и иных документов, подтверждающих качество товара, указанные доказательства не будут иметь правового значения. 

Кроме того, Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с п. 10.10 Договора поставки документ, а также любое сообщение по настоящему Договору считается доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании электронной почты – дата и время, указанные в отчете о доставке электронного документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по электронной связи подтвердила получение документа.

Ответчиком не представлено подтверждение получения документов принимающей стороной, доказательств принадлежности электронных адресов передающей и принимающей стороне, с учетом отсутствия в Договоре поставки адреса электронной почты Покупателя.

Кроме того, в Договоре поставки в качестве официального адреса ООО «ЭСИ» указаны info@group-esi.ru, при этом представленные Ответчиком снимки страницы были отправлены с иных адресов электронной почты.

По поводу истребования из Управлении Росреестра по Республике Башкортостан выписки в отношении земельного участка с кадастровым номером 02:59:050204:16 с указанием собственника, зарегистрированных обременений в период с 2021-2023гг. и копий зарегистрированных договоров аренды за период 2021-2023гг. суд приходит к следующему.

Согласно представленным в материалы дела Договорам субаренды № 54зем/Н от 01.04.2021г., №20-А/22(Н) Арендатор (ООО «НХРС») обязуется предоставить Субарендатору (ООО «ЭСИ») за плату во временное владение и пользование часть территории земельного участка с кадастровым номером 02:59:050204:16 площадью 400 кв.м. с оказанием услуг по погрузочно-разгрузочным работам. В приложении № 1 к Договорам субаренды указана схема размещения открытой площадки. 

Согласно вышеназванным Договорам субаренды, участок предоставлен во владение и пользование, территория является открытой. Доказательств того, что земельный участок использовался Ответчиком для складирования и хранения оборудования, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суду предоставлено не было.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд вправе истребовать доказательство от лица, у которого оно находится, по ходатайству лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить это доказательство. При этом суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, и вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства. 

Решение вопроса о необходимости удовлетворения ходатайства участвующего в деле лица об истребовании доказательств осуществляется арбитражным судом в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств, что является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.10.2020 N 2481-О). 

Кроме того, в материалы дела представлены уведомления о готовности товара к отгрузке № 88 от 18.11.2021г. ,№ 92-1 от 15.12.2021г. , № 92-1 от 15.12.2021г. , № 97 от 07.12.2021г., № 4 от 02.03.2021г., № 27 от 27.05.2021г., № 52 от 16.07.2021г., № 86 от 15.11.2021г., № 94 от 17.12.2021г., № 99 от 22.12.2021г., № 100 от 17.12.2021г., № 101 от 17.12.2021г., № 116 от 25.03.2022г., № 135 от 28.07.2022г., № 139 от 09.01.2023 г., в которых указывается, что информация о водителе, транспортном средстве, ттн, и пр., будет направлена дополнительно.

Указание на водителей, транспортное средство и товарно-транспортную накладную подразумевает, что поставляемый Товар будет доставлен Истцу, что исключает применение ст.515 Гражданского кодекса РФ. 

При таких обстоятельствах, заявленное ходатайство не подлежит удовлетворению.

Довод Ответчика о том, что Истец не предоставил выписки банка плательщика о зачислении денежных средств на корреспондентский счет Покупателя несостоятелен ввиду того, что Истцом в материалы дела представлены заверенные банком платежные поручения с отметкой об исполнении.

Поскольку относительно расчетов пени по п. 7.5 Договора поставки с момента подписания товарной накладной Обществом «НХРС» не заявлено возражений, контррасчет не представлен, руководствуясь с ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, суд признает верным расчет Ответчика в части исчисления встречных исковых требований с даты подписания Сторонами товарной накладной.

Учитывая изложенное выше, периоды просрочки по оплате Товара и по Поставке указанного товара надлежит исчислять следующим образом:

1. 02.03.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №4 к Договору поставки (далее – Спецификация №4).

В соответствии с п. 2 Спецификации №4 общая сумма Товара с НДС составляет 67 320,00 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №4 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 33 660,00 евро. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №4 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 26 928,00 евро. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации № 4, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 6 732,00 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

В соответствии с п.3.4 Спецификации № 4 оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляется в российских рублях.

В соответствии с п. 4 Спецификации №4 срок поставки: в течение 5-7 месяцев с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты.

26.04.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 15494 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 3 045 139 (Три миллиона сорок пять тысяч сто тридцать девять рублей) руб. 42 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 26.11.2021г.

21.12.2021г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 147 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №4, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 24 дня (с 26.11.2021г. по 20.12.2021г.). 

2. 27.05.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №27 (39-1) к Договору поставки (далее – Спецификация №27).

В соответствии с п. 2 Спецификации №27 общая сумма Товара с НДС составляет 134 448,00 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №27 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 67 224,00 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №27 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 53 779,20 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации №27, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 13 444,80 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

В соответствии с п.3.4 Спецификации № 27 оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляется в российских рублях.

В соответствии с п. 4 Спецификации №27 срок поставки 14-18 рабочих недель с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты.

18.10.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 34838 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 5 561 280 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят) руб. 18 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 22.02.2022г.

12.04.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 29 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №27, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 38 дней (с 22.02.2022г. по 01.04.2022г.). 

3. 21.06.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №29 к Договору поставки (далее – Спецификация №29).

В соответствии с п. 2 Спецификации №29 общая сумма Товара с НДС составляет 21 300,00 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №29 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 10 650,00 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №29 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 8 520,00 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации №29, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 2 130,00 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

В соответствии с п.3.4 Спецификации № 29 оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляется в российских рублях.

В соответствии с п. 4 Спецификации №29 срок поставки: в течение 105 календарных дней с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты.

06.07.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 22403 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 926 839 руб. (Девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать девять) руб. 68 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 19.10.2021г.

12.11.2021г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 132 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №29, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 22 дня (с 20.10.2021г. по 11.11.2021г.). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №29 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 12.12.2021г., оплата произведена 17.12.2021г. платежным поручением № 42268. Просрочка оплаты составила 5 дней.

4. 16.07.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №52 к Договору поставки (далее – Спецификация №52).

В соответствии с п. 2 Спецификации №52 общая сумма Товара с НДС составляет 58 806,00 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №52 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 29 403,00 евро. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №52 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 23 522,40 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации № 52, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 5 880,60 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

В соответствии с п.3.4 Спецификации № 52 оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляется в российских рублях.

В соответствии с п. 4 Спецификации №52 срок поставки 84 календарных дня с момента поступления авансового платежа в размере 50%.

27.07.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 25922 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 2 567 384 руб. (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 69 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло19.10.2021г.

11.01.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 4 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №52, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 82 дня (с 20.10.2021г. по 10.01.2022). 

5. 11.08.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №63 к Договору поставки (далее – Спецификация №63).

В соответствии с п. 2 Спецификации №63 общая сумма Товара с НДС составляет 7 110 600,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №63 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 4 977 420,00 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №63 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 1 442 120,00 руб. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации № 63, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 711 060,00 руб. (с НДС) производится по факту поставки Товара и подписания Сторонами Акта приема-передачи технической документации в течение 20 (Двадцати) календарных дней.

В соответствии с п. 4 Спецификации № 63 срок поставки 210 календарных дней с момента осуществления Покупателем предоплаты.

30.08.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 29910 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 2 133 180 (Два миллиона сто тридцать три тысячи сто восемьдесят) руб. 00 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 28.03.2022г.

02.06.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 38 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией № 63, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 3 дня (с 29.03.2022г. по 01.04.2022г.). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №63 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 22.06.2022г., оплата произведена 20.07.2022г. платежным поручением № 63325. Просрочка составила 28 дней.

6. 28.10.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №67 к Договору поставки (далее – Спецификация №67).

В соответствии с п. 2 Спецификации №67 общая сумма Товара с НДС составляет 2 946 000,00 руб. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №67 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 1 473 000,00 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №67 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 1 178 400,00 руб. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 294 600,00 руб. (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

В соответствии с п. 4 Спецификации №67 срок поставки 120 календарных дней с момента подписания спецификации уполномоченными представителями Сторон и оплаты Покупателем аванса в размере 50%.

15.11.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 38703 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 1 473 000 (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи) руб., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 15.03.2022г.

05.09.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 79 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №67, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 16 дней (с 15.03.2022г. по 01.04.2022г.). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №67 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 06.10.2022г., оплата произведена 08.02.2023г. платежным поручением № 42268. Просрочка составила 125 дней.

7. 23.09.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №72 к Договору поставки (далее – Спецификация №72)

В соответствии с п. 2 Спецификации №72 общая сумма Товара с НДС составляет 20 040,00 евро. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №72 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 10 020,00 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №72 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 8 016,00 (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации № 72, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 2 004,00 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара и подписания Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями Сторон. 

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт.  

В соответствии с п.3.4 Спецификации № 72 оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Товарная накладная и счет-фактура оформляется в российских рублях.

В соответствии с п. 4 Спецификации №72 срок поставки 110 календарных дней, исключая праздничные дни, с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты согласно п. 3.1 спецификации.

19.10.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 35418 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 826 241руб. (Восемьсот двадцать шесть тысяч двести сорок один) руб. 18 коп., в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 06.02.2022г.

16.03.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 13 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №72, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара, по мнению Истца, составила 36 дней (с 07.02.2022г. по 15.03.2022г.). 

Вместе с тем, Истцом не учтено, что согласно п. 4 Спецификации № 72 срок поставки исключает праздничные дни, таким образом, просрочка оплаты составила 25 дней.

8. 30.09.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №74 к Договору поставки (далее – Спецификация №74).

В соответствии с п. 2 Спецификации №74 общая сумма Товара с НДС составляет 1 466 232,00 евро. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №74 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 733 116,00 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №74 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 586 492,80 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 146 623,20 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара и подписания полномочными представителями Сторон Акта приема-передачи технической документации и получения счета-фактуры в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 30.09.2021г. к Спецификации № 74 Стороны внесли изменения в п.п. 3.1, 3.2 Спецификации.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 Покупатель производит предварительную оплату в размере 10% от общей суммы, указанной в п. 2 спецификации, что составляет 146 623,20 евро (с НДС), в течение 14 банковских дней после подписания Спецификации.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 Покупатель производит предварительную оплату в размере 80% от общей суммы, указанной в п. 2 Спецификации, что составляет 1 172 985,60 евро (с НДС) по факту готовности Товара к отгрузке в течение 14 банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.  

В соответствии с п. 4 Спецификации №74 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2021) срок поставки: в течение 18 (восемнадцати) недель с момента осуществления Покупателем 10% предоплаты согласно п.3.1. Спецификации №74. 

06.10.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 33688 был перечислен 10% аванс за поставку оборудования в размере 12 341 611 (Двенадцать миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот одиннадцать) руб. 98 коп. в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 09.02.2022г.

17.02.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 10 по форме ТОРГ-12, а также 01.07.2022г. подписана товарная накладная № 50 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которыми Товар, предусмотренный Спецификацией №74, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 48 дней (с 10.02.2022г. по 31.03.2022). 

Вместе с тем, Истцом при расчете исковых требований, неверно указана сумма аванса. Истец начисляет пени на сумму аванса в размере 733 116,00 евро, тогда как сумма аванса, перечисленная платежным поручением № 33688 от 06.10.2021г. составила 146 623,20 евро.

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №74 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 10.08.2022г., оплата произведена 16.12.2022г. в сумме 4 791 663,04 руб., 07.02.2023г. в сумме 1 718 229,87 руб., 09.02.2023 в сумме 9 295 969,70. Просрочка составила по сумме 213 590,50 евро с 11.08.2022г. по 16.12.2022г. – 127 дней, по сумме 143 585,05 евро с 17.12.2022г. по 07.02.2023г. – 53 дня, по сумме 120 987,08 евро с 08.02.2023г. по 09.02.2023г. – 2 дня.

9. 15.11.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №86 к Договору поставки (далее – Спецификация №86).

В соответствии с п. 2 Спецификации №86 общая сумма Товара с НДС составляет 852 114,00 евро. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №86 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 426 057,00 евро (с НДС) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №86 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 340 845,60 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 85 211,40 (с НДС) производится по факту поставки Товара и Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями сторон в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №86 срок поставки до 30.09.2022. 

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 30.09.2022г.

09.02.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 122 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №86, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 68 дней (с 01.10.2022г. по 08.12.2022). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №86 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 17.01.2023г., оплата произведена 07.02.2023г. платежным поручением № 78695. Просрочка составила 21 день.

10. 28.10.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №87 к Договору поставки (далее – Спецификация №87)

В соответствии с п. 2 Спецификации №87 общая сумма Товара с НДС составляет 182 112,60 евро 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №87 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 546 337,80 евро (с НДС) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №87 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 437 070 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 109 267,56 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, предоставления относящихся к Товару документов в соответствии с разделом 3 Договора поставки, после получения Покупателем Счета-фактуры, оформленного надлежащим образом, и подписания сторонами Акта приемки- передачи технической документации. 

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №87 срок поставки 231 (Двести тридцать один) календарный день с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты. 

03.11.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 37815 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 45 322 927,31 руб. (Сорок пять миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот двадцать семь рублей тридцать одна копейка), в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 22.06.2022г.

22.01.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 1 по форме ТОРГ-12, а также 01.07.2022г. подписана товарная накладная № 50 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которыми Товар, предусмотренный Спецификацией №87, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 111 дней (с 23.06.2022г. по 19.01.2023). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №87 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 28.06.2023г., оплата произведена 02.10.2023г. платежным поручением № 94545. Просрочка составила 96 день.

11. 18.11.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №88 к Договору поставки (далее – Спецификация №88).

В соответствии с п. 2 Спецификации №88 общая сумма Товара с НДС составляет 782 244 долларов США 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №88 Покупатель производит предварительную оплату в размере 10% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 391 122 долларов США (с НДС) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №88 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 312 897,60 долларов США (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 62 579,52 долларов США (с НДС) производится в течение 21 (двадцати одного) банковского дня по факту поставки Товара, получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом, подписания Сторонами Акта приемки-передачи технической документации. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №88 срок поставки 224 (двести двадцать четыре) календарных дня с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты согласно п.3.1. Спецификации №88. 

07.12.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 40738 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 28 813 723,07 руб. (Двадцать восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать три рубля семь копеек), в т.ч НДС.

31.10.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 109 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №88, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 28 дней (с 02.10.2022г. по 30.10.2022). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №88 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 01.12.2022г. по товарной накладной № 109 от 31.10.2022г., и 22.12.2022г. по товарной накладной № 116 от 21.11.2022г., оплата произведена по товарной накладной № 109 по платежному поручению № 78689 от 07.02.2023г. и по товарной накладной № 116 по платежному поручению № 78696 от 07.02.2023г. Просрочка оплаты составила 68 дней по товарной накладной № 109, 47 дней по товарной накладной № 116.

12. 15.12.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №92-1 к Договору поставки (далее – Спецификация №92-1).

В соответствии с п. 2 Спецификации №92-1 общая сумма Товара с НДС составляет 32 730 долларов США 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №92-1 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 16 365 долларов США (с НДС) в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №92-1 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 13 092 доллара США (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 3 273 долларов США (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения счета-фактуры, оформленного надлежащим образом и подписания полномочными представителями Сторон Акта приема-передачи технической документации в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №92-1 срок поставки 98-135 календарных дней (без учета праздничных и выходных дней) с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты согласно п.3.1. Спецификации №92-1. 

29.12.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 43146 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 1202760,40 руб. (Один миллион двести две тысячи семьсот шестьдесят рублей сорок копеек), в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 25.07.2022г.

31.10.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписаны товарные накладные № 112 №107 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которыми Товар, предусмотренный Спецификацией №92-1, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 29 дней (с 26.07.2022г. по 30.10.2022). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №92-1 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 01.12.2022., оплата произведена 07.02.2023г. платежными поручениями № 78690, 78691. Просрочка составила 69 день.

13. 15.11.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №93 к Договору поставки (далее – Спецификация №93)

В соответствии с п. 2 Спецификации №93 общая сумма Товара с НДС составляет 835 740 евро 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №93 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 417 870 евро (с НДС) в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №93 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 334 296 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 83 574 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, предоставления относящихся к Товару документов, получения Покупателем Счета-фактуры, подписания Сторонами Акта приема-передачи технической документации в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №93 срок поставки 22 (Двадцать две) недели с момента подписания Спецификации уполномоченными представителями Сторон и осуществления Покупателем 50% предоплаты согласно п.3.1. Спецификации №93. 

06.12.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 40698 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 34 783 749,52 руб. (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок девять рублей пятьдесят две копейки), в т.ч НДС.

18.03.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 16 по форме ТОРГ-12, 22.07.2022г. подписана товарная накладная № 54 по форме ТОРГ-12, а также 30.12.2022г. подписана товарная накладная № 127 по форме ТОРГ-12 в соответствии с которыми Товар, предусмотренный Спецификацией №93, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 88 дней (с 02.10.2022г. по 29.12.2022). 

14. 17.12.2021 г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №94 к Договору поставки (далее – Спецификация №94).

В соответствии с п. 2 Спецификации №94 общая сумма Товара с НДС составляет 187 867,12 евро 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №94 Покупатель производит предварительную оплату в размере 70% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 131 506,98 евро (с НДС) в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания настоящей спецификации поступления счета на оплату от Поставщика.

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №94 Покупатель производит оплату в размере 20% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 37 573,43 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 18 786,71 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения надлежаще оформленного счета-фактуры и подписания Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями Сторон в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет ее, в случае отсутствия замечаний подписывает указанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №94 срок поставки 170 (сто семьдесят) календарных дней с момента осуществления Покупателем 10% предоплаты согласно п.3.1. Спецификации №94. 

29.12.2021 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 43174 был перечислен 10% аванс за поставку оборудования в размере 10 943 931,97 руб. (Десять миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать один рубль девяносто семь копеек), в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 17.06.2022.

09.12.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 123 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №94, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 68 дней (с 18.06.2022г. по 08.12.2022г.). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №94 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара. 

Срок окончательного расчета истек 17.01.2023г., оплата произведена 07.02.2023г. платежными поручениями № 78627, 78628. Просрочка составила 21 день.

15. 07.12.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №97 к Договору поставки (далее – Спецификация №97).

В соответствии с п. 2 Спецификации №97 общая сумма Товара с НДС составляет 54 840, 00 долларов США.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №97 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 27 420, 00 долларов США (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №97 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 21 936,00 долларов США (с НДС) по факту готовности Товара к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 5 484, 00 долларов США (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения счета-фактуры, оформленного надлежащим образом, и подписания Акта приема-передачи технической документации (по форме Приложения №1 к спецификации) полномочными представителями Сторон в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №97 срок поставки в течение 175 (ста семидесяти пяти) календарных дней с момента подписания спецификации уполномоченными представителями Сторон и оплаты аванса в размере 50% согласно п. 3.1 спецификации.

27.12.2021г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 42680 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 2 006 831, 41 руб. (Два миллиона шесть тысяч восемьсот тридцать один рубль 41 копейка) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 30.11.2022г.

15.02.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 5 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №97, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 76 дней (с 01.12.2022г. по 14.02.2023г.).

16. 22.12.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №99 к Договору поставки (далее – Спецификация №99).

В соответствии с п. 2 Спецификации №99 общая сумма Товара с НДС составляет 702 988, 54 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №99 Покупатель производит предварительную оплату в размере 76% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 534 271, 28 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №99 Покупатель производит оплату в размере 14% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 98 418, 40 евро (с НДС) по факту готовности Товара к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 70 298, 86 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения счета-фактуры, оформленного надлежащим образом, и подписания Акта приема-передачи технической документации (приложение №2 к настоящей спецификации) полномочными представителями Сторон в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №99 срок поставки в течение 170 (ста семидесяти) календарных дней с момента осуществления Покупателем первого авансового платежа согласно п. 3.1 Спецификации.

29.12.2021г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 43185 был перечислен 76% аванс за поставку оборудования в размере 44 461 735, 36 руб. (Сорок четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 36 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 17.06.2022г.

13.10.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 103 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №99, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 11 дней (с 02.10.2022г. по 12.10.2022г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №99 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 24.11.2022г., оплата произведена 07.02.2023г. платежными поручениями № 78611,78617. Просрочка составила 75 дней.

17. 17.12.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №100 к Договору поставки (далее – Спецификация №100).

В соответствии с п. 2 Спецификации №100 общая сумма Товара с НДС составляет 1 722 856, 40 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №100 Покупатель производит предварительную оплату в размере 70% от общей суммы Товара, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 1 205 999, 48 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №100 Покупатель производит оплату в размере 20% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 344 571, 28 евро (с НДС) по факту готовности Товара к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 172 285, 64 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения надлежаще оформленного счета-фактуры и подписания Акта приема-передачи технической документации (приложение №2 к настоящей спецификации) полномочными представителями Сторон в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №100 срок поставки до 15.09.2022г.

29.12.2021г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 43172 был перечислен 70% аванс за поставку оборудования в размере 100 362 553, 13 руб. (Сто миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 13 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 15.06.2022г.

09.12.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 124 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №100, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 68 дней (с 02.10.2022г. по 08.12.2022г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №100 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 16.01.2023г., оплата произведена 07.02.2023г. платежными поручениями № 78618,78625. Просрочка составила 21 день.

18. 17.12.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №101 к Договору поставки (далее – Спецификация №101).

В соответствии с п. 2 Спецификации №101 общая сумма Товара с НДС составляет 166 161, 60 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №101 Покупатель производит предварительную оплату в размере 70% от общей суммы Товара, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 116 313, 12 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №101 Покупатель производит оплату в размере 20% от общей суммы Товара, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 33 232, 32 евро (с НДС) по факту готовности Товара к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы Товара, указанной в пункте 2 спецификации, что составляет 16 616, 16 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара, получения надлежаще оформленного счета-фактуры и подписания Акта приема-передачи технической документации (приложение №2 к настоящей спецификации) полномочными представителями Сторон в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №101 срок поставки в течение 100 (Сто) календарных дней с момента осуществления Покупателем первого авансового платежа согласно п. 3.1 Спецификации

29.12.2021г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 43173 был перечислен 70% аванс за поставку оборудования в размере 9 679 508, 06 руб. (Девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь рублей 06 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 08.04.2022г.

09.12.2022г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 121 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №101, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 69 дней (с 02.10.2022г. по 08.12.2022г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №101 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 17.01.2023г., оплата произведена 07.02.2023г. платежным поручением № 78626. Просрочка составила 20 дней.

19. 25.03.2022г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №116 к Договору поставки (далее – Спецификация №116).

В соответствии с п. 2 Спецификации №116 общая сумма Товара с НДС составляет 24 365, 52 евро.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №116 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы Товара, указанной в спецификации, что составляет 12 182, 76 евро (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №116 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 9 746, 21 евро (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 2 436, 55 евро (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся к Товару документов (предусмотренных разделом 3 Договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом и подписания Сторонами Акта приема-передачи технической документации (по форме Приложения № 1 к спецификации).

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт. 

В соответствии с п. 4 Спецификации №116 срок поставки до 55-105 календарных дней с момента подписания настоящей Спецификации уполномоченными представителями сторон и осуществления Покупателем 50% предоплаты.

18.04.2022г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 54717 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 1 060 771, 19 руб. (Один миллион шестьдесят тысяч семьсот семьдесят один рубль 19 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 01.08.2022г.

16.05.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 16 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №116, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара с учетом моратория, введенного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», составила 286 дней (с 02.10.2022г. по 15.05.2023г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №116 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 28.08.202г. по товарной накладной № 56 от 29.07.2022г. и 20.06.2023г. по товарной накладной № 16 от 16.05.2023г. Оплата произведена 07.02.2023г. по товарной накладной № 56 и 31.08.2023г. по товарной накладной № 16. Просрочка оплаты составила 73 и 162 дня соответственно.

20. 28.07.2022г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №135 к Договору поставки (далее – Спецификация №135).

В соответствии с п. 2 Спецификации №135 общая сумма Товара с НДС составляет 6 624 794, 40 руб.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №135 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 3 312 397, 20 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №135 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 2 649 917, 76 руб. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату.

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 662 479, 44 руб. (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся к Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом и подписания Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями Сторон.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт.  

В соответствии с п. 4 Спецификации №135 срок поставки 63-77 календарных дней с момента поступления авансового платежа в размере 50% на расчетный счет с правом досрочной поставки с согласия Покупателя.

16.09.2022 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 68162 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 3 312 397, 20 руб. (Три миллиона триста двенадцать тысяч триста девяносто семь рублей 20 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 02.12.2022г.

07.02.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 4 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №135, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 66 дней (с 03.12.2022г. по 06.02.2023г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №135 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 10.03.2023г. Оплата произведена 31.08.2023г. платежным поручением №92701. Просрочка оплаты составила 175 дней.

21. 29.12.2021г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №136 к Договору поставки (далее – Спецификация №136).

В соответствии с п. 2 Спецификации №136 общая сумма Товара с НДС составляет 12 344 200,80 руб.

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №136 Покупатель производит предварительную оплату в размере 2 990 000,40 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации 136 окончательный расчет за поставку товара в размере 9 354 200,40 руб. (с НДС) производится в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом и подписания Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями Сторон.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт.  

В соответствии с п. 4 Спецификации №136 срок поставки 175-190 календарных дней с момента осуществления Покупателем предварительной оплаты согласно п. 3.1.

27.01.2023г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 77812 был перечислен аванс за поставку оборудования в размере в размере 2 990 000,40 руб. (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч рублей 40 копеек) рублей, в т.ч. НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 05.08.2023г.

25.09.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 19 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №136, был передан в полном объеме.

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 50 дней (с 06.08.2023г. по 24.09.2023г.).

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №136 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 26.10.2023г. Оплата произведена 31.01.2024г. платежными поручениями 203164, 203165, 203177. Просрочка оплаты составила 97 дней.

22. 10.02.2023г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №137 к Договору поставки (далее – Спецификация №137).

В соответствии с п. 2 Спецификации №137 общая сумма Товара с НДС составляет 1 385 328, 00 руб. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №137 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 692 664, 00 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №137 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 554 131, 20 руб. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 138 532, 80 руб. (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.  

В соответствии с п. 4 Спецификации №137 срок поставки 60 календарных дней с момента осуществления Покупателем 50% предоплаты и при условии своевременного внесения второго авансового платежа в размере 40%.

21.03.2023 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 79686 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 692 664 руб. (Шестьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля) рублей, в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 22.04.2023г.

16.05.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 15 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №137, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 23 дня (с 22.04.2023г. по 15.05.2023г.). 

Ответчиком по первоначальному иску, Истцом по встречному, по Спецификации №137 заявлены встречные исковые требования за просрочку оплаты Товара.

Срок окончательного расчета истек 22.06.2023г. Оплата произведена 31.08.2024г. платежным поручением № 92697. Просрочка оплаты составила 70 дней.

23. 09.01.2023г. ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписали Спецификацию №139 к Договору поставки (далее – Спецификация №139).

В соответствии с п. 2 Спецификации №139 общая сумма Товара с НДС составляет 552 710, 40 руб. 

В соответствии с п. 3.1 Спецификации №139 Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 276 355, 20 руб. (с НДС).

В соответствии с п. 3.2 Спецификации №139 Покупатель производит оплату в размере 40% от общей суммы, указанной в спецификации, что составляет 221 084, 16. (с НДС) по факту готовности к отгрузке в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления письменного уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату. 

В соответствии с п. 3.3 Спецификации, окончательный расчет за поставку товара в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации, что составляет 55 271, 04 руб. (с НДС) производится по факту поставки Товара в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента поставки Товара, предоставления относящихся в Товару документов (в соответствии с разделом 3 договора поставки), получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом и подписания Акта приема-передачи технической документации полномочными представителями Сторон.

Покупатель в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта приема-передачи технической документации проверяет, в случае отсутствия замечаний подписывает вышеуказанный Акт.  

В соответствии с п. 4 Спецификации №139 срок поставки 77-91 календарный день с момента подписания спецификации уполномоченным представителями Сторон, поступления авансового платежа на расчетный счет и при условии своевременного внесения второго авансового платежа в размере 40%.

08.02.2023 г. Обществом «НХРС» в адрес Общества «ЭСИ» платежным поручением № 79038 был перечислен 50% аванс за поставку оборудования в размере 276 355, 20 руб. (Двести семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей 20 копеек) рублей, в т.ч НДС.

Таким образом, обязательство по поставке Товара Обществом «ЭСИ» истекло 10.05.2023г.

22.06.2023г. между ООО «НХРС» и ООО «ЭСИ» подписана товарная накладная № 18 по форме ТОРГ-12, в соответствии с которой Товар, предусмотренный Спецификацией №139, был передан в полном объеме. 

С учетом изложенного, просрочка поставки Товара составила 42 дня (с 10.05.2023г. по 21.06.2023г.).

Таким образом, пени за нарушение срока поставки по Спецификациям по п. 7.2 Договора составит:

Расчет в рублях:

№ и дата Спецификации

Стоимость Товара, руб. с НДС

Срок для поставки

Реквизиты п/п по оплате аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Кол-во дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за каждый день просрочки

Итоговая сумма пени, руб. с учетом п. 7.2. Договора

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

 63 от 11.08.21

7 110 600,00

28.03.22

30.08.21

29910

38

02.06.22

29.03.22

01.06.22

3

0,1

21 331,80

 67 от 28.10.21

2 946 000,00

15.03.22

15.11.21

38703

79

05.09.22

16.03.22

04.09.22

16

0,1

47 136,00

135 от 28.07.22

6 624 794,40

02.12.22

16.09.22

68162

4

07.02.23

03.12.22

06.02.23

66

0,1

437 236,43

136 от 29.12.22

12 344 200,80

05.08.23

27.01.23

77812

19

25.09.23

06.08.23

24.09.23

50

0,1

617 210,04

137 от 10.02.23

1 385 328,00

22.04.23

21.02.23

79686

15

16.05.23

23.04.23

15.05.23

23

0,1

31 862,54

139 от 09.01.23

552 710,40

10.05.23

08.02.23

79038

18

22.06.23

11.05.23

21.06.23

42

0,1

23 213,84

 Итого      

1 177 990,65

Расчет в евро:

№ и дата Спецификации

Стоимость Товара, евро. с учетом НДС

Реквизиты п/п по оплате аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за каждый день просрочки

Итоговая сумма пени, евро. с учетом п. 7.2. Договора

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

4 от 02.03.21

67 320,00

26.04.21

15494

147

21.12.21

26.11.21

20.12.21

24

0,1

1 615,68

27 от 27.05.21

134 448,00

18.10.21

34838

29

12.04.22

22.02.22

01.04.22

38

0,1

5 109,02

29 от 21.06.21

21 300,00

06.07.21

22403

132

12.11.21

20.10.21

11.11.21

22

0,1

468,60

52 от 16.07.2021

58 806,00

27.07.21

25922

4

11.01.22

20.10.2021

10.01.22

82

0,1

4 822,09

72 от 23.09.2021

20 040,00

19.10.21

35418

13

16.03.2022

19.02.2022

15.03.22

25

0,1

501

74 от 30.09.2021

1 446 232,00

06.10.21

33688

10

17.02.22

10.02.2022

17.02.22

7

0,1

10 263,62

733 116,00

27.06.22

60681

50

01.07.22

18.02.22

31.03.22

41

0,

30 057,76

86 от 15.11.21

852 114,00

06.12.21

40696

122

09.12.22

01.10.22

08.12.22

68

0,1

57 943,75

87 от 28.10.21

1 092 675,60

03.11.21

37815

1

20.01.23

23.06.22

19.01.23

111

0,1

109 267,56

93 от 15.11.21

835 740,00

06.12.21

40698

16

18.03.22

02.10.22

29.12.22

88

0,1

29 726,40

07.07.22

61648

54

22.07.22

-

20.10.22

70705

127

30.12.22

-

94 от 17.12.21

187 867,12

29.12.21

43174

123

09.12.22

18.06.22

08.12.22

68

0,1

12 774,96

99 от 22.12.21

702 988,54

29.12.21

43185

103

13.10.22

18.06.22

12.10.22

11

0,1

7 732,87

100 от 17.12.21

1 722 856,40

29.12.21

43172

124

09.12.22

16.09.22

08.12.22

68

0,1

117 154,24

101 от 17.12.21

166 161,60

29.12.21

43173

121

09.12.22

09.04.22

08.12.22

69

0,1

11 465,15

116 от 25.03.22

24 365,52

18.04.22

54717

16

16.05.23

02.08.22

15.05.23

286

0,1

2 436,55

Итого

401 339,25

Расчет в долларах США

№ и дата Спецификации

Стоимость Товара, долл. с НДС

Реквизиты п/п по оплате аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

%

 за 

каждый 

день просрочки

Итоговая сумма пени, долл. с учетом п. 7.2. Договора

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

88 от 18.11.21

782 244,00

07.12.21

40738

109

31.10.22

02.10.22

30.10.22

28

0,1

21 902,83

61 806,00

116

21.11.22

31.10.22

20.11.22

20

0,1

1 236,12

92-1 от 15.12.21

32 730,00

29.12.21

43146

107, 112

31.10.22

26.07.22

30.10.22

29

0,1

949,17

97 от 07.12.21

54 840,00

27.12.21

42680

5

15.02.23

01.12.22

14.02.23

76

0,1

4 167,84

Итого

28 255,96   

Таким образом, сумма, подлежащая взысканию с Общества «ЭСИ» в пользу Общества «НХРС» по п. 7.2 Договора поставки составляет:

Таким образом, сумма, подлежащая взысканию с Общества «ЭСИ» в пользу ООО «НХРС» по пунктам 7.2 Договора составляет:

1. 1 177 990,65 руб.

2. 401 339,25 евро. По курсу на дату обращения в суд (27.08.2024) = 41 134 343,35 руб.

3. 28 255,96 Долл. США. По курсу на дату обращения в суд (27.08.2024) = 2 593 176,6

Итого: 44 905 510,60 руб.

Пени за нарушение срока поставки по Спецификациям по п. 7.7 Договора составит:

Расчет в рублях:

№ и дата Спецификации

Реквизиты п/п по оплате аванса

Сумма аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период пользования авансом

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за каждый 

день просрочки

Сумма пени по расчету, руб.

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

 63 от 11.08.21

30.08.21

29910

 2 133 180,00 

38

02.06.2022

31.08.2021

01.06.22

214

0,1

 456 500,52   

67 от 28.10.21

15.11.21

38703

 1 473 000,00 

79

05.09.2022

16.11.2021

04.09.22

138

0,1

 203 274,00   

135 от 28.07.22

16.09.22

68162

 3 312 397,20 

4

07.02.2023

17.09.22

06.02.23

128

0,1

 423 986,84   

28.12.22

76350

 2 649 917,76 

29.12.22

06.02.23

40

0,1

 105 996,71   

 136 от 29.12.22

27.01.23

77812

 2 990 000,40 

19

25.09.23

28.01.23

24.09.23

240

0,1

 717 600,10   

137 от 10.02.23

21.02.23

79686

 692 664,00 

15

16.05.23

22.02.23

15.05.23

83

0,1

 57 491,11   

11.04.23

83238

 554 131,20 

12.04.23

15.05.23

34

0,1

 18 840,46   

 139 от 09.01.23

08.02.23

79038

 276 355,20 

18

22.06.23

09.02.23

21.06.23

133

0,1

 36 755,24   

07.04.23

83159

 221 084,16 

08.04.23

21.06.23

75

0,1

 16 581,31   

Итого

2 037 026,29   

Расчет в евро: 

№ и дата Спецификации

Реквизиты п/п по оплате аванса

Сумма 

аванса в евро

Сумма неиспольз. аванса 

Реквизиты Товарной накладной

Период пользования авансом

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за каждый день просрочки

Сумма пени по расчету, евро.

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

 4 от 02.03.21

26.04.21

15494

 33 660,00 

147

21.12.21

30.06.21

20.12.21

174

0,1

 5 856,84   

27 от 27.05.21

18.10.21

34838

 67 224,00 

29

12.04.22

19.10.21

31.03.22

164

0,1

 11 024,74   

29 от 21.06.21

06.07.21

22403

 10 650,00 

132

12.11.21

07.07.21

11.11.21

128

0,1

 1 363,20   

17.09.21

31730

 8 520,00 

18.09.21

11.11.21

55

0,1

 468,60   

 52 от 16.07.21 

27.07.21

25922

 29 403,00 

4

11.01.22

28.07.21

10.01.22

167

0,1

 4 910,30   

06.09.21

30209

 23 522,40 

07.09.21

10.01.22

126

0,1

 2 963,82   

72 от 23.09.21

19.10.21

35418

 10 020,00 

13

16.03.22

20.10.21

15.03.22

147

0,1

 1 472,94   

28.02.22

49827

 8 016,00 

01.03.22

15.03.22

15

0,1

 120,24   

74 от 30.09.21

06.10.21

33688

146 623,20 

 146 623,20 

10

17.02.22

07.10.21

16.02.22

133

0,1

 19 500,89   

27.06.22

60681

 446 213,9 

50

01.07.22

 -     

86 от 15.11.21

06.12.21

40696

 426 057,00 

122

09.12.22

07.12.21

08.12.22

184

0,1

 78 394,49   

31.08.22

66892

 340 845,60 

01.09.22

08.12.22

68

0,1

 23 177,50   

87 от 28.10.21

03.11.21

37815

 546 337,80 

1

20.01.23

04.11.21

19.01.23

259

0,1

 141 501,49   

93 от 15.11.21

06.12.21

40698

 417 870,00 

 417 870,00 

16

18.03.22

07.12.21

17.03.22

101

0,1

 42 204,87   

 94 от 17.12.21

29.12.21

43174

 131 506,98 

123

09.12.22

30.12.21

08.12.22

161

0,1

 21 172,62   

21.11.22

73259

 37 573,43 

22.11.22

08.12.22

17

0,1

 638,75   

 99 от 22.12.21

29.12.21

42185

 534 271,28 

103

13.10.22

30.12.21

12.10.22

104

0,1

 55 564,21   

07.07.22

61755

 98 418,40 

08.07.22

12.10.22

11

0,1

 1 082,60   

100 от 17.12.21

29.12.21

43172

 1 205 999,48 

124

09.12.22

30.12.21

08.12.22

161

0,1

 194 165,92   

30.09.22

68904

 344 571,28 

02.10.22

08.12.22

68

0,1

 23 430,85   

101 от 17.12.21

29.12.21

43173

 116 313,12 

121

09.12.22

30.12.21

08.12.22

161

0,1

 18 726,41   

28.04.22

55748

 33 232,32 

29.04.22

08.12.22

70

0,1

 2 326,26   

116 от 25.03.22

18.04.22

54717

 12 182,76 

 9 746,21 

16

16.05.23

02.10.22

15.05.23

226

0,1

 2 202,64   

24.06.22

60623

 9 746,21 

56

29.07.22

 -     

Итого:

652 270,18   

Расчет в Долларах США:

№ и дата Спецификации

Реквизиты п/п по оплате аванса

Сумма аванса в долл

Сумма неисп. аванса в долл

Реквизиты Товарной накладной

Период пользования авансом

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за

каждый день просрочки

Сумма пени по расчету, долл

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

88 от 18.11.2021

07.12.21

40738

391122,00

391 122,00

109

31.10.22

08.12.21

31.03.22

113

0,1

44 196,79

18.08.22

65816

24722,40

464 665,20

116

21.11.22

02.10.22

18.10.22

16

0,1

7 434,64

29.08.22

66546

48820,80

704 019,60

19.10.22

30.10.22

11

0,1

7 744,22

92-1 от 15.12.2021

29.12.21

43146

16365,00

16 365,00

107

31.10.22

30.12.21

31.03.22

91

0,1

1 489,22

28.07.22

63976

9949,43

26 314,43

112

31.10.22

02.10.22

18.10.22

16

0,1

421,03

19.10.22

70657

1780,80

28 095,23

19.10.22

30.10.22

11

0,1

309,05

97 от 07.12.2021

27.12.21

42680

27420,00

27 420,00

5

15.02.23

28.12.21

14.02.23

230

0,1

6 306,60

27.12.22

75901

21936,00

21 936,00

28.12.22

14.02.23

48

0,1

1 052,93

Итого:

68 954,48   

 Таким образом, сумма, подлежащая взысканию с Общества «ЭСИ» в пользу ООО «НХРС» по пункту 7.7 Договора составляет:

1. 2 037 026,29 руб.

2. 652 270,18 евро. По курсу на дату обращения в суд (27.08.2024) = 66 852 931,88 руб.

3. 68 954,48 Долл. США По курсу на дату обращения в суд (27.08.2024) = 6 328 262,92

Итого: 75 218 221,09 руб.

По встречному исковому заявлению по п 7.5 Договора пени за нарушение оплаты составит:

По п. 7.5 Договора расчет в рублях:

№ и дата Спецификации

Сумма окончательного расчета (руб.)

Реквизиты п/п по оплате аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Кол-во дней просрочки 

% за каждый день просрочки

Итоговая сумма пени, руб. с учетом п. 7.5. Договора (10%)

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

 63 от 11.08.21

711 060,00

20.07.22

63325

38

02.06.22

23.06.22

20.07.22

28

0,1

19 909,68

 67 от 28.10.21

1 473 000,00

08.02.23

78772

79

05.09.22

07.10.22

08.02.23

125

0,1

147 300,00

135 от 28.07.22

662 479,44

31.08.23

92701

4

07.02.23

11.03.23

31.08.23

175

0,1

66 247,94

136 от 29.12.22

9 354 200,40

31.01.24

203164

19

25.09.23

27.10.23

31.01.24

97

0,1

907 357,44

203165

203177

137 от 10.02.23

138 532,80

31.08.23

92697

15

16.05.23

23.06.23

31.08.23

70

0,1

9 697,29

Итого: 1 150 512,35

Расчет в евро:

 № и дата Спецификации

Сумма окончательного расчета (евро)

Реквизиты п/п окончательного платежа

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Количество дней просрочки с учетом моратория с 01.04.22 по 01.10.22

% за каждый день просрочки

Итоговая сумма пени, евро. с учетом п. 7.5. Договора (10%)

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

29 от 21.06.21

2 130,00

17.12.21

42268

132

12.11.21

13.12.21

17.12.21

5

0,1

10,65

52 от 16.07.21

Расчет по указанной спецификации произведен ООО «ЭСИ» с момента направления уведомления, что не соответствует условиям Договора. Указанная Спецификация оплачена без просрочки.

74 от 30.09.21

73 311,60

16.12.22

75077

10

17.02.22

10.02.2022

17.02.22

183

0,1%

7 331,16

07.02.23

78675

50

01.07.22

18.02.22

31.03.22

09.02.23

79124

86 от 15.11.21

85 211,40

07.02.23

78695

122

09.12.22

18.01.23

07.02.23

21

0,1

1 789,44

87 от 28.10.21

44 489

02.10.23

94545

1

20.01.23

29.06.23

02.10.23

96

0,1

4 270,94

93 от 15.11.21

8004

08.02.23

78982

07.02.23

08.02.23

2

0,1

16,008

33 780

09.02.23

79117

07.02.23

09.02.23

3

0,1

101,34

94 от 17.12.21

18 786,71

07.02.23

78627

123

09.12.22

17.01.23

07.02.23

21

0,1

394,52

07.02.23

78628

99 от 22.12.21

70 298,86

07.02.23

78611

103

13.10.22

25.11.22

07.02.23

75

0,1

1 409

07.02.23

78617

100 от 17.12.21

172 285,64

07.02.23

78618

124

09.12.22

17.01.23

07.02.23

21

0,1

3 617,99

07.02.23

78625

101 от 17.12.21

16 616,16

07.02.23

78626

121

09.12.22

18.01.23

07.02.23

20

0,1

332,32

116 от 25.03.22

1 092,63

31.08.23

16

16.05.23

02.08.22

15.05.23

73

0,1

79,74

1 343,92

07.02.23

56

29.07.22

30.08.22

07.02.23

162

134,39

Итого

19 487,50

Расчет в долларах США

№ и дата Спецификации

Сумма окончательного расчета (долл.)

Реквизиты п/п по оплате аванса

Реквизиты Товарной накладной

Период просрочки

Количество дней просрочки с учетом моратория с 

%

 за 

каждый 

день просрочки

Итоговая сумма пени, долл. с учетом п. 7.2. Договора

Дата п/п

Номер п/п

Номер ТН

Дата ТН

Начало

Окончание

88 от 18.11.21

57 635,04

07.02.23

78689

109

31.10.22

02.12.22

07.02.23

68

0,1

3 919,18

4 944,48

07.02.23

78696

116

21.11.22

23.12.22

07.02.23

47

0,1

232,39

92-1 от 15.12.21

3 273

07.02.23

78690

107, 112

31.10.22

01.12.22

07.02.23

69

0,1

225,84

07.02.23

78691

97 от 07.12.21

4 387,2

31.08.23

92702

5

15.02.23

07.04.23

31.08.23

146

0,1

438,72

Итого

4 816,13   

Таким образом, сумма, подлежащая взысканию с Общества «НХРС» в пользу ООО «ЭСИ» по пункту 7.5 Договора составляет:

1. 1 150 512,35 руб.

2. 19 487,50 евро. По курсу на 26.12.24 = 2 025 561,93 руб.

3. 4 816,13 Долл. США По курсу на 26.12.24= 479 746,75 руб.

Итого: 3 655 821,03 руб.

Довод Ответчика о недопустимости установления в договоре двойной ответственности за одно и тоже нарушение отклоняется судом, как основанный на ошибочном толковании условий пунктов 7.2 и 7.7 Договора поставки. 

Неустойка за нарушение сроков поставки товара (п.7.2 Договора поставки) и проценты за пользование авансом (п. 7.7. Договора поставки) являются самостоятельными обязательствами, по своей правовой природе отличаются друг от друга и не являются двойной мерой ответственности за одно и то же правонарушение.

В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Стороны при заключении Договора поставки согласовали, что если Поставщик допускает просрочку поставки товара, но при этом за этот товар был внесен аванс, то Покупатель имеет право на взыскание 0,1% от суммы аванса за весь период пользования авансом. Данное условие об обязанности Поставщика уплатить проценты за пользование авансом не противоречит законодательству РФ и сложившейся судебной практике.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 5 статьи 454 Гражданского кодекса РФ к обязательствам, вытекающим из договоров поставки, применяются также отдельные положения, предусмотренные нормами о договоре купли-продажи. 

Согласно пункту 4 статьи 487 Гражданского кодекса РФ в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя.

В рассматриваемом случае Договором поставки предусмотрено иное: 0,1 % за каждый день просрочки вместо применения ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Также предусмотрена обязанность Продавца уплачивать указанные проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от Покупателя.

В этом случае проценты взимаются как плата за предоставленный коммерческий кредит (статья 823 Кодекса) согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998г. (ред. от 24.12.2020г.) «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

Приняв во внимание, что применительно п.7.7. Договора поставки, 0,1% за пользование авансом по своей правовой природе не является санкцией, а представляет собой плату за пользование денежными средствами, перечисленными в качестве аванса, руководствуясь п. 12 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14, учитывая, что в рассматриваемом случае возможность начисления процентов за пользование авансом в п. 7.7. Договора поставки поставлена под отлагательное условие - просрочка Продавца - что не изменяет их правовой природы, суд приходит к выводу, что одновременное применение п.7.2. и 7.7. Договора поставки само по себе не является формой двойной ответственности за одно и то же правонарушение.

К представленному Ответчиком заключению специалиста от 01.11.2024г. суд относится критически, поскольку внесудебное исследование специалиста отражает лишь субъективное мнение отдельно взятого лица по поставленным перед ним вопросам и не обладает для суда заранее установленной силой. При этом, суд также учитывает, что специалист, проводивший исследование, не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, исследование составлено по инициативе одной из сторон, заинтересованной в исходе судебного разбирательства в отношении вопросов права, а не вопросов, требующих специальных познаний.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства может быть уменьшена в судебном порядке (п.1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ).

Согласно п. 77 указанного Постановления снижение размера договорной неустойки допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредиторами необоснованной выгоды (пункты 1, 2 ст. 333 Гражданского кодекса РФ).

Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком не представлено доказательств того, что взыскание неустойки может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

Ответчик по встречному иску не представил доказательств того, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере, с учетом десятипроцентного ограничения, может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

В указанном случае, суд не находит оснований для снижения заявленных неустоек.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени, предусмотренные п. 7.2 Договора поставки № 331-ЭСИ от 18.12.2020г., в размере 44 905 510,60 руб., пени, предусмотренные п. 7.7 Договора поставки № 331-ЭСИ от 18.12.2020г., в размере 75 218 221,09 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 189 047,38 руб.

В удовлетворении остальной части требований ООО «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени, предусмотренные п. 7.5 Договора поставки № 331-ЭСИ от 18.12.2020г., в размере 3 655 821,03 руб. 

В удовлетворении остальной части требований Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать. 

Произвести зачет.

В результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 116 656 958 руб. 04 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 110 796 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Электросетьинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному заявлению в размере 225 004 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Шамсутдинов Э.Р