Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-299548/23-14-2293

г. Москва

03 мая 2024 года

Резолютивная часть объявлена                                                                 15 апреля 2024 г.

Дата изготовления решения в полном объеме                                             03 мая 2024 г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., без использования средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ФКР МОСКВЫ (ОГРН 

<

***>)

к ответчику ООО "СЕРВАЛИС" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 930 381,81руб.

 

при участии представителей:

в судебное заседание не явились:

истец – извещен, ответчик – извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

ФКР Москвы обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Сервалис» о взыскании суммы неустоек:

- 80 594,69 руб. – неустойки по договору № ПКР-008180-21 от 20.09.2021 г.;

- 101 042,96 руб. – неустойки по договору № ПКР-008171-21 от 20.09.2021 г.;

- 182 771,97 руб. – неустойки по договору № ПКР-008372-21 от 20.09.2021 г.;

- 207 743,06 руб. – неустойки по договору № ПКР-008371-21 от 20.09.2021 г.;

- 358 229,13 руб. – неустойки по договору № ПКР-007833-21 от 10.09.2021 г.

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Как следует из ч. 3 ст. 156 АПК РФ неявка в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не служит препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006 г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом.

При указанных обстоятельствах суд на основании ст. ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие истца и ответчика, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Ответчиком отзыв не представлен, иск по праву и размеру документально не оспорен.

Исследовав материалы дела, оценив представленные суду доказательства, суд признаёт заявленные требования подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Так, между организацией "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ" (далее - Истец, Заказчик) и организацией "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВАЛИС" (далее - Ответчик, Генподрядчик) были заключены:

1. Договор от 10.09.2021 № ПКР-007833-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) ЮАО г. Москвы по адресу (-ам): ул. Чертановская, д. 42, корп. 1 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы . по адресу (-ам): ул. Чертановская, д. 42, корп. 1 (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ (далее - Договор № ПКР-007833-21).

2. Договор от 20.09.2021 № ПКР-008371-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) ЮАО г. Москвы по адресу (-ам): ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 2 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы), по адресу (-ам): ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 2 (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ (далее - Договор № ПКР-008371-21).

3. Договор от 20.09.2021 № ПКР-008372-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) ЮАО г. Москвы по адресу (-ам): ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 3 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы), по адресу (-ам): ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 3 (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ (далее - Договор № ПКР-008372-21)

4. Договор от 20.09.2021 № ПКР-008171-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) ЮАО г. Москвы по адресу (-ам): ул. Чертановская, д. 43, корп. 1 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы), по адресу (-ам): ул. Чертановская, д. 43, корп. 1 (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ (далее - Договор № ПКР-008171-21).

5. Договор от 20.09.2021 № ПКР-008180-21 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) ЮАО г. Москвы по адресу (-ам): ул. Академика Янгеля, д. 14, корп. 7 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами-ч средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы), по адресу (-ам): ул. Академика Янгеля, д. 14, корп. 7 (далее - Объект), включая выполнение строительных - монтажных работ на Объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки законченных работ на Объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ (далее - Договор № ПКР-008180-21).

В соответствии с п. 12.4 Договоров, в случае задержки Генподрядчиком срока начала и\или завершения работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (начальный и конечный сроки исполнения), Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ по разработке проектной документации по Объекту за каждый день просрочки.

Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания. Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору № ПКР-007833- 21) по адресу: ул. Чертановская, д. 42, корп. 1 окончание срока работ по разработке проектной документации - 10.03.2022 г. Фактическая сдача работ системы - 27.05.2022 г. просрочка выполнения работ по системе составила 76 дней.

Стоимость работ по разработке проектной документации составляет 4 713 541.24 руб.

Сумма неустойки по Договору № ПКР-007833-21 составляет: 358 229,13 руб.

В адрес Ответчика отправлена претензия № ФКР-ПИР-2652/23 от 13.06.2023 с требованием об оплате неустойки. Направленная претензия в досудебном порядке, оставлена без ответа.

В соответствии с Г рафиком производства работ (Приложение № 1 к Договору № ПКР-008371-21) по адресу: ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 2 окончание срока работ по разработке проектной документации - 20.03.2022 г. Фактическая сдача работ системы - 23.05.2022 г. просрочка выполнения работ по системе составила 62 дня.

Стоимость работ по разработке проектной документации составляет 3 350 694.52 руб.

Сумма неустойки по Договору № ПКР-008371-21составляет: 207 743,06 руб.

Расчет неустойки к иску прилагается.

В адрес Ответчика отправлена претензия № ФКР-ПИР-2686/23 от 14.06.2023 с требованием об оплате неустойки. Направленная претензия в досудебном порядке, оставлена без ответа.

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору № ПКР-008372-21) по адресу: ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 3 окончание срока работ по разработке проектной документации - 20.03.2022 г. Фактическая сдача работ системы - 13.05.2022 г. просрочка выполнения работ по системе составила 52 дня.

Стоимость работ по разработке проектной документации составляет 3 514 845,49 руб.

Сумма неустойки по № Договору № ПКР-008372-21 составляет: 182 771,97 руб.

Расчет неустойки к иску прилагается.

В адрес Ответчика отправлена претензия № ФКР-ПИР-2495/23 от 13.06.2023 с требованием об оплате неустойки. Направленная претензия в досудебном порядке, оставлена без ответа.

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору № ПКР-00817-21) по адресу: ул. Чертановская, д. 43, корп. 1 окончание срока работ по разработке проектной документации - 10.03.2022 г. Фактическая сдача работ системы - 28.04.2022 г. просрочка выполнения работ по системе составила 49 дней.

Стоимость работ по разработке проектной документации составляет 2 062 101.28 руб.

Сумма неустойки по Договору № ПКР-008171-21составляет: 101 042,96 руб.

Расчет неустойки к иску прилагается.

В адрес Ответчика отправлена претензия № ФКР-ПИР-2494/23 от 13.06.2023 с требованием об оплате неустойки. Направленная претензия в досудебном порядке, оставлена без ответа.

В соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору № ПКР-008180-21) по адресу: ул. Академика Янгеля, д. 14, корп. 7 окончание срока работ по разработке проектной документации - 10.03.2022 г. Фактическая сдача работ системы - 16.05.2022 г. просрочка выполнения работ по системе составила 65 дней.

Стоимость работ по разработке проектной документации составляет 1 239 918,26 руб.

Сумма неустойки по Договору № ПКР-008180-21составляет: 80 594,69 руб.

Расчет неустойки к иску прилагается.

В адрес Ответчика отправлена претензия № ФКР-ПИР-1999/23 от 06.06.2023 с требованием об оплате неустойки. Направленная претензия в досудебном порядке, оставлена без ответа.

Общая сумма неустойки составляет: 930 381,81 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, а также ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Расчет неустойки в материалы дела представлен. Судом признан обоснованным.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

В установленном порядке ответчиком отзыв по существу заявленных требований не представлен.

Таким образом, предъявленный иск ответчиком в установленном порядке не оспорен, процессуальная обязанность по представлению отзыва ответчиком не исполнена.

Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах оснований для отказа в предъявленном иске не имеется.

Учитывая, что требования истца обоснованы, документально подтверждены, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СЕРВАЛИС" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФКР МОСКВЫ (ОГРН 

<

***>):

- 80 594,69руб. – неустойки по договору № ПКР-008180-21 от 20.09.2021г.;

- 101 042,96руб. – неустойки по договору № ПКР-008171-21 от 20.09.2021г.;

- 182 771,97руб. – неустойки по договору № ПКР-008372-21 от 20.09.2021г.;

- 207 743,06руб. – неустойки по договору № ПКР-008371-21 от 20.09.2021г.;

- 358 229,13руб. – неустойки по договору № ПКР-007833-21 от 10.09.2021г.

Взыскать с ООО "СЕРВАЛИС" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФКР МОСКВЫ (ОГРН 

<

***>) 21 608руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

 

Судья:                                                                                                 О.В. Лихачева