АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-53622/23-110-440

г. Москва

22 января 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 22 января 2024 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "СК ГАРАНТ" (141013, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИ Г.О.,  МЫТИЩИ Г., МЫТИЩИ Г., СИЛИКАТНАЯ УЛ., Д. 37А, ПОМЕЩ. 1, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ПРЕСТИЖ"  (141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ХИМКИ Г.,  ЭНГЕЛЬСА УЛ., Д. 7/15, ПОМЕЩ. 31, ОГРН: 

<

***>,) о взыскании 27 882  176,90 руб.,  

Третье лицо 1- общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОДИНА" (109451, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>),  

Третье лицо 2- общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНССТРОЙ" (143409, МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, УСПЕНСКАЯ 

<

...>/2,  ЭТАЖ 2, ОГРН: 

<

***>),  

при участии:  

от истца – ФИО2 по дов. от 07.09.2023 

от ответчика- ФИО3 по дов. от 30.06.2022, ФИО4 по дов. от  29.10.2021, ФИО5 по дов. от 04.07.2023,  

от ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОДИНА"-не явился,  

от ООО ответственностью "НАУЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  АЛЬЯНССТРОЙ"-не вился,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СК ГАРАНТ" обратилось с иском  к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ПРЕСТИЖ" о взыскании  29 117,50 руб. задолженности по договору № 16/03/20-СП от 16.03.2020, 35 440 руб.  задолженности по договору № 1 от 04.12.2019, 27 817 619,40 руб. задолженности по  договору № 16/04/20-СП от 06.04.2020.  

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле были привлечены общество с  ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "РОДИНА", общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНССТРОЙ", которые в судебное заседание не  явились, спор рассмотрен их отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.  

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные  доказательства, суд пришел к следующим выводам.  

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной  ответственностью «Строй Престиж» и Обществом с ограниченной ответственностью  СК «Гарант» были заключены договоры на выполнение работ № 16/03/20-СП от  16.03.2020 года по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает  на себя обязательство выполнить своими силами и средствами работы на объекте:  Общеобразовательная школа на 1100 учащихся» но адресу: 

<

...>».  

В соответствии с и. 2.1. договора стоимость работ, предусмотренных договором  определяется согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой  частью настоящего договора (приложение № 1) и составляет 2 595 225 руб.  

Работы подлежащие выполнению по договору подлежат выполнению в срок с  16.03.2020 года по 16.04.2020 года (п. 3.1 договора).  

Согласно приложения № 1 к договору № 16/03/20-СП от 16.03.2020 года  сторонами согласованы работы - штукатурка стен по сетке в количестве 3460,3 кв.м 750  руб. за квадратный метр.  

Работы подлежащие выполнению по договору подлежат выполнению в срок с  16.03.2020 года по 16.04.2020 года (п. 3.1 договора).  

01.04.2020 года между сторонами подписано дополнительное соглашение по  условиям которого стоимость работ, предусмотренных договором определяется  согласно сметных расчетов, являющихся неотъемлемой частью договора и составляет 6  485 840 руб.  

Дата окончания работ определена сторонами - 03.08.2020 года.  

Работы по договору выполнены Субподрядчиком в полном объеме и приняты  Подрядчиком, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 03.08.2020  года, и справкой о стоимости выполненных работ от 03.08.2020 года.  

Выполненные работы по договорам ответчиком оплачены частично в общей  сумме 6 456 722,50 руб., ввиду чего задолженность по договору составила 29 117,50  руб.  

06.04.2020 года между ООО «Строй Престиж» (подрядчик) и ООО «СК Гарант»  (Субподрядчик) был заключен договор подряда № 16/04/20-СП от 06.04.2020 года по  условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя  обязательство по выполнить своими силами и средствами отделочные работы на  объекте «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся» по адресу: 

<

...>».  

В соответствии с п. 2.1. договора стоимость работ по договору определяется  согласно локального сметного расчета, являющихся неотъемлемой частью настоящего  договора (Приложение № 1) и составляет 21 885 843,55 руб.  

Срок выполнения работ по договору определён сторонами в период с 06.04.2020  года по 31.07.2020 года (п. 3.1. договора).  

01.07.2020 года между ООО «Строй Престиж» и ООО «СК Гарант» было  заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 16/04/20-СП от  06.04.2020 года по условиям которого п. 2.1 договора изложен в следующей редакции:  «Стоимость работ, предусмотренных договором, определяется согласно локального  сметного расчета (Приложение № 1) и составляет 27 367 873,44 руб. Срок выполнения  работ определен 03.08.2020 года (п. 1.2 дополнительного соглашения к договору  подряда).  

Сторонами согласован локальный сметный расчет к договору на сумму 27 367  873,44 руб.  

Согласно актов о приемке выполненных работ от 30.06.2020 года ответчиком  приняты работы по договору, но оплачены частично в сумме 20 267 550 руб.  задолженность ответчика по договору составила 7 100 323,40 руб.  

Кроме того, фактически ООО «СК Гарант» выполнены дополнительные работы  по договору № 16/04/20-СП от 06.04.2020 года на сумму 12 247 959,60 руб., от оплаты  которых ответчик отказался без указания причин.  

При этом, ответчиком приняты по акту № 1 от 14.08.2020 года дополнительные  работы на сумму 5 090 374 руб., что подтверждено приемной комиссией ответчика.  Кроме того, по акту от 14.08.2020 года ответчиком приняты дополнительные работы на  сумму 3 378 962,40 руб.  

Общая задолженность по договору № 16/04/20-СП от 06.04.2020 года составила  20 717 296 руб. за дополнительные работы по договору (12 247 959,60 руб. по  дополнительным работам + но дополнительному соглашению 5 090 374 руб. +3 378  962,40 руб.) и задолженность неоплаченная по актам 7 100 323,40 руб., а всего 27 817  619,40 руб.  

04.12.2019 года между ООО «Строй Престиж» (подрядчик) и ООО «СК Гарант»  (Субподрядчик) был заключен договор подряда № 1 от 04.12.2019 года в редакции  дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2020 года но условиям которого подрядчик  поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнить своими  силами и средствами отделочные работы.  

В соответствии с п. 2.1. договора в редакции дополнительного соглашения от  01.07.2020 года стоимость работ по договору определяется согласно локального  сметного расчета, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора  (Приложение № 3) и составляет 335 440 руб.  

Работы по договору выполнены, результат передан заказчику на сумму 335 440  руб.  

Работы по договору Подрядчиком оплачены в сумме 300 000 руб., ввиду чего  задолженность составила 35 440 руб.  

В срок определенный договорами работы ООО «СК Гарант» выполнены, работы  по договору Подрядчиком и Подрядчиком приняты, в настоящий момент выполненные  Субподрядчиком работы эксплуатируются по назначению собственниками объектов.  

Отказ ответчика от оплаты выполненных по договорам работ послужил  основанием для обращения в арбитражный суд с данным исковым заявлением.  

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

В силу пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или  нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и  обязанностей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного  подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию  заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену.  

В рамках спорных правоотношении ответчиком работы по договору № 16/03/20- СП от 16.03.2020 года на сумму 6 485 840 руб., договору подряда № 1 от 04.12.2019 года  на сумму 335 440 руб., № 16/04/20-СП от 06.04.2020 года на сумму 39 615 833,33 руб.  приняты в полном объеме, но оплачены частично, соответственно задолженность в  сумме 29 117,50 руб. по договору № 16/03/20-СП от 16.03.2020 года, в сумме 35 440  руб. по договору № 1 от 04.12.2019 года, и в сумме 27 817 619,40 руб. по договору   № 16/04/20-СП от 06.04.2020 года подлежат взысканию с ответчика в общей сумме 27  882 176,90 руб.  

На основании изложенного истец обратился в суд. 

Вместе с тем, согласно п. 4.1.1 Договора № 16/04/20-СП Субподрядчик  ежемесячно производит сдачу выполненных работ на основании Акта о приемке  выполненных работ (Форма № КС-2) Справки о стоимости выполненных работ и затрат  (Форма № КС-3) и исполнительной документации.  

После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма №  КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в  установленном порядке, работы подлежат оплате в соответствии с условиями  настоящего Договора.  

Обязательств по оплате работ истца в размере 7 100 323,40 рублей, у ответчика  не возникает, в связи с их невыполнением. Не представлены акты выполненных работ,  не представлена исполнительная документация.  

Согласно п.2.3. Договора Оплата фактически выполненных Субподрядчиком в  Отчётном периоде Работ производится в размере 95 % Подрядчиком с зачетом  выплаченного аванса, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты поступления  средств Подрядчику от Генерального подрядчика, при условии подписания Сторонами  следующих документов:  

Акта о приемке выполненных работ ( № КС-2); 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); и предоставления  Субподрядчиком:  

Счета и счета-фактуры Субподрядчика; 

Актов на скрытые работы, паспортов и сертификатов на материалы, и иной  исполнительной документации согласно п. 5.3. Договора.  

В случае предоставления Субподрядчиком неполного комплекта  вышеуказанных документов (и/или несоответствующих условиям Договора) оплата  выполненных работ Подрядчиком не производится, обязательство Подрядчика но  оплате считается не возникшим.  

Стоимость работ в размере 20 267 550 рублей оплачена полностью,  подтверждается платежными поручениями. Истцу передан давальческий материал на  сумму в размере 9 725 672,45 рублей, что подтверждается УПД.  

В материалы дела представлено письмо истца без даты, с ссылкой на Договор   № 06/04/20-СП от 06.04.2020(который фактически не был заключен), в котором истец  указывает, что 29.12.2020 представителем ответчика ФИО6 получены  акты КС 2, КСЗ по договору и на дополнительные работы, с указанием адреса для  отправки ответа.  

Оригинальные документы представленные истцом 29.12.2020, были  рассмотрены ответчиком, подготовлено мотивированное возражение и отказ в  подписании актов КС-2 № 2 от 08.10.2020, КС-3 № 2 от 08.10.2020 (дополнительные  работы), КС-2 № 1 от 03.08.2020, КС-3 № 1 от 03.08.2020 по Договору 16/04/20-СП от  06.04.2020.  

Возражения направлены истцу 31.12.2020, посредством почты России, по  указанным реквизитам.  

ООО «Строй Престиж» выразил свой отказ в подписании представленных КС-2   № 1 от 03.08.2020, КС-3 № 1 от 03.08.2020 на сумму 28 921 549,16 руб. Работы истцом  не выполнены, в представленных документах не отображены давальческие материалы  ответчика, которые подтверждаются - УПД № 49 от 29.06.2020, № 88 от 21.09.2020,   № 102 от 01.10.2020, № 103 от 01.10.2020, № 104 от 01.10.2020, № 89 от 05.11.2020 на  общую сумм 9 725672,45 руб.  

Таким образом, исходя из цены работ, определённой договором с учетом  дополнительного соглашения, оплаты на 20 267 550 рублей, стоимость переданного  ответчиком давальческого материала (который должен был приобретать истец),  работы приняты и полностью оплачены, задолженности не имеется.  

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению, по  договорам № 16/03/20-сп, и № 1.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ПРЕСТИЖ"  (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ""СК  ГАРАНТ" ( ОГРН: 

<

***>) 64 557 руб. 50 коп. задолженности, 375 руб. в  возмещение расходов по госпошлине.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья: А.В. Мищенко