АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, 

<

...>; тел/ факс: 

<

***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-893/2025

город Саратов

17 июня 2025 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ,  

арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по делу в части исковых требований об обязании муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры» муниципального образования город Балаково, Саратовская область, г. Балаково, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда получить задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – прекратить.  

Обязать муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры» муниципального образования город Балаково, Саратовская область, г. Балаково, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>:  

 - в течение 180-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда с привлечением организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия организовать проведение противоаварийных работ по усилению несущих конструкций здания;  

 - в течение 180-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда с привлечением организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия провести инженерно-техническое обследование основных несущих конструкций здания;  

- в течение 250-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда с привлечением организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия разработать на основании инженерно-технического обследования научно-проектную документацию на ремонтно-реставрационные работы;  

- в течение 360-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда с привлечением организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия выполнить ремонт кровельного покрытия;  

 - в течение 560-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда с привлечением организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия по согласованной проектной документации выполнить ремонтно-реставрационные работы.  

Взыскать с муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры» муниципального образования город Балаково, Саратовская область,  

г. Балаково, ИНН 

<

***>, ОГРН 1026401423157в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.  

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Ю.С. Святкина