АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-54377/2022

09 октября 2023 г.

г. Краснодар

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2023 г.

Полный текст судебного акта изготовлен 09 октября 2023 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Семененко, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шишкиной А.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>), г. Краснодар

к страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (ИНН 

<

***>), г. Москва, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Айслэб» (ИНН 

<

***>), г. Москва,

о взыскании неустойки в размере 40 032 067,04 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.,  

 

при участии: 

от истца: ФИО1 - по доверенности,

от ответчика: ФИО2 - по доверенности,

от третьего лица: ФИО3 - по доверенности, 

 

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общества «Россети Кубань» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» о взыскании неустойки в размере 40 032 067,04 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Определением суда от 10.04.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Айслэб».

Прибывшие в судебное заседание представители сторон дали пояснения суду, настаивали на заявленных требованиях и возражениях.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 02.10.2023 объявлялся перерыв до 16 часов 35 минут, после окончания которого судебное заседание было продолжено.

К производству принято ходатайство ответчика об истребовании документов, а именно ответчик просит обязать истца предоставить документы согласно п.п. 8.1.4. Договора страхования в отношении восстановительных и иных работ по опорам № 108 и 109:

- копию договора на проектно-изыскательские работы по опорам;

- копии документов, подтверждающих приобретение нового имущества или оборудования на замену поврежденного или погибшего Застрахованного имущества, а именно: копии спецификации к договорам купли-продажи/поставки или копии счетов на поставку материалов и оборудования;

- копии документов, подтверждающих списание поврежденного Застрахованного имущества с баланса предприятия, а также утилизацию поврежденного имущества (в случае его непригодности к ремонту (восстановлению);

- копии документов, подтверждающих затраты на ремонт (восстановление), а именно копии договоров подряда со всеми приложениями, копии актов приема-сдачи работ, копии счетов на оплату, копии платежных поручений или двухсторонних актов сверок. Протокол конкурсной комиссии.

- акт о расследовании причин аварий в электроэнергетике введенный в действие Приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90, во исполнение ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Постановления Правительства от 28.10.2009 № 846 о «Правилах расследования причин аварий в электроэнергетике» по опорам № 38, 105 и 138.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В силу ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. 

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

При рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательствам, и вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства.

Судом ходатайство ответчика об истребовании судом рассмотрено и оставлено без удовлетворения, поскольку имеющихся в деле доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу по рассматриваемому предмету спора.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 29.11.2017 года между ПАО «Россети Кубань и СПАО «Ингосстрах» заключен договор страхования имущества юридических лиц «От всех рисков» № 453-073998/17/407/30-1127 (далее – договор). 

По настоящему договору застрахованным считается движимое и недвижимое имущество Страхователя, состоящее на балансе (арендованное Страхователем) на дату начала периода страхования. 

Срок действия договора страхования с 00 часов 00 минут 01.01.2018 года до 24 часов 00 минут 31.12.2020 года.

В соответствии с и. 7.1.6.2. договора, если предварительное страховое возмещение по каким-либо причинам не выплачивалось Страховщиком (либо не запрашивалось Страхователем), Страховщик в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.1.4 Договора, осуществляет выплату страхового возмещения Страхователю и направляет Страхователю копию соответствующего страхового акта.

01-04.02.2020 года в ПАО «Россети Кубань» в результате стихиынйх явлений произошло повреждение электрических сетей.

Во исполнение условий договора 20.01.2022 года Истец направил Ответчику заявление о выплате страхового возмещения (предварительное страховое возмещение истцом не запрашивалось), а также документы в составе и количестве, предусмотренном условиями договора, которые позволили объективно установить факт и причины страхового случая и определить размер ущерба.

Ответчик СПАО «Ингосстрах», нарушив сроки, установленные договором, произвел выплату предварительного страхового возмещения:

- 28.03.2022  в размере 17 922 212 руб. (платежное поручение № 336931);

- 05.07.2022 в размере 48 740 088,13 руб. (платежное поручение № 739180).

Таким образом, как указывает истец, в соответствии с условиями договора выплата страхового возмещения должна была быть произведена в срок по 10.02.2022.

В соответствии с п. 7.2. договора в случае необоснованной задержки любого из сроков, в том числе и сроков, указанных в п. 7.1.6.2., Страхователь вправе потребовать от Страховщика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Таким образом, как указывает истец, просрочка выплаты страхового возмещения составляет с 11.02.2022 по 28.03.2022 года включительно, размер неустойки, подлежащий взысканию, составляет 40 032 067,04 руб.

Истец направлял 15.04.2022 направил письменную претензию № РК/004/100-исх, содержащую требование об уплате неустойки за нарушение срока выплаты страхового возмещения, которая была получена ответчиком 25.04.2022 и оставлена им без рассмотрения.

Ответчиком выплата неустойки не произведена, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующему выводу.

Согласно ч. 3 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 26.07.2017) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

Пунктом 3 статьи 3 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с ГК РФ и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.

Согласно части 1 статьи 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключён договор (выгодоприобретателю), причинённые вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки, в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определённой договором суммы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 961 ГК РФ страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.

Пунктом 2 статьи 961 ГК РФ установлено, что неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 "О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан", страхователь или выгодоприобретатель имеет возможность оспорить отказ страховщика в выплате страхового возмещения, предъявив доказательства того, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не повлияло на его возможность определить, действительно ли имел место страховой случай и какова сумма причиненного ущерба (пункт 2 статьи 961 ГК РФ).

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 29.11.2017 года между СПАО «Ингосстрах» и ПАО «Кубаньэнерго» был заключен договор страхования имущества юридических лиц «от всех рисков» № 453-073998/17. 

В период с 01.02.2020 года по 04.02.2020 года в Краснодарском крае и Республике Адыгея в результате воздействия стихийных явлений произошло повреждение объектов электрических сетей. 

О факте события страховщик был уведомлен 05.02.2020 года, предварительный размер ущерба составил 1 365 000,0 рублей.

 В дальнейшем заявление о выплате 69 716 687,33 рублей с документами было направлено в адрес и получено Ответчиком 27.01.2022 года. 

Однако, выплата произведена с нарушением установленного договором страхования 10-ти дневного срока: 28.03.2022 года в размере 20 415 231,08 рублей и 05.07.2022 года в сумме 48 740 088,13 рублей.

Истец просит взыскать неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере 40 032 067,04 рублей. 

Истец считает привлечение Ответчиком независимого оценщика/лосс-аджастера ООО «Айслэб» необоснованным, представленные при обращении в страховую компанию документы достаточными, необходимость организации осмотра и независимой экспертизы отсутствовала. Размер произведенной выплаты суммы страхового возмещения не оспаривает. Не согласен с отказом Ответчика выплатить неустойку, в связи с чем обратился с настоящим иском в суд.

В обоснование своих возражений ответчик указал, что первоначальное уведомление истца от 05.02.2020 года о произошедшем событии не содержало конкретное наименование и инвентарные номера объектов, пострадавших в результате стихийного бедствия, без наличия обоснования Истец указал предварительный размер ущерба в сумме 1 365 000,0 рублей (произвести осмотр и выплату предварительного страхового возмещения истец не просил). 

27.01.2022 года Истец представил в адрес Страховщика заявление о страховом событии, указал перечень поврежденного имущества, увеличив сумму ущерба до                        69 716 687,33 рублей. Выплатить предварительное возмещение, заявление и сопроводительное письмо к нему, не содержало. 

Привлекая к проведению осмотра и расчета ущерба, согласованного договором страхования независимого оценщика/лосс-аджастера ООО «Айслэб», ответчик действовал разумно и добросовестно. Тот факт, что Истец допустил ООО «Айслэб» к проведению осмотра объектов, свидетельствует о согласованном порядке урегулирования заявленного события, Ответчик воспользовался своим правом на отсрочку выплаты возмещения, по мере предоставления документов произвел выплату в сумме 20 415 231,08 рублей, а в дальнейшем произведена доплата в размере 48 740 088,13 рублей. 

Ответчик считает, что Истец, злоупотребляя своим правом, вводил в заблуждение относительно размера предполагаемого ущерба, предоставлял документы, не предусмотренные договором страхования, которые носили противоречивый характер, увеличил сумму ущерба от 1 365 000,0 рублей до 69 716 687,33 рублей, в том числе путем спорного задвоения восстановительных работ по опорам № 108-109 с использованием проекта аналога опоры № 38 и опоры № 416, проектно-изыскательстких работ. 

Поскольку Истец не оспаривает размер возмещения, ответчик считает, что каких-либо нарушений условий договора со стороны СПАО «Ингосстрах» допущено не было.

На основании изложенного просит в удовлетворении требований истца отказать в полном объеме, а в случае взыскания суммы, уменьшить размер неустойки.

Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, ПАО «Россети Кубань» 05.02.2020 года посредством электронной почты, уведомило страховую компанию о наступлении события, указав, что в результате стихийный явлений, повреждены объекты электрических сетей, наименование и инвентарные номера объектов уточняются, предварительный размер ущерба составил 1 365 000 рублей.

Произвести осмотр и выплату предварительного страхового возмещения истец не просил. Обратного в материалы дела не представлено.

27.01.2022 года, спустя 2 года ПАО «Россети Кубань» представило в адрес Страховщика заявление о страховом событии, произошедшем в указанный выше период времени, в результате воздействия комплекса опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений природных явлений (стихийных явлений): грозы, града, налипания мокрого снега, сильного ветра, сильных осадков, последовавших подъёмов уровня воды в реках с изменением русла, падений древесно-кустарниковой растительности. 

Сумма предварительно определенного размера ущерба была значительно увеличена и составила 69 716 687,33 рублей, из них:

Армавирские электрические сети (далее – ЭС) – 38 361,92 руб.;

Адыгейские ЭС - 16 282,49 руб.;

Краснодарские ЭС – 463 943,84 руб.;

ФИО4 – 68 592,69 руб.;

Славянские ЭС – 42 835,37 руб.;

Сочинский ЭС – 68 557 076,68 руб.;

ФИО5 – 168 564,49 руб.;

Тихорецкие ЭС - 64 836,30 руб.;

Усть-ФИО4 – 73 858,50 руб.;

Юго-Западные ЭС – 222 335,05 руб.

Согласно п. 7.1.1.1 договора страхования Страхователь в течении 3 (трех) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обязан уведомить Страховщика любым доступным способом (тел, факс, эл почта).

Страхователь в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, направляет Страховщику по факсу или эл. почты уведомление с изложением описания наступившего события и (по возможности) с указанием предварительного размера суммы ущерба по форме, представленной в приложении к настоящему договору.

В соответствии с п. 7.1.1.2 договора страхования неисполнение Страхователем срока уведомления Страховщика о наступлении страхового случая не является основанием для отказа выплаты страхового возмещения, если задержка сообщения сверх указанного срока не повлияла на увеличение суммы ущерба от страхового случая.

Согласно п. 7.1.2 договора для признания Страховщиком события, заявленного Страхователем, в качестве страхового случая по договору страхования Страхователь направляет Страховщику официальное заявление о необходимости признания Страховщиком страхового случая, прикладывая к заявлению документы, указанные в пп. 8.1.1.-8.1.2 Договора.

В соответствии с п. 7.1.4 договора Страхователь (при необходимости) вправе направить Страховщику заявление о необходимости получения предварительной выплаты страхового возмещения, прикладывая к заявлению документы, указанные в п. 8.1.3 Договора.

Но основании п. 7.1.5           договора Страховщик в срок не позднее 10 рабочих дней (если Страхователем не указан в заявлении более поздний срок) с момента получения такого заявления обязан осуществить выплату предварительного страхового возмещения в соответствии с п. 8.3 Договора.

Согласно п. 7.1.6 договора страхования для формирования Страховщиком окончательного страхового акта и завершения Сторонами страхового урегулирования по рассматриваемому страховому случаю Страхователь направляет Страховщику документы, указанные в п. 8.1.4 Договора.

В соответствии с п. 7.1.6.2 договора, если предварительное страховое возмещение по каким-либо причинам не выплачивалось Страховщиком (либо не запрашивалось Страхователем), Страховщик в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.1.4. Договора, осуществляет выплату страхового возмещения Страхователю и направляет Страхователю копию соответствующего страхового акта.

В соответствии с п. 7.1.1.5 договора страхования Страхователь обязан обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить на предприятии акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях – обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, государственную противопожарную службу, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

Положениями п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 54 от 22.11.2016 года «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» установлено, что при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 4501 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 168 ГК РФ).

Стороны договора № 453-073998/17/407/30-1127 установили заявительный порядок для реализации Страхователем права на получение страховой выплаты, что не противоречит пункту 2 статьи 1 ГК РФ, в соответствии с которым граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Требования к форме и содержанию соответствующего обращения в страховую компанию установлены приложениями, которые являются неотъемлемой частью упомянутого договора.

Положения договора страхования № 453-073998/17 во взаимосвязи (пункт 7.1.1.1, пункт 7.1.3, пункт 7.1.5, пункт 7.1.6.1, пункт 7.1.6.2,пункт 7.1.6.3 и пункт 8.1.3) устанавливают сроки выполнения действий после события, а в отношении осмотра такой срок не установлен договором страхования, а зависит от волевых юридически значимых действий страхователя по обеспечению Страховщику или его уполномоченным представителям доступа к застрахованному имуществу обеспечению участия в осмотре путем направления уведомления о предоставлении имущества на осмотр.

В данном случае, инициатива по определению срока исполнения такого обязательства передана Истцу, который при реализации соответствующего права должен действовать разумно. Суд исходит из того, что поскольку критерий разумности в гражданском законодательстве неразрывно связан с фактором добросовестности (например, ст. ст. 6, 10, 53 ГК РФ), не может быть признано разумным недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), в том числе путем безосновательного затягивания Истцом срока предъявления требования об исполнении обязательства. 

Суду не представлено мотивированных доводов отсутствия у Истца возможности обращения в страховую компанию в более короткий срок после произошедшего события, невозможности сбора необходимых документов, предоставления страховщику информации о наименовании и инвентарных номерах поврежденных объектов. 

Напротив, судом установлено, что таковые объекты были известны Истцу после события по результатам самостоятельно организованного осмотра, составления комиссионных ведомостей дефектов поврежденного объекта и актов расследования страхового случая с предварительной оценкой ущерба, привлечения для указанных целей осмотра организации ООО «Управление берегозащитных и противооползневых работ экспертиза» (ОГРН: 

<

***>), подготовившей Заключения по результатам обследования земельного участка в месте расположения поврежденных объектов.

Так же, суд критически относится к доводам Истца о возможности в одностороннем порядке организации такого осмотра без уведомления и участия страховщика, такая обязанность закреплена в  п. 7.1.1.6 договора страхования, где Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем в экспертизе и оценке ущерба. 

Необходимость привлечения данных организаций установлена в п. 8.5 договора страхования, в случае если установление факта события, имеющего признаки страхового случая, его причин, соответствующих обстоятельств, а также размера ущерба невозможно без привлечения экспертных организаций, либо при наличии разногласий у Сторон в части признания события страховым случаем и/или определения размера ущерба.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 03.02.2022 года Страховщик направил Страхователю письмо о назначении Аварийного комиссара – ООО «Айслэб» для возможности организации осмотра, экспертизы и установления размера ущерба в отношении пострадавших в результате события объектов.

10.02.2022 года направило в ПАО «Россети Кубань» письмо исх. № 05/1-00192/22 о предоставлении следующих документов (которые легли в основу представленных Страхователем расчетов:

- проект-аналог «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры № 38 BЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ-Шепси»;

- проект-аналог «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая-Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) (проектно-изыскательские работы)» (инвестиционная программа)».

- договор подряда № 639 на выполнение проектно-изыскательских работ от 16.09.2020 года по объекту-аналогу опоре № 38.

Суд находит несостоятельными доводы истца о том, что согласно п. 8.1.3 Договора, документ, необходимый для подтверждения величины предварительного страхового возмещения – это укрупненный сметный расчет затрат на ремонтные (восстановительные работы) в произвольной форме. 

Наличие такой произвольной сметы позволит определить фактический размер ущерба. 

Данные доводы опровергаются в частности п. 2.1. Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ мдс 81-35.2004 (Приложение к Постановлению Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1), где регламентировано, что действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной стоимости строительства. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

Пунктом 3.16. указанной Методики локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД). 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

Данный документ Страховщику представлен не был, поскольку ПАО «Россети Кубань» предъявило укрупнённые/сводные сметные расчеты (сводные укрупнённые таблицы), которые не включали детальные сметные расчеты, представленные первоначально документы были датированы 2020 годом. 

Более того, произвольная форма сметы, имеет оценочный характер, может быть использована в процессе составления самой сметы затрат, но с точки зрения положений ст. 929 ГК РФ, во взаимосвязи со ст. 15 ГК РФ, где страховщик обязуется возместить страхователю, в пользу которого заключен договор, причиненные вследствие этого события убытки, смета должна подтверждать размер расходов (убытков), при этом существо таких расходов – должно быть мотивировано подтверждающими документами.

В свою очередь, проведение оценки объекта с использованием аналога регламентируется Федеральными стандартами "Подходы и методы оценки (ФСО V)", утвержден приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200 и «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328. 

Существенными условиями возможности такой оценки является доступность информации о сделках (значимость сравнительного подхода тем выше, чем надежнее информация о сделках с аналогами), актуальность рыночной ценовой информации (значимость сравнительного подхода тем выше, чем меньше удалены во времени сделки с аналогами от даты оценки и чем стабильнее рыночные условия были в этом интервале времени), степень сопоставимости аналогов с объектом оценки (значимость сравнительного подхода тем выше, чем ближе аналоги по своим существенным характеристикам к объекту оценки и чем меньше корректировок требуется вносить в цены аналогов).

Таким образом, сравнение объекта оценки с аналогами может проводиться с использованием различных количественных параметров измерения объекта оценки, представляющих собой единицы сравнения. Однако, недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования (п. 13 ФСО № 10)

Как следует из аварийного акта ООО «Айслэб» от 03.03.2022 года, Страхователь сообщил о невозможности проведения осмотра по причине отсутствия доступа к объектам, расположенным в труднодоступных местах и климатических/погодных условий (опоры в глубоком снегу, неблагоприятные погодные условия) и что предварительный анализ ущерба проведен по представленным ПАО «Россети Кубань» документам. ООО «Айслэб» частично подтвердила представленные документы по расчету ущерба по опорам №108 и №109, по остальным поврежденным объектам в полном объеме, итого на сумму 20 415 231,08  рублей.

09.03.2022 года, т.е. до истечения 10-ти рабочих дней на выплату возмещения, в адрес СПАО «Ингосстрах» поступило письмо ПАО «Россети Кубань с новыми документами в обоснование расчета ущерба, которые были вновь направлены для проверки в ООО «Айслэб».

25.03.2022 года по результатам проверки полученных документов от 09.03.2022 года, Ответчик письмом № 05/1-00419/22 направил в адрес Истца страховой акт и расчет предварительной выплаты.

Кроме того, 25.03.2022 года Ответчик письмом (исх. № 05/1-00418/22 сообщил о готовности провести осмотр опор №108 и №109 в даты 30.03.2022 года и 31.03.2022 года. Указал, лиц, которым необходимо обеспечить доступ к объектам.

В соответствии с п. 7.1.10 Договора, днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.

28.03.2022 года, денежные средства в сумме 20 415 231,08 рублей были перечислены на счет Истца, что не превышает 30 рабочих дней с момента получения от Истца последнего документа (с учетом привлечения лосс-аджастера) и соответствует положениям п. 8.5.2 договора страхования о сроке с учетом проведенной экспертизы

В связи с улучшением погодных условий, по согласованию сторон, ООО «Айслэб» и представители Истца, в период с 30.03.2022 по 31.03.2022 г.г. совместно провели осмотр объектов – опор №108 и №109. 

При этом, отчёт или иной документ по итогам работы Аварийного комиссара должен быть оформлен не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком документов по событию, имеющему признаки страхового случая (п. 8.5.2. договора).

Более того, во взаимосвязи с п. 7.1.9.1 договора страхования, Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба с привлечением Аварийного комиссара. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза.

Аналогичное положение о праве Страховщика на отсрочку выплаты содержится в п. 7.1.9.2. договора страхования, такое право возникает в случае, если Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим образом.

Отвергая доводы истца о пропуске, установленного договором страхования 20-ти дневного срока подготовки упомянутого отчета (иного документа) лосс-аджастером, суд руководствуется началом течения срока не с даты получения Ответчиком заявления о выплате возмещения, а с даты направления Страховщиком уведомления Истцу о привлечении согласованной договором страхования компании ООО «Айслэб» для проведения осмотра, проверки документов, независимой экспертизы и расчета ущерба от 03.03.2022 года.

В ходе рассмотрения дела Истец подтвердил факт получения такого уведомления, доказательств своего не согласия, с предложенным Страховщиком порядком урегулирования заявленного события, не представил.

Согласно абз. 1 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 года N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении" разъяснено, что по смыслу п. 1 ст. 314 ГК РФ, ст. 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. В п. 28 обзора судебной практики ВС РФ N 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020г.) указано, что поскольку условие, от наступления которого зависело исчисление срока исполнения обязательства, не наступило на дату, указанную в договоре и ограничивающую его наступление, срок исполнения обязательства необходимо исчислять с указанной даты.

Согласно п. 43 и п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора» условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Суд с учетом особенностей конкретного договора вправе применить как приемы толкования, прямо установленные статьей 431 ГК РФ, иным правовым актом, вытекающие из обычаев или деловой практики, так и иные подходы к толкованию. В решении суд указывает основания, по которым в связи с обстоятельствами рассматриваемого дела приоритет был отдан соответствующим приемам толкования условий договора.

15.04.2022 года СПАО «Ингосстрах» была получена претензия ПАО «Россети Кубань» о доплате страхового возмещения в размере 48 740 088,13 рублей и выплате неустойки.

22.04.2022 года ООО «АЙСЛЭБ» направило в адрес Страховщика промежуточный акт и 29.04.2022 года информационное письмо, в котором уведомила Страховщика о наличии в представленных истцом документах существенных противоречий, без устранения которых решение о выплате возмещения в счет восстановительных работ по опоре № 108 и № 109 не представляется возможным, в частности отсутствие локальных сметных расчетов по проектам-аналогам (опора № 38 и № 416), не представлены доказательства фактически понесенных расходов по договору подряда № 639 на выполнение проектно-изыскательских работ от 16.09.2020 года по объекту-аналогу (опора № 38).

Соглашаясь с доводами стороны Ответчика о наличии возможности предоставить Истцом необходимые документы для подтверждения расчетов по опоре-аналогу № 38, суд руководствуется представленной в материалы дела информацией о проведении тендера ПАО «Россети-Кубань» «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту опора № 38 и копии протокола заседания центральной конкурсной комиссии № 32110322566/3 от 05.07.2021 года, где с победителем принято решение о заключении договора и стоимости работ на сумму 14 626 713,20 руб. Такие документы имелись у Истца до даты обращения в компанию Ответчика с заявлением от 27.01.2022 года.

Уклоняясь от предоставления предусмотренных договором страхования документов, Истец недобросовестно отнесся к своим обязанностям, вводя Страховщика в заблуждение относительно действительной стоимости восстановительных работ по объектам опора №108 и №109, действовал на свой страх и риск, без должной заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и нормам действующего законодательства (применительно к ст. 2 и п. 2 ст. 50 ГК РФ).

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 311 ГК РФ Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязательства.

Условиями договора страхования № 453-073998/17 от 29.11.2017 года выплата по частям допустима, Кредитор ее принял, по мере поступления документов выплаты производились в установленный срок, размер выплаты страхового возмещения Истец не оспаривает.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права.

В силу положений ч.2 ст.328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Согласно ч. 1 ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии со ст. 406 ГКРФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Таким образом, доводы истца о нарушении Ответчиком сроков выплаты, своего подтверждения не нашли, произведенные выплаты, каждая в отдельности, не превышают установленного договором страхования совокупного 30-ти дневного срока, мотивированных доказательств, что привлечение к урегулированию заявленного события лосс-аджастера ООО «Айслэб», проведение осмотра страховщиком и направление запросов о предоставлении дополнительных доказательств для реализации права истца на получение страхового возмещения, каким-либо образом затронуло права и законные интересы стороной истца не представлено.

Более того, до настоящего времени акт о расследовании причин аварий в электроэнергетике введенный в действие Приказом Минэнерго России от 02.03.2010 N 90, во исполнение ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановления Правительства от 28.10.2009 N 846 о «Правилах расследования причин аварий в электроэнергетике», страховщику не предоставлен.

То обстоятельство, что СПАО «Ингосстрах» признало страховой случай и выплатило истцу страховое возмещение, в дальнейшем удовлетворило претензию Истца от 15.04.2022 года выплатив дополнительно сумму возмещения в размере                                      48 740 088,13 рублей может свидетельствовать лишь о его добросовестности.

Довод страхователя о том, что линии электропередач необходимо было восстановить в кратчайшие сроки не снимает обязанность страхователя уведомить о наступившем страховом случае страховщику и не лишает последнего права на проверку факта страхового случая и размера ущерба поврежденного имущества. Обратное может свидетельствовать о злоупотреблении истцом своими правами, что недопустимо. Более того, суду не предоставлено доказательств выполнения работ и затрат по спорным опорам № 108 и № 109.

Таким образом, доводы истца о нарушении Ответчиком сроков выплаты, своего подтверждения не нашли, позднее направление в адрес страховщика сведений о поврежденных объектах в данном случае также является основанием для отказа в выплате, поскольку это привело к увеличению суммы ущерба от страхового случая (7.1.1.2 договора, п. 13.2. Правил страхования). Данное обстоятельство подтверждается материалами осмотра, показаниями третьего лица, компании ООО «Айслэб».

Аналогичная позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.06.2020 года по делу № А32-19795/2019.

Суд считает, что представленными доказательствами подтверждается законность и последовательность действий страховщика и одновременная недобросовестность со стороны страхователя, принимавшего выплаты, обсуждавшего условия подписания соглашения и заявившего требования о взыскании неустойки.  

Таким образом, в удовлетворении требований следует отказать.

На основании того, что в удовлетворении требований о взыскании неустойки отказано, ходатайство ответчика о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации также следует оставить без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края 

 

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика об истребовании документов – оставить без удовлетворения.

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации – оставить без удовлетворения.

В иске отказать.

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной  инстанции - в течение двух месяцев  со дня  вступления  решения  в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                          Н.В. Семененко