АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-14726/2019 

Дата принятия решения –  11 декабря 2019 года.

Дата объявления резолютивной части –  04 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Аппаковой Л.Р.,

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань к Закрытому акционерному обществу "Коттеджный поселок "Загородная усадьба", г.Казань о взыскании 13496946.10 руб. долга и неустойки, 

с участием:

от истца– представитель ФИО2, 

от ответчика– представитель ФИО3, доверенность 16.08.2019; представитель ФИО4 по доверенности, ФИО5 по паспорту,

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Закрытому акционерному обществу "Коттеджный поселок "Загородная усадьба", г.Казань о взыскании 13496946.10 руб. долга и неустойки.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования. Дали устные  пояснения по делу.

Представитель ответчика заявленные требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве. Дали устные пояснения.

Исследовав материалы дела и заслушав представителей сторон, Арбитражный суд Республики Татарстан считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела установлено, что между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Заказчик) был заключен договор № 11042012 пд от 16.07.2012 г., (далее - договор), в соответствии с которым Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, оснащение оборудованием, инженерными системами в соответствии с проектной документацией (шифр 2762-ЭС), проведение экспертиз, испытаний, предъявление выполненных работ с участием эксплуатационной организацией и уполномоченным представителем ОАО «Сетевая компания» «Казанские электрические сети» Заказчику к приемке с надлежаще оформленной доверенностью, устранение дефектов, организация приемочной комиссии по приемке в гарантированную эксплуатацию 4 (Четырех) трансформаторных подстанций (ТП) и сетей электроснабжения 0,4-10 кВ согласно Локальных сметных расчетов (Приложения № I, № 2, № 3, № 4, № 5), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора на объекте: «Коттеджный поселок «Загородная усадьба» (далее по тексту «Объект»). 

Объект расположен по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский район, 11 км Оренбургского тракта. Кадастровый номер земельного участка 16:24:150305:0026.

Согласно пункту 1.2. Договора подрядчик обязуется получить в ОАО «Сетевая компания «Казанские электрические сети» справку о выполнение технических условий №218-114-1988 от 01.04.2010 г.

Полный объем и стоимость работ определяются Локальными сметными расчетами № 1, № 2, № 3, № 4. № 5 (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5).  (пункт 1.3. договора)

Согласно разделу 2 договора датой начала работ является «16» июля 2012года. Дата окончания работ  -  «31» декабря 2012 года. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и Графиком производства работ (Приложение № 6), являющимся неотъемлемой частью настоящею Договора.

В соответствии с пунктом 3.1 договора Заказчик обязан передать по акту приема- передачи участок для производства работ согласно рабочего проекта по настоящему Договору; Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в разделе 5 Договора;  вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

Согласно пункту 3.2 договора Подрядчик обязан:

- Представить Заказчику Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

- Принять по акту приема передачи строительную площадку по настоящему договору в течение З(Грех) дней с даты подписания настоящего Договора. Приемку осуществляет лицо, уполномоченное надлежащим образом (доверенностью, выданной организацией, подписанной директором и скрепленной печатью организации и т.п.).

- Представить Заказчику исполнительную документацию в 3 (Трех) экземплярах в соответствии с перечнем документов, необходимых для ввода в эксплуатацию Объекта, определенных действующей нормативной документацией РФ и РТ.

- Предоставить до начала работ приказы, удостоверения, действующие допуски ответственных за производство работ.

- Выполнить  все  работы  в  объеме и в сроки, предусмотренные настоящим  Договором   и  приложениями к нему в строгом соответствии с графиком производств, работ (Приложение № 6), согласовав с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте, в соответствии с требованиями проектов производства работ, разрабатываемых Подрядчиком и согласованных с заинтересованными организациями  и  Заказчиком, и сдать работы  Заказчику в  установленный срок в состоянии обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

- Вести всю техническую документацию согласно требованиям СНиП, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести журнал входного качества строительных материалов инженерного оборудования и комплектующих, составлять акты промежуточной приемки ответственных конструкций испытания и опробования оборудования, систем и сетей, и устройств внутри Объекта, в присутствии Заказчика, в том числе специальные журналы в соответствии с нормативной документацией РФ и РТ

- Укомплектовать Объект всеми необходимыми для производства работ материалами, оборудованием изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанным в проектной документации. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии них сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчиком одновременно с передачей материалов на строящийся Объект, оригиналы за 2(Два) рабочих дня до даты начала монтажа.

- Осуществлять ввоз и вывоз необходимых для строительства материалов и оборудования в соответствии с требованиями действующей Инструкции «О порядке организации внутриобъектового и пропускного режимов на объектах ЗАО «Коттеджный поселок «Загородная усадьба».

- Ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которою Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории Объект строительную техник) и оборудование) несет Подрядчик.

- Подрядчик отвечает за соответствие материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям с момента их приёмки на строящийся объект.

- Подрядчик обязуется осуществлять лабораторный контроль качества конструкций и металлов.

- Подрядчик обязуется выполнить работы, при условии готовности участка для производства работ, в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложением № 6), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, с момента внесения авансового платежа Заказчиком.

- Известить Заказчика в письменной форме о выполнении (готовности к сдаче) работ не менее, чем за 5 (Пять) дней.

- Сдать работы Заказчик по приемосдаточным актам в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

- Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему оборудование, инструменты и материалы.

- Производить ежедневную санитарную уборку на территории Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории от мусора, отходов и строительных материалов о производства работ.

-  За 3 (три) дня до начала работ предоставить Заказчику письмо с указанием ответственных за безопасное выполнение работ командированным персоналом на территорию Объекта. Перед началом работ 

- Подрядчик при выполнении работ обязуется полностью выполнять требования пропускного и внутри объектового режимов, установленных на Объекте.

- Обеспечить на Объекте выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии, рациональное использование территории, обеспечивать содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений, транспортных средств, организацию рабочих мест, производственных и бытовых помещений, проходов и проездов в соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности и производственной санитарии.

- Обеспечить производство работ- в соответствии со строительными нормами и правилами, проектной документацией и госстандартами, и требованиями эксплуатирующих организаций.

- Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты, установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком.

- Подрядчик обязуется выдать заключение о готовности Объекта к эксплуатации.

Согласно пункту 4.1 договора стоимость работ но настоящему Договору определяется Бюджетом систем электроснабжения 10 и 0.4 кВ (Приложение № 7 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 27 202 512 рублей 73 копейки (Двадцать семь миллионов двести две тысячи пятьсот двенадцать рублей 73 копейки), в том числе 11ДС 18% -4 149 535,84руб.

Расчеты за выполненные работы по настоящему Договору производятся Заказчиком после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок (форма № КС-3).

Согласно пункту 6.1 договора за нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает подрядчику за задержку начала приемки выполненных строительно-монтажных работ свыше 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пени в размере 0,1% err стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, начиная с 6 дня, но не более 5% стоимости работ; За задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы свыше 10 рабочих дней - пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, по не более 5% от договорной стоимости.

Истцом в адрес ответчика  направлены акты КС-2 на сумму 5 807 288,5 руб. и на сумму 4 168 993,1 руб. от 30.04.2018г., выполненные в апреле 2018г.(отчетный период с 01.04.2018 по 30.04.2018г.)

Ссылаясь на ненадлежащее исполнения ЗАО "Коттеджный поселок "Загородная усадьба" денежных обязательств по договору в части оплаты работ, предъявленных к оплате на основании актов формы КС-2, КС-3, подписанных подрядчиком в одностороннем порядке, ООО  "Восток-Энерго" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 9 976 281,60 руб. долга за выполненные работы и 3 520 664,5 руб. пени.

Возражая относительно исковых требований, ЗАО "Коттеджный поселок "Загородная усадьба" указывало на то, что предъявленные к оплате работы являются дополнительными работами, проведение которых не было согласовано сторонами. Кроме того, ответчик указывал на то, что договором предусмотрен порядок начала работ, которые не был соблюден истцом, при этом предусмотренные договором работы выполнены подрядчиком  и оплачены заказчиком  в 2017 году, договор является исполненным.

Исходя из предмета и условий договора подряда № 11042012пд от 16.07.2012, арбитражный суд приходит к выводу о его правовой квалификации как договора на выполнение подрядных работ, подпадающих в сферу правового регулирования параграфов 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 753 Гражданского кодекса РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 

Выполнение дополнительных работ по договору строительного подряда, то есть не учтенных в технической документации, должно производиться лишь с согласия заказчика, что следует из пункта 3 статьи 745 ГК РФ.

Если дополнительные работы не согласованы, но выполнены подрядчиком, то последний лишается права взыскания их стоимости и по договору, и в качестве неосновательного обогащения.

В соответствии с п. 1.3. Договора в редакции Дополнительного соглашения объем и стоимость работ была согласована сторонами и определялась в Локально сметных расчетах №№ 1-8.

Расчеты за выполненные работы по Договору производились Заказчиком после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (п. 4.4. Договора). Подписанию актов Заказчиком предшествовала приемка работ в соответствии с п. 5.3 и п. 5.4 Договора на основании исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком.

Срок окончания выполнения работ по Договору в редакции Дополнительного соглашения (п. 2.2. Договора) в объемах, установленных Локально сметными расчетах №№ 1-8, определен сторонами - 30.09.2012г. 

Заказчик свои обязательства перед Подрядчиком по Договору выполнил: подтвержденный объем работ, в том числе по прокладке низковольтных сетей, оплачен в полном объеме.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов по Договору на 31.12.2018. подписанному ООО «Восток-Энерго», задолженность ответчика перед истцом отсутствует.

Доказательства необходимости выполнения  дополнительных работ по прокладке низковольтных сетей в рамках данного Договора после 31.08.2015г. Заказчиком Подрядчику не поручалось, соответствующих дополнительных соглашений сторонами не заключалось. Доказательства обратного истцом не представлены.

Кроме того, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдано разрешение на допуск в эксплуатацию электрооборудования от 28.06.2017. Ответчиком в подтверждение обстоятельств выполнения работ в полном объеме по договору подряда представлена справка о выполнении электромонтажных работ по внутриплощадочным низковольтным сетям 0,4 кВ по объекту Коттеджный поселок «Загородная усадьба», подписанная истцом, по состоянию на 10.10.2019 года, согласно которому сметная стоимость с НДС составила 19 973 762,98 руб., подписанные объемы работ заказчиком составило 8 383 150,51 руб. последний акт выполненных работ датирован августом 2015 года.

Исходя из представленных в материалы дела документов и пояснений сторон условия договора подряда исполнены сторонами, претензий по качеству работ и  их оплате у сторон не имелось, следовательно, договор был исполнен в полном объеме в 2015 году. Иных доказательств  истцом не представлено.

Исходя из вышеуказанного, довод истца о том, что подрядные работы, предъявляемые к оплате, являются работами, выполняемыми в рамках договора, судом отклоняется  

Работы, представленные к оплате истцом, суд расценивает как дополнительные работы, не согласованные с ответчиком.

В соответствии с п.3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п.3 ст. 743 ГК РФ, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (п.4 ст. 743 ГК РФ).

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 10 информационного письма от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору подряда» разъяснил, что подрядчик, не выполнивший указанной обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ даже в тех случаях, когда такие работы были включены в акт приемки. Указанные акты могут лишь подтверждать факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на их оплату, если они не предусмотрены договором или дополнительным соглашением к нему.

Истец о необходимости выполнения дополнительных работ в рамках ранее заключенного Договора, не учтенных в технической документации, Ответчику не сообщал. Данный факт истцом не оспаривается.

28.06.2018 в адрес ответчика от Подрядчика поступило письмо № 314-18 от 27.06.2018г. с просьбой подписать и оплатить работы по прокладке низковольтных сетей согласно Актам КС-2 на сумму 5 807 288,5 руб. и на сумму 4 168 993,1 руб. от 30.04.2018г., выполненные в апреле 2018г.(отчетный период с 01.04.2018 по 30.04.2018г.) 

Ссылаясь на Договор, Подрядчиком в нарушение порядка, предусмотренного п.5.3 и п.5.4. Договора были предоставлены Акты КС-2 без предоставления акта скрытых работ и подтверждающих выполнение работ исполнительных документов. 

Заказчик не подписал предъявленные Акты КС-2 от 30.04.2018г. и отказался оплачивать предъявленные работы со ссылкой на Договор и ст. 743 ГК РФ, направив соответствующий ответ № 114/18-1 от 05.07.2018г. на письмо Подрядчика № 314-18 от 27.06.2018г.

В последствии техническими специалистами Заказчик и Подрядчика была проведена оценка объемов работ, предъявленных Подрядчиком к приемке по Договору за весь период его действия с учетом переданной Заказчику исполнительной документацией. Факт выполнения работ, указанных в Актах КС-2, направленных в адрес Заказчика 27.06.2018г., в результате совместно проведенных мероприятий контроля подтвержден не был.

Истец доказательства, опровергающие доводы ответчика, не представил.

При изложенных обстоятельствах, требования истца удовлетворению не подлежат.

В силу статей 9 и 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, а также имеющихся в материалах дела.

На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, установил, что ответчик свои обязательства выполнил надлежащим образом, что подтверждается материалами дела.

Исходя из чего, требования истца о взыскании пени в размере 3 520 664,5 руб. в связи с неисполнением обязательств возникших из договоров подряда, удовлетворению не подлежат, поскольку вина ответчика в нарушении обязательства по неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства стороной истца в данном случае не доказана. И, напротив, стороной ответчика представлены доказательства исполнения оговоренных обязательств по договору подряда.

В порядке статьи 110 АПК РФ, судебные расходы подлежат отнесению на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований. В связи с тем, что  при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, расходы по государственной пошлине в сумме 90 485 руб. подлежат взысканию в доход федерального бюджета.  

В резолютивной части решения судом допущена опечатка: вместо «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 90 485 руб. государственной пошлины.» указано : «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 902 485 руб. государственной пошлины.»

В соответствии со ст.179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Считать правильным в резолютивной части второй абзац: «Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 90 485 руб. государственной пошлины.»

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Восток-Энерго", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 90 485 руб. государственной пошлины.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЛ.Р. Аппакова