ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-27595/2024

31 марта 2025 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     19 февраля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме  31 марта 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  судьи И.Н.Барминой,

судей   С.М.Кротова, В.В.Черемошкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В.Потаповой,

при участии:  

от истца представителя  ФИО1 по доверенности от 21.11.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-36604/2024)  ООО  «Ленинградский завод металлоконструкций  МеталлГарант» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2024 по делу № А56-27595/2024 (судья  Бутова Р.А.), принятое 

по иску ООО «МОДУЛЬ» 

к  ООО  «Ленинградский завод металлоконструкций  МеталлГарант»

о взыскании, 

установил:

ООО "МОДУЛЬ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО  «Ленинградский завод металлоконструкций  МеталлГарант» (далее – ответчик, ООО «ЛЗМ МГ») о взыскании 1 495 077,49 руб. долга по оплате выполненных и принятых работ и 213 211,08 руб. долга по выплате ? части гарантийного удержания по договору субподряда № 0112/2021 от 01.12.2021, 11 386, 55 руб. долга по выплате ? части гарантийного удержания по дополнительному соглашению № 1 от 20.12.2021 к договору, 224 002, 92 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты работ по договору по стоянию на 05.08.2024, 1 383, 47 руб.  неустойки за нарушение сроков оплаты по дополнительному соглашению № 1 от 20.12.2021 к договору по состоянию на 05.08.2024. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 02.10.2024 с ООО «ЛЗМ МГ» в пользу ООО «Модуль» взыскано 1 719 675 руб. 12 коп. долга, 225 396 руб. 39 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты работ по состоянию на 05.08.2024 с ее последующим начислением с 06.08.2024 по день уплаты долга по ставке 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки по день ее уплаты и 32 451 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

ООО  «Ленинградский завод металлоконструкций  МеталлГарант» подана апелляционная жалоба, в которой просили изменить решение, изложив резолютивную часть в следующей редакции: «взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛЗМ МГ» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Модуль» (ИНН 

<

***>) 1 495 077,49 руб. долга, 198 097,77 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты работ по состоянию на 05.08.2024 с ее последующим начислением с 06.08.2024 по день уплаты долга по ставке 0,05% от суммы долга за каждый день, просрочки по день ее уплаты и 29932 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части заявленных требований отказать.». По мнению подателя апелляционной  жалобы, судом первой инстанции не принят во внимание довод ответчика о том, что согласно п. 3.6.1. и п. 7.2. Договора субподряда № 0112/2021 от 01.12.2021 право на получение гарантийного удержания возникает у Субсубподрядчика: первой части – не ранее 04.09.2024, второй части – на ранее 04.09.2025. Как указывал сам истец в исковом заявлении, установленный п. 4.4.2 Договора срок в 30 (тридцать) рабочих дней для приемки результата Работ по Итоговому акту приемки работ от 04.09.2023 по Договору истек 07.11.2023, соответственно этой датой (07.11.2023) акт считается подписанным.  Поскольку, как указано выше, итоговый акт был подписан 07.11.2023, право на получение гарантийного удержания возникает у Субсубподрядчика: первой части – не ранее 07.11.2024, второй части – на ранее 07.11.2025. Таким образом, по состоянию на дату вынесения резолютивной части решения суда (05.08.2024) истец не получил право на выплату гарантийного удержания. Поскольку основное требование не подлежит удовлетворению, дополнительно требование о взыскании неустойки за просрочку выплаты гарантийного удержания также подлежит отклонению. Соответственно, по состоянию на 05.08.2004 истец имел право на выплату основного долга в размере 1495077,49 руб. и неустойки за период с 15.11.2023 по 05.08.2024 в сумме 198097,77 руб., общая сумма задолженности, подлежащая взысканию с ответчика должна была составить 1693175,26 руб. (1495077,49 + 198097,77). Вывод суда первой инстанции о наступлении срока для выплаты гарантийного удержания, по мнению ответчика, противоречит имеющимся в деле доказательствам, как следствие, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Истец в отзыве и в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, решение просил оставить без изменения, изложив мотивированную позицию по всем доводам ответчика. Истец считает, что при вынесении решения суд первой инстанции на основании представленных в дело материалов всесторонне и в полном объеме исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, а также применил закон, подлежащий применению по данному делу, и оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Законность и обоснованность определения решения в апелляционном порядке с применением части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в отсутствие подателя апелляционной  жалобы, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав доводы подателя апелляционной жалобы, возражения истца в совокупности и взаимосвязи с собранными доказательствами, апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда по фактическим обстоятельствам и иного применения норм материального и процессуального права.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов  дела, между истцом (Субсубподрядчик) и ответчиком (Субподрядчик) заключены:

Договор субподряда № 0112/2021 от 01.12.2021 (далее - Договор) на выполнение работ по устройству металлоконструкций каркаса здания выше отм. 0.000 (Корпус 1) (далее - Работы по Договору);

Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2021 (далее - ДС № 1) к Договору на выполнение работ по монтажу металлоконструкций Корпус 2 ,3 ,4 (далее - Работы по ДС № 1) на объекте строительства «Научно-образовательный комплекс» федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с аллеей Котельникова).

Согласно абз. 1 п. 3.1.1. Договора общая стоимость Работ по Договору является предельной (максимальной), определена сторонами на основании Расчета договорной цены (Приложение № 3 к Договору) и составляет 8 528 443 руб., в т.ч. НДС 20 % - 1 421 407 руб. 17 коп.

В силу п. 3.1.2. Договора окончательная стоимость Работ определяется на основании Расчета договорной цены и фактически выполненных Субсубподрядчиком и принятых Субподрядчиком Работ в полном объеме. В любом случае окончательная стоимость Работ по Договору не может превышать общую предельную (максимальную) стоимость Работ, указанную в п. 3.1. Договора, заложенную при расчете договорной цены. 

На основании п. 4.1. Договора приемка Субподрядчиком Работ по Договору производится после завершения выполнения Субсубподрядчиком в полном объеме предусмотренных Договором работ, включая обеспечение получения документации, указанной в п. 1.4., 4.4. Договора, необходимой для подписания Акта законченного строительством объекта и получения Заключения о соответствии объекта, сдачи полного пакета надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных п. 4.2. Договора, подписания сторонами форм № КС-2 и форм № КС-3 в порядке, предусмотренном п. 4.2. Договора (включая его подпункты), предоставления Субсубподрядчиком технической и исполнительной документации на предусмотренный в отчетных документах объем выполненных Работ.

Подтверждением выполнения Субсубподрядчиком и приемки Субподрядчиком выполненных в полном объеме Работ по Договору является подписанный сторонами Итоговый акт приемки работ.

Согласно п. 4.2.3. Договора Субсубподрядчик ежемесячно за отчетный период в срок не позднее 20 числа отчетного месяца представляет Субподрядчику оформленные надлежащим образом следующие документы:

а)         Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 - 3 (три) экз.;

б)         Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 - 3 экз.;

в)         счет-фактуру;

г)         счет на оплату;

д)         накопительную ведомость (Журнал учета выполненных работ) по форме № КС-ба - 2 экз.;

е)         отчет переработчика по форме Приложения № 11 к Договору - 2 экз.;

ж)        отчет об оказанных услугах по выполнению механизированных работ с использованием башенных кранов с указанием количества используемых башенных кранов и количества рабочих смен - 2 экз.;

з)         акт (акты) с расчетом стоимости потребленных энергоресурсов - 2 (два) экз.;

и)        исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии со СНиП и условиями Договора, удостоверенную в установленном порядке, - 6 (шесть) экз. в бумажном виде и 1  экз. в электронном виде с приложением перечня документов, в т. ч. на электронном носителе, с копиями сертификатов на оборудование и документами, подтверждающими гарантийные обязательства на оборудование;

к) справки с полигона размещения отходов и товарно-транспортных накладные;  

л) документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с Приложением № 6.1. 

н) товарные накладные на оборудование (если в Работы включена поставка/установка оборудования).

В соответствии с п. 4.2.4. Договора Субподрядчик в течение 20 рабочих дней рассматривает представленные Субсубподрядчиком документы, получает, совместно с Субсубподрядчиком, согласование от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль, и возвращает Субсубподрядчику 1 экземпляр отчетных документов, подписанных со своей стороны, либо отказывается полностью или частично от их подписания и представляет Субсубподрядчику возражения, оформленные в письменной форме.

Все указанные в п. 4.2.3 Договора документы должны представляться Субсубподрядчиком единым пакетом в отношении всего объема фактически выполненных за отчетный период Работ.

Согласно п. 4.4.1. Договора после завершения всех Работ по Договору в полном объеме Субсубподрядчик производит подготовку результата выполненных Работ к приемке Субподрядчиком и в письменной форме уведомляет Субподрядчика о готовности результата Работ к приемке. Подписание сторонами Итогового акта приемки работ осуществляется после подписания в установленном Договором порядке форм № КС-2 и форм № КС-3 на весь объем выполненных по Договору Работ и предоставления полного комплекта подписанной представителем строительного контроля Субподрядчика исполнительной документации.

Одновременно с уведомлением Субсубподрядчик представляет Субподрядчику:

Итоговый акт приемки выполненных работ, составленный по форме Приложения № 7 к Договору, в 2 экземплярах;

полный комплект технической/исполнительной документации отдельной книгой по всем выполненным Работам в 2  экземплярах, согласованной с Заказчиком, и гарантийные письма для Заказчика, справку городских и/или иных эксплуатационных организаций (владельца коммуникаций) о выполнении технических условий, обеспечении требуемых условий эксплуатации вынесенных/переустроенных инженерных сетей и сооружений. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются только в части Работ, выполняемых Субсубподрядчиком по Договору. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Субподрядчику в сброшюрованном виде в твердом переплете;

комплект оригиналов документов, необходимых и достаточных для подписания Акта законченного строительством объекта и получения Заключения о соответствии объекта, в части Работ, выполняемых Субсубподрядчиком по Договору.

На основании п. 4.4.2. Договора Субподрядчик в течение 30 рабочих дней с даты получения уведомления Субсубподрядчика и документации, указанной в п. 4.4.1. Договора, производит проверку результата выполненных Субсубподрядчиком Работ. Проверка результата выполненных Субсубподрядчиком Работ по Договору производится совместно с полномочными представителями Заказчика, лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), проектной организации, осуществляющей авторский надзор. Уклонение Субсубподрядчика от направления своих полномочных представителей для осуществления проверки результата выполненных Работ по Договору не препятствует к проведению указанной проверки представителями Заказчика, контролирующих (надзирающих) лиц и Субподрядчика.

При отсутствии замечаний к результату Работ и документации, указанной в п. 4.4.1. Договора, Субподрядчик и Субсубподрядчик подписывают Итоговый акт приемки работ по форме Приложения № 7 к Договору.

При наличии замечаний к результату Работ и документации, указанной в п. 4.4.1. Договора, стороны фиксируют перечень замечаний с указанием срока их устранения в порядке, определенном п. 4.4.3. Договора. В этом случае Субсубподрядчик обязан устранить замечания в установленный срок и повторно предъявить результат Работ и документацию Субподрядчику в порядке, определенном в разделе 4 Договора. Субподрядчик вправе отказаться от подписания Итогового акта приемки работ также в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию.

В силу абз. 5 п. 3.5.1. Договора платеж в порядке финансирования производится не позднее 15 рабочих дней после подписания Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при условии предоставления Субсубподрядчиком документов в соответствии с п. 4.2. Договора (включая его подпункты).

Произведенное Субподрядчиком на основании п. 3.5.1. Договора Удержание подлежит накоплению и выплачивается Субсубподрядчику после подписания Итогового акта приемки работ на следующих условиях: после подписания Итогового акта приемки работ Субподрядчик со дня подписания Итогового акта приемки работ, а далее ежегодно по истечении каждых последующих 12 месяцев выплачивает Субсубподрядчику по 1/2 накопленной суммы Удержания в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Субсубподрядчиком Субподрядчику счета на выплату соответствующей суммы Удержания.

В силу п. 13.3.1. Договора любые уведомления, направляемые сторонами в соответствии с Договором, должны оформляться в письменной форме, доставляться курьерской службой доставки, нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении и должны быть адресованы соответствующей стороне и доставляться по указанным ниже адресам либо иному адресу, сообщенному соответствующей стороной другой стороне в письменной форме.

Согласно п. 13.3.2. Договора уведомления Субподрядчику направляются по адресу: 192177, 

<

...>, лит. П, пом. ЮН, оф. 1, а равно по адресу электронной почты: info@metallqarant-spb.ru.

05.09.2023 Истец направил Почтой России (РПО № 80085788529512) в адрес Ответчика комплект подлинников документов в рамках исполнения обязательств по сдаче-приемке Работ по Договору:

1)         Счет на оплату № 112 от 04.09.2023 г. - 1 экз.;

2)         Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 04.09.2023 г. (на весь объем Работ по Договору) - 3 экз.;

3)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 04.09.2023 г. (на весь объем Работ по Договору) - 3 экз.;

4)         Счет-фактура № 81 от 04.09.2023 г. - 1 экз.;

5)         Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 6 от 04.09.2023 г. (на промежуточный объем Работ по Договору) - 3 экз.;

6)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 6 от 04.09.2023 г. (на промежуточный объем Работ по Договору) - 3 экз.;

7)         Журнал учета выполненных работ (по форме КС-ба) (на промежуточный объем Работ по Договору) - 2 экз.;

8)         Итоговый акт приемки работ от 04.09.2023 г. - 2 экз.;

9)         Опись о сдаче исполнительной документации - 1 экз.

Общая стоимость выполненных Истцом по Договору Работ составила 8 528 443 (Восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20 % - 1 421 407 руб. 17 коп.

Согласно Отчету об отслеживании РПО № 80085788529512 вышеуказанный комплект документов получен Ответчиком 25.09.2023.

Установленный п. 4.2.4. Договора срок в 20 рабочих дней для приемки промежуточного объема Работ по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 6 от 04.09.2023  и Справке о стоимости выполненных работ из затрат (по форме КС-3) № 6 от 04.09.2023 по Договору истек 23.10.2023 в 23 ч. 59 мин., а установленный п. 4.4.2 Договора срок в 30 рабочих дней для приемки результата Работ по Итоговому акту приемки работ от 04.09.2023 по Договору истек 07.11.2023.

Мотивированного отказа от приемки промежуточного объема Работ по Договору, а равно результата Работ по Договору, либо замечаний к выполненным Работам Истцу от Ответчика в течение указанных сроков не поступало, в связи с чем направленный в РПО № 80085788529512 комплект документов, согласно положений ст. 753 ГК РФ, подписан Истцом в одностороннем порядке с отметкой о немотивированном уклонении Ответчика от  подписания.

К моменту подачи искового заявления Истцом в адрес Ответчика были направлены: Претензия Исх. № 292 от 29.11.2023 (РПО № 80081490892616, получена Ответчиком 06.12.2023);

Досудебная претензия Исх. № 326 от 15.12.2023 (РПО № 80081491373602, не получена Ответчиком и возвращена Истцу 17.01.2024).

Оценив представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд первой инстанции пришел к мотивированным выводам, что промежуточный объем Работ по Договору, а равно результат Работ по Договору, считаются выполненными Истцом надлежащим образом, принятыми Ответчиком без замечаний и подлежащими оплате. На дату подачи искового заявления выполненные Истцом и принятые Ответчиком Работы по Договору последним не оплачены. Нарушение срока оплаты Работ по Договору составляет 129 календарных дней (с 15.11.2023 по 21.03.2024). По состоянию на 21.03.2024 Ответчиком не выплачена ? части гарантийного удержания по Договору в размере 213 211 рублей 08 копеек, в т.ч. НДС 20 % (счет направлен Ответчику по электронной почте 22.11.2023, Почтой России - 29.11.2023), хотя установленный п. 3.6.1. Договора срок уплаты истек 06.12.2023. Нарушение Ответчиком срока выплаты суммы гарантийного удержания составляет 106 календарных дней (с 07.12.2023 по 21.03.2024).

Доводы подателя апелляционной жалобы объективного подтверждения не нашли и  отклонены, как не опровергающие выводов суда первой инстанции и не создающие оснований для отмены обжалуемого  судебного акта.

В силу ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (ч. 4 ст. 753 ГК РФ).

В случае необоснованного отказа заказчика от подписания направленного ему подрядчиком акта выполненных работ, односторонний акт выполненных работ признается надлежащим подтверждением фактического выполнения работ на указанную в нем сумму.

Исходя из установленной ч. 4 ст. 753 ГК РФ презумпции действительности одностороннего акта сдачи-приемки работ, именно заказчик должен доказать обоснованность мотивов отказа от подписания акта, в том числе наличие в работах подрядчика таких недостатков, которые согласно п. 6 ст. 753 ГК РФ носят существенный и неустранимый характер, исключающий возможность использования результата работ по назначению.

В соответствии с ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 3.5.1. Договора расчеты в порядке финансирования по Договору субподряда № 0112/2021 от 01.12.2021 производятся при условии надлежащего исполнения Субсубподрядчиком своих обязательств по Договору и соблюдения порядка подписания документов в соответствии с п. 4.2. Договора (включая его подпункты).

Сумма денежных средств, подлежащая выплате Субподрядчиком в порядке осуществления финансирования по Договору, определяется в соответствии с условиями Договора, исходя из объемов и стоимости работ за отчетный период, зафиксированных формой  КС-2 и формой КС-3, подписанными сторонами, за вычетом сумм произведенного авансирования в порядке, предусмотренном п. 3.4.5 Договора, удержания в размере 5 % от зафиксированной за отчетный период стоимости работ, составляющих Удержание, а также за вычетом расходов, сумм пени, неустоек, штрафов, подлежащим возмещению в соответствии с п. 3.8. Договора. Конкретная сумма Удержания за отчетный период определяется Сторонами при подписании формы № КС-2 и указывается в форме № КС-3 отдельной строкой.

Согласно разделу 1 Договора Удержанием признается способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субсубподрядчика по Договору в соответствии со ст. 329 ГК РФ (если предусмотрено Договором). Стороны признают, что Удержание не является удержанием имущества Субсубподрядчика, а представляет собой согласованный способ обеспечения исполнения Субсубподрядчиком обязательств по Договору.

В соответствии с п. 3.8. Договора их суммы денежных средств, подлежащей выплате Субсубподрядчику в порядке финансировании и/или выплату Удержания (если применимо) по Договору, подлежат возмещению:

расходы, понесенные Субподрядчиком в рамках возмещения ущерба (убытков), причиненного Субсубподрядчиком (его соисполнителями) Субподрядчику и третьим лицам (сумма расходов определяется на основании документов, подтверждающих расходы (сметы, накладные и др.));

расходы, понесенные Субподрядчиком в случае оплаты им работ, выполненных третьими лицами (подрядными организациями, привлеченными Субподрядчиком к выполнению работ, в случае их невыполнения Субсубподрядчиком) по поручению Субподрядчика в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Субсубподрядчиком обязательства по выполнению работ (устранение недостатков выполненных работ) по Договору (сумма расходов определяется на основании документов, подтверждающих расходы (договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ));

суммы пени, неустоек, штрафов, начисленных в соответствии с условиями Договора, и определяемых в требовании Субподрядчика;

расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее) государственных органов, а также суммы штрафов, выплаченных Субподрядчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Субсубподрядчика или его соисполнителя;

расходы на оплату энергоресурсов, потребляемых Субсубподрядчиком во время выполнения работ на строительной площадке в случае, если обеспечение энергоресурсами места производства работ Субсубподрядчика осуществляется посредством подключения к точке, предоставленной Субподрядчиком;

расходы на оплату оказанных услуг по выполнению механизированных работ башенным краном, при условии простоя либо отставания согласно Графику производства работ по вине Субсубподрядчика.

При этом стороны определили в Договоре порядок выплаты удержания в размере 5 %. Согласно п. 3.6., 3.6.1. Договора произведенное Субподрядчиком на основании п. 3.5.1. Договора Удержание подлежит накоплению и выплачивается Субсубподрядчику после подписания Итогового акта приемки работ на следующих условиях: после подписания Итогового акта приемки работ Субподрядчик со дня подписания Итогового акта приемки работ, а далее ежегодно по истечении каждых последующих 12 (двенадцати) месяцев выплачивает Субсубподрядчику по 1/2 накопленной суммы Удержания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Субсубподрядчиком Субподрядчику счета на выплату соответствующей суммы Удержания.

Выплата удержания производится Ответчиком в следующем порядке:

1)        со дня подписания Итогового акта приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления счета на выплату – 1/2 часть удержания;

2)        далее - ежегодно по истечении 12 (двенадцати) календарных месяцев в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления счета на выплату – 1/2 часть удержания.

Согласно п. 3.6.2. Договора после подписания Итогового акта приемки работ Субподрядчик вправе предоставить Субподрядчику обеспечение исполнения Субсубподрядчиком обязательств по устранению недостатков в течение гарантийного срока по Договору в виде банковской гарантии-2 в соответствии с п. 3.12. Договора. В случае предоставления Субсубподрядчиком Субподрядчику в обеспечение исполнения Субсубподрядчиком обязательств по устранению недостатков в течение гарантийного срока по Договору банковской гарантии-2,

Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Субсубподрядчику остаток Удержания на основании предоставленного Субсубподрядчиком счета на оплату.

В случае предоставления Истцом банковской гарантии-2 Ответчиком подлежала бы выплате на основании п. 3.6.2. Договора ?  часть удержания (остаток Удержания), который согласно п. 3.6.1. подлежит выплате по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Итогового акта приемки работ - 04.09.2023, поскольку указанный акт является односторонним в силу ч. 4 ст. 753 ГК РФ и подписан Истцом 04.09.2023. При этом п. 3.12. Договора, на который ссылается п. 3.6.2. Договора, в Договоре отсутствует, что свидетельствует о том, что банковская гарантия-2 должна выдаваться на все 24 (двадцать четыре) месяца гарантийного срока Договором не установлено.

Таким образом, какой-либо привязки Удержания и порядка его выплаты к непосредственно гарантийному сроку на все 24 (двадцать четыре) месяца в Договоре не имеется, равно как отсутствует и противоречие п. 7.2. Договора.

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы или в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 176, 110, 223, 268, 269 ч. 1, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение арбитражного суда первой инстанции от 02.10.2024  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.

Взыскать с ООО  «Ленинградский завод металлоконструкций  МеталлГарант» в федеральный бюджет 30000 руб. 00 коп. государственной пошлины по апелляционной  жалобе. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.Н. Бармина

Судьи

С.М. Кротов

 В.В. Черемошкина