ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-182262/23-89-1038

13 декабря 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2023 года                                                              

Полный текст решения изготовлен 13 декабря 2023 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬ" (119435, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛАЯ ПИРОГОВСКАЯ УЛ., Д. 18, СТР. 1, ПОМЕЩ. XI - КОМН. 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2007, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-КОМ ИНЖИНИРИНГ" (196158, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ, ПУЛКОВСКОЕ Ш., Д. 30, К. 4, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 008, КОМ. А, В, Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.09.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 781001001) о взыскании 10 052 689, 10 руб.

при участии:

от истца: ФИО2, по дов. от 09.03.2023; 

от ответчика:  ФИО3, по дов. от 24.04.2023.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании штрафа в размере 1 120 000 руб., неустойки в размере 8 932 689, 14 руб.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, заслушав мнения лиц, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на следующее.

Между ООО «ЭнергоСеть» (Истец, Подрядчик) и ООО «НТ-Ком Инжиниринг» (Ответчик, Субподрядчик) заключен договор подряда от 23.09.2022 № 20923/03/ЭС-ВСП.

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить комплекс строительно-монтажных работ с поставкой материалов (далее -Работы) и сдать Подрядчику указанные Работы в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых Субподрядчиком работ, а Подрядчик обязуется принять результат Работы и оплатить его. Выполнение Работ должно производиться Субподрядчиком в соответствии с Рабочей документацией и Технической документацией.

Пунктом 3.1. Договора установлено, что начальный срок выполнения работ -23.09.2022, а срок завершения работ - 01.11.2022.

Пунктом 3.2. Договора установлено, что сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) устанавливаются в соответствии с графиком выполнения работ, разрабатываемым Субподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора и утверждаемым Подрядчиком. Результатами выполненных этапов работ являются объемы работ, зафиксированные Сторонами в актах о приемке выполненных работ.

Приложением № 2 к Дополнительному соглашению от 11.10.2022 № 3 к Договору Сторонами утвержден «График производства работ», в соответствии с которым срок завершения работ устанавливается на 44 календарную неделю. Также установлено, что срок выполнения работ может быть соразмерно увеличен в случае переноса сроков выполнения пп. 1-8 табличной части указанного графика.

Ранее в адрес Субподрядчика направлялись письма о необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору: от 26.10.2022 № ЭС/8824, от 30.11.2022 № ЭС/10058, от 12.12.2022 № ЭС/10469, от 22.12.2022 №ЭС/10836, от 29.12.2022 № ЭС/11060, от 03.04.2023 № ОП/СП/177 с указанием выявленных Подрядчиком нарушений и приложением соответствующих актов, фиксирующих указанные нарушения: акт о нарушении требований охраны труда от 28.11.2022, акты о нарушении требований пожарной безопасности от 29.11.2022№3и от 18.01.2023 № 2.

Субподрядчик не предпринял никаких мер по устранению выявленных нарушений, а именно не выполнены следующие договорные обязательства:

1. Не предоставлен проект производства работ (ППР);

2. Работы по заключенному Договору (с учетом дополнительных объемов работ по заключенным дополнительным соглашениям к Договору) не выполнены в полном объеме в согласованные Сторонами сроки;

3. Низкое качество выполнения работ;

4. Не соблюдаются/допускаются нарушения норм техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ;

5. Для прохода работников не установлены переходные мостики;

6. Не предоставлены следующие документы:

- скан-копия удостоверения проверки по электробезопасности работников (не менее II гр. по ЭБ) на работников, работающих с электроинструментом;

- скан-копия удостоверения проверки по электробезопасности на руководителя, ответственного за электрохозяйство (не менее IV гр. по ЭБ);

- приказ о назначении лиц, ответственных за оформление и выдачу наряда-допуска;

- не предоставлены наряды-допуски на производство работ повышенной опасности;

- не предоставлены журналы инструктажа на рабочем месте;

- не предоставлены журнала инструктажа по пожарной безопасности;

- не предоставлены удостоверения и протоколы о внеочередной проверке знаний в связи с введением в действие правил по охране труда с 01.09.2022.

- не предоставлены протоколы и удостоверения Пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 (обязательный минимум для дополнительного профессионального обучения в области пожарной безопасности для ответственных лиц).

Кроме того, Подрядчиком обнаружено резкое снижение численности работников Субподрядчика, выполняющих работы по заключенному Договору. Данное обстоятельство имеет прямое отношение к качеству и скорости выполнения работ.

В рамках Договора Сторонами согласовано Приложение № 3 «Ответственность Субподрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства работ и охране труда». С учетом выявленных нарушений к Субподрядчику подлежат применению штрафные санкции в размере:

10 000 руб. - Отсутствие приказа руководителя строительной организации с назначении лица, ответственного за производство работ на Объект (п. 1.1);

10 000 руб. - Отсутствие удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами (п. 1.2);

150 000 руб. - Отсутствие стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проект; производства работ на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки (п. 1.3);

50 000 руб. - Отсутствие журналов: производства работ, сварочных и бетонных работ проверки знаний и инструктажей по технике безопасности, входного контроля и других специальных журналов видов работ (п. 1.4);

150 000 руб. - Невыполнение своевременного, корректного заполнения и ведение оформления журналов указанных в п. 1.4 (п. 1.4.1);

10 000 руб. - Отсутствие средств пожаротушения (пожарный щит, мобильная установка для пожаротушения в городке, огнетушители, пожарная сигнализация в каждом бытовом помещении) (п. 3.8);

100 000 руб. - Невыполнение требований и предписаний строительного контроля (3.11.1);

30 000 руб. - Неисключение использования непроектных материалов или их замену без согласования с Заказчиком (п. 3.11.2);

30 000 руб. - Отсутствие комплекта исполнительной документации на предъявляемую к освидетельствованию работу (п. 3.11.3);

30 000 руб. - Эксплуатация лестниц, трапов, галерей: наличие галерей, настилов, трапов на путях прохода (п. 4);

50 000 руб. - Нарушения требований электробезопасности (п. 8);

50 000 руб. - Нарушения требований пожарной безопасности (п. 9);

400 000 руб. - Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней - бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик (п. 11.1);

50 000 руб. - Установка к местам производства работ лестниц, соответствующих СНиП 12-04.2002 (п. 11.5).

Общей размер штрафных санкций, подлежащих применению к Субподрядчику в соответствии с Приложением № 3 к Договору, составляет 1 120 000 руб. 

Кроме того, пунктом 12.1. Договора установлено, что Субподрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Договору в полном объеме с высоким качеством, передаваемой Подрядчиком Проектной и Рабочей документацией (со штампом «В производство работ»), требованиям соответствующих нормативных документов, а также своевременное устранение всех недостатков (дефектов).

Пунктом 13.2. Договора установлена ответственность Субподрядчика за нарушение начального, конечного, промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства Работ - неустойка в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до момента их надлежащего выполнения.

Общая стоимость работ по Договору (с учетом заключенных Дополнительных соглашений) составляет 61 240 653 (Шестьдесят один миллион двести сорок тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 64 копейки, в том числе НДС 20%.

Стоимость выполненных и принятых работ по Договору по состоянию на 14.07.2023 составляет 26 210 500 (Двадцать шесть миллионов двести десять тысяч пятьсот) рублей 16 копеек.

Таким образом, стоимость невыполненных работ по состоянию на 14.07.2023 составляет 35 030 153 (Тридцать пять миллионов тридцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 48 копеек, а размер договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ составляет  8 932 689,14 руб.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием по оплате штрафных санкций, которая оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для подачи настоящего иска  в суд.

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Из п. 1 ст. 716 ГК РФ следует, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Ответчик, в нарушение положений ст. 716 ГК РФ, не воспользовался правом на приостановление выполнения работ при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок, истец надлежащим образом не уведомлен об обнаружении указанных обстоятельств, в связи с чем ответчик лишился права ссылаться на нарушение истцом встречных обязательств.

Кроме того, такое поведение подрядчика не отвечает принципу добросовестности участников гражданского оборота (статья 10 ГК РФ).

Таким образом, суд приходит выводу об обоснованности требований истца в части взыскания договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ на сумму 8 932 689,14 руб., поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств исполнения договорных обязательств в установленный договором срок. Представленный истцом расчет требований в данной части признан судом арифметически и методологически выполненным верно.

Доводы ответчика, приведенные в отзыве на исковое заявление, оценены судом, признаны необоснованными, несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений. 

Требования в части взыскания штрафа в размере 1 120 000 руб. не подлежат удовлетворению, поскольку истцом в материалы дела не представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих их обоснованность, не представлено ни одного документа, фиксирующего факты нарушения ответчиком договорных обязательств.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В связи с вышеизложенным, исковые требования подлежат удовлетворению в части.

Расходы по госпошлине распределены на основании ст. 110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст. 10, 309, 310, 330, 702, 708, 716 ГК РФ и ст.ст. 4, 8, 9, 65, 71, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-КОМ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬ" (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 8 932 689, 14 руб., госпошлину в размере 65 100, 55 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко