АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                       Дело № А65-15213/2022

Дата принятия решения –  08 сентября 2022 года.

Дата объявления резолютивной части –  05 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Воробьева Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Петон Констракшн», г. Уфа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гемонт», г.Нижнекамск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору субподряда №R109SС.0378 от 13.07.2021 за выполненные работы в марте 2022, апреле 2022 в размере 35 617 069,73 рублей, задолженности в связи с вынужденным простоем по актам простоя от 11.04.2022, 19.04.2022 в размере 5 016 000 рублей с НДС, отложенного платежа в размере 5 049 701, 33 руб.,

при участии третьего лица ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ИНН 

<

***>),

с участием:

от истца – ФИО2 по доверенности от 20.04.2022,

от ответчика – не явился,

от третьего лица – не явился,

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Петон Констракшн» (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Гемонт» (ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда №R109SС.0378 от 13.07.2021 за выполненные работы в марте 2022, апреле 2022 в размере 35 617 069,73 рублей, задолженности в связи с вынужденным простоем по актам простоя от 11.04.2022, 19.04.2022 в размере 5 016 000 рублей с НДС, отложенного платежа в размере 5 049 701, 33 руб.

Третьим лицом по делу привлечено ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, дал пояснения.

Ответчик в судебное заседание не явился, ранее иск не признал, представил отзыв в котором просил в удовлетворении отказать. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, 13.07.2021 между ООО «Гемонт» (Подрядчик) и ООО «Петон Констракшн» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда №R109SC0378 от 13.07.2021 (Договор).

Предметом Договора является монтаж трубопроводов в рамках проекта «Завод этилен-600» по адресу Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона (п.1 дополнительного соглашения №1 от 07.09.2021, п.4.1 Договора).

В силу п.2 дополнительного соглашения № 1 к Договору стоимость работ определяется на основании приложения № 1 (смета и единичные расценки) и составляет 739 895 851,98 рублей в том числе НДС 20%.

Согласно п.7 дополнительного соглашения № 1 приемка выполненных работ осуществляется сторонами на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Договором предусмотрена обязанность по оплате промежуточных платежей (раздел 9 Договора).

Для получения промежуточной оплаты Субподрядчик обязан до 25 числа каждого месяца предоставить акты сдачи - приемки фактически выполненных работ по форме КС-2 (п.9.1.1 Договора).

29.04.2022 Истец, в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком и возникшим в связи с этим вынужденным простоем рабочих был вынужден направить заявление об отказе от договора.

Подрядчик обязался выплатить Субподрядчику аванс в размере 5% от стоимости работ, что составляет 36 994 792, 6 рублей. Авансом погашается часть задолженности за выполненные работы путем уменьшения оплаты ее стоимости на 5% от стоимости, подлежащей оплате в подписанном акте КС-2 (п. 3, 4 Дополнительного соглашения №1).

Между тем, Подрядчик выполнил указанное обязательство частично и оплатил аванс 10 000 000 рублей (ПП №5084 от 06.10.2021).

Кроме того, в силу пункта 10.1.1. Договора 5% от суммы промежуточных актов удерживается Подрядчиком в качестве денежного обеспечения (отложенный платеж).

Из суммы оплаты промежуточных платежей за выполненные работы вычитается стоимость питания, топлива, расходных материалов, которые предоставлял Ответчик (п.9.1.2. Договора).

Таким образом, промежуточный платеж составляет стоимость выполненных работ за вычетом части оплаченной авансом, отложенного платежа, удерживаемого Ответчиком и стоимости предоставленных Ответчиком услуг.

Формула расчета промежуточных платежей за выполненные работы выглядит следующим образом: X = А - (А*5%) - (А*5%) - Б;

X - сумма, подлежащая оплате за текущий месяц;

А - стоимость выполненных работ (КС-2, КС-3);

А*5% - отложенный платеж (п.10.1.1 Договора);

А*5% - аванс, подлежащий зачету (п. 4 Дополнительного соглашения №1);

Б - расходы на оплату питания, топлива, расходных материалов и др. (п.9.1.2. Договора) 

Сумма задолженности за март 2022.

По результатам выполнения работ в марте 2022 представителями сторон подписывались ведомости выполненных работ и запросы на проведение инспекции, а также ведомость выполненных работ по неразрушающему контролю.

Указанные документы подтверждают объемы и качество работ, и на их основе в дальнейшем составлялись акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Письмом ПКТ-1408 от 25.03.2022 в адрес Ответчика были направлены подписанные со стороны ООО «Петон Констракшн» акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, журнал производства работ, с приложением вышеназванных промежуточных документов.

В силу пункта 9.1.1. Подрядчик обязан принять работы в течение 15 дней, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки работ.

Между тем, Ответчик от подписания актов уклонился, мотивированный отказ от их подписания не направил.

В случае непредставления подписанного акта или мотивированного отказа от приемки работ Истец вправе самостоятельно подписать указанные акты в соответствии с п.4 ст.753 ГК РФ (п.9.1.1. Договора).

Ответчик не осуществил приемку работ и в связи с этим Истец, по истечение срока на приемку работ и направление мотивированного отказа, 19.04.2022 направил письмо ПКТ-1828 о том, что акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ за март 2022 года являются подписанными.

Согласно условиям договора, стоимость работ согласно справке КС-3, составляет 20 746 597, 28 рублей - А;

Отложенный платеж- 1 037 329,86 рублей - (А*5%);

Сумма, подлежащая зачету из перечисленного аванса - 1 037 329,86 рублей -(А*5%);

Стоимость оказанных Ответчиком услуг - 295 740 рублей (УПД № 492) - Б

Таким образом, задолженность ООО «Гемонт» перед ООО «Петон Констракшн» за март 2022 составила 18 376 197,56 рублей с НДС (20 746 597,28 - 1037 329,86-1 037 329,86 - 295 740).

Сумма задолженности за апрель 2022.

По результатам выполнения работ в апреле 2022 представителями сторон подписывались ведомости выполненных работ и запросы на проведение инспекции.

Кроме того, заключения о качестве выполненных работ, а также пленки с проверками за все время выполнения работ были переданы по реестру передачи заключений и пленок.

Указанные документы подтверждают объемы и качество работ, и на их основе в дальнейшем составлялись акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Письмом ПКТ-1852 от 20.04.2022 в адрес Ответчика были направлены подписанные со стороны ООО «Петон Констракшн» акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, журнал производства работ, ведомость выполненных работ и запросы на проведение инспекции.

В силу пункта 9.1.1. Подрядчик обязан принять работы в течение 15 дней, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки работ.

Между тем, Ответчик от подписания актов уклонился, мотивированный отказ от их подписания не направил.

В случае непредставления подписанного акта или мотивированного отказа от приемки работ Истец вправе самостоятельно подписать указанные акты в соответствии с п.4 ст.753 ГК РФ (п.9.1.1. Договора).

Стоимость работ согласно справке КС-3, составляет 19 638 409, 97 рублей - А;

Отложенный платеж- 981 920, 5 рублей - (А*5%);

Сумма, подлежащая зачету из перечисленного аванса - 981 920, 5 рублей - (А*5%);

Таким образом, задолженность ООО «Гемонт» перед 000 «Петон Констракшн» за апрель 2022 составила 17 674 568,97 рублей с НДС (19 638 409, 97 - 981920,5 -981 920, 5).

По результатам выполнения работ в апреле 2022 представителями сторон подписывались ведомости выполненных работ и запросы на проведение инспекции.

Указанные документы подтверждают объемы и качество работ, и на их основе в дальнейшем составлялись акты о выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости работ КС-3.

Кроме того, заключения о качестве выполненных работ, а также пленки с проверками за все время выполнения работ были переданы по реестру передачи заключений и пленок.

Указанные документы подтверждают объемы и качество работ, и на их основе в дальнейшем составлялись акты о выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости работ КС-3.

Письмом ПКТ-1852 от 20.04.2022 в адрес Ответчика были направлены подписанные со стороны ООО «Петон Констракшн» акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости работ КС-3, журнал производства работ, ведомость выполненных работ и запросы на проведение инспекции.

В силу пункта 9.1.1. Подрядчик обязан принять работы в течение 15 дней либо направить письменный мотивированный отказ от приемки работ.

Между тем, ответчик от подписания акта уклонился, мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ не направил.

В случае непредставления подписанного акта или мотивированного отказа от приемки работ Истец вправе самостоятельно подписать указанные акты в соответствии с п.4 ст.753 ГК РФ (п.9.1.1. Договора).

Стоимость работ согласно справке КС-3, составила 19 638 409, 97 рублей - А;

Отложенный платеж- 981 920, 5 рублей - (А*5%);

Сумма, подлежащая зачету из перечисленного аванса - 981 920, 5 рублей - (А*5%);

Стоимость оказанных услуг и переданных материалов - 433 696,8 рублей (УПД № 552 на 331 816,8 рублей + УПД № 607 на 101 880 рублей) - Б

Таким образом, задолженность ООО «Гемонт» перед ООО «Петон Констракшн» за апрель 2022 составила 17 240 872,17 рублей с НДС (19 638 409, 97 - 981920,5 -981 920, 5-433 696,8).

В связи с уменьшением стоимости работ, выполненных в апреле, общий размер просроченной задолженности за выполненные Истцом в марте и апреле 2022 работ составил 35 617 069,73 рублей с НДС (18 376 197, 56 + 17 240 872,17).

В силу п.9.1.4 Договора Истец уведомляет Ответчика о простое. Сумма оплачивается Истцу исходя из подписанного между сторонами акта простоя. При этом, стоимость простоя составляет 1000 рублей без НДС за 1 человеко-час, а оплата производится в течение 30 календарных дней с момента получения и подписания акта вынужденного простоя.

В силу условий указанного пункта Договора Ответчик обязан либо подписать акты простоя в течение 7 дней, либо направить мотивированный отказ от их подписания. В случае неисполнения обязанности Подрядчика по подписанию актов простоя или не направления в установленный срок письменного мотивированного отказа от его подписания, направленные Субподрядчиком Акты простоя являются подписанными и подлежат оплате.

Письмом ПКТ-1731 от 12.04.2022 в адрес Ответчика были направлены акты вынужденного простоя по вине Подрядчика за период с 04.04.2022 по 11.04.2022.

Письмом ПКТ-1852 от 20.04.2022 в адрес Ответчика были направлены акты вынужденного простоя по вине Подрядчика за период с 12.02.2022 по 19.04.2022.

Ответчик не подписал акты простоя, а также не представил мотивированный отказ от их подписания.

Письмом от 29.04.2022 в адрес Ответчика были направлены УПД № 363 от 11.04.2022 на сумму 2 364 000 рублей с НДС и УПД № 364 от 19.04.2022 на сумму 2 652 000 рублей с НДС, для оплаты стоимости простоя работников ООО «Петон Констракшн» с 04.04.2022 по 19.04.2022.

Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения (ст.406.1 ГК РФ).

Общая стоимость неоплаченных простоев составила 5 016 000 рублей с НДС (2 364 000 + 2 652 000).

Ответчик не подписал акты вынужденного простоя и не представил мотивированного отказа от их подписания, и, следовательно, они являются подписанными в одностороннем порядке. 

В соответствии с п.10.1.1 Договора 5% от суммы с НДС промежуточных актов удерживается в качестве денежного обеспечения.

29.04.2022 ООО «Петон Констракшн» направило в адрес ООО «Гемонт» заявление об отказе от договора в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по договору и возникшим в связи с этим вынужденным простоем работников.

В условиях договора отсутствуют положения, устанавливающий срок возврата отложенного платежа в случае досрочного расторжения договора в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязанностей.

В силу п. 2 ст.314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования об его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

В уведомлении об отказе от договора от 29.04.2022 содержится требование о возврате отложенного платежа в сумме 5 049 701,33 рублей, которая рассчитана как сумма всех отложенных платежей, подлежащих удержанию в соответствии с условиями договора за каждый месяц выполнения работ.

Формула расчета отложенного платежа за каждый месяц - А*5%, где А - стоимость выполненных работ с НДС.

Стоимость работ согласно справке КС-3 № 1, составляет 18 724 696, 44 рублей - А;

Отложенный платеж, удержанный в Ноябре 2021 - 936 234,82 рублей - (А*5%);

Стоимость работ согласно справке КС-3 № 2, составляет 5 071 966,67 рублей - А;

Отложенный платеж, удержанный в Декабре 2021- 253 598, 33 рублей - (А*5%); Стоимость работ согласно справке КС-3 № 3, составляет 16 691 068,58 рублей - А; Отложенный платеж, удержанный в Январе 2022 - 834 553,43 рублей - (А*5%); Стоимость работ согласно справке КС-3 № 4, составляет 20 121 287,69 - А; Отложенный платеж, удержанный в Феврале 2022- 1 006 064,38 рублей - (А*5%); Стоимость работ согласно справке КС-3 № 5, составляет 20 746 597, 28 рублей - А; Отложенный платеж, удержанный в Марте 2022 - 1 037 329,86 рублей - (А*5%); Стоимость работ согласно справке КС-3 № 6, составляет 19 638 409, 97 рублей - А; Отложенный платеж, удержанный в Апреле 2022 - 981 920, 5 рублей - (А*5%); 

Таким   образом,   сумма   удержанного   отложенного   платежа,   которая   подлежит взысканию, составила 5 049 701, 33 рублей (936 234,82+253 598,33+834 553,43+1 006 064,38+1 037 329,86+981 920,5).

29.04.2022 года ООО «Петон Констракшн» направило в адрес ООО «Гемонт» претензию с требованием о погашении задолженности.

Поскольку ответа на претензию не последовало истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд, выслушав доводы истца, исследовав представленные материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения работ истцом подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, справками КС-2 и Актами о приемке выполненных работ.

Доказательств полной выполненных работ ответчик в суд не представил. 

Доводы ответчика изложенные в отзыве суд считает несостоятельными.

ООО «Петон Констракшн» исполнило все принятые на себя обязательства до момента расторжения договора, в условиях неисполнения заказчиком обязательств по оплате.

Предметом Договора является монтаж трубопроводов в рамках проекта «Завод этилен-600» по адресу Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона (п.1 дополнительного соглашения №1 от 07.09.2021, п.4.1 Договора).

Согласно п.7 дополнительного соглашения № 1 приемка выполненных работ осуществляется сторонами на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Договором предусмотрена обязанность по оплате промежуточных платежей (раздел 9 Договора).

Для получения промежуточной оплаты Субподрядчик обязан до 25 числа каждого месяца предоставить акты сдачи - приемки фактически выполненных работ по форме КС-2 (п.9.1.1 Договора).

29.04.2022 Истец, в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком и возникшим в связи с этим вынужденным простоем рабочих был вынужден направить заявление об отказе от договора.

По результатам выполнения работ в марте и апреле 2022 представителями сторон подписывались ведомости выполненных работ и запросы на проведение инспекции, а также ведомость выполненных работ по неразрушающему контролю.

Кроме того, заключения о качестве выполненных работ, а также пленки с проверками за все время выполнения работ были переданы по реестру передачи заключений и пленок.

Указанные документы подтверждают объемы и качество работ, и на их основе в дальнейшем составлялись акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Письмом ПКТ-1408 от 25.03.2022 (работы в марте) и ПКТ-1852 от 20.04.2022 (работы в апреле) в адрес Ответчика были направлены подписанные со стороны ООО «Петон Констракшн» акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, журнал производства работ, с приложением вышеназванных промежуточных документов.

В силу пункта 9.1.1. Подрядчик обязан принять работы в течение 15 дней, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки работ.

Между тем, Ответчик подписанные акты не вернул, мотивированный отказ от их подписания не направил.

В случае непредставления подписанного акта или мотивированного отказа от приемки работ Истец вправе самостоятельно подписать указанные акты в соответствии с п.4 ст.753 ГК РФ (п.9.1.1. Договора).

В связи, этим работы в соответствии с условиями договора считаются принятыми.

В силу статей 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон, вытекающие из договора подряда, носят встречный характер (статья 328 Кодекса), где на стороне подрядчика имеется обязательство выполнить работу в соответствии с условиями договора и передать ее результат заказчику, а на стороне заказчика с учетом статей 711, 720 данного кодекса лежит обязанность по приемке и оплате выполненных подрядчиком работ.

Исходя из положений статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить работы подрядчика в размере, сроки и порядке, которые установлены договором.

Истец выполнил, а Ответчик уклонился от принятия работ, не представил мотивированный отказ от приемки работ, в связи с чем акты выполненных работ считаются подписанными на основании п.9.1.1 Договора.

Довод о не подписании актов вынужденного простоя не состоятелен в силу п.9.1.4 Договора.

В силу п.9.1.4 Договора Истец уведомляет Ответчика о простое. Сумма оплачивается Истцу исходя из подписанного между сторонами акта простоя. При этом, стоимость простоя составляет 1000 рублей без НДС за 1 человеко-час, а оплата производится в течение 30 календарных дней с момента получения и подписания акта вынужденного простоя.

В силу условий указанного пункта Договора Ответчик обязан либо подписать акты простоя в течение 7 дней, либо направить мотивированный отказ от их подписания. В случае неисполнения обязанности Подрядчика по подписанию актов простоя или не направления в установленный срок письменного мотивированного отказа от его подписания, направленные Субподрядчиком Акты простоя являются подписанными и подлежат оплате.

Письмом ПКТ-1731 от 12.04.2022 в адрес Ответчика были направлены акты вынужденного простоя по вине Подрядчика за период с 04.04.2022 по 11.04.2022.

Письмом ПКТ-1852 от 20.04.2022 в адрес Ответчика были направлены акты вынужденного простоя по вине Подрядчика за период с 12.02.2022 по 19.04.2022.

Ответчик подписанные акты простоя не вернул, а также не представил мотивированный отказ от их подписания.

Письмом от 29.04.2022 в адрес Ответчика были направлены УПД № 363 от 11.04.2022 на сумму 2 364 000 рублей с НДС и УПД № 364 от 19.04.2022 на сумму 2 652 000 рублей с НДС, для оплаты стоимости простоя работников ООО «Петон Констракшн» с 04.04.2022 по 19.04.2022.

Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения (ст.406.1 ГК РФ).

Общая стоимость неоплаченных простоев составляет 5 016 000 рублей с НДС (2 364 000 + 2 652 000).

Ответчик не подписал акты вынужденного простоя и не представил мотивированного отказа от их подписания, следовательно, они являются подписанными в одностороннем порядке.

Довод ответчика о сроке исполнения отложенного платежа также является несостоятельным, поскольку договор не предусматривает срока возврата отложенного платежа в случае его расторжения, и, следовательно, применяются положения, установленные в ст.314 ГК РФ.

В соответствии с п.10.1.1 Договора 5% от суммы с НДС промежуточных актов удерживается в качестве денежного обеспечения.

29.04.2022 ООО «Петон Констракшн» направило в адрес ООО «Гемонт» заявление об отказе от договора в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по договору и возникшим в связи с этим вынужденным простоем работников.

В условиях договора отсутствуют положения, устанавливающий срок возврата отложенного платежа в случае досрочного расторжения договора в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязанностей.

Сам факт досрочного расторжения договора исключает возможность окончательной приемки работ, и означает наличие лишь промежуточных результатов работ.

Невозможность проведения окончательной приемки в совокупности с отсутствием положений о возврате отложенного платежа на случай досрочного расторжения договора является основанием для применения общего правила о сроке исполнения обязательств которые установлены в ст.314 ГК РФ.

В силу п. 2 ст.314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования об его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

В уведомлении об отказе от договора от 29.04.2022 содержится требование о возврате отложенного платежа в сумме 5 049 701,33 рублей, которая рассчитана как сумма всех отложенных платежей, подлежащих удержанию в соответствии с условиями договора за каждый месяц выполнения работ.

Таким образом, в связи с расторжением договора отложенный платеж подлежит возврату.

Учитывая вышеизложенное, суд находит требование истца обоснованными и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гемонт», г.Нижнекамск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Петон Констракшн», г. Уфа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору субподряда №R109SС.0378 от 13.07.2021 за выполненные в марте 2022, апреле 2022 работы в размере 35 617 069,73 рублей, задолженности в связи с вынужденным простоем по актам простоя от 11.04.2022, 19.04.2022 в размере 5 016 000 рублей с НДС, отложенный платеж в размере 5 049 701, 33 руб., расходы по государственной пошлине в размере 200 000 руб.

Исполнительный лист выдать по заявлению.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья                                                                                                                 Р.М. Воробьев