21/2023-192665(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Новосибирск Дело № А45-18675/2021 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

требования по первоначальному иску удовлетворить частично.  

Признать недействительным односторонний отказ Главного управления  Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области от  исполнения государственного контракта № 1921177100572540629709400/55 от  22.07.2019.  

Признать незаконными действия Главного управления Министерства  Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Новосибирской области по начислению неустойки за  просрочку исполнения обществом с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Союз военных строителей» обязательств по контракту   № 1921177100572540629709400/55 от 22.07.2019 в части строительства  Вещевого склада и Продовольственного склада.  

Признать недействительным требование Главного управления  Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области об  осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 35265-04 от  

19ю07.2019 об уплате 419201,74 рублей и применить последствия  недействительности требования - обязать Главное управление Министерства  Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Новосибирской области возвратить 419201,74 рубль  Сибирскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк» в течение 7 дней с момента  вступления решения в законную силу.  

Признать недействительным соглашение № 5 от 07.09.2020 к контракту   № 1921177100572540629709400/55 от 22.07.2019.  

Взыскать с Главного управления Министерства Российской Федерации по  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Новосибирской области в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Союз военных строителей» 40831957,94 рублей  убытков, 500000 рублей неустойки (штрафа), а также 525420 рублей судебных  расходов по оплате стоимости экспертизы и 184000 рублей судебных расходов  по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований по первоначальному иску к  Главному управлению Министерства Российской Федерации по чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской  области отказать.  

В удовлетворении исковых требований к Федеральному государственному  учреждению «Сибирский спасательный центр МЧС России» отказать.  

По встречному иску взыскать с общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» в  пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Новосибирской области 51374099,72 рублей неосновательного обогащения и  3292847,03 рублей неустойки (штрафа).  

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску  отказать.  

В результате зачета встречных требований взыскать с общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных  строителей» в пользу Главного управления Министерства Российской  Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий по Новосибирской области 12625568,81 рублей неосновательного  обогащения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Союз военных строителей» в доход федерального бюджета 44400  рублей государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный  суд.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья С.Г. Зюзин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 23:11:00

Кому выдана Зюзин Сергей Геннадьевич