ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 09АП-30286/2024

г. Москва

11 июня 2024 года

Дело № А40-209665/23

Резолютивная часть постановления оглашена: 29 мая 2024 года

Полный текст постановления изготовлен: 11 июня 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Семикиной О.Н., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Саидмурадовым А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "Кронштадт"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2024 по делу № А40-209665/23

по иску (заявлению) акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к акционерному обществу "Кронштадт" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

третье лицо: Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

о взыскании задолженности по договору №1921187340741452408002795/291/2020 от 17.02.2020,

по встречному исковому заявлению АО "Кронштадт"

к АО "Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика"

о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 23.04.2024,

от третьего лица: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

АО "Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "Кронштадт" о взыскании задолженности по договору № 1921187340741452408002795/291/2020 от 17.02.2020 в размере 13 800 155,52 руб., неустойки в размере 1 646 473,12 руб. за период с 01.06.2021 по 01.09.2023. 

АО "Кронштадт" заявлено встречное исковое заявление к АО "Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика" о взыскании неустойки по договору № 1921187340741452408002795/291/2020 от 17.02.2020 за просрочку исполнения обязательств по подэтапам № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.1 в размере 1 962 985,96 руб. за период с 01.12.2020 по 01.02.2022.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство обороны Российской Федерации.

Решением от 11.03.2024 в удовлетворении первоначального искового заявления отказано, в удовлетворении встречного искового заявления отказано.

Не согласившись с судебным актом, АО "Кронштадт" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит суд отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2024 по делу № А40-209665/23-15-1707 в части отказа в удовлетворении встречного иска, принять в этой части новый судебный акт, которым встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме, в остальной части решение суда оставить без изменения.

В судебном заседании апелляционного суда АО "Кронштадт" поддержало доводы апелляционной жалобы, АО "Научно-производственный комплекс "Альтернативная энергетика" явку не обеспечило.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее. 

Как следует из материалов дела, 17.02.2020 между АО «НПК «Альтэн» (далее - исполнитель) и АО «Кронштадт» (далее - заказчик) заключен договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (далее - СЧ ОКР)№ 1921187340741452408002795/291/2020. На основании п. 1.1 договора АО «НПК «Альтэн» обязуется в установленный договором срок выполнить составную часть опытно-конструкторской работы в объеме, соответствующую качеству, результату, установленные требованиям технического задания на составную часть опытно-конструкторской работы и своевременно сдать заказчику ее результат, а заказчик обязуется принять и оплатить такой результат. Основанием для заключения договора является государственный контракт №1921187340741452408002795 от 27.12.2019, заключенный между Министерством обороны Российской Федерации и АО «Кронштадт» на выполнение опытно-конструкторской работы.

Работы по договору выполняются поэтапно в сроки, указанные ведомостью исполнения работ (приложение №2 к договору). Цена договора определяется протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены на выполнение СЧ ОКР (приложение №3 к договору) и заключением 244 ВП на ориентировочную (уточняемую) цену СЧ ОКР. Для перевода ориентировочной (уточняемой) цены этапа СЧ ОКР работ в фиксированную исполнитель не позднее чем за 90 календарных дней до даты окончания работ в соответствии с ведомостью исполнения (приложение №2) направляет заказчику протокол согласования фиксированной цены работ в 2 (двух) экземплярах, оформленный в соответствии с приложением №4 к договору, заключение 244 ВП МО РФ исполнителя на фиксированную цену работ и комплект расчетно-калькуляционных материалов в соответствии с формами по Приказу ФАС от 26.08.2019 №1138/19 на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях (CD-R) в форматах электронных копий и таблиц.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн»,  в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение№2) к договору в срок с 01.04.2020 - 30.09.2020 был выполнен этап 2 «Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов (ОО) АБК». Ориентировочная цена 2 этапа СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 6 949 222,04 руб. 04 коп.

По счету №15 от 23.04.2020 платежным поручением №11919 от 26.05.2020 перечислен аванс в размере 80% от цены этапа по ориентировочной цене в размере 5 559 377,63 руб.

16.09.2020 актом приемки этапа 2 СЧ ОКР «Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов в (ОО) АКБ» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №19 от 09.04.2021 на окончательный расчет за 2 этап в размере 979 473,72 руб.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №2) к договору в срок с 01.07.2020 - 30.11.2020 был выполнен подэтап 3.1 «Изготовление ООО АКБ для стендовых испытаний на базе АО «Кронштадт».

Ориентировочная цена подэтапа 3.1 СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 5 940 648,13 руб. 13 коп. По счету №35 от 08.07.2020 перечислен аванс платежным поручением № 12421 от 28.08.2020 на сумму 1 782 194,44 руб. 44 коп., платежным поручением №16439 от 26.04.2021 на сумму 261 388,52 руб. 52 коп., платежным поручением №14816 от 28.12.2020 на сумму 926 741,11 руб. 11 коп., в размере 30% от цены подэтапа 3.1 по ориентировочной цене всего в размере 2 970 324,07 руб.

29.10.2021 актом приемки подэтапа 3.1 СЧ ОКР «Изготовление ООО АКБ для стендовых испытаний на базе АО «Кронштадт» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет № 66 от 13.12.2021 на окончательный расчет за подэтап 3.1 в размере 1 025 769,56 руб..

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №2) к договору в срок с 01.07.2020 - 30.12.2020 был выполнен подэтап 3.2 «Изготовление ОО АКБ для ПИ и МВИ (5шт.)».

Ориентировочная цена подэтапа 3.2 СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 9 901 080,21 руб. 21 коп. По счету №17 от 30.03.2021 платежным поручением №16440 от 26.04.2021 на сумму 435 647,53 руб. 53 коп., по счету №36 от 08.07.2020 платежным поручением №12422 от 28.08.2020 на сумму 2 970 324,06 руб. 06 коп., платежным поручением №14817 от 28.12.2020 на сумму 1 544 568,51 руб. 51 коп., перечислен в размере 4 950 540,10 руб. 10 коп.

29.10.2021 актом приемки подэтапа 3.2 СЧ ОКР «Изготовление ОО АКБ для ПИ и МВИ (5шт.)» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №67 от 13.12.2021 на окончательный расчет за подэтап 3.2 в размере 1 709 615, 94 руб.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение№2) к договору в срок с 01.01.2021 - 30.04.2021 был выполнен подэтап 3.3 «Проведение ПИ ОО АКБ, присвоение литеры «О».

Ориентировочная цена подэтапа 3.3 СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 7 961 308 руб. 13 коп. По счету №6 от 15.02.2021 платежным поручением №15683 от 02.03.2021 перечислен аванс в размере 50% от цены подэтапа 3.3 по ориентировочной цене в размере 3 980 654,33 руб.

01.02.2022 актом приемки подэтапа 3.3 СЧ ОКР «Проведение ПИ ОО АКБ, присвоение литеры «О» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №13 от 16.03.2022на окончательный расчет за подэтап 3.3 в размере 3 362 847,39 руб.

АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №2) к договору в срок с 01.05.2021 - 15.06.2021 был выполнен подэтап 3.4 «Изготовление ОО АКБ для МВИ (2шт.)».

Ориентировочная цена подэтапа 3.4 СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 4 183 070,14 руб. По счету №27 от 02.06.2021 платежным поручением №18934 от 25.11.2021 перечислен аванс в размере 50% от цены подэтапа 3,4 по ориентировочной цене в размере 2 091 535,07 руб.

06.12.2021 актом приемки подэтапа 3.4 СЧ ОКР «Изготовление ОО АКБ для МВИ (2шт.)» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №8 от 15.02.2022 на окончательный расчет за подэтап 3.4 в размере 1 034 384,55 руб.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №1) к дополнительному соглашению №6 от 16.08.2022 к договору в срок с 01.05.2021 - 30.09.2021 был выполнен подэтап 3.6 «Изготовление и передача 3-х комплектов ОО АКБ, ЗИП АКБ для летных испытаний в составе ОО Комплекса БпЛА».

Ориентировочная цена подэтапа 3.6 СЧ ОКР определена протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 16 732 280,54 руб. По счету №29 от 02.06.2021 платежным поручением №18936 от 25.11.2021 перечислен аванс в размере 50% от цены подэтапа 3.6 по ориентировочной цене в размере 8 366 140,27 руб.

01.02.2022 актом приемки подэтапа 3.6 СЧ ОКР «Изготовление и передача 3-х комплектов ОО АКБ, ЗИП АКБ для летных испытаний в составе ОО Комплекса БпЛА» работа принята заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №16 от 23.03.2022 на окончательный расчет за подэтап 3.6 в размере 3 213 046,95 руб.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №1) к дополнительному соглашению №6 от 16.08.2022 к договору в срок с 01.03.2021 - 24.12.2021 был выполнен подэтап 3.7.1 «Разработка РКД и изготовление ОО ЗРУ».

Ориентировочная цена подэтапа 3.7.1 СЧ ОКР определена Протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены и составила 5 227 788,57 руб. По счёту №46 от 27.08.2021 платежным поручением №18329 от 30.09.2021 на сумму 1 551 607,64 руб., платёжным поручением №18330 от 30.009.2021 на сумму 2 613 894,29 руб. перечислен аванс в размере 75% от цены подэтапа 3.7.1 по ориентировочной цене в размере 4 165 501,93 руб.

01.02.2022 актом приемки подэтапа 3.7.1 СЧ ОКР «Разработка РКД и изготовление ОО ЗРУ», работа принята Заказчиком. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №14 от 16.03.2022 на окончательный расчет за подэтац 3.7.1 в размере 1 031 900,29 руб.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» в соответствии с ведомостью исполнения работ (приложение №1) к дополнительному соглашению №6 от 16.08.2022 к договору, в срок с 24.12.2021 - 15.06.2022 был выполнен подэтап 3.7.2 «Проведение ПИ ОО ЗРУ, корректировка РКД на ЗРУ и доработка ОО (при необходимости) присвоение литеры «О» (1шт.)».

По счету №47 от 27.08.2021 платежным поручением №3151 от 16.02.2022 перечислен аванс в размере 50% от цены подэтапа 3.7.2 по ориентировочной цене в размере 2 484 102,42 руб.

01.08.2022 актом приемки подэтапа 3.7.2 СЧ ОКР «Проведение ПИ ОО ЗРУ, корректировка РКД на ЗРУ и доработка ОО (при необходимости) присвоение литеры «О» (1шт.)» работа принята заказчиком.

Протоколом согласования фиксированной цены СЧ ОКР (подэтапа 3.7.2) установлена фиксированная цена 3 927 219,54 руб. АО «НПК «Альтэн» выставлен счет №51 от 03.10.2022на окончательный расчет за подэтап 3.7.2 в размере 1 443 117,12 руб.

В соответствии с п.6.9 договора окончательный расчет между сторонами за выполненные по настоящему договору работы осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненного этапа СЧ ОКР и счета исполнителя в течении 10 банковских дней с даты получения финансовых средств от государственного заказчика по соответствующему этапу договора.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» задолженность окончательного расчета по этапу 2 составляет 979 473,72 руб.; подэтапу 3.1 - 1 025 769,56 руб.; подэтапу 3.2 - 1 709 615,94 руб.; подэтапу 3.3 - 3 362 847,39 руб.; подэтапу 3.4 - 1 034 384,55 руб.; подэтапу 3.6 - 3 213 046,95 руб.; подэтапу 3.7.1 - 1 031 900,29 руб.; подэтапу 3.7.2 - 1 443 117,12 руб., а всего в размере 13 800 155,52 руб.

Поскольку задолженность не погашена, АО «НПК «Альтэн» начислены проценты в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) за период с 01.06.2021 по 01.09.2023 в общем размере 1 646 473,12 руб.

Отказывая в удовлетворении первоначального иска в части задолженности, суд первой инстанции руководствовался ст. 307, 309, 310, 421 ГК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном  оборонном заказе", п. 6.4 и 6.9 договора, а также исходил из того, что обязательство по осуществлению окончательного расчета не наступили. Поскольку в удовлетворении основного требования судом первой инстанции отказано, акцессорное требование о взыскании процентов также было отклонено.

В указанной части решение не обжалуется.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, обоснованно исходил из отсутствия вины АО «НПК «Альтэн» в нарушении сроков выполнения работ применительно к ст. 401, п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 777 ГК РФ.

Согласно п. 1.1 договора исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить составную часть опытно-конструкторской работы в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным договором, требованиями Технического задания на составную часть опытно-конструкторской работы (далее - ТЗ на СЧ ОКР) и своевременно сдать заказчику ее результат.

Содержание, сроки выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), стоимость этапов СЧ ОКР, а также перечень ожидаемых результатов СЧ ОКР и документации, содержащей сведения о результатах СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), определены ведомостью исполнения, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2 к настоящему договору) (п. 2.2 договора). Дополнительным соглашением № 6 к договору введена в действие ведомость исполнения к договору в новой редакции.

В соответствии с п. 4.3 договора датой исполнения обязательств по отдельным этапам СЧ ОКР является дата подписания заказчиком (представителем заказчика) акта приемки выполненного этапа СЧ ОКР, датой исполнения СЧ ОКР по договору считается дата подписания заказчиком (представителем заказчика) итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР (приложение № 6 в договору) при условии выполнения обязательств по всем этапам СЧ ОКР, указанным в ведомости исполнения к настоящему договору.

Акт приемки выполненной СЧ ОКР (Этапа СЧ ОКР) - документ, подтверждающий выполнение исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим договором по Форме 16 ГОСТ РВ 15.203-2001 (п. 1.3.6). Подэтапы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.1, 3.7.2 выполнены с просрочкой.

В соответствии с п. 8.3 договора в случае нарушения сроков выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), предусмотренных договором, заказчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем.

Согласно расчету АО «Кронштадт» размер неустойки составляет 1 962 985,96 руб.

Как следует из материалов дела, просрочка исполнения этапов СЧ ОКР со стороны исполнителя произошла по вине заказчика, о чем было указано ответе на претензию. Так, отчетная документация по этапу 2 «Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов (ОО) АКБ» направлены 16.09.2020 исх.№971/А, акт приемки этапа 2 направлен АО «Кронштадт» 05.04.2021 исх. №БАС/2100-21 в адрес АО «НПК «Альтэн», что также нарушает условия приёмки и оформления акта.

В соответствии с п.5.10 договора продолжительность приемки результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) определяется временем, необходимым для проверки результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в объеме требований, установленных договором и ТЗ. При этом время приемки не должно превышать время приемки, указанное в ГОСТ РВ 15.203-2001, не более 30 календарных дней с момента получения заказчиком отчетных документов. Не приемка этапа 2 не позволяла заказчику вовремя приступить к этапу 3 по вине заказчика. Так, как для того чтобы приступить к этапу 3 запустить в производство, необходимо было получить от заказчика согласованный комплект документов с отметкой заказчика.

Отчетная документация по этапу 2 «Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытных образцов (ОО) АКБ» направлена в адрес АО «Кронштадт» 16.09.2020 исх.№971/А, акт приемки этапа 2 направлен АО «Кронштадт» 05.04.2021 исх. №БАС/2100-21 в адрес АО «НПК «Альтэн», что нарушило условия приёмки и оформления акта.

При заключении договора АО «НПК «Альтэн» не мог предвидеть наступившие обстоятельства, что невозможность поставки возникнет в связи с нарушением иностранными контрагентами поставщика своих обязанностей. Согласно п. 8.14 договора, Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В этап 3.1 и 3.2 входило закупка комплектующих для изготовления опытных образцов. В частности, поставка комплектующих Российского производства с приемкой 5, предприятиями кооперации осуществляется с большими задержками (Исх.№200БСЮ-09/843 от 08.07.2020г. АО «Аксион-холдинг»), что привело к задержке изготовления опытных образцов БКУ.

Как установлено судом первой инстанции, аккумуляторные модули батарей были изготовлены без задержек, проблемы возникли с изготовлением и отладкой блока контроля и управления (БКУ).

Выполнение дополнительных требований (дополнительным соглашением №3 от 01.04.2021 было дополнено техническое задание) по подзаряду батареи и обеспечение температурного режима работы батарей средствами самой батареи без создания на борту БЛА обогреваемого контейнера, как планировалось изначально, что усложнило конструкцию и потребовало проведение дополнительной отработки уже после сборки первых образцов БКУ.

Согласно доводам АО «НПК «Альтэн» указанное обстоятельство потребовало заново разработать и отладить плату преобразователя напряжения, при этом использование готового преобразователя от отечественного производителя не представлялось возможным из-за ограничений по габаритным размерам.

В   соответствии   с   требованием   технического   задания   по   использованию   отечественных материалов и изделий в рамках программы импортозамещения, при проектировании были использованы комплектующие Российского производства, уступающие своим техническим характеристикам импортным аналогам. Это привело к существенной переработке технических решений и переработке конструкторской документации для обеспечения требований технического задания.

Врио начальника 244 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации Исх. №244/384 от 14.07.2021 было направлено письмо в адрес 189 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, где также указано, что АО «Кронштадт» затягивает согласование документации.

АО «НПК «Альтэн» для решения вопросов о нарушении сроков предприняло следующие действия. На базе АО «Кронштадт» было проведено совещание с участием представителей АО «НПК «Альтэн» и 189 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации по рассмотрению вопросов исполнения договорных обязательств по выполнению СЧ ОКР и поставочных договоров.

Протоколом №35 от 01.10.2021 было принято решение п. 3 «В случае выполнения прогнозных сроков поставки предложенных АО «НПК «Альтэн» по этапу 3.1 - 12.10.2021; по этапу 3.2 - 30.10.2021; по этапу 3.3 - 30.11.2021; по этапу 3.4 - 30.11.2021; по этапу 3.6 - БпЛА №1 - 30.11.2021; БпЛА №2 -15.12.2021; БпЛА №3-30.12.2021; АО «Кронштадт» откажется от выставленных штрафных санкций и выставленных требований».

АО «НПК «Альтэн» с учетом решения совещания от 01.10.2021 работы выполнило, что подтверждается подписанными актами и сохранными расписками на ответственное хранение, письмом АО «Кронштадт» Исх.АОК/1516-22 от 28.02.2022. Следовательно, по указанным этапам АО «Кронштадт» отказался от взыскания неустойки.

В соответствии с п. 1 ст. 777 ГК РФ исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (п.1 ст. 401 ГК РФ).

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора

Учитывая изложенное, требования АО «Кронштадт» обоснованно отклонены судом первой инстанции в силу отсутствия документального подтверждения их обоснованности, поскольку нарушение срока выполнения работ обусловлено неисполнением встречных обязательств заказчиком, а также объективными причинами, обусловленными обстоятельствами, не зависящими от АО «НПК «Альтэн».

Все доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу                                  части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2024 по делу №А40-209665/23 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                           А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                   О.Н. Семикина

 

В.И. Тетюк