АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(вынесено с перерывом в порядке ст. 163 АПК РФ)

Дело № А66-8033/2017

г.Тверь

27 декабря 2017 года

Резолютивная часть объявлена 13 декабря 2017 года

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Кольцовой М.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации юридического лица – 23.07.1997)

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Абсолют», г. Калининград (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации юридического лица – 08.02.2006)

о взыскании  23 685 445  руб. 01 коп., с учетом уточнений 21 765 003 руб. 53 коп.

при участии представителей: от истца - ФИО2,

У С Т А Н О В И Л:

Министерство здравоохранения Тверской области, г. Тверь (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Абсолют», г. Калининград (далее – ответчик) с требованием о взыскании 23 685 445 руб. 01 коп., неустойки по государственному контракту от 30.12.2014 №0136200003614009047 на поставку низкотемпературной камеры для длительного хранения плазмы для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения Тверской области «Станция переливания крови».

Иск заявлен по правилам договорной подсудности, установленной п. 9.3 контракта.

Определением от 17 июля 2017 суд в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований до суммы 23 045 297 руб. 85 коп.

Определением от 23 октября 2017 суд в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований до суммы 21 765 003 руб. 53 коп.

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, явку представителей не обеспечил.

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствии представителя ответчика по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В настоящем судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований до суммы 21 124 856 руб. 36 коп. за период с 07.11.2015 по 22.09.2016, что не противоречит требованиям ст. 49 АПК РФ и принято судом.

Из имеющихся в материалах дела документов судом установлено следующее:

Между Министерством здравоохранения Тверской области, г. Тверь (заказчик) и ООО «Абсолют», г. Калининград (поставщик) заключен государственный контракт № 0136200003614009047 от 30.12.2014 на поставку низкотемпературной камеры для длительного хранения плазмы для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения Тверской области «Станция переливания крови»  (далее - контракт).

В соответствии с пунктом 3.1. контракта поставка товара, монтаж (установка), проведение настройки, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж медперсонала эксплуатации оборудования осуществляется Поставщиком в течение 50 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку товара, направленной по электронной почте по адресу absolut39@bk.ru. Датой исполнения поставщиком обязательств по контракту является дата подписания акта приема-передачи оборудования и акта выполненных работ по монтажу (установке), проведению настройки, вводу оборудования в эксплуатацию, инструктажу медперсонала эксплуатации оборудования между заказчиком и поставщиком с отметкой получателя.

17.09.2015истец направил ООО «Абсолют», г. Калининград заявку на поставку товара.

Соответственно, последний день надлежащего исполнения обязательств по контракту – 06.11.2015.

Фактически поставка была произведена с нарушением вышеуказанного срока.

В соответствии с п. 6.2 контракта в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, поставщик уплачивает заказчику пени.

Расчет пени осуществляется заказчиком по формуле, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

В претензионном порядке спор не был урегулирован.

Ссылаясь на несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по контракту и неуплату начисленной неустойки, истец обратился суд с данным исковым заявлением о взыскании с ответчика пеней.

Ответчик в ранее представленном отзыве и дополнениях к отзыву на иск возражал против его удовлетворения, указав, что нарушение сроков исполнения обязательств по контракту произошло не по вине поставщика, а из-за отсутствия подготовленного помещения для установки оборудования, оспорил расчет неустойки и количество дней просрочки. 

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Обращение в суд за защитой нарушенного права, согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, допускается в отношении лица, права которого нарушены, а удовлетворение иска возможно только в отношении лица, которое нарушает или оспаривает права. В противном случае отсутствует спор, подлежащий разрешению судом.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Требования истца основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств, вытекающих из государственного контракта № 0136200003614009047 от 30.12.2014 на поставку низкотемпературной камеры для длительного хранения плазмы для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения Тверской области «Станция переливания крови». Представленный в материалы дела государственный контракт является смешанным договором, содержащим элементы договора купли-продажи (в части поставки оборудования) и подряда (в части монтажа, установки, настройки, ввода в эксплуатацию оборудования). Следовательно, отношения, складывающиеся по заключению, исполнению указанного контракта, регулируются нормами Закона 44-ФЗ и глав 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену), с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки  (пункт 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя (пункт 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3.1. контракта № 0136200003614009047 от 30.12.2014 поставка товара, монтаж (установка), проведение настройки, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж медперсонала эксплуатации оборудования осуществляется Поставщиком в течение 50 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку товара, направленной по электронной почте по адресу absolut39@bk.ru. Датой исполнения поставщиком обязательств по контракту является дата подписания акта приема-передачи оборудования и акта выполненных работ по монтажу (установке), проведению настройки, вводу оборудования в эксплуатацию, инструктажу медперсонала эксплуатации оборудования между заказчиком и поставщиком с отметкой получателя.

Заявка заказчика от 17.09.2015 № 4688 получена  поставщиком по указанному в контракте адресу электронный почты 17.09.2015, соответственно, последний день исполнения обязательств поставщика по контракту – 06.11.2015.

Обязательства по контракту в полном объеме исполнены 22.09.2016.

С учетом установленного судом факта просрочки ответчиком исполнения обязательства, суд считает правильным определение истцом периода просрочки по контракту – с 07.11.2015 по 22.09.2016.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ является неустойка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу частей 4, 6, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Порядок начислений штрафов и пеней предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - Правила N 1063).

Стороны при подписании контракта в пункте 6.2, установили, что в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Расчёт пени осуществляется Заказчиком по формуле, утверждённой Правилами №1063.

Истец в соответствии с условиями контракта начислил 21 124 856 руб. 36 коп. (с учетом уточнений) неустойки за просрочку исполнителем сроков исполнения обязательств по контракту за период с 07.11.2015 по 22.09.2016.

Исследовав расчет истца, суд считает возможным, согласиться с ним, поскольку он соответствует действующему законодательству и условиям контракта. Арифметическая часть исковых требований, основанная на представленных доказательствах, судом проверена и сомнений не вызывает.

Возражения ответчика о недоказанности истцом факта просрочки исполнения обязательств по контракту от 30.12.2014 судом отклоняются, поскольку данное обстоятельство надлежаще подтверждается трехсторонними товарной накладной, актом приема-передачи товара с данными о его получении истцом 22.09.2016, актом выполненных работ, подписанным истцом 22.09.2016. Довод ответчика о неготовности помещения для установки оборудования документально не обоснован.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце первом пункта 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В данном случае в ходе рассмотрения дела ответчик не заявил ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ, соответствующие доказательства в обоснование несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств не представил.

Таким образом, поскольку ходатайство о снижении неустойки ответчиком не подавалось, у суда отсутствуют основания для применения статьи 333 ГК РФ.

При таких обстоятельствах исковые требования в части взыскания 21 124 856 руб. 36 коп. неустойки являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины в силу требований ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и взыскиваются с него в бюджет РФ поскольку истец в силу ст. 333.37 НК РФ  освобожден от ее уплаты. 

Руководствуясь ст.ст. 49, 65, 71, 110, 156, 163, 167, 170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют», г. Калининград (ИНН 3904074026, ОГРН 1063905015712, дата государственной регистрации 08.02.2006) в пользу Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь (ИНН 6905044950, ОГРН 1026900516246, дата государственной регистрации 23.07.1997) 21 124 856 руб. 36 коп. неустойки. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют», г. Калининград (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 08.02.2006) в доход федерального бюджета 128 624 руб. 00 коп. государственной пошлины.

 Исполнительные листы выдать взыскателям после вступления решения в законную силу в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

           Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда в месячный срок со дня его принятия.

           Судья                        М.С. Кольцова