Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-9270/2018

16 октября 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания помощником судьи Кудриным В.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного общества "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "НИЖНЕВАРТОВСКГРАНДСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628407, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) об обязании совершить определенные действия и взыскании 14 743 246 рублей 56 копеек, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНТАКТ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>),

при участии представителей:

от истца - ФИО1 по доверенности от 06.08.2018 № 685,

от третьего лица - ФИО2 по доверенности от 18.09.2018,

от ответчика - не явились,

установил:

открытое акционерное общество "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НИЖНЕВАРТОВСКГРАНДСТРОЙ" (далее – ответчик) об обязании предоставить исполнительную документации и  взыскании договорной неустойки (пени) в размере 14 743 246 рублей 56 копеек, исчисленной за период с 01.10.2017 по 31.12.2017. В качестве основания для удовлетворения заявленных требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору на выполнение подрядных работ по строительству объекта от 16.06.2016 № 8404-102 (далее – договор).

Представитель ответчика для участия в судебное заседание не явился, извещен.

Возражения ответчика относительно рассмотрения дела в отсутствие представителей в материалы дела не поступили.

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело по существу по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие надлежаще извещенного ответчика.

Изучив материалы дела и доводы истца, суд установил нижеследующее.

16 июня 2016 года между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор.

В соответствии с пунктом 2.1. договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами на свой риск в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком, работы по строительству (далее - Работы) Объекта: «Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП», в составе стройки: «Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения-Аганский КСП».

На основании пункта 2.2 договора Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных Подрядчиком, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что оформление Подрядчиком Детализированного графика производства работ (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) в сроки, установленные п. 6.1.30. Договора является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора (пункт 2.3 договора).

Цена договора определена в разделе 3 договора.

пункт 3.1. Стоимость работ, материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, предусмотрены в Расчете договорной цены (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, является ориентировочной.

Расчет договорной цены (Приложение № 3) включает все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

В случае изменения стоимости и/или номенклатуры материалов, поставляемых Заказчиком/Подрядчиком в соответствии с Приложением № 6, договорная цена подлежит соразмерному изменению, путем заключения дополнительного соглашения.

пункт 3.2. Договорная цена рассчитывается по локальным сметам, составленным в сметно- нормативной базе 2001 года с последующим переводом индексами в текущие цены, обозначенными в Ценовых показателях (Приложение № 4), в Расчете договорной цены (Приложение № 3) и составляет: 138 500 000 рублей 00 коп. (сто тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.), кроме того НДС (18%) 24 930 000 рублей 00 коп. (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч руб. 00 коп.), всего с учетом НДС 163 430 000 рублей 00 коп. (сто шестьдесят три миллиона четыреста тридцать тысяч руб. 00 коп.). Механизм расчета договорной цены прописывается в Порядке определения договорной цены и принятия выполненных объемов работ (Приложение № 5) и является неизменным на весь период действия договора.

В дополнительного соглашения от 30.12.2016 № 1 пункт 3.2. Договора изложен в следующей редакции: «Договорная цена рассчитывается по локальным сметам, составленным в сметно-нормативной базе 2001 года с последующим переводом индексами в текущие цены, обозначенными в Ценовых показателях (Приложение № 4), в Расчете договорной цены (Приложение № 3) и составляет: 138 500 000 рублей 00 коп. (сто тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.), кроме того НДС (18%) 24 930 000 рублей 00 кон, (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч руб. 00 коп.), всего с учетом НДС 163 430 000 рублей 00 коп. (сто шестьдесят три миллиона четыреста тридцать тысяч руб. 00 коп.). Механизм расчета договорной цены прописывается в Порядке определения договорной цены и принятия выполненных объемов работ (Приложение № 5) и является неизменным на весь период действия договора.

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2016 году, по настоящему договору составляет: 56 061 571,00 (пятьдесят шесть миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС 18%: 10 091 082,78 (десять миллионов девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля 78 копеек, всего с учетом НДС: 66 152 653,78 (шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 78 копеек.

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2017 году, по настоящему договору составляет: 82 438 429,00 (восемьдесят два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%; 14 838 917,32 (четырнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот семнадцать) рублей 32 копейки, всего с учетом НДС: 97 277 346,22 (девяносто семь миллионов двести семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) рублей 32 копейки. 

В дополнительного соглашения от 22.05.2018 № 2 пункт 3.2. Договора изложен в следующей редакции: «Договорная цена рассчитывается по локальным сметам, составленным в сметно-нормативной базе 2001 года с последующим переводом индексами в текущие цены, обозначенными в Ценовых показателях (Приложение № 4), в Расчете договорной цены (Приложение 3) и составляет: 160 252 680 руб.. (сто шестьдесят миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей), кроме того НДС (18%) 28 845 482,40 руб. (двадцать восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 40 копеек) всего с учетом НДС 189 098 162,40 руб. (сто восемьдесят девять миллионов девяносто восемь тысяч сто шестьдесят два рубля 40 копеек). Механизм расчета договорной цены прописывается в Порядке определения договорной цены и принятия выполненных объемов работ (Приложение № 5) и является неизменным на весь период действия договора.

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2016 году, по настоящему договору составляет: 56 061 571,00 (пятьдесят шесть миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одни) рубль 00 копеек, кроме того НДС 18%: 10 091 082,78 (десять миллионов девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля 78 копеек, всего с учетом НДС: 66 152 653,78 (шестьдесят шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 78 копеек. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2017 году, по настоящему договору составляет: 104 191 109 (сто четыре миллиона сто девяносто одна тысяча сто девять рублей), кроме того НДС 18%: 18 754 399.62 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто девять рублей 62 копейки), всего с учетом НДС: 122 945 508,62 (сто двадцать два миллиона девятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемь рублей 62 копейки)

пункт 3.3. Фактические затраты на материалы, оборудование по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком, принимаются от Подрядчика на выполненный объем работ по Приложению к форме № КС-2.

пункт 3.4. При необходимости выполнения дополнительных объемов работ, без выполнения, которых невозможно завершение работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком объемы дополнительных работ, оформив в течение 10 (Десяти) рабочих дней ведомость дополнительных объемов работ.

Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

пункт 3.5. Стоимость дополнительных работ определяется по согласованным с Заказчиком в соответствии с условиями определенными в п. 3.4. настоящего договора объемам и ценовым показателям, предусмотренными в Ценовых показателях (Приложение № 4), Расчете договорной цены (Приложение № 3) и оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

В соответствии с пунктом 4.1 договора Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а)  «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - форма №КС-3;

б)  «Акт о приемке выполненных работ» - форма №КС-2;

в)  неунифицированных форм (Приложения к форме №КС-2) согласно расчету договорной цены;

г)  счета-фактуры.

Сроки выполнения работ установлены в разделе 5 договора, а также в редакции дополнительных соглашениях к договору от 30.12.2016 № 1, от 22.05.2017 № 2.

пункт 5.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены в сроки, предусмотренные в Графике производства работ (Приложение № 1).

пункт 5.2. Сроки начала и окончания работ по этапам (технологическим процессам, за единицу работ и пр.) определяются Детализированным графиком производства работ, составляемым по форме Приложения № 2 к настоящему Договору и являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, в соответствии с п. 12.42. Стороны согласовали, что Детализированный график выполнения работ является неотъемлемой частью настоящего договора.

пункт 5.3. В случае если в ходе выполнения работ по объекту, выяснилась необходимость внести отдельные изменения, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение цены производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

Согласно разделу 6.1 договора подрядчик обязуется:

пункт 6.1.1. Своими силами, средствами, материалами и оборудованием, в том числе оборудованием и материалами переданными Заказчиком в порядке, предусмотренном в п. 8.1, на свой риск выполнить все работы качественно, с соблюдением строительных норм и правил, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма №КС-11, №КС-14).

пункт 6.1.2. Выполнить Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с Рабочей Документацией, Графиком производства работ (Приложение № 1), Расчетом Договорной цены (Приложение № 3), иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей Документации, в том числе не влияющие на технологию и качество выполняемых работ на Объекте, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

пункт 6.1.10. Подрядчик сдает Заказчику ежемесячно не позднее 25 числа каждого отчетного месяца, выполненные объемы работ по следующим формам:

- «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - форма №КС-3;

- «Акт о приемке выполненных работ» - форма №КС-2 (с согласованным с Заказчиком перечнем визирующих специалистов);

- неунифицированные формы (Приложения к форме №КС-2);

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Расшифровка к форме № КС - 3;

- Общий журнал работ (по форме КС-6);

- Журнал учета выполненных работ (по форме КС-ба);

- Исполнительная документация.

При необходимости получения дополнительной информации Подрядчик представляет последнюю по форме и в сроки, определенные Заказчиком.

пункт 6.1.13. Устранять замечания Заказчика, возникающие в процессе выполнения работ, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик исправляет брак, вызванный некачественным выполнением части (вида) работ, применением некачественных материалов, оборудования, за свой счет, без увеличения срока проведения работ (сдачи объекта). В противном случае, для устранения замечаний Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения брака будет соотноситься за счет Подрядчика, допустившего брак и удерживаться из суммы окончательного расчета по настоящему Договору.

пункт 6.1.14. Извещать Заказчика о необходимости проведения скрытых работ не менее чем за 3 (три) дня до их начала.

пункт 6.1.15. Передать Заказчику исполнительную документацию, после сдачи законченного строительством Объекта в эксплуатацию или, по его поручению, эксплуатационной организации или пользователю.

пункт 6.1.23. Вести в период выполнения работ исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации, Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

пункт 6.1.32.    Обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительной документации по объекту и иной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами, на месте производства работ, а также предоставить Заказчику, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы.

пункт 6.1.33.    Подрядчик предъявляет Заказчику законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Заказчиком.

пункт 6.1.34.    В срок не позднее 3 (трех) календарных дней до начала испытаний на объекте, предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, согласованный представителем Строительного Контроля Заказчика, для проверки и получить утвержденное Заказчиком заключение в объеме соответствующем «Перечню Исполнительной Документации», и нормативным документам Ростехнадзора и Регламентам Заказчика.

пункт 6.1.35.    Предоставить Заказчику окончательный комплект исполнительной документации в количестве 2 (Двух) экземпляров за 3 (три) рабочих дня до начала работы Приемочной Комиссии.

пункт 6.1.36.    Немедленно уведомить Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- инциденты (в течение 2 (двух) часов);

- технические осложнения (в течение 4 (четырех) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 48 (сорока восьми) часов);

- дорожно-транспортные происшествия (в течение 4 (четырех) часов). Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 

<

***>. 47-581.41-179, 8 (34643) 46-222. 46-6-31 47-088;

- хищения и иные противоправные действия (в течение 4 (четырех) часов);

- обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 48 (сорока восьми) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 4 (четырех) часов).

пункт 6.1.38.    Предоставить для подтверждения объемов выполненных работ следующие документы:

- 2 (Два) комплекта исполнительной документации, подтверждающей предъявляемые объемы работ, подписанные уполномоченным представителем Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, акты замеров и испытаний;

- геодезические и маркшейдерские съемки, подтвержденные маркшейдерской службой Заказчика

Подписание актов о приемке выполненных работ без оформленной надлежащим образом исполнительной документации и/или не завизированных представителем Заказчика, не допускается.

пункт 6.1.42.    Вести с момента начала работ до их завершения «Общий журнал работ» по форме КС-6 в соответствии со СНиП 12-01-2001/РД-11-05-2007.

Согласно разделу 6.2 договора заказчик обязуется:

пункт 6.2.1. Передать Подрядчику на период выполнения работ по акту, подписанному Сторонами, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, оговоренных в пункте 2.1., настоящего Договора не позднее чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ.

пункт 6.2.2. Передать Подрядчику за 14 (четырнадцати) дней до начала строительства, утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектно-сметную документацию.

пункт 6.2.3. Рассмотреть в течение 10 (десяти) дней замечания Подрядчика по проектно - сметной документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

пункт 6.2.4. Оформить до начала работ разрешение на право ведения работ в охранной зоне действующих коммуникаций со схемой, с указанием в ней пересекаемых коммуникаций, а также договор аренды земельного участка или проект освоения лесов с прохождением госэкспертизы и лесной декларации.

пункт 6.2.5. Заказчик организовывает работу приёмочной комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию, в течение двух недель, с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта.

пункт 6.2.6. Назначить уполномоченное лицо по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, а также уведомить Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей Строительный Контроль Заказчика за производством Работ на Объекте.

пункт 6.2.7. В установленном порядке Заказчик совместно с Подрядчиком определяет объёмы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, являющуюся основанием для платежей или акт о некачественном выполнении работ, не являющийся основанием для платежей.

Согласно раздела 6.3 договора заказчик вправе:

пункт 6.3.2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

пункт 6.3.9. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе прямо не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

пункт 6.3.10. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ, полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации регламентирующей выполнение Работ предоставленной Подрядчику в целях настоящего Договора, на период выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

пункт 6.3.11. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 30 (тридцати) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.

Скрытые работы. Индивидуальные испытания и комплексное опробование определены в разделе 10 договора:

пункт 10.1.  Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 18 (восемнадцать) часов до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, подлежащих закрытию. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее Строительный Контроль Заказчика, о назначении даты приемки Скрытых Работ.

пункт 10.2.  Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и часы работы.

пункт 10.3.  В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть скрытые работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик.

пункт 10.4.  В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

пункт 10.5.  Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным нормативно-технической документацией.

пункт 10.6.  В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти Скрытые Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей Документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

пункт 10.7. Подрядчик обязан уведомить Представителей Заказчика о планируемой дате проведения испытаний, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до запланированной даты их проведения. Подрядчик обязан согласовать с Представителями Заказчика время и место проведения необходимых испытаний любого Оборудования, Материалов, конструкций и прочих частей Работ.

пункт 10.8 Подрядчик в период комплексного опробования Оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к устранению выявленных Дефектов/Недостатков Работ.

пункт 10.9. Комплексное опробование Оборудования осуществляется Подрядчиком, эксплуатационным персоналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Подрядчика, проектных и субподрядных монтажных организаций, а при необходимости и при участии представителей производителя Оборудования.

Контроль качества работ определен в разделе 11 договора:

пункт 11.1. Контроль качества работ включает в себя проведение следующих контрольных мероприятий:

- проверка качества материалов и оборудования, поставленных для выполнения работ;

проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов и оборудования;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении работ;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям рабочей документации, технологической и нормативной документации совместно с Заказчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка, выполненных объемов работ;

- приемка, совместно с Заказчиком, законченного строительством объекта.

пункт 11.2. Заказчик и/или строительный контроль вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта, правильность использования материалов, оборудования Заказчика и т.п.

При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий настоящего Договора или иных дефектов/недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, и/или рабочей документации, и/или требований законодательства РФ, нормативных документов РФ и/или Положений, Регламентов Заказчика, которые могут ухудшить качество работ, или иных дефектов/недостатков, Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика обязан заявить о выявленных дефектах/недостатках Подрядчику, Подрядчик должен устранить выявленные дефекты/недостатки в течение срока, указанного Заказчиком. 

пункт 11.3. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.

пункт 11.4. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика ко всем Объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ.

пункт 11.5. Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства РФ, рабочей документации и нормативной документации.

В соответствии с пунктом 12.4. договора за нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ, за исключением Детализированного графика производства работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

Согласно пункту 12.9. договора установлено, что в случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в п. 4.1., Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Исполнительная документация является результатом действий (работы) Подрядчика по заключенному Договору и подлежит передаче Заказчику вместе с актами о приемке выполненных работ.

В период с декабря 2017 года по апрель 2018 года ООО «НГС» неоднократно предоставляло в ОАО «СН-МНГ» акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 по Договору без необходимого пакета исполнительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ, заключенным Договором. Указанная первичная документация, представленная ООО «НГС» была рассмотрена ОАО «СН-МНГ» и в связи с наличием замечаний к актам, и не предоставлением полного пакета исполнительной документации, в адрес ООО «НГС» были направлены требования ОАО «СН-МНГ» (Акты проверки объема выполненных работ от 15.12.2017г., письма № ОМ-ЗО от 15.01.2018г., № РГ-265 от 29.01.2018г., № ОМ-262 от 22.02.2018г., № ОМ-321 от 07.03.2018г., № ОМ-498 от 02.04.2018г.) об устранении замечаний и предоставлением в ОАО «СН-МНГ» полного пакета исполнительной документации. В адрес ООО «НГС» неоднократно направлялись письма  ОАО «СН-МНГ» об обязанности Подрядчика в соответствии с заключенным Договором, предоставить полный пакет исполнительной документации.

24.04.2018г. в адрес ОАО «СН-МНГ» вновь поступило письмо ООО «НГС» (исх. № 39 от 23.04.2018г.) с приложением первичных документов, в том числе, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23 от 30.04.2018г., подтверждающие затраты ООО «НГС» при выполнении работ по строительству объекта «Газопровод ДНС-2 Аганского месторождения - Аганский КСП» по договору № 8404-102 от 16.06.2016.

Проверив представленную к письму ООО «НГС» (исх. № 39 от 23.04.2018г.) первичную документацию, установлено, что Подрядчиком в очередной раз, в нарушение требований действующего законодательства РФ, условий заключенного Договора не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы, в том числе, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний трубопровода, журналы общих работ и спецжурналы зарегистрированные в РГТИ. Кроме того, в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, представленных Подрядчиком указаны также иные замечания, включая, завышенные объемы работ или работы, которые не выполнялись ООО «НГС» и др.

В связи с указанными замечаниями и не предоставлением Подрядчиком исполнительной документации, в адрес ООО «НГС» было направлено письмо ОАО «СН-МНГ» (исх. № ОМ-646 от 03.05.2018г.) с приложением оригиналов актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23 от 30.04.2018г. (не подписанных ОАО «СН-МНГ») и требованием устранить замечания в актах и предоставить исполнительную документацию, в том числе, журналы общих работ и спежурналы зарегистрированные в РГТИ, оригиналы актов освидетельствования скрытых работ для подтверждения фактов выполнения Подрядчиком объемов работ согласно Договору.

Ответчик не передал надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, являющаяся результатом действий (работы) Подрядчика по заключенному Договору и подлежащая передаче Заказчику вместе с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. Так как исполнительная документация необходима для безопасной эксплуатации объекта и проведения ремонтных работ, данная правовая позиция отражена в пункте 11 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016). Данная позиция подтверждается судебной практикой: постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2010 по делу № А66-10377/2009, постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу № А45-949/2009, постановление ФАС Центрального округа от 13.11.2013 по делу № А14-17945/2012, постановление ФАС Московского округа от 10.02.2011 по делу № А40-45717/10-50-351, постановление ФАС Московского округа от 19.04.2012 по делу № А40-73925/11-52-600,  постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 по делу № А40-73920/11-52-599.   

Следовательно истец мотивированно отказался от приемки выполненных работ.

Вместе с тем, поскольку истец указанные работы не принял, у него отсутствует право требовать от ответчика предоставления соответствующей исполнительной документации, так как договор в установленном порядке не расторгнут.

Стоимость договора в редакции пункта 3.2 дополнительного соглашения от 22.05.2017 № 2 - 160 252 680 рублей, а с учетом НДС 189 098 162 рубля 40 копеек.

Истец заявил о взыскании договорной неустойки за период с 01.10.2017 по 31.12.2017.

Срок выполнения работ, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Надлежащий расчет договорной неустойки (пени) по договору за период просрочки с 03.10.2017 по 31.12.2017 составил 17 018 834 рубля 62 копейки.

Ответчик указал на пункт 12.6, 5.3 договора, переписку сторон о продлении срока выполнения работ до 31.03.2018.

Доводы ответчика о неисполнении встречных обязательств не подлежат удовлетворению, 22.05.2017 заключено дополнительное соглашение № 2 со сроком выполнения до 30.09.2017, доводы о необоснованном отказе истца от заключения дополнительного соглашения о продлении сроков работ по 31.03.2017 отклонены, фактически работы с сентября 2017 года по декабрь 2017 года ответчик выполнил.

Доводы ответчика о продлении срока выполнения не подлежат удовлетворению, так как в период с января по март 2018 года работы не велись, истец обосновано отказался от подписания дополнительного соглашения № 3.

На основании пункта 17.2 договора стороны установили, что любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

Следовательно положения статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не обязывает истца на заключение дополнительного соглашения.

Ответчик о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершенов письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с пунктом 12.4. договора за нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ, за исключением Детализированного графика производства работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1 % от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. 

Окончание сроков 30.09.2017, пеня 0,1% от стоимости (160 252 680 рублей), допустил просрочку с 01.10.2017 по 31.12.2017.

Таким образом, взысканию подлежит договорная неустойка (пени) в размере 14 743 246 рублей 56 копеек.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 102 716 рублей.

Истец по платежным поручениям от 08.06.2018 №№ 2036, 2037 уплатил государственную пошлину в размере 30 087 рублей.

Недоплата государственной пошлины составила 102 716 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 96 716 рублей на ответчика, 6 000 рублей на истца.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования открытого акционерного общества "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НИЖНЕВАРТОВСКГРАНДСТРОЙ" в пользу открытого акционерного общества "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" 14 743 246 рублей 56 копеек - договорную неустойку (пеню).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НИЖНЕВАРТОВСКГРАНДСТРОЙ" в пользу открытого акционерного общества "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" 96 716 рублей - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин