Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А15-643/2021

21 сентября 2022 года

г. Махачкала

 

              Резолютивная часть решения объявлена     14 сентября 2022 года

  Решение в полном объеме изготовлено     21 сентября 2022 года

 

   Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (ИНН 

<

***>) 

к ФГУП "Главное управление специального строительства" (ИНН 

<

***>)  

о взыскании 15910112,08 руб. задолженности по государственному контракту от 28.10.2019 №ГК-002 за просрочку исполнения обязательств за период с 11.12.2020 по 05.07.2021 с последующим расчетом по день фактического исполнения обязательств,

        при участии в судебном заседании 

от истца – ФИО2   (доверенность от 01.07.2022 №02-69д/22),

от ответчика – ФИО3 (доверенность от 13.01.2022 №42-40/1д),

УСТАНОВИЛ:

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (далее – истец, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к  ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (переименовано в ФГУП "Главное управление специального строительства", далее – ответчик, предприятие) о взыскании 15910112,08 руб. задолженности по государственному контракту от 28.10.2019 №ГК-002 за просрочку исполнения обязательств за период с 11.12.2020 по 05.07.2021 с последующим расчетом по день фактического исполнения обязательств.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечено  ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

         Выслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела и оценив, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд установил следующее.     

         Как следует из материалов дела, 28.10.2019 между учреждением (далее - заказчик) и обществом (далее - генподрядчик) заключен государственный контракт №ГК-002 на выполнение работ по объекту: "Общеобразовательная организация на 400 ученических мест в сел.Авадан Докузпаринского района Республики Дагестан". 

Согласно пункту 3.1. контракта общая стоимость работ составляет 419238790 рублей. 

В соответствии с пунктом 5.2. контракта подрядчик обязан выполнить работы в срок до 10.12.2020. 

Пунктом 17.4. контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных генподрядчиком.   

В связи с просрочкой выполнения работ заказчик обратился к генподрядчику с требованием об уплате неустойки.

Поскольку требование об уплате неустойки было оставлено без удовлетворения, заказчик обратился в арбитражный суд с иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 - 729 названного Кодекса), если это не противоречит статьям 779 - 782 указанного Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В части 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Право заказчика потребовать от исполнителя уплаты неустойки за просрочку исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту предусмотрено в пункте 17.4. контракта.

В соответствии с пунктом 5.2. контракта подрядчик обязан выполнить работы в срок до 10.12.2020.

Дополнительным соглашением от 05.07.2022 к государственному контракту от 28.10.2019 №ГК-002 внесены изменения в п.5.2. и срок выполнения работ продлен до 10.12.2022. 

 При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик не нарушил срок выполнения работ, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении искового заявления отказать. 

           Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья                                                                                                          Х.В. Оруджев