АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-246180/23-126-1913

г. Москва

19 апреля 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел помощник судьи С.А. Антоновский,  рассматривает в судебном заседании дело  

по иску ГКУ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА  МОСКВЫ" (ИНН 

<

***>)  

к АО "СК РЕМИР" (ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить обязательства В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО1, доверенность от 18.12.2023. от ответчика: не явился, не извещен 

РЕШИЛ:

Обязать АО "СК РЕМИР" (ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца со дня  вступления решения в законную силу исполнить в натуре обязательство по  государственному контракту от 19 июля 2021 г. № 131/21 на выполнение работ по  текущему ремонту кровли и фасада здания ГБУК г. Москвы "ДК "Нагорный" по адресу:  Электролитный проезд, д. 3, корп. 1 согласно Акту выявленных недостатков-дефектов  от 13 февраля 2023 г., а именно:  

- заменить на чердаке ТВР (утеплитель из мин. плиты) в объеме -10 м3; 

- осуществить на 2 этаже в помещении тип 1, № 3 по БТИ отделку стен из ГКЛ  

площадью 36 м2; 

- осуществить на 2-м этаже в помещении тип II № 5 по БТИ отделку  

оштукатуренных стен площадью - 3,4 м2; 

- осуществить на 3-м этаже в помещении тип I № 10, 106 по БТИ отделку  

оштукатуренных стен, оклеенных стеклообоями площадью - 12,3 м2; - заменить плитку потолка типа "Армстронг" - 2,16 м2; 

- осуществить в помещении лестницы А отделку оштукатуренных стен  

площадью -21,3 м2, оштукатуренных потолки площадью 4,5 м2. 

Взыскать с АО "СК РЕМИР" (ОГРН 

<

***>) в пользу ГКУ  

"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН  

<

***>) 4 903 (четыре тысячи девятьсот три) руб. 99 коп. неустойки.  

Взыскать с АО "СК РЕМИР" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального  

бюджета государственную пошлину в размере 8 000 (восемь тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья: М.С. Новиков