1650/2022-329147(2) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 10 октября 2022 года 

по делу А33-30897/2021 Красноярск

10 октября 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на  территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 51 455 руб. убытков, 6 000 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины, взыскать в доход федерального бюджета 2 058 руб.  государственной пошлины.   

Обязать Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на  территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):  

 в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, не включая в  указанный срок дни в которые среднесуточная температура воздуха в г. Норильске составит  ниже -20 градусов Цельсия, в целях устранения выявленных строительных недостатков  работ на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>,  выполнить следующие работы в следующем объеме:  

- с дворовой стороны фасада, на участке кровли между осями 6-10, по оси Е, в  координатах подъездов № 2 и № 3 устранить деформации (загибания) "картин" от свеса (края  кровли) до парапетного ограждения, на ширину до 1,5 м, длиной 23,85 погонных метров, в  том числе расфальцовку "картин", разрывы металла по кромкам фальцев, восстановить  металлическое покрытие на площади 35,8 кв.метров;  

- осуществить монтаж и устранить повреждения крепления снегозадержателя на участке  кровли между осями 6-10, по оси Е, протяженностью 23,3 погонных метров;  

- восстановить металлическое покрытие на трех слуховых окнах: на 1-м окне - со  стороны главного фасада, на 2-х окнах - со стороны дворового фасада;  

- устранить провисы гидроизоляционной мембраны со стороны чердачного  помещения;  

а также в течение 30 дней с момента наступления устойчивой положительной  температуры воздуха в г. Норильске выполнить следующие работы: обеспечить  

герметичное примыкание кровли к выступающей части брандмауэра.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова