1209/2023-113922(2) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-5146/2023

г. Благовещенск

23 ноября 2023 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Есауловой Н.В., 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного  казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 12 239 694,99 руб.,  

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройком»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к государственному казенному учреждению  Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  штрафа в размере 500 000 руб., о внесении изменений в государственный контракт от  09.03.2021 № 40 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта  капитального строительства «Здание поликлиники на 240 посещений в смену, с. Поярково  Михайловского района»,  

руководствуясь статьями 101, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

решил:

по первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения  Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по  государственному контракту на выполнение работ по проектированию и строительству  объекта капитального строительства «Здание поликлиники на 240 посещений в смену, с.  Поярково Михайловского района» от 09.03.2021 № 40:  

- неустойку (пени) за просрочку выполнения работ по проектированию и  прохождению государственной экспертизы за период с 19.03.2022 по 31.03.2022 в размере  31 107,26 руб., за период с 01.10.2022 по 02.12.2022 в размере 150 750,58 руб., всего181 857,84 руб.;  

- неустойку (пени) за просрочку выполнения строительно-монтажных работ за  период с 15.12.2022 по 19.05.2023 в размере 11 419 942,62 руб.;  

- неустойку (штраф) за ненадлежащее исполнение условий пункта 5.4.11  государственного контракта в размере 100 000 руб., итого - 11 701 800,46 руб.  

В остальной части первоначальных требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН  

1082801004615, ИНН 2801132203) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размер 80 863 руб.  

В удовлетворении требований по встреченному иску отказать. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Н.В. Есаулова