ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 http://1aas.arbitr.ru, тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А43-39455/2023

30 сентября 2024 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16.09.2024. 

Полный текст постановления изготовлен 30.09.2024.  

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Насоновой Н.А.,  

судей Новиковой Л.П., Танцевой В.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Казаковой Е.Ю.,  

при участии в судебном заседании:  

от истца (заявителя) - общества с ограниченной ответственностью «Арена Н»  – ФИО1 по доверенности от 02.10.2023 сроком действия 5 лет  (диплом);  

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Инженерные  системы и сети» - ФИО2 по доверенности от 04.03.2024 сроком  действия до 31.12.2024 (диплом);  

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований -  акционерного общества «Нижегородский водоканал» –  

ФИО3 по доверенности от 11.04.2024 сроком действия по  30.06.2025 (диплом),  

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Арена Н» на решение  Арбитражного суда Нижегородской области от 21.05.2024 по делу  

 № А43-39455/2023, по иску общества с ограниченной ответственностью  «Арена Н» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Инженерные системы и сети» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании недействительным  одностороннего отказа от исполнения договора,   

У С Т А Н О В И Л :

общество с ограниченной ответственностью «Арена Н» (далее – ООО  «Арена Н») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском  к обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы и сети»  (далее – ООО «Инженерные системы и сети») о признании  недействительным одностороннего отказа от исполнения договора от  20.06.2023 № 20/06/23-01 на основании уведомления о расторжении договора  от 21.11.2023 исх. № 268.  

 Исковые требования основаны на статьях 10, 191, 193, 450.1 (пункт 5)  Гражданского кодекса Российской Федерации. В обоснование иска указано,  что односторонний отказ от договора противоречит указанным положениям  Закона, а кроме того, промежуточные сроки выполнения работ по договору  согласованы не были, что исключает возможность считать ООО «Арена Н»  нарушившим сроки.  

 Ответчик иск не признал. 

 Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 21.05.2024 по  делу № А43-39455/2023 в удовлетворении исковых требований ООО «Арена  Н» отказано.  

 ООО «Арена Н», не согласившись с принятым решением, просит его  отменить на основании пунктов 1, 2, 3, 4 части 1, 2 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Заявитель настаивает на том, что промежуточные сроки выполнения  отдельных видов работ сторонами не согласованы, первый график  производства работ был утвержден сторонами лишь при подписании  дополнительного соглашения к договору № 2 от 21.09.2023. Поскольку  давальческие материалы были переданы 04.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023,  то в соответствии с пунктом 7 дополнительного соглашения от 21.09.2023  срок окончания выполнения работ автоматически продлился без заключения  дополнительных соглашений к договору до 27.02.2024.  

Кроме того, ответчиком не представлена в части труба и запорная  арматура на трубопроводы, в связи с чем истец не мог закончить пайку трубы  по всей длине и засыпать траншею. В связи с чем вины истца в нарушении  сроков выполнения отдельных видов работ не имелось, основания для  расторжения договора отсутствовали.  

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной  жалобы поддержал; представители ответчика и третьего лица указали, что с  жалобой не согласны.  

 Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены  Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Повторно рассмотрев дело, Первый арбитражный апелляционный суд  считает судебный акт суда первой инстанции не подлежащим отмене.  

Установлено, что между ООО «Арена Н» (субподрядчиком) и ООО  «Инженерные системы и сети» (подрядчиком) был заключен договор на  выполнение комплекса работ по проектированию и строительству  магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное  

строительство в п. Ольгино и п. Новинки (1 этап – проектирование и  строительство сетей водоснабжения).  

Согласно пункту 2.1 договора субподрядчик обязался по заданию  подрядчика в установленный договором срок, указанный в Графике  производства работ (приложение № 2 к договору), собственными и (или)  привлеченными силами и средствами, с поставкой материалов  подрядчиком, выполнить в полном объеме работы на объекте, указанные в  приложении № 2 к договору, а также иные работы (услуги), определенно не  упомянутые в договоре, но необходимые для реализации договора и  оформленные сторонами соответствующими дополнительными  соглашениями к договору. Подрядчик обязался создать субподрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и  уплатить обусловленную договором цену.  

В соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 договора начальный срок  выполнения работ: с момента подписания договора, приемки  субподрядчиком от подрядчика рабочей документации, предоставления  фронта работ. Конечный срок выполнения всех работ по договору20.11.2023 и устанавливается в соответствии с Графиком производства  работ (приложение № 2 к договору). Стороны договорились, что в любом  случае конечный срок выполнения всех работ по договору, будет зависеть  от сроков, которые регулируются договором № 23-22-670 от 13.07.2022,  заключенным между АО «Нижегородский водоканал» (генеральным  подрядчиком) и ООО «Инженерные системы и сети», а также  заключенными дополнительными соглашениями к нему,  предусматривающими увеличение сроков выполнения работ по договору №  23-22-670 от 13.07.2022. Промежуточные, обязательные к соблюдению,  сроки выполнения работ по договору определяются сторонами в Графике  производства работ (приложение № 2 к договору).  

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 21.09.2023  окончательный срок выполнения работ согласован на 10.12.2023. Также  сторонами подписан График выполнения работ, включающий в себя  отдельные виды работ и сроки их выполнения (промежуточные сроки  выполнения работ).  

Пунктом 4.11 договора предусмотрено, что в случае, если субподрядчик  допустил срыв промежуточных сроков производства работ по договору  более, чем на 10 календарных дней, подрядчик вправе в одностороннем  порядке принять решение об изменении договора в части объема работ,  выполняемых субподрядчиком, а именно об исключении из объема работ по  договору части работ, которые подрядчик вправе выполнить собственными  силами либо с привлечением третьих лиц, единичные расценки по договору  при этом остаются неизменными. Срыв таких сроков является  существенным условием, являющимся также основанием для расторжения  договора.  

Договор может быть расторгнут подрядчиком в одностороннем порядке в  соответствии с условиями, установленными пунктами 4.11 и 5.1.28  

договора, при этом расторжение договора оформляется без составления  дополнительного письменного соглашения путем направления  субподрядчику соответствующего уведомления, и расторжение договора в  данном случае наступает с момента получения его субподрядчиком (пункт  8.3 договора).  

Ответчик направил в адрес ООО «Арена Н» уведомление от 21.11.2023 №  268 об одностороннем отказе от исполнения договора от 20.06.2023 №  20/06/23-01 со ссылкой на пункты 8.3 и 4.11 договора, в связи с нарушением  субподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ по договору  более чем на 10 календарных дней.  

Полагая, что условия для одностороннего отказа от договора от 20.06.2023   № 20/06/23-01 отсутствовали, ООО «Арена Н» обратилось с настоящим  иском в суд.  

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 450.1, 715, 750  Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что факт  нарушения сроков выполнения работ по контракту не связан с  неправомерными действиями заказчика, пришел к выводу об отсутствии  оснований для удовлетворения иска.  

 В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы  и оплатить его.  

 Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к  исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно,  что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

 Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской  Федерации предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации,  другими законами, иными правовыми актами или договором право на  односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310  Гражданского кодекса РФ) может быть осуществлено управомоченной  стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора); договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом  Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или  договором.  

Требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения  договора от 20.06.2023 № 20/06/23-01, истец указал, что промежуточные  сроки выполнения отдельных видов работ сторонами не согласованы; а  предусмотренные графиком производства работ сроки соразмерно  увеличились за счет несвоевременного предоставления подрядчиком  давальческого материала, а также по независящим от субподрядчика  обстоятельствам (дождь).  

Довод заявителя относительного того, что промежуточные сроки  выполнения работ сторонами по делу не согласованы, судом обоснованно  отклонен в силу следующего.  

Согласно подписанному сторонами дополнительному соглашению № 2 

от 21.09.2023 к договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01 окончательный срок  выполнения работ изменен на 10.12.2023.  

Приложением № 2 к договору сторонами по делу согласован график  выполнения работ, включающий в себя отдельные виды работ и сроки их  выполнения (промежуточные сроки выполнения работ):  

1.Участок от ВК2 до ВК 24 (разработка траншеи – с 11.09.2023 по 29.09.2023,  прокладка трубопровода Ф630 – с 02.09.2023 по 17.10.2023, разработка  грунта под камеры – с 30.09.2023 по 02.10.2023, устройство камер до  фундаментных плит – с 02.10.2023 по 11.10.2023, монтаж колодцев – с  30.09.2023 по 11.10.2023, засыпка трубопровода - с 02.10.2023 по 17.10.2023,  устройство камер до фундаментных плит – с 18.10.2023 по 26.10.2023,  монтаж запорной арматуры– с 18.10.2023 по 26.10.2023, обратная засыпка  камер – с 24.10.2023 по 29.10.2023);  

2. Участок от ВК2 до В-5 (разработка траншеи – с 06.09.2023 по 29.09.2023,  прокладка трубопровода Ф500 – с 18.09.2023 по 10.10.2023, устройство камер  

до фундаментных плит– с 18.09.2023 по 24.09.2023, монтаж колодцев – с  25.09.2023 по 01.10.2023, засыпка трубопровода – с 30.09.2023 по 10.10.2023,  устройство камер до фундаментных плит–с 11.10.2023 по 19.10.2023, монтаж  запорной арматуры – с 11.10.2023 по 19.10.2023, обратная засыпка камер – с  20.10.2023 по 23.10.2023);  

3. Участок от В-5 до ВК5 (разработка траншеи – с 30.09.2023 по 13.10.2023,  прокладка трубопровода Ф400 – с 11.10.2023 по 24.10.2023, монтаж колодцев  – с 14.10.2023 по 18.10.2023, засыпка трубопровода – с 19.10.2023 по  29.10.2023, монтаж запорной арматуры - с25.10.2023 по 29.10.2023);  

4. Участок от ВК5 до ВК 24 (разработка траншеи – с 02.10.2023 по  15.10.2023, прокладка трубопровода Ф500 и Ф560 – с 25.10.2023 по  02.11.2023, разработка грунта под камеры – с 08.10.2023 по 15.10.2023,  устройство камер до фундаментных плит – с 16.10.2023 по 25.10.2023,  засыпка трубопровода – с 30.10.2023 по 04.11.2023, устройство камер до  фундаментных плит – с 03.11.2023 по 15.11.2023, монтаж запорной  арматуры, обратная засыпка камер - с 03.11.2023 по 15.11.2023);  

5. Участок от ВК2 до ВК12 (разработка траншеи – с 06.10.2023 по 10.10.2023,  прокладка трубопровода Ф630 – с 18.10.2023 по 24.10.2023, устройство камер  

до фундаментных плит – с 18.09.2023 по 20.09.2023, монтаж колодцев – с  

06.10.2023 по 07.10.2023, засыпка трубопровода – с 22.10.2023 по 27.10.2023,  устройство камер до фундаментных плит–с 03.11.2023 по 15.11.2023, монтаж  запорной арматуры – с 03.11.2023 по 15.11.2023, обратная засыпка камер – с  10.11.2023 по 15.11.2023);  

6. Участок от ВК12 до В-16/17 (разработка траншеи – с 01.09.2023 по  14.10.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 18.09.2023 по 27.10.2023,  разработка грунта под камеры – с 15.10.2023 по 16.10.2023, устройство камер  до фундаментных плит – с 18.10.2023 по 21.10.2023, монтаж колодцев – с  15.10.2023 по 27.10.2023, засыпка трубопровода – с 17.10.2023 по 01.11.2023,  устройство камер до фундаментных плит – с 28.10.2023 по 09.11.2023,  монтаж запорной арматуры – с 28.10.2023 по 09.11.2023, обратная засыпка  камер - с 04.11.2023 по 09.11.2023);  

7. Участок от В-16/17 до ВК16 (прокол) (пайка труб Ф1000 – с 25.09.2023 

по 10.10.2023, пайка труб Ф710– с 25.09.2023 по 10.10.2023, устройство  прокола – с 25.09.2023 по 10.10.2023, протаскивание трубы – с 11.10.2023 по  19.10.2023);  

8. Участок от ВК16 до ВК18 (разработка траншеи – с 20.10.2023 по  02.11.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 28.10.2023 по 17.11.2023,  разработка грунта под камеры – с 11.10.2023 по 19.10.2023, устройство камер  до фундаментных плит – с 20.10.2023 по 27.10.2023, монтаж колодцев – с  20.10.2023 по 27.10.2023, засыпка трубопровода – с 07.11.2023 по 17.11.2023,  устройство камер до фундаментных плит – с 18.11.2023 по 30.11.2023,  монтаж запорной арматуры – с 18.11.2023 по 30.11.2023, обратная засыпка  камер – с 25.11.2023 по 30.11.2023);  

9. Участок от ВК18 до ВК19 (овраг) (разработка траншеи с 19.10.2023 

по 03.11.2023, прокладка трубопровода Ф710 и Ф1000 – с 28.10.2023 по  17.11.2023, монтаж колодцев – с 04.11.2023 по 10.11.2023, засыпка  трубопровода - 07.11.2023 по 20.11.2023);  

10. Участок от ВК19 до ВК21/22 (разработка траншеи – с 09.10.2023 по  18.10.2023, прокладка трубопровода Ф710 – с 11.10.2023 по 27.10.2023,  разработка грунта под камеры – с 02.10.2023 по 08.10.2023, устройство камер  до фундаментных плит – с 04.10.2023 по 12.10.2023, засыпка трубопровода –  с 19.10.2023 по 27.10.2023, устройство камер до фундаментных плит – с  28.10.2023 по 09.11.2023, монтаж запорной арматуры – с 28.10.2023 по  09.11.2023, обратная засыпка камер – с 04.11.2023 по 09.11.2023).  

В соответствии с пунктом 2.2 договора от 20.06.2023 № 20/06/23-01  субподрядчик обязался выполнить по заданию подрядчика полный комплекс  работ, предусмотренных договором, рабочей документацией, утвержденной  подрядчиком сметной документацией, включая, но не ограничиваясь:  

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту; - выполнение пуско-наладочных работ; - проведение необходимых испытаний, экспертиз; - оформление и предоставление подрядчику комплекта исполнительной 

и технической документации в части выполненных работ, необходимого для  ввода объекта в эксплуатацию и его последующей эксплуатации,  

сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, протоколов  испытаний, исполнительных схем, а также иной документации,  предусмотренной строительными нормами и правилами, техническими  регламентами;  

- сдачу результата работ подрядчику по акту приемки результата работ, в том  числе работ, выполняемых в течение гарантийного срока;  

- сдачу совместно с подрядчиком результата выполненных работ по договору  специализированным эксплуатирующим и контролирующим службам и  организациям.  

Если иное прямо не предусмотрено договором (сметой/расчетом  стоимости работ) или дополнительным соглашением сторон, выполнение  работ субподрядчиком осуществляется строительными материалами,  предоставляемыми подрядчиком (пункт 2.7 договора).  

Согласно пункту 4.5 договора субподрядчик подтверждает, что сроки,  указанные в договоре, являются реально достижимыми и выполнимыми.  

В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость  внести изменения в График производства работ (приложение № 2 к  договору), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ,  то такие изменения производятся по согласованию сторон в письменной  форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору (пункт  4.6 договора).  

В силу пункта 4.9 договора субподрядчик обязан приложить все усилия  для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ, а при  фактической остановке выполнения работ оперативно устранять  послужившие этому обстоятельства, если таковые будут иметь место, в том  числе, в результате споров, возникших в отношении предписаний  подрядчика, касающихся порядка выполнения работ (требований,  предъявляемых к характеру, качеству и объему выполняемых работ).  

В случае существенного отставания от срока выполнения работ,  предусмотренных Графиком производства работ, субподрядчик обязан  устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей  силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное  время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ  (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная договором, изменению  не подлежит (пункт 4.10 договора).  

В соответствии с пунктом 4.12 договора субподрядчик имеет право на  продление срока выполнения работ, или продление сроков выполнения  отдельных видов работ, определенных Графиком производства работ  (приложение № 2 к договору) по следующей причине: несвоевременное  исполнение подрядчиком обязательств, принятых на себя по  договору, если неисполнение подрядчиком обязательств по договору не  является следствием неисполнения субподрядчиком обязательств, принятых  на себя по договору.  

Продление срока выполнения работ (сроков выполнения отдельных видов  работ) в соответствии с настоящим пунктом договора производится  

посредством подписания сторонами дополнительного соглашения к  договору. Субподрядчик, в целях продления указанных сроков, обязан  обратиться к подрядчику, путем направления в адрес последнего  письменного обращения. Подрядчик в течение 15 рабочих дней с  даты получения указанного обращения рассматривает его и уведомляет  субподрядчика о принятом решении в письменной форме.  

При согласии подрядчика на продление срока выполнения работ (сроков  выполнения отдельных видов работ), последний направляет в адрес  субподрядчика на подписание дополнительное соглашение. Субподрядчик в  течение 3 рабочих дней с момента получения указанного дополнительного  соглашения обязан подписать его и направить (в двух экземплярах,  подписанных со стороны субподрядчика) дополнительное соглашение на  подписание подрядчику. В течение 3 рабочих дней с момента получения  дополнительного соглашения, подписанного со стороны субподрядчика,  подрядчик производит его подписание и направляет в адрес субподрядчика 1  экземпляр дополнительного соглашения, подписанного со своей стороны.  

Согласно пункту 4.13 договора при не подписании сторонами  вышеуказанного дополнительного соглашения, а также при отказе  подрядчика от продления срока выполнения работ (сроков выполнения  отдельных видов работ), выполнение работ (выполнение отдельных видов  работ) по договору производится субподрядчиком в  соответствии с ранее согласованными сторонами сроками их выполнения.  

Ежемесячно (не позднее 19-го числа каждого месяца) субподрядчик обязан  представлять подрядчику «месячно-суточный график выполнения работ»  (приложение № 8 к договору). Ежемесячно (не позднее 25-го числа каждого  месяца) субподрядчик обязан представлять подрядчику акт сдачи-приемки  выполненных работ на объекте по форме КС-2, справку о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, и комплект промежуточной  исполнительной документации на весь объем выполненных в отчетном  периоде работ (пункты 5.1.15 и 5.1.16 договора).  

В соответствии с пунктом 6.2 договора субподрядчик предъявляет  подрядчику для приемки выполненные работы ежемесячно не позднее 25-го  числа отчетного месяца с предоставлением нижеуказанных документов:  

- журнал учета выполненных работ (ф. № КС-6а), завизированный  представителем подрядчика или представителем организации,  осуществляющей строительный контроль;  

- акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) в 2-хэкземплярах; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) в 2-х  экземплярах;  

- комплект промежуточной исполнительной документации (в бумажном 

и электронном виде, подписанный всеми поименованными в документах  лицами);  

- счет на оплату выполненных работ (с обязательным указанием стоимости  выполненных работ, суммы гарантийного удержания, суммы зачета аванса,  итоговой суммы к оплате) – 1 экз.;  

- извещение об устранении замечаний по предписаниям;  

- реестр предписаний с отметкой об устранении. Вся вышеуказанная документация комплектуется реестрами и передается по сопроводительному письму. 

Установлено, что предусмотренная пунктом 6.2 ежемесячная отчетная  документация ООО «Арена Н» не сдавалась, акты о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и исполнительная документация  ответчику не передавались, доказательств обратного истцом в материалы  дела не представлено.  

Доказательства предъявления к приемке результатов выполненных по  договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01 работ, сдачи предусмотренной  договором ежемесячной отчетной документации, истцом в материалы дела  также не представлено.  

В соответствии с позицией самого истца, на момент заявления об  одностороннем отказе от исполнения договора (21.11.2023), им не  выполнены или не выполнены в полном объеме следующие виды работ:  

1.Участок от ВК2 до ВК 24: устройство камер до фундаментных плит –  выполнено 50 %, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода -  не выполнено (отсутствие запорной арматуры), устройство камер до  фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры - не  выполнено (отсутствие запорной арматуры), обратная засыпка камер –не  выполнено (отсутствие запорной арматуры);  

2. Участок от ВК2 до В-5: прокладка трубопровода Ф500 – остаток пайки 700  м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не выполнено  (отсутствие запорной арматуры), устройство камер до фундаментных плит –  выполнено 50 %, монтаж запорной арматуры - не выполнено (отсутствие  запорной арматуры), обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие  запорной арматуры);  

3. Участок от В-5 до ВК5: прокладка трубопровода Ф400, монтаж колодцев - 

не выполнено (отсутствие трубы), засыпка трубопровода - не выполнено  (отсутствие запорной арматуры), монтаж запорной арматуры - не выполнено  (отсутствие запорной арматуры);  

4. Участок от ВК5 до ВК 24: засыпка трубопровода – не выполнено  (отсутствие трубы и запорной арматуры), устройство камер до  фундаментных плит – не выполнено, монтаж запорной арматуры - не  выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры), обратная засыпка камер  – не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры);  

5. Участок от ВК2 до ВК12: устройство камер до фундаментных плит –  выполнено 50 %, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода,  монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено  (отсутствие трубы и запорной арматуры);  

6. Участок от ВК12 до В-16/17: монтаж колодцев – не выполнено, засыпка  трубопровода - не выполнено (отсутствие трубы и запорной арматуры),  устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %, монтаж  запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено (отсутствие  

трубы и запорной арматуры);  

7. Участок от В-16/17 до ВК16 (прокол): пайка труб Ф710– остаток пайки  1000 м, протаскивание трубы - не выполнено (отсутствие трубы и запорной  арматуры);  

8 Участок от ВК16 до ВК18: прокладка трубопровода Ф710 –– остаток пайки 

1000 м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не  выполнено (отсутствие запорной арматуры),устройство камер до  фундаментных плит – выполнено 50 %,монтаж запорной арматуры, обратная  засыпка камер – не выполнено (отсутствие запорной арматуры);  

9. Участок от ВК18 до ВК19 (овраг): прокладка трубопровода Ф710 - остаток  пайки 1000 м, монтаж колодцев – не выполнено, засыпка трубопровода - не  выполнено (отсутствие запорной арматуры);  

10. Участок от ВК19 до ВК21/22: прокладка трубопровода Ф710 - остаток  пайки 1000 м, засыпка трубопровода - не выполнено (отсутствие запорной  арматуры); устройство камер до фундаментных плит – выполнено 50 %,  монтаж запорной арматуры, обратная засыпка камер – не выполнено  (отсутствие запорной арматуры).  

Таким образом, истец сам подтвердил, что ряд работ, срок выполнения  которых установлен утвержденным сторонами графиком производства работ,  им не выполнен.  

Из содержания письма истца от 18.10.2023 следует, что по состоянию на  18.10.2023 ООО «Арена Н» выполнило работы по пайке полиэтиленовой  трубы диаметром 630 мм, 560 мм, 500 мм и 1000 мм, при этом факт  предъявления данных работ к приемке субподрядчиком не подтвержден.  

Из представленной истцом сводной таблицы выполненных работ следует,  что на участке от ВК2 до В-5 остаток пайки трубопровода Ф500 составляет  700 м.  

Также истцом представлена в материалы дела объемная переписка между  сторонами по делу, из содержания которой следует, что часть давальческого  материала ответчиком не поставлена либо поставлена с задержкой, при этом  ряд писем датирован июлем 2023 года ( № 24 от 10.07.2023, № 25 от  12.07.2023, № 47 от 31.07.2023), то есть до того момента, как сторонами  согласован актуальный график выполнения работ.  

Субподрядчик указал, что срок выполнения работ автоматически  пролонгировался после даты фактической поставки материала.  

Данный довод ООО «Арена Н» судом обоснованно отклоннен, так как  условиями договора (пункты 4.12, 4.13) стороны согласовали порядок  продления сроков выполнения отдельных видов работ, в том числе, в случае  несвоевременного исполнения подрядчиком обязательств, принятых на себя  по договору.  

Истец указал, что график производства работ, утвержденный  дополнительным соглашением к договору № 2 от 21.09.2023, утратил свою  актуальность в связи с направлением ответчиком в адрес ООО «Арена Н»  нового графика производства работ (приложение к дополнительному  соглашению № 3 от 23.10.2023).  

В материалы дела представлены два экземпляра дополнительного  соглашения № 3 от 23.10.2023 к договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01, один  из которых подписан только истцом, другой - ответчиком, при этом их  содержание отличается, графики выполнения работ содержат разные  временные периоды выполнения отдельных видов работ.  

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что дополнительное  соглашение № 3 от 23.10.2023 сторонами не заключено, промежуточные и  конечный сроки выполнения работ не изменены.  

Также истец указал, что периодически работы не могли выполняться ввиду  неблагоприятных погодных условий (дождь) (письмо от 16.10.2023).  

Однако, как обоснованно указал суд, наличие осадков не является  обстоятельством непреодолимой силы и не является  препятствием для выполнения работ, обратного суду не доказано. Ответчик в  письмах рекомендовал субподрядчику применять специальные защитные  средства, обеспечить водопонижение в камерах, колодцах и траншеях  (письма № 218 от 16.10.2023 и № 250 от 30.10.2023).  

В качестве подтверждения факта выполнения работ истец представил  перепискуиз месседжера "WhatsApp", а также отчет об использовании  авансовых платежей, при этом сам факт выполнения работ ответчиком не  оспаривается, а представленная документация не может заменить акты  выполненных работ и подтвердить выполнение работ в согласованные сроки.  

Субподрядчик представил график выполнения работ по устройству камер,  при этом данный документ никем не подписан и не мог т быть принят судом  в качестве надлежащего доказательства по делу.  

Кроме того, договор между АО «Нижегородский водоканал» и ООО  «Инженерные системы и сети», в рамках исполнения которого заключался  договор от 20.06.2023 № 20/06/23-01, на момент рассмотрения настоящего  спора расторгнут.  

 При изложенных обстоятельствах арбитражный суд обоснованно счел  факт нарушения истцом сроков выполнения отдельных видов работ по  договору от 20.06.2023 № 20/06/23-01 (промежуточных) установленным. В  связи с чем, в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса  Российской Федерации ООО «Инженерные системы и сети» вправе было  отказаться от исполнения договора. Оснований для признания  недействительным одностороннего отказа ООО «Инженерные системы и  сети» от исполнения договора у суда не имелось.  

 Основания для отмены решения арбитражного суда по доводам  апелляционной жалобы отсутствуют. Судом правильно применены нормы  материального права. Нарушений норм процессуального права,  предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, при разрешении спора не судом допущено.  

 В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по уплате государственной пошлины по жалобе  относятся на заявителя.  

 Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный  апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 21.05.2024 по  делу № А43-39455/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Арена Н» - без  удовлетворения.  

 Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок.  

Председательствующий Н.А. Насонова  

Судьи Л.П. Новикова  

 В.А. Танцева