1012/2018-110684(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-14201/2017

г. Чебоксары

23 апреля 2018 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Харитоновым В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

администрации Козловского района Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 429430, 

<

...>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стрим"  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428000, 

<

...>,  

об обязании устранить недостатки, 

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, Администрации  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики,  

общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие",  (ИНН 

<

***>, 

<

...>,  

при участии от истца: ФИО1 по доверенности от 13.02.2017 № 01-06- 04/748 (сроком на три года),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стрим" в течение одного месяца с момента вступления настоящего  решения в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки в доме   № 20Б по улице Карла Маркса в городе Козловка Чувашской Республики:  

- в квартире № 1: устранить вмятины порога дверного проема входной двери,  установить 2 секций радиаторов в зале согласно проектно-сметной документации;  

-в квартире № 21: установить 8 секций радиаторов согласно проектно-  сметной документации;  

-в квартире № 24: устранить неплотное примыкание входной двери к дверной  коробке;  

- в квартирах №№ 14, 26, 30: устранить подтекание воды на откосах  мансардных окон, переустановив оконные блоки в соответствии с ГОСТ 30971- 2012;  

- произвести посев газонных трав на территории, не занятой застройками и  проездами;  

- в зале и жилой комнате квартиры № 6 установить по 1 секции  отопительных батарей согласно проектно- сметной документации;  

- в зале квартиры № 12 установить 2 секции отопительных батарей согласно  проектно- сметной документации;  

- в жилой комнате квартиры № 13 установить 1 секцию отопительных  батарей согласно проектно- сметной документации;  

- в квартире № 19 установить 3 секции батарей согласно проектно- сметной  документации;  

- в первой жилой комнате квартиры № 24 установить 1 секцию  отопительных батарей согласно проектно- сметной документации; во второй  жилой комнате установить 5 секций батарей согласно проектно- сметной  документации;  

- на кухне квартиры № 26 установить 2 секции батарей, в жилой комнате  установить 4 секции батарей согласно проектно- сметной документации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стрим" в доход федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина