АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-224420/2022-52-1745

г. Москва

02 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2023 года. Решение в полном объеме изготовлено 02 мая 2023 года. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» (117105, Г.  МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш.,  Д. 17, СТР. 5, ЭТАЖ № 2, ПОМЕЩ./ОФИС 22/2, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 28.11.2018, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «МОТС» (105613,  Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВО,  ИЗМАЙЛОВСКОЕ Ш., Д. 71, К. 4Г-Д, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. IV-ГД, КОМ. 5, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2022, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании пени в размере 774 456 руб. по договору от 14.05.2022 № 1405-2022 за  период с 05.10.2022 по 12.10.2022,  

при участии:  

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. от 28.11.2022), от ответчика – представитель не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» (далее –  истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «МОТС» (далее – ответчик) о взыскании  пени в размере 774 456 руб. по договору от 14.05.2022 № 1405-2022 за период с  05.10.2022 по 12.10.2022.  

Истец заявленные требования поддержал. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного  разбирательства в судебное заседание не явился.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца, оценив  представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований  частично на основании нижеследующего.  

Между ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» (Поставщик) и ООО «МОТС»  (Покупатель) был заключен договор поставки № 1405-2022 от 14.05.2022. В этот же  день Стороны заключили Спецификацию № 1 к Договору на общую сумму 19 361 400  руб.  

В соответствии с п. 7.2 Договора оплата производится Покупателем на  условиях 100% предварительной оплаты на основании выставленного  счета/подписанной Спецификации.  

Пунктом 5.19 Стороны установили, что Покупатель обязуется оплачивать счёт  в течение 3 календарных дней с момента выставления Счета/подписания  Спецификации к настоящему договору.  

Пунктом 8.6 Договора Стороны остановили, что в случае нарушения п. 7.2.  Договора Покупатель оплачивает пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки от  суммы, указанной в подписанной Спецификации.  

Истцом произведено начисление неустойки на сумму 774 456 руб. за период с  05.10.2022 по 12.10.2022 в связи с просрочкой внесения предварительной оплаты.  

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок  урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с  настоящим иском в суд.  

Возражая по исковым требованиям ответчик в своем отзыве указывает, что на  его стороне задолженность отсутствует, что подтверждается подписанным двусторонне  Актом сверки взаимных расчетов от 30.06.2022; договорные отношения в октябре 2022  года между сторонами отсутствовали; счет на оплату на сумму 19 361 400 руб. в его  адрес не направлялся.  

Так материалами дела установлено, что истцом и ответчиком 14.05.2022 была  подписана Спецификация № 1, со стороны ответчика подписана генеральным  директором ФИО3  

Далее истцом 03.08.2022 ответчику был выставлен счет № 367 на сумму  19 361 400 руб., который был направлен ответчику с Уведомлением о готовности  товара к отгрузке 08.08.2022 (РПО 11511468046142 – 14.10.2022 «Срок хранения истек.  Выслано обратно отправителю»).  

В соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,  заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые  сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия  для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки  соответствующего сообщения ему или его представителю.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу,  которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не  было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

Согласно п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О  некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью  адреса юридического лица», юридическое лицо несет риск последствий неполучения  юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ,  а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое  лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные  ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный  реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на  ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по  делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда  соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий  третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.  

На основании вышеизложенного, доводы отзыва ответчика признаны судом  необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим  

обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным  применением норм материального права.  

Суд приходит к выводу о правомерности требования истца о взыскании  неустойки за нарушение сроков выполнения работ, однако, приходит к выводу о  возможности применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем  ответчиком было заявлено в своем отзыве.  

В силу пунктов 69, 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7, подлежащая уплате неустойка, установленная законом  или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Снижение размера  договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией,  индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией,  нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности,  допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной  выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При этом согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, если должником является коммерческая  организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация  при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом  допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может  быть сделано в любой форме.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской  Федерации) Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, правила о  снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации применяются также в случаях, когда неустойка определена  законом.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям  нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд  вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и  обстоятельств конкретного дела, как того требуют статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность  снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений  сторон.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства,  Гражданский кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь,  которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.  

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие  обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а  также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на  основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется  

правилами ст. ст. 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации об относимости и допустимости доказательств.  

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст.  71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь  названными нормами права, учитывая положения ст. 333, 404 Гражданского кодекса  Российской Федерации, суд приходит к выводу о снижении размера неустойки до 154  891,20 руб. (по 0,1%) за период с 05.10.2022 по 12.10.2022 (8 дней).  

В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта  обязанность основана на статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на  основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства  должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на  наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает  процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное  действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая  позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 №  12857/12.  

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений,  распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном  процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают,  изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных  участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда  распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.  

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия  для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для  правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного  суда Российской Федерации от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения  арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной  пошлине» при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по  государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы  неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МОТС» (ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ  ИНДУСТРИЯ» (ИНН: 

<

***>) пени в размере 154 891,20 руб., госпошлину в  размере 18 489 руб.  

В остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.Е. Галиева