Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-61074/23

19 марта 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО "Архонт"  (143300, Россия, Московская обл., Наро-Фоминский г.о., Наро-Фоминск г., ФИО1 ул., д. 29, стр. 1,  помещ. 9, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ООО СК "Магирус" (143300, Россия,  Московская обл., Наро-Фоминский г.о., Наро-Фоминск г., Маршала ФИО2 ул., д. 6Б, ком. 40,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

третье лицо: Муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства» о  взыскании задолженности по Договору подряда от 01.04.2022 № 0148200005421001018- 22/СП-СНР в  размере 13 598 843 рублей 30 копеек,  

по встречному исковому заявлению ООО СК «Магирус» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО «Архонт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании суммы  неотработанного аванса (неосновательного обогащения) в сумме 16 300 000 руб. 00 коп., неустойки  (штраф, пени) в размере 1 737 365 руб. 46 коп., процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 10.02.2023 по 31.08.2023 в размере 77 158 руб. 07 коп., с 01.09.2023 процентов  за пользование чужими денежными средствами начисленными на сумму основного долга (1 737 365  руб. 46 коп.) (в случае погашения – на остаток задолженности) по день фактической оплаты  задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО «Архонт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО СК  «Магирус» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неотработанный аванс (неосновательное  обогащение) в размере 16 300 000 руб. 00 коп., неустойку (штраф, пени) в размере 1 737 365 руб. 46  коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10.02.2023 по 31.08.2023 в  размере 77 158 руб. 07 коп., с 01.09.2023 проценты за пользование чужими денежными средствами  начисленными на сумму основного долга (1 737 365 руб. 46 коп.) (в случае погашения – на остаток  задолженности) по день фактической оплаты задолженности, исходя из ключевой ставки Банка  России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины в  размере 113 573 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова