1076/2023-219472(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

127994 Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-50433/2023

Дело № А40-110436/23

г. Москва

16 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления оглашена: 14 ноября 2023 года 

Полный текст постановления изготовлен: 16 ноября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи: Семёновой А.Б., судей: Кузнецовой Е.Е., Тетюка В.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ветух А.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  ООО "Институт "Каналсетьпроект"  

на Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2023 по делу № А40-110436/23,  по иску ООО "ГОРПОЖЗАЩИТА М" (ОГРН 1177746280876) к ООО "Институт  "Каналсетьпроект" (ОГРН 1167746706258) о взыскании 1 960 281 руб. 81 коп. – долга,  неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Горпожзащита М" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с исковым заявлением к ООО "Институт "Каналсетьпроект" (далее – ответчик) о  взыскании задолженности по договорам № 005/01/18 от 30.01.2018, № 039/04/20 от  06.04.2020, № 041/04/20 от 06.04.2020, № 042/04/20 от 06.04.2020, № 043/04/20 от  06.04.2020, № 044/04/20 от 06.04.2020, № 045/04/20 от 06.04.2020, № 025/10/21 от  25.10.2021, № 026/10/21 от 25.10.2021, № 014/03/20 от 24.03.2020, № 016/03/20 от 24.02.2020  в размере 1 785 935,35 руб., неустойки по состоянию на 19.07.2022 в размере  174 346,46 руб.  

Решением от 14.06.2023 исковые требования удовлетворены.  

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой,  в которой просит суд решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2023 по делу   № А40-110436/23-63-874 о взыскании с ООО «Институт «Каналсетьпроект» (ИНН  

<

***>) в пользу ООО «Горпожзащита М» (ИНН 

<

***>) денежных средств в  размере 1 960 281,81руб., в том числе: 1 785 935,35 руб. – долг, 174 346,46 руб. неустойки,  отменить полностью; в части взыскания денежных средств в размере 505 163,47 руб., в  том числе 460 794,7 руб. – долг, 44 368,77 руб. – неустойки, оставить без рассмотрения; в  остальной части принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых  требований.  

В судебное заседание апелляционного суда представители сторон не явились. 

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ), изучив материалы дела, обсудив доводы  апелляционной жалобы, судебная коллегия установила следующее.  

Как следует из материалов дела, в период с 11.09.2017 по 25.10.2021 между  ООО «Горпожзащита М» и ООО «Институт «Каналсетьпроект» заключены договоры  подряда от 11.09.2017 № 046/09/17; от 30.01.2018 № 005/01/18; от 06.04.2020 № 039/04/20;  от 06.04.2020 № 041/04/20; от 06.04.2020 № 042/04/20; от 06.04.2020 № 043/04/20; от  06.04.2020 № 044/04/20; от 06.04.2020 № 045/04/20; от 25.10.2021 № 025/10/21; от  25.10.2021 № 025/10/21; от 25.10.2021 № 026/10/21; от 24.03.2020 № 014/03/20; от  24.02.2020 № 016/03/20.  

1. 11.09.2017 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 046/09/17 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 046/09/17), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утверждённому заказчиком заданию на проектирование  выполнить корректировку раздела проектной документации «Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности» для объекта: «Внутригородские системы  инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение  Инновационного центра «Сколково». Дороги и магистральные инженерные  коммуникации в районах Dl, D2, D3, Z.2.2, Z 2.3 для инженерного обеспечения объектов  1-ой фазы за пределами проектируемых дорог. Этапы строительства 9.1. — 9.9. в части  этапа строительства 9.6. (за исключением водопровода и канализации) и передать  заказчику готовую документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных  подрядчиком работ и оплатить его.  

В соответствии с пунктом 2.1. договора подряда № 046/09/17 цена составляет 100  000 рублей. Статьёй 3 договора подряда № 046/09/17 установлен порядок оплаты работ, в  соответствии с которым заказчик в течении 10 рабочих дней после подписания договора  перечисляет подрядчику аванс в размере 50% от цены работ. Сумма аванса составляет  50 000 рублей (пункт 3.1.1). Окончательный расчёт за выполненные работы производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, с учётом ранее оплаченной суммы аванса путём перечисления  причитающейся к выплате суммы на p/счёт подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента  подписания заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ при условии: получения  положительного заключения экспертизы на разработанную проектную документацию  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; предоставления заказчику  счёта- фактуры и счёта (пункт 3.1.2).  

Пунктом 6.1. договора подряда № 046/09/17 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. На основании выполненных работ составлен и подписан  акт сдачи-приёмки выполненных работ от 20.09.2021 к договору подряда № 046/09/17, в  соответствии с которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в  полном объёме и удовлетворяет условиям договора. Кроме того, стороны подтвердили,  что заказчиком перечислен аванс в размере 50 000 рублей.  

20.09.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 046/09/17 на сумму 5 000 рублей. В соответствии  с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022 по договору  подряда № 046/09/17 подрядчиком 20.09.2021 на p/счёт заказчика произведена оплата по  договору в размере 5 000 рублей.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 046/09/17 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  неустойка за период с 21.12.2021 по 19.07.2022 составила 5 000 руб.  

2. 30.01.2018 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключён договор подряда № 005/01/18 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 005/01/18), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности» для объекта: Реконструкция перепускных трубопроводов с увеличением  пропускной способности участка русла реки Нищенка, расположенного по адресу:  г. Москва, ЮВАО, ул. Пруд Ключики (Казанская ж/д) и передать заказчику готовую  документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и  оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 005/01/18 цена договора  составляет 174 834 руб. 70 коп. Статьёй 3 договора подряда № 005/01/18 установлен  порядок оплаты работ, в соответствии с которым заказчик в течении 10 рабочих дней  после подписания договора перечисляет подрядчику аванс в размере 50% от цены работ.  Сумма аванса составляет 87 417 руб. 35 коп. (пункт 3.1.1). Окончательный расчёт за  выполненные работы производится заказчиком единовременно на основании акта сдачи- приёмки выполненных работ, подписанного сторонами, с учетом ранее оплаченной суммы  аванса путем перечисления причитающейся к выплате суммы на p/счёт подрядчика не  позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных  работ при условии: получения положительного заключения экспертизы на разработанную  проектную документацию «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;  предоставления заказчику счёта-фактуры и счёта (пункт 3.1.2).  

Пунктом 6.1. договора подряда № 005/01/18 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. На основании выполненных работ составлен и подписан  акт сдачи-приёмки выполненных работ от 20.09.2021 к договору подряда № 005/01/18 в  соответствии с которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в  полном объёме и удовлетворяет условиям договора. Кроме того, стороны подтвердили,  что заказчиком на счёт подрядчика перечислен аванс в размере 87 417 руб. 35 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 005/01/18 имеется задолженность в размере 87 417 руб. 35 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 договора подряда № 005/01/18 при  нарушении заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик  выплачивает подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый  день просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету  истца неустойка за период с 21.12.2021 по 19.07.2022 составила 8 741,74 руб.  

3. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 041/04/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 041/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: Жилой объект в составе  объекта «Жилые дома, район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская» по адресу: г. Москва,  ЮВАО, район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская» и передать заказчику готовую  документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и  оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 041/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 041/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  

подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на  p/счётп не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 041/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 06.04.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ. На основании выполненных работ  составлен и подписан акт сдачи-приёмки выполненных работ от 25.11.2021 к договору  подряда № 041/04/20 в соответствии с которым стороны подтвердили, что работа по  договору выполнена в полном объеме и удовлетворяет условиям договора. 25.11.2021  сторонами подписан акт об оказании услуг генерального проектировщика по договору  подряда № 041/04/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп. В соответствии с актом сверки взаимных  расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022 по договору подряда № 041/04/20  Подрядчиком 25.11.2021 на p/счёт заказчика произведена оплата по договору в размере  2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 041/04/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 26.02.2022 по 19.07.2022 в размере 5 899 руб.  

4. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 039/04/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 039/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Жилой дом с инженерными  сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, 

<

...> влд. 935 (мкр.9, корп. 935)  (Зеленоградский АО)» и передать заказчику готовую документацию. Заказчик обязуется  принять результат выполненных подрядчиком работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1 статьи 2 договора подряда № 039/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 039/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1 и 6.2 договора подряда № 039/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 06.04.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 11.10.2021 к договору подряда № 039/04/20 в соответствии с  которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет  58 990 рублей. 11.10.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 039/04/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 039/04/20 подрядчиком 11.10.2021 на p/счёт заказчика  произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 8 договора подряда № 039/04/20 при  нарушении заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик  выплачивает подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый  день просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету  истца размер неустойки за период с 12.01.2022 по 19.07.2022 составил 5 899 руб.  

5. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 043/04/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 043/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утверждённому заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: Объект коммунального  назначения в составе объекта: «Очистные сооружения поверхностного стока» по адресу:  ЮАО, 

<

...>» и передать заказчику готовую  документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и  оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 043/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 043/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 043/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ — 06.04.2020;  окончание работ — 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 19.03.2021 к договору подряда № 043/04/20 в соответствии с  которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет 58  990 рублей. 19.03.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 043/04/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 043/04/20 подрядчиком 19.03.2021 на p/счёт заказчика  произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 043/04/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 20.06.2022 по 19.07.2022 составил 1 769,70 руб.  

6. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 044/04/20 на  выполнение проектных работ (далее — договор подряда № 044/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Проект строительства жилого  дома» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Воздвиженка, вл. 7/6, стр. 6» и передать заказчику  готовую документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком  работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 044/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 044/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 044/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 06.04.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 15.12.2021 к договору подряда № 044/04/20 в соответствии с  которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет 58  990 рублей. 15.12.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 044/04/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 044/04/20 подрядчиком 15.12.2021 на p/счёт заказчика  произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 договора подряда № 044/04/20 при  нарушении заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик  выплачивает подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый  день просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету  истца неустойка за период с 16.03.2022 по 19.07.2022 составила 5 899 руб.  

7. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 045/04/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 045/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ТУП «Мосводосток» объекта: «Развитие Киевского  направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного  пассажирского движения. Строительство IV главного пути на участке Москва -  Сартировочная - Киевская -Апрелевка», по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково -  Матвеевское, район Солнцево» и передать заказчику готовую документацию. Заказчик  обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1 договора подряда № 045/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 045/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 045/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 06.04.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 12.01.2022 к договору подряда № 045/04/20 в соответствии с  

которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет  58 990 рублей. 12.01.2022 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 045/04/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 045/04/20 подрядчиком 12.01.2021 на p/счёт заказчика  произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 045/04/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 13.04.2022 по 19.07.2022 составил 5 781,02 руб.  

8. 25.10.2021 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 025/10/21 на  выполнение проектных работ (далее — договор подряда № 025/10/21), в соответствии с  которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по разработке  раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности» на строительство объекта «Автомобильная дорога от с. Севи- через с.  Сыстыг-Хем - с. Ырбан до Ак-Сугского ГОКа» по 3 этапу строительства - участок с.  Ырбан - Подбаза; на строительство объекта «Автомобильная дорога от с. Севи – через с.  Сы-стыг-Хем - с. Ырбан до Ак-Сугского ГОКа» по 4 этапу строительства - участок  Подбаза - Ак-Сугский ГОК». В соответствии с заданием и календарным графиком работ,  являющимися неотъемлемыми частями договора, а заказчик обязуется принять и оплатить  результат выполненных работ.  

В соответствии пунктом 1.2. договором подряда № 025/10/21 сроки выполнения  работ определены с даты заключения договора до 10.02.2022. Пунктом 3.1. договора  подряда № 025/10/21 установлена цена и порядок оплаты работ, в соответствии с которым  цена договора составляет 750 000 рублей (п.3.1), при этом заказчик в течении 15 рабочих  дней со дня подписания договора, получения от подрядчика счета на оплату перечисляет  подрядчику аванс в размере 50% от цены, что составляет 375 000 рублей (п. 3.3.1.).  Последующая оплата этапов работ осуществляется в срок не более 30 календарных дней с  даты подписания без замечаний акта сдачи-приёмки выполненных работ (п. 3.3.2).  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт № 1 сдачи-приёмки  этапа работ от 16.12.2021 к договору № 025/10/21 в соответствии с которым стороны  подтвердили, что подрядчиком выполнен 1.1. этап работ: «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности». Кроме того, актом подтверждено, что заказчиком авансовым  платежом оплачено 120 000 рублей. Следует к перечислению 206 700 рублей. 28.02.2022  сторонами подписан акт № 2 сдачи-приёмки этапа работ, в соответствии с которым  стороны подтвердили, что подрядчиком выполнен 2.1. этап работ: «Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности». Сторонами подтверждено, что авансом заказчиком  оплачена сумма в размере 120 000 рублей, следует к перечислению подрядчику 228 300  рублей.  

В соответствии с пунктом 10.2. договора подряда № 025/10/21 за просрочку оплаты  принятых результатов работ подрядчик вправе требовать с заказчика уплату неустойки в  размере 0,05% от своевременно не оплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10%. Согласно расчету истца неустойка за период с  16.01.2022 по 19.07.2022 составила 20 670 руб., за период с 31.03.2022 по 19.07.2022 –  22 830 руб.  

9. 25.10.2021 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 026/10/21 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 026/10/21), в соответствии с  которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по разработке  

раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности» на строительство объекта «Автомобильная дорога от г. Туран - через с. Хут  - до с. Севи» по 1 этапу строительства - участок г. Туран - с. Хут; на строительство  объекта «Автомобильная дорога от г. Туран - через с. Хут - до с. Севи» по 2 этапу  строительства - участок с. Хут — с. Севи; на строительство объекта «Автомобильная  дорога от с. Севи - через с. Сытыг - Хем- с. Ырбан до Ак-Сугского ГОКа» по 1 этапу  строительства - участок с.Севи -с. Сыстыг - Хем; на строительство объекта  «Автомобильная дорога от с. Севи - через с. Сытыг -Хем- с. Ырбан до Ак-Сугского ГОКа»  по 2 этапу строительства - участок с. Сыстыг - Хем = с. Ыр-бан. В соответствии с  заданием и календарным графиком работ, являющимися неотъемлемыми частями  договора, заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.  

В соответствии пунктом 1.2. договором подряда № 026/10/21 сроки выполнения  работ определены с даты заключения договора до 10.02.2022. Пунктом 3.1. договора  подряда № 026/10/21 установлена цена и порядок оплаты работ, в соответствии с которым  цена договора составляет 1 400 000 рублей (п.3.1), при этом заказчик в течении 15 рабочих  дней со дня подписания договора, получения от подрядчика счёта на оплату перечисляет  подрядчику аванс в размере 50% от цены, что составляет 700 000 рублей (п. 3.3.1.).  Последующая оплата этапов работ осуществляется в срок не более 30 календарных дней с  даты подписания без замечаний акта сдачи-приёмки выполненных работ (п. 3.3.2).  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт № 1 сдачи-приёмки  этапа работ от 16.12.2021 к договору № 026/10/21 в соответствии с которым стороны  подтвердили, что подрядчиком выполнен 1.1. этап работ: «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности». Кроме того, в акте указано, что аванс не перечислен. Следует к  перечислению 336 600 рублей. 16.12.2022 сторонами подписан акт № 2 сдачи-приёмки  этапа работ, в соответствии с которым стороны подтвердили, что подрядчиком выполнен  2.1. этап работ: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

В соответствии с пунктом 10.2. договора подряда № 026/10/21 за просрочку оплаты  принятых результатов работ подрядчик вправе требовать с заказчика уплату неустойки в  размере 0,05% от своевременно не оплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10%. Согласно расчету истца размер неустойки за период  с 16.01.2022 по 19.07.2022 составил 74 160 руб.  

10. 24.03.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 014/03/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 014/03/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ТУП «Мосводосток» объекта: Проектирование и  строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным  переходом в здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (

<

...>)» по адресу: 

<

...>,  ЦАО и передать заказчику готовую документацию. Заказчик обязуется принять результат  выполненных подрядчиком работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 014/03/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 014/03/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 014/03/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 24.03.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ. На основании выполненных работ  составлен и подписан акт сдачи-приёмки выполненных работ от 28.09.2021 к договору  подряда № 014/03/20 в соответствии с которым стороны подтвердили, что работа по  договору выполнена в полном объеме и удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате  за выполненные работы составляет 58 990 рублей. 28.09.2021 сторонами подписан акт об  оказании услуг генерального проектировщика по договору подряда № 014/03/20 на сумму  2 949 руб. 50 коп. В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января  2017 по 01.03.2022 по договору подряда № 014/03/20 подрядчиком 28.09.2021 на p/счёт  заказчика произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3 договора подряда № 014/03/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 29.12.2021 по 19.07.2022 составил 5 899 руб.  

11. 24.03.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 016/03/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 016/03/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ТУП «Мосводосток» объекта: Организация  пригородногородского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск -  Наха-бино (МЦД-2 «Подольск- Нахабино»). «Строительство остановочного пункта  Волоколамская. Этап 11. Продольный водоотвод в районе р. Барышиха, по адресу:  Волоколамское шоссе. АЗС «Лукойл» на удалении 100 м от ж.д. пути, р. Барышиха и  передать заказчику готовую документацию. Заказчик обязуется принять результат  выполненных подрядчиком работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1. договора подряда № 016/03/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 016/03/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым оплата  выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате сумме на p/счёт  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания заказчиком акта сдачи-приёмки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 016/03/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 24.03.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 28.09.2021 к договору подряда № 016/03/20 в соответствии с  которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет 58  990 рублей. 28.09.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 016/03/20 на сумму 2 949 руб. 50 коп.  В соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с января 2017 по 01.03.2022  по договору подряда № 016/03/20 подрядчиком 28.09.2021 на p/счёт заказчика  произведена оплата по договору в размере 2 949 руб. 50 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 016/03/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10 % от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 29.12.2021 по 19.07.2022 составил 5 899 руб.  

12. 06.04.2020 между ООО «Институт «Каналсетьпроект» (заказчик) и  ООО «Горпожзащита М» (подрядчик) заключен договор подряда № 042/04/20 на  выполнение проектных работ (далее - договор подряда № 042/04/20), в соответствии с  которым подрядчик обязуется по утвержденному заказчиком заданию на проектирование  разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту:  «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения  поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Жилой дом с инженерными  сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Нижегородский, ул.  Нижегородская, вл. 76 (Юго-Восточный административный округ)» и передать Заказчику  готовую документацию. Заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком  работ и оплатить его.  

В соответствии пунктом 2.1 договора подряда № 042/04/20 цена работ,  выполняемых подрядчиком, составляет 58 990 рублей. Статьёй 3 договора подряда   № 042/04/20 установлен порядок оплаты работ, в соответствии с которым выполненных  подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора работ производится  заказчиком единовременно на основании акта сдачи-приемки выполненных работ,  подписанного сторонами, путем перечисления причитающейся к выплате суммы на р/счет  подрядчика не позднее 3-х месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки  выполненных работ.  

Пунктами 6.1. и 6.2. договора подряда № 042/04/20 срок действия договора  устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения сторонами  своих обязательств по договору. Сроки выполнения работ: начало работ - 06.04.2020;  окончание работ - 10 рабочих дней с даты начала работ.  

На основании выполненных работ составлен и подписан акт сдачи-приёмки  выполненных работ от 19.03.2021 к договору подряда № 042/04/20 в соответствии с  которым стороны подтвердили, что работа по договору выполнена в полном объёме и  удовлетворяет условиям договора. Итого к оплате за выполненные работы составляет  58 990 рублей. 19.03.2021 сторонами подписан акт об оказании услуг генерального  проектировщика по договору подряда № 042/04/20 на сумму 2 457 руб. 92 коп.  

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 042/04/20 при нарушении  заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору заказчик выплачивает  подрядчику в размере 0,1% от неоплаченной подрядчику суммы за каждый день  просрочки платежа, но не более 10% от невыплаченной суммы. Согласно расчету истца  размер неустойки за период с 20.01.2022 по 19.07.2022 составил 5 899 руб.  

Удовлетворяя иск в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался  ст. 309, 310, 314, 702, 758, 762 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК  РФ). Усматривая основания для частичного удовлетворения апелляционной жалобы  ответчика, апелляционный суд исходит из следующего.  

25.11.2021 Арбитражный суд города Москвы вынес определение о принятии  заявления ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» о признании должника  (ответчика) банкротом, возбудил дело о банкротстве № А40-248556/21-109-664.  

22.07.2022 определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40248556/21-109-664 в отношении должника введена процедура наблюдения.  

20.01.2023 (резолютивная часть объявлена 18.01.2022) решением Арбитражного  суда города Москвы по делу № А40-248556/21-109-664 должник признан банкротом, в  отношении него введена процедура конкурсного производства; конкурсным  управляющим утвержден ФИО1  

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 126 Федерального закона "О несостоятельности  (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия  арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии  конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об  уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением  текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и  требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого  незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о  применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе  конкурсного производства в порядке статей 71, 100 Закона.  

Под требованиями кредиторов по текущим платежам, указанными в п. 1 ст. 134  Закона о банкротстве, понимаются требования, которые возникли до принятия заявления о  признании должника банкротом.  

Как разъяснено в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009г. № 63 «О  текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», по смыслу нормы  п. 1 ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», текущими являются любые требования  об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после  возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до  даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

По смыслу норм ст. 5 и п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве требования кредиторов по  денежным обязательствам, возникшим до даты принятия заявления о признании должника  банкротом, рассматриваются в общем порядке искового производства, если они  предъявлены к должнику до даты введения процедуры наблюдения.  

В связи с этим исковые заявления о взыскании с должника долга по денежным  обязательствам, за исключением текущих платежей, поданные в день введения  наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению  без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.  

Применительно к рассматриваемому спору текущими являются требования по  оплате выполненных работ, возникшие с 25.11.2021 (дата принятия судом заявления о  признании должника банкротом). Соответственно, требования, возникшие до этой даты,  являются реестровыми, подлежащими рассмотрению в рамках дела о банкротстве при  включении в реестр требований кредиторов; в рамках рассматриваемого дела подлежат  оставлению без рассмотрения.  

Суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что на момент вынесения  обжалуемого акта в отношении должника была введена процедура конкурсного  производства, и взыскал с должника денежные средства в размере 58 990 руб. в погашение  реестровых требований.  

Так, стороны заключили 12 договоров на выполнение истцом проектных работ   № 005/01/18 от 30.01.2018, № 039/04/20 от 06.04.2020, № 041/04/20 от 06.04.2020,   № 042/04/20 от 06.04.2020, № 043/04/20 от 06.04.2020, № 044/04/20 от 06.04.2020,   № 045/04/20 от 06.04.2020, № 025/10/21 от 25.10.2021, № 026/10/21 от 25.10.2021,   № 014/03/20 от 24.03.2020, № 016/03/20 от 24.02.2020.  

Из условий договоров № 039/04/20, № 041/04/20, № 042/04/20, № 043/04/20,   № 044/04/20, № 045/04/20, № 014/03/20, № 016/03/20, № 046/09/17, № 005/01/18 следует, что  оплата производится в течение 3 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.  

Из условий договоров № 025/10/21 и № 026/10/21 следует, что оплата производится  в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ.  

Согласно представленным в материалы дела актам сдачи-приемки работ  апелляционным судом установлены следующие даты возникновения требования  подрядчика к заказчику по оплате выполненных работ: по договору № 039/04/20 от  06.04.2020 – 11.01.2022 (т. 1 л.д. 37) на сумму 58 990 руб.; по договору № 041/04/20 от  06.04.2020 – 25.02.2022 (т. 1 л.д. 41) на сумму 58 990 руб.; по договору № 042/04/20 от  

06.04.2020 – 19.01.2022 (т. 1 л.д. 45) на сумму 58 990 руб.; по договору № 043/04/20 от  06.04.2020 – 19.06.2021 (т. 1 л.д. 49) на сумму 58 990 руб.; по договору № 044/04/20 от  06.04.2020 – 15.02.2022 (т. 1 л.д. 53) на сумму 58 990 руб.; по договору № 045/04/20 от  06.04.2020 – 12.04.2022 (т. 1 л.д. 57) на сумму 58 990 руб.; по договору № 025/10/21 от  25.10.2021 (3 этап строительства) – 15.01.2022 (т. 1 л.д. 69) на сумму 206 700 руб.; по  договору № 025/10/21 от 25.10.2021 (4 этап строительства) – 30.03.2022 (т. 1 л.д. 69 на  обороте) на сумму 228 300 руб.; по договору № 026/10/21 от 25.10.2021 (1 этап  строительства) – 15.01.2022 (т. 1 л.д.82 на обороте) на сумму 336 600 руб.; по договору   № 026/10/21 от 25.10.2021 (2 этап строительства) – 15.01.2022 (т. 1 л.д.83) на сумму  364 500 руб.; по договору № 014/03/20 от 24.03.2020 – 27.12.2021 (т. 1 л.д. 87) на сумму  58 990 руб.; по договору № 016/03/20 от 24.03.2020 – 27.12.2021 (т. 1 л.д. 91) на сумму  58 990 руб.; по договору № 046/09/17 от 11.09.2017 – 19.12.2021 (т. 1 л.д. 95 оборотная  сторона) на сумму 50 000 руб.; по договору № 005/01/18 от 30.01.2018 – 19.12.2021 (т. 1  л.д. 99) на сумму 87 417,35 руб.  

Поскольку спорные требования истца к ответчику по договору № 043/04/20 от  06.04.2020 по оплате долга на сумму 58 990 руб. возникли до даты возбуждения судом  производства по делу о банкротстве (до 25.11.2021), в соответствии со ст. 5 Закона о  банкротстве № 127-ФЗ они являются реестровыми, ввиду чего в указанной части решение  суда подлежит отмене, а исковые требования оставлению без рассмотрения.  

В остальной части доводы апелляционной жалобы апелляционным судом  отклоняются, поскольку ссылаясь на недействительность актов сдачи-приемки  выполненных работ, ответчик не заявил о фальсификации доказательств.  

Возражений по существу требования ответчик в апелляционной жалобе не указал. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что акт сдачи-приемки выполненных работ  от 19.03.2021 по договору № 043/04/20 от 06.04.2020 подписан директором ФИО2  по доверенности от 16.01.2017 № 00142, однако лицо, выдавшее доверенность, объем  полномочий и срок действия доверенностей неизвестны, апелляционный суд отклоняет  как несостоятельные ввиду следующего.  

В соответствии с частью 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были  предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не  рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Как указано в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»,  поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ  повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно  представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия  новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на  апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства,  возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по  независящим от него уважительным причинам.  

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное  отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об  истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в  материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом,  участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных  заявлениях, касающихся оценки доказательств.  

В решении Арбитражного суда города Москвы, от 14.06.2023 указано, что ответчик  не представил отзыв на исковое заявление; документы, опровергающие иск не предъявил;  расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и  месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями  121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.  

Таким образом, довод ответчика относительно подписания актов сдачи-приёмки  выполненных работ лицами по доверенности не являлись предметом рассмотрения в суде  первой инстанции и не могут рассматриваться судом апелляционной инстанции.  

Апелляционный суд учитывает, что судом первой инстанции при рассмотрении  иска не было учтено Постановление. Правительства Российской Федерации от 28.03.2022  N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,  подаваемым кредиторами".  

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) для обеспечения  стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных  обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее -  мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства РФ № 497 с 01.04.2022 на территории Российской  Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том  числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2  данного постановления).  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок  действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают  последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63  данного Федерального закона. В силу абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о  банкротстве не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за  неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных  платежей, за исключением текущих платежей.  

Введенный Постановлением Правительства Российской Федерации № 497  мораторий на удовлетворение требований кредиторов как инструмент государственного  регулирования экономики антикризисной направленности имеет цель минимизировать  последствия санкционного режима в 2022 году, обеспечить стабильность экономики  государства путем оказания поддержки хозяйствующим субъектам. Мораторием  предусмотрен запрет на начисление неустоек, иных финансовых санкций за неисполнение  или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей в период  с 01.04.2022 по 01.10.2022.  

Разъяснения, касающиеся цели и направленности моратория, вводимого в  определенных случаях, даны в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения  положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 44).  

В силу пункта 7 указанного постановления в период действия моратория проценты  за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса),  неустойка (статья 330 Гражданского кодекса), пени за просрочку уплаты налога или сбора  (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции  не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему  под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона  о банкротстве).  

При этом возникновение долга по причинам, не связанным с теми, в связи с  которыми введен мораторий, не имеет значения. Освобождение от ответственности  направлено на уменьшение финансового бремени на должника в тот период его  просрочки, когда она усугубляется объективными, непредвиденными и  экстраординарными обстоятельствами. Данный вывод изложен в определении Судебной  

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от  19.04.2021 № 305-ЭС20-23028.  

Положения абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве о  неначислении неустойки фактически носят генеральный характер и применяются ко всем  реестровым имущественным требованиям кредитора (применительно к мораторию – к  имущественным требованиям, возникшим до его введения). Указанная позиция изложена  в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации от 14.06.2023 № № 305-ЭС23-1845.  

Таким образом, к спорным правоотношениям подлежит применению мораторий,  введенный Постановлением Правительства Российской Федерации № 497.  

Согласно произведенному апелляционным судом перерасчету, взысканию  подлежит задолженность по договорам № 039/04/20 от 06.04.2020 на сумму 58 990 руб.; по  договору № 041/04/20 от 06.04.2020 на сумму 58 990 руб.; по договору № 042/04/20 от  06.04.2020 на сумму 58 990 руб.; по договору № 044/04/20 от 06.04.2020 на сумму 58 990  руб.; по договору № 045/04/20 от 06.04.2020 на сумму 58 990 руб.; по договору № 025/10/21  от 25.10.2021 (3 этап строительства) на сумму 206 700 руб.; по договору № 025/10/21 от  25.10.2021 (4 этап строительства) на сумму 228 300 руб.; по договору № 026/10/21 от  25.10.2021 (1 этап строительства) на сумму 336 600 руб.; по договору № 026/10/21 от  25.10.2021 (2 этап строительства) на сумму 364 500 руб.; по договору № 014/03/20 от  24.03.2020 на сумму 58 990 руб.; по договору № 016/03/20 от 24.03.2020 на сумму 58 990  руб.; по договору № 046/09/17 от 11.09.2017 на сумму 50 000 руб.; по договору № 005/01/18  от 30.01.2018 на сумму 87 417,35 руб. Всего задолженность составляет 1 686 447,35 руб.  

Общий размер неустойки согласно перерасчету апелляционного суда составляет  76 449,55 руб., из них неустойка по договору: № 039/04/20 – 4 660,21 руб. за период с  12.01.2022 по 31.03.2022 (0,1%); № 041/04/20 – 2 005,66 руб. за период с 26.02.2022 по  31.03.2022 (0,1%); № 042/04/20 – 4 188,29 руб. за период с 20.01.2022 по 31.03.2022 (0,1%);   № 044/04/20 – 943,84 руб. за период с 16.03.2022 по 31.03.2022 (0,1%); № 045/04/20 –  5 781,02 руб. за период с 13.04.2022 по 19.07.2022 (0,1%); № 025/10/21 – 7 751,25 руб. за  период с 16.01.2022 по 31.03.2022 (0,05%) и 114,15 руб. за период с 31.03.2022 по  31.03.2022 (0,05%); № 026/10/21 – 26 291,25 руб. за период с 16.01.2022 по 31.03.2022  (0,05% от суммы долга 701 100 руб.); № 014/03/20 – 5 486,07 руб. за период с 29.12.2021 по  31.03.2022 (0,1%); № 016/03/20 – 5 486,07 руб. за период с 29.12.2021 по 31.03.2022 (0,1%);   № 046/09/17 – 5 000 руб. за период с 21.12.2021 по 31.03.2022 (0,1%);   № 005/01/18 – 8 741,74 руб. за период с 21.12.2021 по 31.03.2022 (0,1%).  

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ  пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.  

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2023 по делу № А40110436/23 изменить. Резолютивную часть решения изложить в следующей редакции:  

Исковое заявление в части взыскании задолженности по договору № 043/04/20 от  06.04.2020 в размере 58 990 руб. и неустойки в размере 1 769,70 руб. оставить без  рассмотрения.  

Взыскать с ООО "Институт "Каналсетьпроект" (ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "Горпожзащита М" (ОГРН 

<

***>) задолженность по договору № 039/04/20  от 06.04.2020 в сумме 58 990 руб.; по договору № 041/04/20 от 06.04.2020 в сумме  58 990 руб.; по договору № 042/04/20 от 06.04.2020 в сумме 58 990 руб.; по договору   № 044/04/20 от 06.04.2020 в сумме 58 990 руб.; по договору № 045/04/20 от 06.04.2020 в  сумме 58 990 руб.; по договору № 025/10/21 от 25.10.2021 (3 этап строительства) в сумме  206 700 руб.; по договору № 025/10/21 от 25.10.2021 (4 этап строительства) в сумме  

228 300 руб.; по договору № 026/10/21 от 25.10.2021 (1 этап строительства) в сумме  336 600 руб.; по договору № 026/10/21 от 25.10.2021 (2 этап строительства) в сумме  364 500 руб.; по договору № 014/03/20 от 24.03.2020 в сумме 58 990 руб.; по договору   № 016/03/20 от 24.03.2020 в сумме 58 990 руб.; по договору № 046/09/17 от 11.09.2017 в  сумме 50 000 руб.; по договору № 005/01/18 от 30.01.2018 в сумме 87 417,35 руб., пени по  договору № 039/04/20 в размере 4 660,21 руб. за период с 12.01.2022 по 31.03.2022;   № 041/04/20 в размере 2 005,66 руб. за период с 26.02.2022 по 31.03.2022; № 042/04/20 в  размере 4 188,29 руб. за период с 20.01.2022 по 31.03.2022; № 044/04/20 в размере 943,84  руб. за период с 16.03.2022 по 31.03.2022; № 045/04/20 в размере 5 781,02 руб. за период с  13.04.2022 по 19.07.2022; № 025/10/21 в размере 7 751,25 руб. за период с 16.01.2022 по  31.03.2022 и 114,15 руб. за период с 31.03.2022 по 31.03.2022; № 026/10/21 в размере  26 291,25 руб. за период с 16.01.2022 по 31.03.2022; № 014/03/20 в размере 5 486,07 руб. за  период с 29.12.2021 по 31.03.2022; № 016/03/20 в размере 5 486,07 руб. за период с  29.12.2021 по 31.03.2022; № 046/09/17 в размере 5 000 руб. за период с 21.12.2021 по  31.03.2022; № 005/01/18 в размере 8 741,74 руб. за период с 21.12.2021 по 31.03.2022,  расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 197,77 руб.  

Взыскать с ООО "Горпожзащита М" (ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "Институт "Каналсетьпроект" (ОГРН 

<

***>) расходы по уплате  государственной пошлины в размере 302,08 руб.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья А.Б. Семёнова  

Судьи Е.Е. Кузнецова  

 В.И. Тетюк