ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-50866/2024

14 октября 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 14 октября 2024 года

 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Богдановской Г.Н.

судей Бугорской Н.А., Пономаревой О.С., 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

 

при участии представителей истца и ответчика согласно протоколу судебного заседания,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29460/2024) общества с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.07.2024 по делу №А56-50866/2024, принятое 

 

по иску акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» 

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» (далее - истец, АО «Концерн Росэнергоатом») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» (далее - ответчик, ООО «ЭТС-Проект») о взыскании 9 123 919 руб. 90 коп. неустойки по договору подряда от 27.12.2021 № 5569910/9/189060-Д. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.07.2024 исковые требования удовлетворены в полно объеме.

С указанным решением суда не согласился ответчик, обратился в апелляционный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представителями истца и ответчика заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, изучив представленное сторонами мировое соглашение б/д б/н, исследовав материалы дела, считает ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 данного Кодекса.

Согласно части 1 статьи 139, части 1 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается   арбитражным судом в судебном заседании (пункт 2 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 5 статьи 49, пункта 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается судом при условии, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Стороны заключили мировое соглашение на следующих условиях:

 «Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице исполняющего обязанности директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» ФИО2, действующего на основании доверенности от 09.04.2024 № 9/313/2024-ДОВ, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО3, действующего на основании доверенности от 11.01.2024 № 9-24/ЭТСп, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1.  Мировое соглашение заключается сторонами на основании статьи139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее— АПК РФ) в целях мирного урегулирования спора по делу № А56-50866/2024 о взыскании неустойки за нарушение Ответчиком условийдоговора от 27.12.2021 № 569910/9/189060-Д (далее — Договор):

-        за нарушение сроков выполнения работ по этапу №1 - 327 календарных дня за период с 30.04.2022 по 22.03.2023 включительно, сумма неустойки составляет 2 322 927,27 руб.,

-        за нарушение сроков выполнения работ по этапу №2 - 365 календарных дня за период с 21.01.2023 по 20.01.2024 включительно, сумма неустойки составляет 6 440 880,12 руб.;

-        за просрочку в предоставлении Ответчиком Истцу нового обеспечения (на замену) - 291 календарных дня за период с 05.04.2023 по 20.01.2024 включительно, сумма неустойки составляет 360 112,50 руб.

2.  По настоящему Мировому соглашению Ответчик выплачивает Истцунеустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1 и 2 ипредоставления нового обеспечения по заявленным периодам просрочки (п. 1настоящего Мирового соглашения) в сумме 6 021 787,13 руб., из них:

-  5 784112,88руб. за нарушение сроков выполнения работ,

-    237 674,25 руб. за просрочку в предоставлении Подрядчиком Заказчику нового обеспечения (на замену).

3.      Ответчик возмещает Истцу 100% расходов по уплатегосударственной пошлины в размере 68 620,00 руб.

4.    Ответчик обязуется уплатить Истцу неустойку в размере 6 021 787,13 руб. и возместить расходы по уплате государственной пошлины в размере 68 620,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Мирового соглашения судом. В остальной части истец отказывается от заявленных исковых требований по делу № А56-50866/2024.

5.    Ответчик вправе досрочно исполнить обязательства по погашению задолженности, предусмотренные Мировым соглашением.

6.    Исполнение обязательств по Мировому соглашению обеспечивается неустойкой из расчета 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, подлежащей уплате по дату фактического исполнения обязательства.

7.     Денежные средства, предусмотренные настоящим Мировымсоглашением, перечисляются Ответчиком, по следующим банковскимреквизитам:

 

Банк получателя

Банк ГПБ (АО) г. Москва

Р/счет

40702810892000000154

К/счет

30101810200000000823

БИК

044525823

 

8.    Денежные обязательства считаются исполненными в моментзачисления денежных средств на расчетный счет Истца.

9.  Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены Мировымсоглашением.

10.   Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению в соответствии с частью 2 статьи 142 АПК РФ.

11.   Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

12.   Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, и один экземпляр для арбитражного суда.

13.   Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

14.   На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139, 141 АПК РФ просим настоящее Мировое соглашение утвердить и производство по делу № А56-50866/2024 прекратить.

15.   Адреса и подписи сторон мирового соглашения».

Мировое соглашение соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  оформлено в письменном виде, подписано полномочными представителями сторон.

Таким образом, поскольку мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению и мировое соглашение сторон утверждению судом.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. 

Государственная пошлина по иску распределена сторонами по условиям мирового соглашения.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе, оплаченная ответчика по платежному поручению №1744 от 27.08.2024, подлежит возвращению ответчику на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 138, 140, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 31.07.2024 по делу №  А56-50866/2024 отменить.

Утвердить мировое соглашение б/д б/н, заключенное между акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и обществом с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» на следующих условиях:

 

«Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице исполняющего обязанности директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» ФИО2, действующего на основании доверенности от 09.04.2024 № 9/313/2024-ДОВ, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО3, действующего на основании доверенности от 11.01.2024 № 9-24/ЭТСп, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

 

1.  Мировое соглашение заключается сторонами на основании статьи139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее— АПК РФ) в целях мирного урегулирования спора по делу № А56-50866/2024 о взыскании неустойки за нарушение Ответчиком условийдоговора от 27.12.2021 № 569910/9/189060-Д (далее — Договор):

-        за нарушение сроков выполнения работ по этапу №1 - 327 календарных дня за период с 30.04.2022 по 22.03.2023 включительно, сумма неустойки составляет 2 322 927,27 руб.,

-        за нарушение сроков выполнения работ по этапу №2 - 365 календарных дня за период с 21.01.2023 по 20.01.2024 включительно, сумма неустойки составляет 6 440 880,12 руб.;

-        за просрочку в предоставлении Ответчиком Истцу нового обеспечения (на замену) - 291 календарных дня за период с 05.04.2023 по 20.01.2024 включительно, сумма неустойки составляет 360 112,50 руб.

2.  По настоящему Мировому соглашению Ответчик выплачивает Истцунеустойку за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1 и 2 ипредоставления нового обеспечения по заявленным периодам просрочки (п. 1настоящего Мирового соглашения) в сумме 6 021 787,13 руб., из них:

-  5 784112,88руб. за нарушение сроков выполнения работ,

-    237 674,25 руб. за просрочку в предоставлении Подрядчиком Заказчику нового обеспечения (на замену).

3.      Ответчик возмещает Истцу 100% расходов по уплатегосударственной пошлины в размере 68 620,00 руб.

7.    Ответчик обязуется уплатить Истцу неустойку в размере 6 021 787,13 руб. и возместить расходы по уплате государственной пошлины в размере 68 620,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Мирового соглашения судом. В остальной части истец отказывается от заявленных исковых требований по делу № А56-50866/2024.

8.    Ответчик вправе досрочно исполнить обязательства по погашению задолженности, предусмотренные Мировым соглашением.

9.    Исполнение обязательств по Мировому соглашению обеспечивается неустойкой из расчета 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, подлежащей уплате по дату фактического исполнения обязательства.

7.     Денежные средства, предусмотренные настоящим Мировымсоглашением, перечисляются Ответчиком, по следующим банковскимреквизитам:

 

Банк получателя

Банк ГПБ (АО) г. Москва

Р/счет

40702810892000000154

К/счет

30101810200000000823

БИК

044525823

 

8.    Денежные обязательства считаются исполненными в моментзачисления денежных средств на расчетный счет Истца.

9.  Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены Мировымсоглашением.

16.   Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению в соответствии с частью 2 статьи 142 АПК РФ.

17.   Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

18.   Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, и один экземпляр для арбитражного суда.

19.   Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

20.   На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 139, 141 АПК РФ просим настоящее Мировое соглашение утвердить и производство по делу № А56-50866/2024 прекратить.

21.   Адреса и подписи сторон мирового соглашения».

 

Производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭТС-Проект» из федерального бюджета 1500 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Г.Н. Богдановская

 

Судьи

 

Н.А. Бугорская

 

 О.С. Пономарева