АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ЕШЕНИЯ  

г. Воронеж 

«22» июня 2021г. Дело № А14-11188/2020  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской  области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об устранении недостатков выполненных работ третьи лица: 

1. государственное унитарное предприятие Воронежской области  «Облкоммунсервис», г. Воронеж  

2. общество с ограниченной ответственностью «Первая строительная  компания», г. Воронеж  

Руководствуясь статьями 109, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вектор» г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с  момента вступления решения в законную силу устранить недостатки работ  по договору № 17/РТС от 25.04.2017, выполнив следующие виды работ:  

 - ремонт отмостки бетонной с устройством основания (песок и  щебень) и с устройством термошвов в объеме 36 кв. м.;  

- ремонт и восстановление герметизации стыков межпанельных  швов на торцевых фасадах здания в объеме 279 м.п.;  

- оштукатуривание стен здания и соответствующие работы по  подготовке поверхностей и их окраске - цокольная часть, часть левого  торцевого фасада, участок на правом торцевом фасаде и участок на  главном фасаде в объеме 98 кв.м.;  

- устройство выравнивающих стяжек входной группы в количестве  58 кв.м.;  

- устройство покрытий входной группы на цементном растворе из  плиток бетонных, цементных в количестве 36 кв.м.;  

- установка металлического дверного блока подъезда № 1-1 шт.  (3,3 кв.м.);  

5) устранение контруклона приборов отопления - радиаторов в  подъездных помещениях в количестве 3 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор»  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Фонда  капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000руб. расходов по  уплате государственной пошлины, 30 000руб. расходов по оплате  экспертизы.  

Перечислить обществу с ограниченной ответственностью  «Воронежский центр судебной экспертизы» 60 000руб. за производство  экспертизы из денежных средств, внесенных сторонами на депозитный  счет суда платежными поручениями № 3022 от 28.12.2020, № 157 от 21.12.2020,   № 144 от 25.11.2020.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова