2010/2022-119820(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-8319/2021 

от 28 ноября 2022 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования администрации городского округа Архангельской области  "Город Новодвинск" (ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ 76» (ОГРН 

<

***>) в  течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки в  работах по муниципальному контракту № 107 от 30.12.2013 на выполнение работ по  строительству объекта: «Детский комбинат на 280 мест в микрорайоне «А» г. Новодвинска»,  а именно:  

- выполнить замену дренажных труб внутренней дренажной системы с подготовкой  основания и устройством обратной засыпки согласно проектной документации и  нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации;  

- выполнить демонтаж существующей отмостки и устройство новой отмостки с  подготовкой основания под нее и устройством узла примыкания отмостки и цокольной части  здания согласно проектной документации и нормативной документации, действующей на  территории Российской Федерации;  

- выполнить восстановление участков газона и основания из песка в местах просадки;  

- выполнить восстановление участков бермы в местах размытия песка; 

- выполнить замену канального нагревателя АРКТОС PBER 600*300/17к.вт 400В/3Ф  приточной вентиляции, выполнить настройку или ремонт шкафа автоматики приточной  вентиляции бассейна, обеспечить работоспособность вентиляционной системы;  

- устранить плесень на стенах в помещении бассейна;  

- выполнить переустройство полов в буфетной комнате группы «Утята» и в  тренерской комнате бассейна по всей площади помещений с устранением зазоров между  стеной и полом;  

- устранить просадку дорожного покрытия проездов около колодца ливневой  канализации.  

На случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью 

«СМУ 76» (ОГРН 

<

***>) судебного акта в части обязательства по устранению  недостатков в выполненных работах взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СМУ 76» (ОГРН 

<

***>) в пользу администрации муниципального образования  «Город Новодвинск» (ОГРН 

<

***>) денежную сумму в размере 1 000 рублей за  каждый день неисполнения.  

В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ 76» 

(ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. государственной  пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.В. Бутусова.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 5:25:52

Кому выдана Бутусова Наталья Владимировна