ПРОТОКОЛЬНОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по делу № А33-16484/2025 от 12 февраля 2026 года

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 15 часов 15 минут 18 февраля 2026 года (зал № 6).

От прокуратуры Красноярского края:

- обосновать невозможность продления срока по пункту 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (ситуация, когда контракт не исполнен по вине подрядчика);

- со ссылкой на материалы дела доказать изменение сторонами сроков выполнения работ;

- представить письменные пояснения по доводам ответчика о предъявлении заказчиком претензии за просрочку выполнения работ (исходя из предусмотренных контрактом сроков);

- представить письменные пояснения о том, каким образом надлежало действовать заказчику в спорной ситуации;

- представить письменные пояснения о том, каким образом изменение условий спорного контракта ограничило либо устранило конкуренцию на рынке оказания подобных услуг;

- уточнить каким образом предъявление настоящего иска влечет защиту публичных интересов.

От ответчиков:

- представить доказательства размещения в ЕАИС сведений о предъявлении

подрядчику претензий по срокам выполнения работ и начислению неустоек;

- представить письменные пояснения о причинах задержки выполнения работ

(имелись ли какие-либо объективные обстоятельства, препятствующие своевременному

выполнению работ).