14/2020-10914(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-8467/2019

г. Благовещенск

02 марта 2020 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Системы и Сети» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Трест Гидромонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 23 443 351,43 руб. (после уточнений), 

встречное исковое заявление акционерного общества «Трест Гидромонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Системы и Сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 5 563,712,53 руб. 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

решил:

первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с акционерного общества «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Системы и Сети»  

(ОГРН 1052800042778, ИНН 2801102858) по договору подряда № У/912/НБГЭС от  20.07.2016 основной долг (без учета отложенного платежа) в размере 8 975 578,48 рублей,  в том числе:  

- 4 771 314 рублей за работы согласно справке о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3) № 11 от 02.07.2019;  

- 4 204 264,48 рублей компенсации затрат по перевозке работников автомобильным  транспортом свыше 3-х км. и вахтовой надбавки за 2017, 2018 годы, согласно справке о  стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 12 от 08.07.2019;  

неустойку в размере 538 778,92 рублей, в том числе: 

- 328 565,70 рублей за просрочку оплаты работ согласно справке о стоимости  выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 11 от 02.07.2019  

- 210 213,22 рублей за просрочку оплаты компенсации согласно справке о  стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 12 от 08.07.2019 (всего  9 514 357,40 руб.).  

В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  56 906 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Системы и Сети» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 83 311 руб.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.05.2019 7:30:12

Кому выдана Сутырина Марина Владимировна