Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1458/2019

07 мая 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Управления Федерального казначейства по  Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному  казенному учреждению "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с участием третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью "Профстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества с  ограниченной ответственностью «СПМ-Альянс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании 3 347 095,66 рублей, обязании устранить нарушения, указанные в предписании,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного казенного учреждения "Служба государственного  заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 3 347 095,66 рублей.  

Обязать государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика  Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.10.2019  устранить нарушения, указанные в пунктах 2-9 перечня нарушений Предписания, путем  устранения недостатков (дефектов), выполненных строительно-монтажных работ в  соответствии с условиями государственных контрактов от 28.04.2017 №  0116200007917000318, заключенного ГКУ «СГЗ PC (Я)» с ООО «Профстрой», от 07.06.2017   № 0116200007917002496, от 04.12.2017 № 0116200007917010207, заключенных ГКУ «СГЗ  

PC (Я)» с ООО «СПМ-Альянс» на объекте «Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Северная мозаика» в Республике Саха  (Якутия), путем:  

- установки конструкций стоек ограждений из стальных труб диаметром 108 мм.  на площадке № 4 в количестве 80 м.п.;  

- устранения разницы конструкций натяжных сеток на площадке № 4 в  количестве 10,7 м2;  

- устранения разницы по устройству ограждения ОГ-1 в количестве 298,5 м2; 

- устранения разницы конструкции стоек из стальных труб, смонтированных на  пруду в количестве 4271,6 м.п.;  

- устранения разницы по установке бортовых камней в количестве 147 м.п.; 

- выполнения работ по обустройству дороги, в том числе: разметка проезжей  части, установка столбиков;  

- выполнения строительно-монтажных работ по устройству дорожной одежды  типа 1 на стоянке;  

- выполнения строительно-монтажных работ по устройству бутового основания  автостоянки.  

Взыскать с государственного казенного учреждения "Служба государственного  заказчика Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 45 735 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А.В. Гуляева