68/2023-4047(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-14653/2022

город Вологда

17 января 2023 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в государственный контракт от 12.11.2021  

 № 1030200000421000003, заключенный между автономным учреждением  

физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа  

олимпийского резерва «Витязь» и обществом с ограниченной ответственностью  

«Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой», следующие  

изменения: пункт 1.5.2 контракта изложить в следующей редакции: «1.5.2. Окончание выполнения работ – не позднее 31.07.2023 года.»; пункт 3.4 контракта изложить в следующей редакции: 

«3.4. Срок окончания выполнения Работ – не позднее 31.07.2023 года.».  

четвертую строку технического задания (приложение № 3 к контракту)  

изложить в следующей редакции: 

Срок выполнения работ 

с даты заключения государственного контракта не  позднее 31 июля 2023 года. Датой окончания выполнения  работ считается дата подписания акта приемки  законченного строительством плоскостного сооружения.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2022 8:20:00

Кому выдана Фадеева Анастасия Александровна