АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, 

<

...>  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-301758/24-180-2025

15 сентября 2025 г.

г. Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи Ламоновой Т.А. (единолично) протокол ведет секретарь Рощин А.Ю. рассмотрев в судебном заседании дело по иску истец:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНЖ" (127566, Г.МОСКВА, УЛ. БЕСТУЖЕВЫХ, Д. 14, КОРП 1, ЭТ 2 ПОМ VI КОМ 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 

<

***>)  

ответчик: 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (123112, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 21, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>)  

третье лицо: 

 ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ-ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ (125032, Г.МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д.13, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.12.2002, ИНН: 

<

***>)  

об обязании заключить дополнительное соглашение к Договору аренды от 02.07.2020 № И-02-001936.  

В судебное заседание явились: От истца – ФИО1 дов. от 22.11.2024 От ответчика – ФИО2 дов. № ДГИ-Д-879/24 от 27.12.2024 

От третьего лица – ФИО2 дов. № 4-47-1599/24 от 16.07.2024  

РЕШИЛ:

Обязать ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (123112, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>) и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНЖ" (127566, Г.МОСКВА, УЛ. БЕСТУЖЕВЫХ, Д. 14, КОРП 1, ЭТ 2 ПОМ VI КОМ 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 

<

***>) заключить дополнительное соглашение к Договору аренды от 02.07.2020 № И-02- 

001936, в котором изложить п. 2.1, п. 4.6, п. 4.7 в следующей редакции:  

п. 2.1.: «Договор заключён сроком на 3 года 2 месяца. Течение срока  

действия Договора считать с 16.03.2024 по 15.05.2027. 

п. 4.6.: «Арендатор обязуется уведомить Департамент о получении  

разрешения на строительство в срок не позднее 14.05.2025 года».  

п. 4.7.: «Арендатор в срок не позднее 14.11.2025 включительно обязуется  

уведомить Департамент о завершении работ нулевого цикла (устройство  

котлована, фундамента, устройство стен и перекрытий подземной части  

объекта). В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (123112, Г.МОСКВА, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 21, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНЖ" (127566, Г.МОСКВА, УЛ. БЕСТУЖЕВЫХ, Д. 14, КОРП 1, ЭТ 2 ПОМ VI КОМ 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 

<

***>) 25 000 руб. расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.  

 Судья: Ламонова Т.А 

.