ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-1830/2019

г. Саратов

13 августа 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен          13 августа 2019 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О.И.,  

судей Борисовой Т.С., Цуцковой М.Г.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу администрации муниципального образования «Володарский район»

на решение Арбитражного суда Астраханской области от 10 июня 2019 года по делу № А06-1830/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Пневмострой»                 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к Администрации муниципального образования «Володарский район» 

о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 25.08.2015 в сумме 1 782 113 руб. 37 коп., неустойки в размере 29 003 руб. 90 коп. и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная с 13.03.2019 за каждый день просрочки по день фактической оплаты; по муниципальному контракту от 25.08.2015 в сумме 488 907 руб. 71 коп., неустойки в размере 7 956 руб. 97 коп., и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная с 12.04.2018 за каждый день просрочки по день фактической оплаты.

третье лицо: ООО «СтройТехМеханизация»,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Пневмострой"  обратилось  в арбитражный суд с иском к Администрации муниципального образования "Володарский район"  о  взыскании  задолженности по муниципальному контракту от 25.08.2015г. в сумме 1 782 113 руб. 37 коп., неустойки в размере 29 003 руб. 90 коп. и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 13.03.2019г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты;  по муниципальному контракту от  25.08.2015г. в сумме  488 907 руб. 71 коп., неустойки в размере 7 956 руб. 97 коп., и неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ России, начисленную на сумму долга, начиная  с 12.04.2018г. за каждый день  просрочки  по день фактической оплаты.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 10 июня 2019 года по делу № А06-1830/2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме, что послужило основанием для обращения в суд с апелляционной жалобой.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 25 августа 2015 года между Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (Продавец) был заключен муниципальный контракт № 0325300022415000320-0178340-01, в соответствии с которым Продавец обязался в срок до 31.03.2016 года передать покупателю благоустроенные квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на территории поселка Володарский Володарского района, общей площадью 1.286,1 кв.м.

Дополнительным соглашением от 02.12.2015 года к муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года права и обязанности покупателя Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» переданы Администрации муниципального образования «Володарский район».

Во исполнение контракта истец 30.03.2016 года согласно актам приема-передачи квартиры передал ответчику 27 квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

Пунктом 2.1 контракта стороны установили, что цена контракта составляет 33.123.505 руб. 50 коп., в том числе:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 22.940.000 руб. 52 коп.; 

- средства бюджета Астраханской области – 5.091.752 руб. 49 коп.; 

- средства бюджета МО «Володарский район» - 5.091.752 руб. 49 коп.

Согласно пункту 2.2 контракта оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1. После подписания Контракта Покупатель предоставляет Продавцу аванс в размере: 

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 6.882.000 руб. 15 коп. в течение 5 рабочих дней при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет бюджета Астраханской области, что составляет 1.527.525 руб. 74 коп., не позднее 31 декабря 2015 года при условии поступления денежных в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области; 

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет местного бюджета МО «Володарский район», что составляет 1.527.525 руб. 74 коп., не позднее 31 декабря 2016 года. 

2.2.2. Окончательный расчет с Продавцом Покупатель производит:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке, при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

 - средства бюджета Астраханской области - не позднее 31 декабря 2016 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем   Свидетельств   о   государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке при условии  поступления денежных средств  в бюджет  МО  «Володарский  район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

- средства местного бюджета МО «Володарский район»:   

- 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2017 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке; 

- 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2018 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке. 

Также, 25 августа 2015 года между Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (Продавец) был заключен муниципальный контракт № 0325300022415000321-0178340-02, в соответствии с которым Продавец обязался в срок до 31.03.2016 года передать покупателю благоустроенные квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном на территории поселка Володарский Володарского района, общей площадью 1.397,4 кв.м. 

Дополнительным соглашением от 02.12.2015 года к муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года права и обязанности покупателя Комитетом земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» переданы Администрации муниципального образования «Володарский район».

Согласно пункту 2.2 контракта оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: 

 2.2.1. После подписания контракта Покупатель предоставляет Продавцу аванс в размере: 

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 7.477.573 руб. 29 коп. в течение 5 рабочих дней при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет бюджета Астраханской области, что составляет 1.659.718 руб. 89 коп., не позднее 31 декабря 2015 года при условии поступления денежных в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области; 

- 30% от стоимости средств, предоставляемых за счет местного бюджета МО «Володарский район», что составляет 1.659.718 руб. 89 коп., не позднее 31 декабря 2016 года. 

2.2.2. Окончательный расчет с Продавцом Покупатель производит:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке, при условии поступления денежных средств в бюджет МО «Володарский район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

- средства бюджета Астраханской области - не позднее 31 декабря 2016 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем   Свидетельств   о   государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке при условии  поступления денежных средств  в бюджет  МО  «Володарский  район» Астраханской области из бюджета Астраханской области;

- средства местного бюджета МО «Володарский район»:   

- 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2017 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке; 

- 35% от стоимости средств не позднее 31 декабря 2018 года при условии подписания акта приема-передачи квартир и получения Покупателем Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект, оформленных в установленном законом порядке. 

 Истцом обязательства по Контрактам выполнены в полном объеме 30.03.2016г., что подтверждается актами приема-передачи квартир № 1-27, расположенных по адресу: 

<

...> и актами приема-передачи квартир № 1-27, расположенных по адресу: 

<

...>

Переход права собственности был зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области в 2016г.

По Контракту   № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.    ответчиком оплата произведена частично в сумме 31.207.657 руб. 38 коп.: платежное поручение № 643 от 04.09.2015г. - 6 290 504,72 руб., п.п. № 452903 от 10.12.2015г. - 9 757 495,65 руб., п.п. № 466900 от 14.12.2015г. - 6 892 000,15 руб., по соглашению о зачете требований, заключенному между истцом, ответчиком и ООО «СтройТехМеханизация» - 8 267 656,86 руб.

 По Контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.   оплата произведена частично в сумме 26.308.537 руб. 32 коп.: платежное поручение № 645 от 04.09.2015г. - 7 477 573,29 руб., п.п. № 460769 от 11.12.2015г. - 16 445 238,86 руб., п.п. № 2121 от 28.12.2016г. - 2 570 012,04 руб., п.п. 2122 от 28.12.2016г. - 2 128 713,13 руб.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 26 октября 2018г. по делу № А06-3352/2018 с ответчика в пользу истца   взыскано      8.788.781 руб. 68 коп., из которых 7.878.895 руб. 71 коп.  – сумма долга, 839.885 руб. 97 коп. – сумма пени и 70.000 руб. – расходы по проведению судебной экспертизы.     Пеня начислена на сумму долга в размере 7.878.895 руб. 71 коп.  и подлежат начислению с 30 июня 2018 года по день фактической уплаты Обществу с ограниченной ответственностью «Пневмострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) суммы долга в размере 1/300 действующей на дату исполнения настоящего решения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Платежным поручением № от 29.12.2018г. на сумму 1.447.431.01 руб. ответчик частично погасил сумму долга. 

С  09.01.2019г.  по контракту №  0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.  образовалась задолженность в размере  1 782 113 руб. 37 коп.

 С  09.01.2019г.  по контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.  образовалась задолженность в размере 488.907 руб. 71 коп.

Поскольку ответчик задолженность не погасил, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли – продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

Согласно пункту 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Статьей 488 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором

В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара.

Как было сказано ранее, решением Арбитражного суда Астраханской области от 26 октября 2018г. по делу № А06-3352/2018 с ответчика в пользу истца   взыскано      8.788.781 руб. 68 коп., из которых 7.878.895 руб. 71 коп.  – сумма долга, 839.885 руб. 97 коп. – сумма пени и 70.000 руб. – расходы по проведению судебной экспертизы.     Пеня начислена на сумму долга в размере 7.878.895 руб. 71 коп.  и подлежат начислению с 30 июня 2018 года по день фактической уплаты Обществу с ограниченной ответственностью «Пневмострой» суммы долга в размере 1/300 действующей на дату исполнения настоящего решения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В данном деле  рассматриваются   требования истца    о взыскании задолженности    с  09.01.2019г.   по контракту №  0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 г.     в размере  1 782 113 руб. 37 коп. и  по контракту № 0325300022415000320-0178340-02 от 25.08.2015 г.    в размере 488.907 руб. 71 коп.

Возражая против заявленных требований, Администрация как в суде первой инстанции так и в рамках апелляционного обжалования указывала, что сумма долга была оплачена  третьему лицу.

Между тем, приведенный довод следует признать необоснованным.

Так, в рамках дела №А06-3352/2018 была проведена судебная экспертиза, в результате которой установлено, что  Соглашение о зачете требований, датированное 18 августа 2016 года, оформленное между ООО «СтройТехМеханизация», ООО «Пневмострой» и Администрацией МО «Володарский район» на сумму 18.417.573 рубля 65 копеек и Соглашение о зачете требований, датированное 14 октября 2016 года, оформленное между ООО «СтройТехМеханизация», ООО «Пневмострой» и Администрацией МО «Володарский район» на сумму 11.597.347 рублей 80 копеек сфальсифицировано.   

Согласно статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку иных доказательств в подтверждение факта оплаты ответчик не представил, то суд не может признать доказанным факт исполнения со стороны ответчика его обязанности по оплате переданных ему истцом квартир в заявленной истцом сумме.

При таких обстоятельствах суд признает требование истца о взыскании с ответчика долга по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года . в сумме 1 782 113 руб. 37 коп.   и по муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года в  сумме 488 907 руб. 71 коп. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Пунктом 6.2 контрактов стороны установили, что в случае просрочки исполнения покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Продавец вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку ответчиком нарушено условие контрактов о сроке исполнения обязательства, обеспеченного договорной неустойкой, то истец вправе требовать ее уплаты за все время просрочки.

Сумма пени по муниципальному контракту № 0325300022415000320-0178340-01 от 25.08.2015 года за период просрочки с 09 января 2019 года по 12 марта 2019 года  составила  29 003 руб. 90 коп., по муниципальному контракту № 0325300022415000321-0178340-02 от 25.08.2015 года за период просрочки с 09 января 2019 года по 12 марта 2019  года – 7 956  руб. 97 коп. 

Отсутствие вины в ненадлежащем исполнении обязательства ответчиком не доказано и судом не установлено.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в указанной части.

Доводы апелляционной жалобы направлены на несогласие с выводами суда первой инстанции, повторяют доводы, приведенные в отзыве на иск, что  само по себе не может служить основанием для его отмены.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 10 июня 2019 года по делу № А06-1830/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление  арбитражного суда апелляционной инстанции  вступает в законную силу со дня  его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа  в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.                

Председательствующий 

О.И. Антонова

Судьи 

 

Т.С. Борисова

М.Г. Цуцкова