АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-28629/23

14 декабря 2023 года.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 г.  Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2023 г.  

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчук И. С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Почта  России" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Генстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 1 811 206 руб. штрафа  при участии:  

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 1609.09.2022,  от ответчика: представитель не явился,  

установил, акционерное общество "Почта России" обратилось в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Генстрой" об обязании в месячный срок  после вступления решения суда в законную силу устранить недостатки в работах,  установленными актами от 24.04.2023 № 2; от 24.04.2023 № 4; от 24.04.2023 № 6; от  24.04.2023 № 5; от 24.04.2023 № 1; от 24.04.2023 № 3, о взыскании 1 811 206 руб. пени.  Определением суда от 31.10.2023 удовлетворено ходатайство истца об уточнении иска  согласно заявлению от 26.10.2023.  

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, отзыв не представил.  

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении  иска согласно заявлению от 07.12.2023.  

Истец уточненные требования поддержал, дал пояснения по иску.  

По правилам статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в судебном заседании 11.12.2023 объявлен перерыв до 11.12.2023 до 16 час. 30  мин.  

После окончания перерыва судебное заседание продолжено.  Стороны в судебное заседание не явились, извещены.  

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Определения суда, выносимые по рассматриваемому делу, опубликованы на  официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел»  (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные  доказательства и оценив их в совокупности, установил следующее.  

По итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая  Россия", прошедшего 24 августа 2021 года, Президент Российской Федерации 11.09.2021  

утвердил перечень поручений № Пр-1703, которым Правительству Российской Федерации  при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть, в том числе бюджетные ассигнования  на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и  приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой  связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в  труднодоступных местностях.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 3821-р  Минцифры России выделены в 2021 году на предоставление бюджетных инвестиций в  виде взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта  России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных  объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской  местности, а также в труднодоступных местностях, бюджетные ассигнования в размере  5000000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в  виду, что выделение указанных средств позволит модернизировать и привести в  нормативное состояние не менее 1195 указанных объектов почтовой связи до конца 2022  года.  

Минцифры России, Минфину России и Росимуществу совместно с акционерным  обществом "Почта России" определено обеспечить в установленном порядке проведение  установленных настоящим распоряжением мероприятий.  

Между АО «Почта России» в лице заместителя директора по имущественным  вопросам ФИО3 и ООО «Генстрой» заключены договоры: от  19.09.2022 № 8.4.8.1-01-17-2022; от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-26-2022; от 19.09.2022 №  8.4.8.1-01-25-2022; от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-15-2022; от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-16-2022;  от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-24-2022 на выполнение строительно-монтажных работ для  отделений почтовой связи формата «Сельское ОПС» (далее - объекты): 404547,  расположенного по адресу: 

<

...>; 404012, расположенного по адресу: 

<

...>; 404026, расположенного по адресу: 

<

...>; 404510, расположенного по  адресу: Волгоградская область, Калачевский район, х. ФИО4, ул. 40 лет Победы, д. 13,  кв. 15; 404521, расположенного по адресу: 

<

...>; 403024, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - договоры).  

В соответствии с п. 1.2 договоров цена каждого из договоров составляет,  соответственно: 7 834 970,00 руб.; 3 364 730,00 руб.; 5 655 090,00 руб.; 4 947 020,00 руб.;  7 834 000,00 руб.; 6 588 310,00 руб.  

Договоры заключены для нужд УФПС Волгоградской области. 

В соответствии с п. 1.5 договоров срок выполнения строительно - монтажных работ  составляет:  

Начало работ - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора. 

Окончание работ - в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с даты начала  выполнения работ.  

Таким образом, срок окончания работ по каждому договору - 25.10.2022. 

Истец указал, что в указанный срок строительно-монтажные работы по каждому из  договоров в полном объеме не выполнены. Отчетные документы по строительно-монтажным работам (требования п. 1.8 договоров), входящие в состав исполнительной  документации на выполненные работы, в адрес УФПС Волгоградской области ответчиком  не представлены.  

Указанные обстоятельства подтверждаются направленными в адрес ответчика  письмами: от 24.11.2022 № Ф34-01/8247; от 28.11.2022 № Ф34-01/8358; от 24.11.2022 №  

Ф34-01/8249; от 28.11.2022 № Ф34-01/8354; от 24.11.2022 № Ф34-01/8250; от 28.11.2022 №  Ф34-01/8355; от 24.11.2022 № Ф34-01/8251; от 28.11.2022 № Ф34-01/8356; от 24.11.2022 №  Ф34-01/8252; от 24.11.2022 № Ф34-01/8357; от 28.11.2022 № Ф34-01/8353; от 03.02.2022 №  Ф34-01/730.  

Строительно - монтажные работы на всех объектах выполнены с недостатками.  Качество работ не соответствует требованиям, предусмотренным в технической  документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.  

Указанные обстоятельства подтверждаются актами: от 24.04.2023 № 2; от  24.04.2023 № 4; от 24.04.2023 № 6; от 24.04.2023 № 5; от 24.04.2023 № 1; от 24.04.2023 № 3  соответственно объектам.  

Содержащиеся в указанных актах сведения о недостатках в строительно -  монтажных работах и качестве работ, не соответствующем требованиям,  предусмотренным в технической документации и в обязательных для сторон  строительных нормах и правилах, акты подписаны представителем ответчика без  возражений.  

Согласно п.п. 8.1.1, 8.1.11 договоров подрядчик обязан выполнить работы в  соответствии с условиями договора и обеспечить надлежащее качество выполнения всех  работ.  

В адрес ответчика направлены претензии с требованиями в срок до 05.05.2023  устранить недостатки работ, установленные соответствующими актами: от 26.04.2023 №  Ф34-01/3186; от 26.04.2023 № Ф34-01/3187; от 26.04.2023 № Ф34-01/3182; от 26.04.2023 №  Ф34-01/3183; от 26.04.2023 № Ф34-01/3184; от 26.04.2023 № Ф34-01/3185.  

Указанные претензии ответчик добровольно не удовлетворил. 

В соответствии с п. 1.14.3 договоров подрядчик уплачивает заказчику неустойку в  виде штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,  предусмотренных п. 8.1.11 договора, в размере 5 % от цены договора, в связи с чем, истец  произвел начисление штрафов в сумме 1 811 206,00 руб.  

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим  иском.  

Рассмотрев заявленные исковые требования, суд пришел к следующим выводам. 

Договорные правоотношения сторон, являющиеся предметом данного судебного  разбирательства, по своей правовой природе относятся к договору подряда и  регулируются нормами, закрепленными в главе 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену  (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской  Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям  договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям,  обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.  

Последствия выполнения работ с ненадлежащим качеством определены в статье  723 ГК РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена  подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или  с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в  договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия  непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено  законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика возмещения своих  расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в  договоре подряда (статья 397 ГК РФ).  

Таким образом, указанные нормы регулируют обязательства сторон по качеству  исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его  обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда.  

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, основанием для  подачи настоящего иска послужили недостатки выполненных ответчиком работ.  

Работы ответчиком по договорам не выполнены в полном объеме, о чем  свидетельствуют акты от 24.04.2023 № 2; от 24.04.2023 № 4; от 24.04.2023 № 6; от  24.04.2023 № 5; от 24.04.2023 № 1; от 24.04.2023 № 3.  

Ответчик отзыв на иск не представил, как и доказательств надлежащего  выполнения работ по договорам в соответствии с их условиями и требованиями  законодательства.  

Указанный истцом срок для устранения недостатков – 1 месяц с даты вступления  решения суда в законную силу является обоснованным и достаточным для выполнения  спорных работ.  

С учетом изложенного, требования истца по устранению недостатков в  строительно-монтажных работах по договорам подлежат удовлетворению в заявленном  объеме с учетом уточнений от 07.12.2023.  

Так же истцом заявлено о взыскании с ответчика штрафа в размере 1 811 206 руб. 

В соответствии с п. 1.14.3 договоров подрядчик уплачивает заказчику неустойку в  виде штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,  предусмотренных п. 8.1.11 договора, в размере 5 % от цены договора.  

Истец произвел начисление штрафа в сумме 1 811 206,00 руб. из расчета 5% от  стоимости работ по каждому из договоров.  

Ответчиком арифметический расчет неустойки не оспорен. 

Учитывая, что факт просрочки исполнения ответчиком работ по договорам, то суд  считает требование истца о взыскании штрафа подлежащим удовлетворению в  заявленном размере.  

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе,  распределяет судебные расходы.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом, с другой стороны,  пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Истцом оплачена госпошлина в размере 37 112 руб. по платежному поручению   № 10588 от 07.08.2023.  

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  с учетом удовлетворения заявленных исковых требований, расходы по уплате  государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 156. 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-16-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404521, расположенного по адресу: 

<

...>, установленные актом от 24.04.2023 № 1:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- убрать строительный мусор; 

- заделать трещины в стенах, образовавшиеся в весенний период из-за осыпания  шпаклевочного слоя, устранить следы бурения;  

- сварить линолеум в рабочей зоне клиентского зала; - выполнить примыкания к смонтированным дверным блокам; 

- завершить отмостку, выполнить подсыпку грунтом к отмостке;  - выполнить в полном объеме работы по ремонту кровли:  

- подготовить поверхность тыльной стороны фасада под нанесение декоративной  штукатурки «короед»;  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-24-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404547, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский  район, п. Береславка, д. 3Б, установленные актом от 24.04.2023 № 2:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- покрытие крыльца выполнить с контруклоном, оборудовать разворотную  площадку  

на пандусе; 

- выполнить примыкание и отделочные работы по устройству откосов дверных  блоков и козырька;  

- завершить монтаж электрооборудования в соответствии с правилами ПЭУ; - выполнить устройство радиаторных ниш; 

- установить защиту проложенных кабелей; заделать отверстия;  - завершить монтаж оконечных устройств;  

- устранить провисы потолка; выполнить окраску; устранить трещины в местах  стыков облицовки стен ГКЛ;  

- выполнить заделку узлов прохода, заделать монтажные швы дверных блоков; - выполнить примыкание разных типов пола; 

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-24-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 403024. расположенного по адресу: Волгоградская область,  

Городищенский район, п. Степной, ул. Центральная, д. 5, установленные актом от  24.04.2023 № 3:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- в местах установки датчиков выполнить подготовка поверхности под окраску;  

- окрасить и заизолировать тепловую сеть; устранить следы коррозии на  трубопроводных и опорных стойках;  

- убрать строительный мусор; 

- оборудовать узел примыкания кровельного покрытия козырька к вертикальной  стене; выполнить элементы металлоконструкций козырька к стене;  

- завершить монтаж окон, установить элементы откосов и отливов; заделать  сквозные отверстия в помещения со стороны улицы;  

- выполнить подготовку поверхностей стен под окраску и отделку, выполнить  покраску стен и потолка;  

- проложенные в запотолочном пространстве кабели оборудовать креплениями и  гофротрубой;  

- установить защиту на кабельные линии, узлы прохода заделать противопожарной  пеной;  

- устранить нарушения требований ПУЭ и охраны труда, допущенные при монтаже  щита электропитания;  

- устранить нарушения требований ПУЭ и охраны труда, допущенные при монтаже  электропроводки в клиентском зале;  

- заделать отверстия прохода кабелей, оборудовать защитой кабельные линии;  - завершить отделочные работы в соответствии с требованиями ТК и СОКК,  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-26-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404012, расположенного по адресу: 

<

...>, установленные актом от 24.04.2023 № 4:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- выполнить работы по восстановлению отделочного покрытия торцов входной  группы;  

- выполнить в полном объеме отделочные работы стен тамбура и технического  помещения;  

- выполнить работы по чистовому покрытию пола, укладке линолеума и плитки;  

- выполнить в полном объеме работы по устройству потолка типа Армстронг,  выполнить окраску потолка;  

- выполнить в полном объеме электромонтажные работы, оборудовать изоляцией  концы электрических кабелей, установить гофрированную трубу, устранить скрутки  проводов в запотолочном пространстве;  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-15-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404510, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский  

район, х. Ляпичев, ул. 40 лет Победы, д. 13, кв. 15, установленные актом от 24.04.2023 №  5:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- выполнить монтаж окопных блоков в соответствии с требованиями ГОСТ 309712016;  

- осуществить демонтаж приступка на входе в тамбур; 

- установить защиту электрических кабелей для исключения поражения  электрическим током;  

- выполнить ремонт отмостки; 

- выполнить работы по защите и креплению кабельной линии по фасаду почтового  отделения;  

- установить поручень на пандус; устранить контруклон покрытия пандуса;  выполнить заезд на пандус в требуемых нормативах;  

- представить исполни тельную документацию но выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-25-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404026, расположенного по адресу: 

<

...>, установленные актом от 24.04.2023 № 6:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- закончен монтаж дверного блока, произвести очистку от шпаклевочного состава и  краски;  

- выполнить в полном объеме работы по покрытию пола керамической плиткой,  оборудовать плинтус;  

- выполнить работы по устранению недостатков в монтаже электрооборудования,  шкафов, кабелей в соответствии с требованиями нормативных документов;  

- выполнить монтаж окон в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы  монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические  условия».  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Генстрой" в пользу  акционерного общества "Почта России" 1 848 318 руб., из них 1 811 206 руб. – штраф,  37 112 руб. – судебные расходы по оплате госпошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Меленчук И. С.