АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

«

Дело № А38-5254/2024

г. Йошкар-Ола

18» марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 4 марта 2025 года. 

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2025 года.

Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Баженовой А.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Никифоровой А.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску Волжского муниципального района Республики Марий Эл в лице администрации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Скобаръ» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ 

третье лицо Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

без участия представителей:

от истца – не явился, заявил о рассмотрении без участия,

от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ,

от третьих лиц – не явились, извещены по правилам статьи 123 АПК РФ

УСТАНОВИЛ:

Истец, Волжский муниципальный район Республики Марий Эл в лице администрации, обратился в арбитражный суд с измененным по правилам статьи 49 АПК РФ исковым заявлением к ответчику, обществу с ограниченной ответственностью «Скобаръ», об обязании в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальным контрактам №№ 58-68 от 12.09.2022, №№ 5-6 от 27.03.2023 следующими видами и способами:

- в квартире № 1 установить приточный клапан;

- в подъезде дома установить металлическую стремянку для выхода в чердачное помещение, решетки на световых приямках, на окнах установить детские замки безопасности; 

- произвести облицовку цоколя по периметру дома; 

- отремонтировать отмостку по периметру дома; 

- установить колено стока в количестве 1 шт.;

- передать администрации Волжского муниципального района ключи от чердачного помещения дома;

- выполнить работы по благоустройству прилегающей к многоквартирному дому территории в соответствии с проектной документацией 04/3-2022-ГП:

- произвести асфальтирование прилегающих к дому тротуарных дорог; 

- произвести расстановку малых архитектурных форм, а именно, садово- паркового дивана на металлических ножках и урны; 

- обустроить контрастную тактильную плитку у входа в дом; 

- установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.2 «Зона действия»; 

- осуществить озеленение прилегающей к дому территории путем создания газона обыкновенного с подсыпкой растительной земли 0,2 м. общей площадью 196 кв.м., цветников с подсыпкой растительной земли 0,4 м. общей площадью 11 кв.м., насаждений: клен остролистый - 1 шт., спирея средняя - 11 шт., спирея белоцветковая - 6 шт.

Также истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного судом для устранения недостатков, по день фактического исполнения судебного акта.

В обоснование заявленных требований истец указал, что при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> (строительная позиция 2), ответчиком были допущены нарушения, а также не выполнены все виды работ, предусмотренные техническим заданием к муниципальным контрактам и проектной документацией. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано ответчику при наличии недостатков строительства в связи с необходимостью переселения граждан из аварийного дома.

Требования покупателя обоснованы правовыми ссылками на статьи 307, 309, 471, 477, 721, 724 ГК РФ (л.д. 4-7, 55-56, 64-65, 87-88, 92).

Истец в судебное заседание не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 92).

Ответчик, надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ извещенный о начавшемся процессе, в судебное заседание не явился, представил отзыв на иск, в котором не согласился с заявленными требованиями и указал, что несет гарантийные обязательства только в отношении переданных жилых помещений. По мнению ответчика, в материалах дела отсутствует информация, подтверждающая его вину в выявленных недостатках. По его утверждению, недостатки в квартирах не должны устраняться застройщиком, поскольку при принятии помещений покупатель подтвердил надлежащее качество помещений.

Ответчик считает, что проектная документация не является неотъемлемой частью заключенных контрактов и не имеет отношения к гарантийным обязательствам общества. Также участник дела сообщил, что дополнительное асфальтирование, благоустройство, озеленение и оборудование площадок осуществляется не позже II квартала 2025 года в соответствии с погодными условиями и требованиями Градостроительного кодекса РФ. Определением Инспекции государственного строительного надзора Республики Марий Эл от 11.11.2024 срок исполнения предписаний о проведении благоустройства продлен до 25.05.2025, в связи с чем требования истца по благоустройству территории не могут быть удовлетворены в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Требование о взыскании судебной неустойки общество считает незаконным и несправедливым (л.д. 67-68).

Третье лицо, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, в судебное заседание не явилось, о начавшемся процессе извещено надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ, отзыв на иск не представило.

На основании частей 2, 3, 5 статьи 156 АПК РФ спор разрешен без участия сторон и третьего лица по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела и исследовав доказательства, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить иск по следующим правовым и процессуальным основаниям.

Из материалов дела следует, что в период с 12 сентября 2022 года по 27 марта 2023 года между администрацией Волжского муниципального района Республики Марий Эл и обществом с ограниченной ответственностью «Скобаръ» по результатам электронных аукционов заключены в письменной форме муниципальные контракты №№ 5-6, 58-68 на приобретение жилых помещений в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». По условиям контрактов общество как продавец обязалось передать в собственность администрации жилые помещения (квартиры), которые будут возведены в будущем в многоквартирном доме по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> позиция 2 – строительный адрес (л.д. 12-22 и документы в электронном виде).

Анализ спорных правоотношений указывает на заключение контрактов от имени муниципального образования, поскольку покупка жилых помещений выполнялась в интересах жителей муниципального образования. Администрация, названная стороной в договоре, выступала в качестве муниципального органа. По смыслу статей 124, 125 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются публично-правовые образования, но не созданные ими государственные органы или органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления в рамках их компетенции своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде от имени муниципальных образований (пункт 2 статьи 125 ГК РФ).

При заключении муниципальных контрактов сторонами достигнуто соглашение по всем условиям, названным в ГК РФ в качестве существенных и необходимых для договора купли-продажи будущей недвижимой вещи (статьи 432, 554 ГК РФ). К предмету обязательств отнесено приобретение покупателем жилых помещений (квартир) в строящемся жилом доме по конкретному адресу, определены площади помещений и номера квартир. Технические характеристики жилых помещений указаны в техническом задании к каждому контракту (пункты 1.2, 1.3). Цена каждого контракта определена по результатам аукциона в твердой сумме в пункте 2.1. 

Контракты составлены в письменной форме с приложениями (техническое задание, форма акта приема-передачи), от имени сторон подписаны уполномоченными лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), поэтому контракты как консенсуальные сделки вступили в силу и стали обязательными для их участников (статьи 425, 433 ГК РФ).

Заключенные сторонами соглашения по существенным условиям являются договорами купли-продажи будущей недвижимой вещи, по которым в соответствии с пунктом 1 статьи 549 ГК РФ продавец обязуется передать в собственность покупателя квартиру, а покупатель принять недвижимое имущество и оплатить его. 

Таким образом, контракты признаются арбитражным судом заключенными, поскольку соответствуют требованиям гражданского законодательства о форме, предмете, сроке и цене. О недействительности или незаключенности контрактов стороны в судебном порядке не заявляли.

Правоотношения участников сделок регулируются гражданско-правовыми нормами о купле-продажи и нормами о продаже недвижимости, содержащимися в статьях 454-491, 549-558 ГК РФ, а также соответствующими нормами Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из контрактов в силу пункта 2 статьи 307 ГК РФ возникли взаимные обязательства сторон. При этом каждая из сторон считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (пункт 2 статьи 308 ГК РФ).

29 февраля 2024 года администрацией выдано ответчику разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> (л.д. 10-11).

Юридически действия застройщика по постройке квартир в многоквартирном доме регулируются нормами ГК РФ о строительном подряде, поскольку процесс строительства объекта недвижимости невозможен без проведения подрядных работ. При таких обстоятельствах застройщик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пунктов 1-2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с пунктом 8.1 контрактов гарантийный срок качества для приобретаемого жилого помещения составляет пять лет со дня подписания акта приема передачи жилого помещения (квартиры).

Жилые помещения по спорным контактам переданы ответчиком истцу 11.03.2024 по актам приема-передачи (материалы дела в электронном виде).

По утверждению истца, после передачи им квартир гражданам в адрес администрации стали поступать жалобы о недостатках, которые возникли в ходе эксплуатации многоквартирного дома, а именно:

- в квартире № 1 отсутствует приточный клапан;

- в подъезде дома отсутствуют металлическая стремянка для выхода в чердачное помещение, решетки на световых приямках, на окнах не установлены детские замки безопасности; 

- не произведена облицовка цоколя по периметру дома; 

- отмостка по периметру дома не соответствует параметрам качества; 

- не установлено колено стока;

- ключи от чердачного помещения дома не переданы истцу застройщиком;

- не выполнены работы по благоустройству прилегающей к многоквартирному дому территории в соответствии с проектной документацией.

Ответчик обязался устранить выявленные замечания до 01.07.2024 (л.д. 37).

Истцом представлены фотографии недостатков, которые были допущены в процессе строительства и благоустройства многоквартирного дома, а также подтверждающие отсутствие колена стока водосточной трубы многоквартирного дома (л.д. 59-61, 95-97).

Поскольку застройщик не принял достаточных мер к устранению недостатков в многоквартирном доме и в жилом помещении, возникших в период гарантийного срока, собственник обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статье 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

В случае когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи (пункты 2, 3 статьи 470 ГК РФ).

По смыслу пункта 2 статьи 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если они возникли в период гарантийного срока. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 477 ГК РФ)

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В пункте 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрены права заказчика в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором.

Аналогичные положения содержатся в пункте 1 статьи 475 ГК РФ. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца, а следовательно, и заказчик в договоре подряда - от подрядчика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Заказчик вправе предъявить требования в отношении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

Учитывая, что акты о приемке квартир подписаны 11.03.2024, и установленный пунктами 8.1 контрактов гарантийный срок на переданные помещения действует до 11.03.2029.

Из материалов дела следует, что администрация в пределах гарантийного срока обращалась к обществу с требованиями устранить дефекты в квартире, в общем имуществе МКД и выполнить работы по благоустройству, направив претензию от 16.07.2024 (л.д. 38-39).

Следовательно, покупатель реализовал право выбора предоставленного ему законом средства защиты в случае ненадлежащего качества помещений, обратившись с требованием о безвозмездном устранении недостатков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ именно на подрядчика возлагается бремя доказывания того, что недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, произошли не по его вине.

Таким образом, положения названной нормы предусматривают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

При этом бремя доказывания обстоятельств, которые могут послужить основанием для освобождения от ответственности, возложено на подрядчика.

Ответчик не представил доказательств возникновения недостатков работ в результате недобросовестных действий заказчика или третьих лиц. Между тем ООО «Скобаръ», действуя добросовестно и разумно, могло и должно было принять конкретные меры по устранению выявленных недостатков в течении установленного контрактами срока. Риск наступления неблагоприятных последствий вследствие несовершения необходимых действий лежит в данном случае на ответчике. Поэтому арбитражный суд руководствуется письменными доказательствами, представленными истцом.

По утверждению истца, заявленные им требования основаны на техническом задании к контрактам и проектной документацией по строительству дома.

Разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в томе 4.2 части 2 проектной документации № 04/3-2022-КР.2  на объект «Многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

...> (поз. 2)» на листах 2 и 5 было предусмотрено наличие на окнах в квартирах приточных клапанов «Air-box» (л.д. 74, 76-77).

Кроме того, на указанных листах предусматривается, что для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон, оконные и балконные блоки подлежат укомплектованию детскими замками безопасности 2 класса, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки (л.д. 76).

Также на листах 2 и 11 проектной документации установлены требования по установке металлической стремянки для выхода в чердачное помещение (л.д. 77-78).

Требования по установке решеток на световых приямках закреплены разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в томе 4.1 части 1 на листе 013 (л.д. 72-73).

Необходимость произведения облицовки цоколя по периметру дома установлена разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» часть 2 «Конструктивные и объемно планировочные решения выше отметки 0.000» (лист 3, стадия П).

Техническим заданием к спорным контрактам предусмотрено, что в жилом доме должно быть обеспечено наличие отмостки из асфальта, устроенной по всему периметру дома, обеспечивающей отвод воды от фундаментов. Дополнительно требования к отмостке закреплены в разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» том 2 проектной документации на листе 8 (л.д. 19, 29).

Требование о необходимости установки колен стока в количестве 7 штук обусловлено разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» части 2 проектной документации, лист 28, стадия П (л.д. 79).

В обоснование требования о передаче ключей от чердачного помещения истцом указано, что самостоятельное вскрытие им врезного замка в металлической двери помещения приведет к деформации двери и замка, что повлечет дополнительные расходы у муниципального заказчика. В качестве доказательств истцом предоставлены фотографии (л.д. 95-97). Кроме того, ответчик обязался устранить замечания покупателя, указанные им в претензии, в том числе в части передачи ключей от чердачного помещения в срок до 01.07.2024 (л.д. 37). 

Необходимость выполнения работ по благоустройству прилегающей к многоквартирному дому территории подтверждается следующими документами.

Асфальтирование прилегающих к дому тротуарных дорог, устройство тактильной плитки у входа в многоквартирный жилой дом, наличие малых архитектурных форм, а именно, садово- паркового дивана на металлических ножках и урны, установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.2 «Зона действия» предусмотрены разделом 2 «Схема планировочной организации земельного участка» тома 2 проектной документации (лист 8) и планом благоустройства территории – лист 4, стадия П (л.д. 29, 81).

Также планом благоустройства территории и техническим заданием предусматривалось озеленение прилегающей к дому территории путем создания газона обыкновенного с подсыпкой растительной земли 0,2 м. общей площадью 196 кв.м., цветников с подсыпкой растительной земли 0,4 м. общей площадью 11 кв.м., насаждений: клен остролистый - 1 шт., спирея средняя - 11 шт., спирея белоцветковая - 6 шт.

В силу части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Следовательно, материалами дела подтверждается нарушение застройщиком требований проектной документации.

Согласно указанной документации и техническому заданию к контрактам истцом определены виды и объемы работ, подлежащие выполнению ответчиком в месячный срок со дня вступления решения арбитражного суда в законную силу:

Ответчик по существу заявленных истцом объемов работ обоснованных возражений не представил. Довод о том, что при принятии жилых помещений покупатель подтвердил их надлежащее качество, является необоснованным, поскольку по условиям спорных контрактов предусмотрен гарантийный срок на жилые помещения, построенные обществом, и входящие в его состав оборудование. Вместе с тем нормами ГК РФ о строительном подряде установлена ответственность подрядчика (застройщика) за качество созданного им объекта строительства.

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ суд приходит к выводу о доказанности истцом допущенных ответчиком при создании имущества недостатков и необходимости их устранения.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. При решении вопроса о выполнении работ в натуре судом не установлено препятствий для такого исполнения.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 174 АПК РФ, учитывая погодные условия и указание Инспекции государственного строительного надзора Республики Марий Эл, суд считает необходимым и достаточным срок для выполнения работ по благоустройству прилегающей к спорному многоквартирному дому территории до 25 мая 2025 года. В части устранения остальных недостатков требования подлежат исполнению в течение месяца со дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Истцом предъявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная по истечении месячного срока по день фактического исполнения решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Действие указанной нормы рассчитано на ситуацию, при которой должник не исполнил судебное решение, предметом которого являлось понуждение ответчика исполнить обязательство в натуре.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В пунктах 31 и 32 постановления Пленума № 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает её размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем, установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре (пункт 33 Пленума № 7).

Как разъяснено в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.03.2018 № 305-ЭС17-17260 согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая обстоятельства дела и необходимость устранения недостатков строительства, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, арбитражный суд считает возможным взыскание судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения, начиная со дня, следующего за днем истечения сроков, установленных судом для устранения недостатков, по день фактического исполнения судебного акта.

По правилам статьи 110 АПК РФ, подпункта 4 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. В силу статьи 333.21 НК РФ её размер составляет 50 000 руб. Поэтому государственная пошлина взыскивается судом в доход федерального бюджета с ответчика, не в пользу которого принят судебный акт. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Скобаръ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить недостатки работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, а именно:

1) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить следующие работы:

- в квартире № 1 установить приточный клапан;

- в подъезде дома установить металлическую стремянку для выхода в чердачное помещение, решетки на световых приямках, на окнах установить детские замки безопасности; 

- произвести облицовку цоколя по периметру дома; 

- отремонтировать отмостку по периметру дома; 

- установить колено стока в количестве 1 шт.;

- передать администрации Волжского муниципального района ключи от чердачного помещения дома;

2) в срок до 25 мая 2025 года выполнить следующие работы по благоустройству прилегающей к многоквартирному дому территории в соответствии с проектной документацией 04/3-2022-ГП:

- произвести асфальтирование прилегающих к дому тротуарных дорог; 

- произвести расстановку малых архитектурных форм, а именно, садово- паркового дивана на металлических ножках и урны; 

- обустроить контрастную тактильную плитку у входа в дом; 

- установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.2 «Зона действия»; 

- осуществить озеленение прилегающей к дому территории путем создания газона обыкновенного с подсыпкой растительной земли 0,2 м. общей площадью 196 кв.м., цветников с подсыпкой растительной земли 0,4 м. общей площадью 11 кв.м., насаждений: клен остролистый - 1 шт., спирея средняя - 11 шт., спирея белоцветковая - 6 шт. 

2. В случае неисполнения вступившего в законную силу решения в указанные сроки взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Скобаръ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Волжского муниципального района Республики Марий Эл в лице администрации судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со дня, следующего за днем истечения сроков, установленных судом для устранения недостатков, по день фактического исполнения судебного акта.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Скобаръ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государственную пошлину в сумме 50 000 рублей в доход бюджета РФ. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл. 

Судья                                                                                                                А.Н. Баженова