Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

Дело № А40-250883/22-107-1669

05 июня 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 16 мая 2023 года.

Полный тест решения изготовлен 05 июня 2023 года.

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-250883/22-107-1669 по иску ООО "ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-У" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ЗАО "ТРАСКОН ТЕКНОЛОДЖИ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы неустойки по договору № П19/081 от 19.08.2019, № П19/087 от 02.09.2019, № П19/093 от 23.09.2019, № П19/103 от 11.10.2019, № П19/104 от 18.10.2019, № П19/106 от 22.11.20219, № П21/107 от 11.05.2021 в размере 338 442 153,02 р., при участии представителя истца: ФИО2, директор, ЕГРЮЛ, паспорт, ФИО3, доверенность от 14.01.2023, паспорт, диплом, ФИО4, доверенность от 20.01.2023, паспорт, диплом, представителей ответчика: ФИО5, доверенность от 10.06.2022, паспорт, диплом, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-У" (далее – истец) обратилось в суд к ЗАО "ТРАСКОН ТЕКНОЛОДЖИ" (далее – ответчик) с требованием о взыскании суммы неустойки по договору № П19/081 от 19.08.2019, № П19/087 от 02.09.2019, № П19/093 от 23.09.2019, № П19/103 от 11.10.2019, № П19/104 от 18.10.2019, № П19/106 от 22.11.20219, № П21/107 от 11.05.2021 в размере 338 442 153,02 р.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения требований по доводам отзыва.

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об отсутствии обоснованности требований истца в виду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО «ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-У» (Истец, Генподрядчик) и ЗАО «ТРАСКОН ТЕКНОЛОДЖИ» (Ответчик, Субподрядчик) заключены следующие Договоры о выполнении работ на объекте: «Завод по производству электротехнической продукции» расположенный по адресу: 432072, 

<

...>:

- Договор строительного субподряда №1119/08 1 от 19.08.2019 г. на работы по устройству системы ОВиК; устройству системы кондиционирования (раздел ОВиК) (далее - Договор-1);

- Договор строительного субподряда №1119/087 от 02.09.2019 г. на работы по устройству системы автоматического водяного пожаротушения (АУВПТ) (далее - Договор-2);

- Договор строительного субподряда №1119/093 от 23.09.2019 г. на работы по устройству отопления (далее - Договор-3);

-Договор строительного субподряда №1119/103 от 11.10.2019 г. на работы по производству монтажных и пусконаладочпых работ индивидуального теплового пункта (далее - Договор-4);

-Договор строительного субподряда №11/104 от 18.10.2019 г. на работы по устройству системы ОВиК ПК и СК (далее - Договор-5);

- Договор строительного субподряда №1119/106 от 22.1 1.2019 г. на работы по устройству системы ЭМ и системы ЭО (далее - Договор-6);

-Договор строительного субподряда №1121/017 от 11.05.2021 г. на работы по устройству системы АОВЗ, АСДУ, АВК, АИТ11 (далее - Договор-7). 

Истец, обращаясь с настоящим иском, указывает, что Ответчиком работы выполнены с нарушением сроков, при этом, авансовые платежи были перечислены в полном объеме, вся необходимая документация была передана Субподрядчику.

В соответствии с п. 8.1. Договоров за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

На основании вышеизложенного, Истец начислил неустойку и направил претензию, и в отсутствии ответа, обратился в суд с настоящим иском.

Судом установлено следующее.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно положениям ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчик представил отзыв, а также пояснил, что:

- все работы были выполнены, закрыты в том числе актам КС-2 от октября 2022 года, истец отказался принимать работы, в настоящее время отказ обжалуется в суде,

- основания для начисления неустойки отсутствуют, поскольку сроки нарушались из-за бездействия и действия истца по не передаче документации, не представление материалов и строительной площадки, также сроки подлежали продлению по дополнительным соглашениям (статья 401 ГК РФ),

- истец представил в материалы дела несколько дополнительных соглашений указанных в платежных поручениях, которые ответчик не подписывал.

Ответчик в отзыве указал на не согласованность условий договоров в части неустойки, поскольку в пункте 8.1 договоров указано на взыскание неустойки исходя из «стоимости договора», «при наличии вины», при том, понятие «стоимость договора» в самих договорах отсутствует (есть только «цена договора» и «стоимость работ»), с учетом положений ГК РФ «стоимость договора» и «цена договора/работ» не тождественные понятия, в том числе с учетом их понимания и толкования истцом, который рассчитывает неустойку исходя из «цены договора за вычетом стоимость фактически выполненных и принятых работ».

Из анализа материалов дела судом установлено следующее.

1) Согласно условиям заключенного Договора-1, Ответчик принял на себя обязательства по устройству системы ОВиК (п. 1.1.1.) в объеме, указанном в Смете № 1  и устройства системы кондиционирования (п.1.1.2.) в объёме, указанном в Смете № 2.

Пунктом 2,1 Договора-1 установлено, что договорная цена работ определяется в соответствии с утвержденными сторонами Сметами № 1, № 2 и составляет 8 358 182,50 (Восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч его восемьдесят два) рубля 50 копеек, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цепу всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цепу материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-1).

Согласно п.3.1. срок начала выполнения работ - в течение 1 (одного) календарного дня с момента перечисления аванса. Авансовый платеж в размере 1 671 636,50 (Один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 50 копеек, предусмотренном 2.3. Договора-1, был перечислен Истцом 23.08.2019 года.

Пунктом 2.4. Договора-1 стороны установили, что датой исполнения Генподрядчиком обязанности по оплате работ (датой платежа) считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Генподрядчика банка в адрес Субподрядчика.

Таким образом, срок начала исполнения обязательств Ответчиком начинается с 24.08.2019 года.

В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по системе ОВиК в рамках Договора-1 стороны заключили Дополнительное соглашение № 1 от 08.05.2021.

Стоимость дополнительных работ по Дополнительному соглашению составила 126 449 (Сто двадцать шесть тысяч четыреста сорок девять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (20%), согласно согласованной к соглашению Смете №1.

Пункт 4 заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 08.05.2021 предусматривает, что Субподрядчик выполняет работы, в следующие сроки:

- начало производства работ: дата подписания соглашения, то есть 08.05.2021;

- окончание работ: 31.05.2021.

Общая сумма выполненных Ответчиком и принятых Истцом согласно справкам о стоимости работ по форме КС-3 составляет 7 209 710,53 (Семь миллионов двести девять тысяч семьсот десять) рублей 53 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-1 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-1, начислил Ответчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 180 706,46 (Сто восемьдесят тысяч семьсот шесть) рублей 46 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 8 278 486,03 (Восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 03 копеек.

Поскольку общая сумма начисленной неустойки за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора, размер неустойки составил 8 358 182,50 (Восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 50 копеек.

В рамках Дополнительного соглашения № 1 от 08.05.2021 года сумма общая неустойки составила 126 449,90 (Сто двадцать шесть тысяч четыреста сорок девять) рублей 90 копеек.

2) Согласно условиям заключенного Договора-2, Ответчик принял на себя обязательства но устройству системы автоматического водяного пожаротушения (АУ1ШТ) (п. 1.1.1.) в объеме, указанном в Смете № 1.

Пунктом 2.1 Договора-2 установлено, что договорная пена работ определяется в соответствии с утвержденной сторонами Сметой № 1 составляет 19 294 035,92 руб. (Девятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи тридцать пять) рублей 92 копейки, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цепу всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объёме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-2).

Согласно п.3.1 Договора-2 срок начала выполнения работ - в течение в течение 3 (трех) календарных дней с момента перечисления аванса. Авансовый платеж в размере 964 701,80 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот один) рублей 80 копеек, предусмотренном 2.3. Договора-2, был перечислен Истцом 04.09.2019 года.

Пунктом 2.4 Договора-2 стороны предусмотрели, что датой исполнения Генподрядчиком обязанности по оплате работ (датой платежа) считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Генподрядчика банка в адрес Субподрядчика.

Таким образом, срок начала исполнения обязательств Ответчиком с 08.09.2019 года.

Однако, Дополнительным соглашением № 1 от 18.09.2019 года Стороны пришли к соглашению увеличить сумму авансового платежа до 30% от договорной пены, указанной в п.2.1. Договора-2. В связи с чем, Истец дополнительно оплатил сумму в размере 4 823 508,98 (Четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемь) рублей 98 копеек (платежное поручение № 1122 от 25.09.2019г.).

Согласно п.3.2. срок окончания производства работ - в течение 130 (ста тридцати) календарных дней, с момента подписания настоящего Договора, согласно Графику производства работ. Ответчик указал, что берет на себя обязательства по исполнению условий договора в течение 19 (девятнадцати) педель. Таким образом, срок окончания работ составлял 15.01.2020 года.

Стороны Дополнительным соглашением № 2 от 28.12.2020 года снова изменили сумму авансового платежа, установив его в размере 7 288 210,78 (Семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 78 копеек. Истец доплатил сумму в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 29.12.2020 года (платежное поручение № 324), тем самым исполнив свои обязательства перед Ответчиком.

Этим же Дополнительным соглашением № 2 от 28.12.2020 года стороны изменили и сроки окончания работ по Договору-2.

В измененной редакции Договора-2 пункт 3.1.2. предусматривал окончание работ до 31 марта 2021 года.

06 мая 2021 года стороны заключили Дополнительное соглашение № 3, которое вносило изменение в Смету № 1 к Договору-2, и увеличило стоимость выполнения работ в части секций АВ4 и АВ5 (с п.530 по п.790 включительно), тем самым цепа Договора-2 стала составлять 19 754 077,04 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 04 копеек.

Общая сумма выполненных Ответчиком и принятых Истцом работ согласно справкам о стоимости работ по форме КС-3 составляет 19 461 117,63 (Девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча сто семнадцать) рублей 63 копеек.

В соответствии с и. 8.1. Договора-2 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-2, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 366 235,02 (Триста шестьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) рублей 02 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 14 027 705,73 (Четырнадцать миллионов двадцать семь тысяч семьсот пять) рублей 73 копеек.

3) Согласно условиям заключенного Договора-3, Ответчик принял на себя обязательства по устройству системы отопления (п. 1.1.1.) в объеме, указанном в Смете № 1.

Пунктом 2.1. Договора-3 установлено, что договорная цепа работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой и составляет 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цену всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-3).

Согласно п.3.1. срок начала выполнения работ -дата подписания Договора. То есть срок начала исполнения обязательств Ответчиком начинается с 23.09.2019 года.

Согласно п.3.2. срок окончания производства работ - 10 октября 2019 года.

Дополнительные соглашения о пролонгации сроков исполнения работ Сторонами не заключались.

Сумма к оплате по факту выполненных работ составила 680 000, 00 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-3 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-3, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 26 600,00 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Поскольку общая сумма начисленной неустойки за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора, размер неустойки составил 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4) Согласно условиям заключенного Договора-4, Ответчик припал на себя обязательства произвести монтажные и пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта в объеме, предусмотренном в Сметном расчете №1.

Пунктом 2.1 Договора-3 установлено, что договорная цена работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой № 1 и составляет 1 669 948,15 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 15 копеек, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цену всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-4).

Согласно п.3.1 Договора-3 срок начала выполнения работ - с момента оплаты аванса в порядке, предусмотренном п.2.3. Договора. Авансовый платеж в размере 1 007 000,00 (Один миллион семь тысяч) рублей 00 копеек, был перечислен Истцом 16.10.2019 года (платежное поручение № от 1290).

Пунктом 2.4. Договора-4 стороны установили, что датой исполнения Генподрядчиком обязанности по оплате работ (датой платежа) считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Генподрядчика банка в адрес Субподрядчика.

То есть срок начала исполнения обязательств Ответчиком начинается с 16.10.2019 года.

Согласно п.3.2. срок окончания производства работ - в течение 21 (двадцать один) календарных дней, с момента оплаты аванса. Таким образом, срок окончания работ составляет 05.11.2019 года.

Дополнительные соглашения о пролонгации сроков исполнения работ Сторонами не заключались.

Сумма к оплате по факту выполненных работ составила 348 275,27 (Триста сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 27 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-4 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-4, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 46 758,55 (Сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 55 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 1 669 948,15 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 15 копеек. Поскольку общая сумма начисленной неустойки за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора, размер неустойки составил 1 669 948,15 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 15 копеек.

5) Согласно условиям заключенною Договора-5, Ответчик припал на себя обязательства по устройству системы ОВиК ПК СК (п. 1.1.1.) в объеме, указанном в Смете № 1.

Пунктом 2.1. Договора-5 установлено, что договорная цена работ определяется в соответствии с утвержденной сторонами Сметой № 1 составляет 58 000 000,00 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цену всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-5).

Первоначально Стороны согласовали в п.3.1. срок начала выполнения работ - в течение 1 (одного) календарного дня с момента перечисления аванса. А срок окончания производства работ - согласно Приложению №2 (График производства работ) (п.3.2.). В Приложении №2 Ответчик указал, что берет на себя обязательства по исполнению условий договора в течение 21 (двадцати одной) недели. Таким образом, срок окончания работ составлял 24.04.2020 года.

Однако, Дополнительным соглашением № 2 от 23.12.2019 года Стороны сдвинули сроки выполнения работ. И срок начала выполнения работ начался с 21.10.2019 г., а сроки выполнения работ:

-устройство системы ОВиК прессового цеха - до 20.01.2020 г. без оконечного оборудования производства «Арктика», установка оборудования производства «Арктика» в период с 20.03.2020г. по 31.03.2020г.;

-устройство системы ОВиК СК - до 30.01.2020 г. без оконечного оборудования производства «Арктика» », установка оборудования производства «Арктика» в период с 20.03.2020г. по 31.03.2020г.;

-устройство системы ОВиК ПК - до 20.03.2020г. без оконечного оборудования производства «Арктика» и до 31.03.2020 г. с учетом установки оконечного оборудования и р о и з во д ств а «Аркти к а».

Первоначальный График производства работ, изложенный в Приложении №2 к Договору-5 был признан утратившим силу.

Дополнительным соглашением № 3 от 13.03.2020 года стороны изменили сроки окончания работ по Договору-5. В измененной редакции Договора-5 пункт 3.1.2. предусматривал окончание работ до 31 марта 2021 года.

В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по устройству системы ОВиК ПК СК, не предусмотренных первоначально Договором, стороны заключили Дополнительное соглашение № 4 от 08.05.2021г.

Пункт 4 заключенного Дополнительного соглашения № 4 от 08.05.2021 г. предусматривает, что Субподрядчик выполняет работы, в следующие сроки:

- начало производства работ: дата подписания соглашения, то есть 08.05.2021г.;

- окончание работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты начала производства работ, то есть 25.05.2021г.

Общая сумма выполненных Ответчиком и принятых Истцом, согласно справкам о стоимости работ по форме КС-3, составила 54 091 238,11 (Пятьдесят четыре миллиона девяносто одна тысяча двести тридцать восемь) рублей 11 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-5 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-5, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 417 925,65 (Четыреста семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 65 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 21 427 144,23 (Двадцать один миллион четыреста двадцать одна тысяча сто сорок четыре) рублей 23 копеек.

В рамках Дополнительного соглашения № 4 от 08.05.2021г. общая сумма неустойки составила 568 599,75 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 75 копеек.

6) Согласно условиям заключенного Договора-6, Ответчик принял на себя обязательства по устройству системы ЭМ (внутреннее электро-оборудование) (п. 1.1.1.) в объеме, указанном в Смете № 1 и в Смете № 2.

Пунктом 2.1. Договора-6 установлено, что договорная цена работ определяется в соответствии с утвержденными сторонами Сметами № 1, № 2 и составляет 18 450 000 руб. (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цену всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-6).

Согласно п.3.1. срок начала выполнения работ - в течение 1 (одного) календарного дня с момента перечисления аванса. Авансовый платеж в размере 1 845 000,00 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, предусмотренном п. 2.3. Договора-1, был перечислен Истцом 07.02.2020г. (платежное поручение № 13).

Пунктом 2.4. Договора-6 стороны согласовали, что датой исполнения Генподрядчиком обязанности по оплате работ (датой платежа) считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Генподрядчика байка в адрес Субподрядчика.

Таким образом, срок начала исполнения обязательств с 10.02.2020 года.

Согласно п.3.2. срок окончания производства работ - 30 марта 2020 года. Этапы производства работ согласованы Сторонами в графике производств работ согласно Приложению №3 (График производства работ) к Договору-6.

Дополнительным соглашением № 1 от 17.12.2020г. стороны изменили сроки производства работ:

- Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента перечисления аванса,

- Срок окончания производства работ - согласно Приложению №3/1 «График завершения работ», в котором зафиксировали сроки проведения работ до 3 1.03.2021 г.

График производства работ в старой редакции утратил силу.

Таким образом, срок окончания работ сдвинулся до 31.03.2021 г.

Общая сумма выполненных Ответчиком и принятых Истцом согласно справкам о стоимости работ по форме КС-3 составила 13 799 855,37 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 37 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-6 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит  14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-6, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 282 878,68 (Двести восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 68 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 15 599 099,31 (Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девяносто девять) рублей 31 копеек.

7) Согласно условиям заключенного Договора-7, Ответчик принял на себя обязательства выполнить монтажные и пусконаладочные работы следующих систем: АОВЗ, АСДУ, АВК, АИТП (п. 1.1.1.)

Пунктом 2.1. Договора-7 установлено, что договорная цена работ определяется в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой №1 и составляет 4 185 000,00 руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС 20%. При этом договорная цена включает в себя: цену всех работ и услуг, оказанных Ответчиком и принятых Истцом, цену материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ в полном объеме, все расходы Ответчика, понесенные в связи исполнением обязанностей по договору, и все накладные расходы Ответчика (п.2.2. Договора-7).

Согласно п.3.1. срок начала выполнения работ - дата подписания Договора (11.05.2021г.).

Согласно п.3.2. срок окончания производства работ - до 02.08.2021 г.

Сроки выполнения этапов работ согласованы в Графике производства работ.

В связи с необходимостью проведения дополнительных электромонтажных работ, не предусмотренных Договором, стороны заключили Дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2021 г.

Стоимость дополнительных работ составила 241 150,00 (Двести сорок одна тысяча сто пятьдесят рублей), в т.ч. НДС (20%). Оплата работ в рамках соглашения производится в порядке п.2.3.2. Договора, то есть по факту выполненных работ.

Начало производства дополнительных работ: 01.07.2021г. Окончание производства дополнительных работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты начала производства работ, то есть 22.07.2021г. Работы в рамках дополнительного соглашения были выполнены без нарушения сроков выполнения.

Общая сумма выполненных Ответчиком и принятых Истцом работ согласно справкам о стоимости работ по форме КС-3 составила 1 731 250,00 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 8.1. Договора-7 за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

В связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 330 ГК РФ и пунктом 8.1 Договора-3, начислил ему неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от стоимости договора с 1 по 14, календарный день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором соответствующего срока, сумма которой составила 75 457,20 (Семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 20 копеек и в размере 0,5% от стоимости договора с 15 календарного дня, сумма которой составила 4 185 000,00 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Поскольку общая сумма начисленной неустойки за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора, размер неустойки составила 4 185 000,00 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Из анализа пунктов 8.1 Договоров судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все тс условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если данные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии с п. 8.1. Договоров за нарушение сроков выполнения работ/устранения дефектов, в том числе в гарантийный период, Субподрядчик, по письменному требованию Генподрядчика, обязан уплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки. В случае если период просрочки исполнения обязательств превысит 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 пятнадцатого дня Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойки в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.

При этом, п. 2.1. Договоров предусматривает цену работ, а не стоимость Договора, кроме того, из анализа других пунктов также не указана стоимость самого Договора.

Суд обращает внимание на отсутствие тождественности между понятиями цена работ (пункт 2.1) и стоимость Договора (пункт 8.1), и как следствие невозможность исчисления неустойки от всей стоимости Договора.

Так как стоимость Договора не предусмотрена гражданским законодательствам и не указана в договорах строительного субподряда, начисление неустойки в рамках п.8.1. Договоров, незаконно и нарушает баланс интересов сторон.

Более того, согласно представленных в материалы дела доказательствам, что Генподрядчиком были не исполнены встречные обязательств по Договорам, выраженные отсутствием: необходимых материалов для выполнения Субподрядчиком работ; согласованных проектных решений; строительной готовности на местах производства работ; неисполнением обязательств по оплате выполненных и принятых работ, ввиду чего, Ответчик на основании ст.719 ГК РФ приостанавливал производство работ, о чем уведомлял Истца.

Так согласно статье 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Возлагая на подрядчика обязанность, выполнить работы, предусмотренные договором, положения ГК РФ также обязывают и заказчика совершить определенные действия в целях достижения конечного результата работ.

В соответствии с п.1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Пунктом 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

При этом, в силу ч. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В нарушении требований ст. 718, 716,  720, 740, 747, 750  ГК Генподрядчик после заключения Договор, не оказывал содействия Субподрядчику в выполнении работ, не совершал надлежащих действий в целях достижения конечного результата работ, нарушал свои обязанности по договорам подряда, не предоставлял своевременно материалы, оборудование, техническую документацию, препятствовал исполнению договора, допускал обязательства свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок,  в разумный срок не предоставлял, не менял непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию, не менял указания о способе выполнения работы, с нарушением срока и порядка без участия Субподрядчика, без осмотра принимал выполненные работы, не передавал в соответствии с договором Субподрядчику  необходимые для осуществления работ здания и сооружения, не обеспечивал транспортировку грузов, временную подводку сетей  энергоснабжения, не принимал  разумные меры по устранению  препятствий исполнению договора.

Более того, в нарушении п.п. 4.2.1., 4.2.3., 4.2.10., 4.2.11.,  4.2.14.,  6.2. Договоров строительного субподряда, Генподрядчик до начала работ не передавал Субподрядчику документацию, указанную в настоящих договорах, а также площадку производства Работ по акту приема-передачи площадки; не информировал Субподрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по Договору; до начала работ, не предоставил Субподрядчику все материалы и оборудование, которое входит в поставку Генподрядчика; не обеспечил подключение электроснабжению.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, судом установлено, что в связи с неисполнением Истцом встречных обязательств Ответчиком были допущены нарушения сроков выполнения работ, при этом, требования Ответчика о содействии для производства работ Генподрядчиком были проигнорированы, как и проекты Дополнительных соглашений с указанием на продление сроков выполнения, более того, условия Договоров в части начисления неустойки не соответствуют нормам гражданского законодательства и признаются судом незаконными, ввиду чего, исковые требования удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Отказать ООО "ПРОМИНВЕСТСТРОЙ-У" в удовлетворении требований к ЗАО "ТРАСКОН ТЕКНОЛОДЖИ" о взыскании суммы неустойки по договору № П19/081 от 19.08.2019, № П19/087 от 02.09.2019, № П19/093 от 23.09.2019, № П19/103 от 11.10.2019, № П19/104 от 18.10.2019, № П19/106 от 22.11.20219, № П21/107 от 11.05.2021 в размере 338 442 153,02 р.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.    

 

СУДЬЯ

М.В. Ларин