Арбитражный суд Амурской области

675023, 

<

...>

тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного разбирательства

Дело № А04-7452/2025

г. Благовещенск

10 декабря 2025 г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна, протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Бурейская районная больница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о возложении обязанности,

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. от 01.07.2025 от ответчика: ФИО2 – дов. № 28АА 1435130 от 10.07.2023

установил:

В Арбитражный суд Амурской области обратилось государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Бурейская районная больница» с

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» о

возложении обязанности выполнить работы по контракту от 19.08.2022 № Ф.2022.1595 на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту объекта: «Капитальный

ремонт поликлиники» государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Амурской области «Бурейская районная больница» в соответствии с условиями контракта и проектной документацией в течение тридцати календарных дней с момента вступления решения в законную силу:

По объекту здание лечебно-профилактического учреждения: 1.Демонтажные работы - на площади 41,1кв.м (травмцентр) - демонтаж оконных

(4шт), дверных блоков (6 блоков), плитки напольной из мраморной крошки, расчистку стен от старой краски.

2. Тип пола 3: Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной- 50 мм и 30 мм - 201,9кв.м , Гидроизоляция оклеенная 2 слоя с заведением на стены - 547,5

кв.м, Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 - 61 кв.м.

3. Тип пола 2: Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной- 50 мм - 89,07 кв.м; Покрытие из линолеума с заведением на стены - 312,52кв.м.

4. Тип пола 4: Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной- 50 мм - 75,3 кв.м; Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 - 20,8 кв.м.

5. Бетонирование пола толщиной 150мм - 11,32 куб.м.

6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными

подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% - 425,48 кв.м.

7. Оштукатуривание и окраска откосов оконных и дверных откосов - 469,4кв.м.

8. Облицовка откосов пластиковыми панелями - 2042 кв. м.

9. Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" - 1098,14 кв. м. 10. Установка наружных металлических дверных блоков - 21,18 кв. м. 11. Установка внутренних алюминиевых дверных блоков - 29,33 кв. м. 12. Установка противопожарных дверей - 7,46 кв. м.

13. Установка оконных блоков - 123,8 кв. м.

14. Установка подоконных досок из ПВХ с заглушками, ширина 650мм - 59,26 м.п.

15. Установка противомоскитных сеток - 118шт. 16. Устройство железобетонных пандусов - 13,99 куб. м.

17. Покрытие пандуса и боковых граней керамогранитной плиткой - 58,66 кв. м.

18. Облицовка фасада - устройство светопрозрачных конструкций площадью 448,18кв.м.

19. Работы по разделу «Электроснабжение» в составе: устройство

распределительного .щита в комплекте с автоматическими выключателями, прокладка кабеля -119 м, монтаж выключателей (14шт), монтаж розеток (20шт.), монтаж

осветительного оборудования - (48шт).

20. Работы по разделу ВК-1 (водоснабжение и канализация) - монтаж водомерного узла горячего водоснабжения, прокладка трубопроводов розлива холодного и горячего водоснабжения по подвалу - 160м, устройство запорной арматуры по стоякам -54шт

21. Работы по разделу OB 1: - Покрытие трубопроводов грунтовкой

антикоррозионной ГФ-021 Универсал (в два слоя) по ГОСТ 25129-82 - 137,39 кв. м;

- Замену Кран шаровой полнопроходной 0 15 мм КШ.Ц.П.015.040.02 - 8шт; - Замену Кран шаровой полнопроходной 0 20 мм: КШ.Ц.П.020.040.02 – 50 шт.; - Установка электродвигатель 0,25квт, 1500 об/мин - 3 шт.; - Прочистка вентиляционных каналов - 200пм; - монтаж решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300x300 мм - 160шт.

22. Работы по разделу Пожарная сигнализация (ПС). Система оповещения и

управления эвакуацией (СОУЭ) - Выполнить монтаж системы АПС и СОУЭ, пусконаладочные работы в составе: - оборудование : прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2OП - 1 шт.; Блок индикации и управления RЗ-Рубеж-БИУ - 1 шт.; GSM ретранслятор NV 290 - 1 шт.; Прибор управления системой речевого

оповещения, марка "Рокот-2" - 2 шт.; Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06 - 1 шт.; Аккумуляторная батарея «Delta» DTM1240 - 3 шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 с H3-1B-R3 – 306 шт.; Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-1 1-A-R- 43 шт.; Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой комбинированный Призма-202 - 4 шт.; Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) – 52 шт.; Громкоговоритель: настенный 5 Вт АС-2-2 – 55 шт.; - коммутационные устройства: Распределительная коробка Барьер-КРМ - 38шт.; - кабельная и кабеленесущая продукция: Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 – 1412 м.; Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(A)-FRHF 2x2x0,5 - 714м; Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660 – 70 м.; Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм – 1200 м.; - аварийное освещение: Светильник аварийный SKAT LT-301300 - 1шт.

По объекту «Хирургическое, детское, родильное отделение»:

23.Демонтажные работы - выполнить демонтаж дверных блоков – 6 кв. м. (чердак), оконных блоков – 4 кв. м. (подвал)

24. Покрытие пола из керамогранитной плитки - 185,8 кв. м.

25. Тип пола 2: Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной-

50 мм - 322,3 кв. м, Покрытие из линолеума с заведением на стены - 650,7 кв. м.

26. Тип пола 5: Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной- 50 мм - 59,04 кв. м, Покрытие - линолеум антистатический -157,9кв.м.

27. Устройство наливного полиуретанового антистатического покрытия - 71,2 кв. м.

28. Сплошное выравнивание, окраска, облицовка керамической плиткой - 156,0 кв. м

29. Установка внутренних алюминиевых с остеклением дверных блоков - 81шт, установка противопожарных дверных блоков - 6 шт.

30. Установка блоков оконный из ПВХ - 1,25 кв. м 31. Установка откатных рентгенозащитных ставен -1 шт. 32. Установка противомоскитных сеток – 175 шт.

33. Комплекс работ по разделу АР2: выполнить облицовку откосов -300 кв.м, выполнить штукатурку и окраску откосов - 308,6 кв. м;

34. Комплекс работ по разделу Электроснабжение ЭОМ2: Монтаж и подключение распределительных щитов в комплекте с автоматическими выключателями - 6 шт.; Монтаж светотехнической аппаратуры (светодиодных панелей) - 580шт; Монтаж и подключение выключателей - 390шт ; Монтаж и подключение розеток - 210шт.; Прокладка кабельных линий силовым кабелем с медными жилами, сечением 3x2.5, ВВГнг (A) LSTx 3x2.5мм в гофре, штробах и открыто – 700 м; Монтаж водного распределительного устройства - 1шт; Монтаж медицинских консолей - 3 шт.; Монтаж и подключение заземляющих устройств в помещении оперблока; Подключение смонтированных систем вентиляции, АПС к системе электроснабжения.

35. Выполнить комплекс работ по разделу Системы водоснабжения и канализации (ВК2): - Прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения по стоякам с установкой кранов, муфт, отводов, тройников, угольников - длиной 572 м.; - Установка трубопроводной арматуры: смесителей для раковин, душа и моек – 18 шт.; - Установка гибкой подводки для смесителей - 62 шт.; - Выполнить покрытие трубопроводов

антикоррозийной грунтовкой и окраску трубопроводов эмалью в два слоя - 25,6 кв. м; - Установить канализационный насос – 1 шт.; - Установить раковины - 17шт; - Выполнить замену трубопровода системы внутреннего водоотведения - длиной 301 м. в комплекте с тройниками, отводами, ревизиями и хомутами в количестве 248 шт..; - Установить унитазы - 2 шт.

36. Комплекс работ по разделу Система отопления (ОВ2) - Смонтировать, подключить, настроить и ввести в эксплуатацию тепловой узел; - Заменить

трубопроводную арматуру - 154 крана; - Выполнить покрытие грунтовкой и окраску трубопроводов два слоя - 116,23 кв. м

37. Комплекс работ по разделу Вентиляция (ОВ) - Выполнить монтаж систем приточных установок в количестве 8 штук в комплекте с воздуховодами,

шумоглушителями, воздушными клапанами, преобразователями, щитами управления, решётками; - Выполнить монтаж систем вытяжных установок в количестве 13 штук в комплекте с воздуховодами из стали, шумоглушителями, воздушными клапанами,

преобразователями, щитами управления, решётками ; - Выполнить утепление базалитом воздуховодов в подвале - 1116,5 кв. м; - выполнить пуско-наладочные работы

смонтированных систем вентиляции.

38. Комплекс работ по разделу Пожарная сигнализация (ПС2). Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ2) - Выполнить все работы предусмотренные разделом № 04/23-АУПС,СОУЭ включая установку оборудования: Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П - 1шт., Блок индикации и управления RЗ- Рубеж-БИУ - 1 шт., GSM ретранслятор NV 290 - 1 шт., Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокот-2" - 1шт, Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06 - 1шт, Импульсный источник бесперебойного питания NV 7201 ver. 1.5 - 1шт, Аккумуляторная батарея «Delta» DTM1240 - 2шт, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-RЗ – 27 шт., Извещатель

пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W2.02 – 147

шт., Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 101- 29-PR-R3 W2.02 – 6 шт., Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-11-A-R3 -27 шт., Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой комбинированный Призма-202 – 3 шт., Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) – 20 шт., Громкоговоритель:

настенный 5 Вт АС-2-2 – 336 шт., установка и подключение распределительных коробок Барьер-КРМ – 20 шт., монтаж кабельной продукции: Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 – 800 м., Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5-660 – 15 м.; монтаж кабеленесущей продукции: Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой – 900 м., кабель-канал – 150 м., аварийный светильник – 1 шт., Бокс установочный металлический NV 2002 – 1 шт., Антенна выносная

NV GSM-maxi – 1 шт.

Кроме того, заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 50 000 руб. за каждый день просрочки его исполнения, начиная с тридцать первого дня с даты вступления в законную силу Решения и до фактического его исполнения.

Ответчик возразил против заявленных требований, указав, что осуществляет выполнение работ в рамках спорного контракта.

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, судебное разбирательство следует отложить.

Руководствуясь статьями 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Отложить судебное разбирательство в заседании арбитражного суда на 12 января 2026 г. на 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу 

<

...>,

кабинет № 230, тел. 

<

***> (канцелярия)

Суд ставит на обсуждение сторон вопрос о назначении экспертизы с целью выяснения объема и стоимости подлежащих выполнению работ, предусмотренных условием спорного договора и технической документацией, составленной во

исполнение указанного договора. В случае заявления ходатайства о назначении экспертизы представить кандидатуру эксперта и документы о его квалификации, с указанием стоимости экспертизы и сроков ее выполнения, внести на депозитный счет

суда стоимость работ по проведению экспертизы с указанием кода 0026, доказательства представить в суд. К судебному заседанию предложить представить:

Истцу: письменно уточнить конкретные виды и объемы работ, которые надлежит выполнить ответчику (позиция 1- площадь подлежащей демонтажу плитки напольной из мраморной крошки и площадь стен, подлежащих расчистке от старой краски); возражения

на отзыв ответчика (при наличии); рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения; иные документы в обоснование позиции по делу; рассмотреть вопрос о заключении с ответчиком мирового соглашения.

Ответчику: письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы

права; отзыв на иск направить (вручить) истцу, доказательства направления (вручения) представить суду; при согласии с заявленными требованиями предоставить письменное заявление о признании иска; в случае добровольного удовлетворения требований,

предоставить соответствующие доказательства; рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения.

Судья А.А.Стовбун.