АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-4168/2024

г. Барнаул

18 июля 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ситниковой И.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Евдокимовой Т.Ю., с использованием средств  аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, г.Барнаул, Алтайский край) к публичному  акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (660021,  Красноярский край, Красноярск город, Бограда улица, 144а, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) об обязании ПАО "Россети Сибирь" в лице филиала "Алтайэнерго"  исполнить мероприятия в соответствии с ТУ 8000566983 по договору об осуществлении  технологического присоединения № 20.2200.3737.23 от 25.08.2023, взыскании с ПАО  "Россети Сибирь" в лице филиала "Алтайэнерго" в пользу истца неустойки за  неисполнение обязательств по договору по договору об осуществлении технологического  присоединения № 20.2200.3737.23 от 25.08.2023 в размере 450 813,6 руб. за период с  27.02.24 по 11.07.2024, продолжить взыскивать неустойку, равную 0,25 процента  указанного общего размера платы за каждый день просрочки до фактического исполнения  обязательств, но не далее 26.02.2025, взыскании с ПАО "Россети Сибирь" в лице филиала  "Алтайэнерго" в пользу истца расходы на оплату госпошлины при обращении в суд,  взыскании с ПАО "Россети Сибирь" в лице филиала "Алтайэнерго" в пользу истца  судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 10 000 рублей за  каждый день просрочки, начиная со дня вступления решения суда в законную силу,  

при участии в судебном заседании представителя: от истца – ФИО2, по  доверенности от 22.02.2024, диплом,  

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течении 5 дней с  момента вступления решения суда в законную силу исполнить мероприятия в  соответствии с ТУ 8000566983 по договору об осуществлении технологического  присоединения № 20.2200.3737.23 от 25.08.2023.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойку в размере  450813,6 руб., а также 8000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Продолжить начисление неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства  по договору об осуществлении технологического присоединения, равную 0,25%  указанного общего размера платы за каждый день просрочки за период с 12.07.2024 по  день фактического исполнения мероприятий по осуществлению технологического  присоединения, но не далее 26.02.2025.  

При неисполнении решения суда в указанный срок взыскать с публичного  акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 на случай неисполнения решения суда судебную  неустойку в размере 10000 руб. за каждый месяц неисполнения решения суда.  

В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.В. Ситникова