Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-11072/2024

28 августа 2025 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Гуляевой А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лукачевским Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Прометей+" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «СахаСтройБетон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту всех фасадов многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>, путём выполнения следующих работ:  

1) вскрытие швов стеновых панелей с удалением покрасочного слоя, цементно-песчаной заделки, герметизирующих, уплотняющих, теплоизоляционных материалов;  

2) очистка швов стеновых панелей и участков рядом с ними от остатков старых герметизирующих, уплотняющих и теплоизоляционных материалов, наплывов бетона и раствора;  

3) обработка швов стеновых панелей антигрибковым составом (при наличии участков, пораженных грибком и плесенью);  

4) обеспыливание поверхностей швов стеновых панелей, обработка грушовкой глубокого проникновения;  

5) нагнетание в швы стеновых панелей монтажной пены; 

6) заполнение межпанельных швов прокладочным теплоизоляционным пенополиэтиленовым шнуром;  

7) заполнение устья стыков стеновых панелей герметизирующей мастикой с заглаживанием мастики и приданием формы швам;  

8) покраска швов стеновых панелей в цвет основной части фасада. 

Обязать некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту балконов и лоджий многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>, путём выполнения следующих работ:  

1) устранить протекания воды на балконы и лоджии; 2) заменить треснувшие стекла в оконных рамах на стекла без трещин; 

3) устранить перекосы оконных рам, обеспечив тем самым свободное открытие и закрытие оконных створок и исключение их выпадения из оконных рам.  

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Прометей+" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 50 000 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Судья А. В. Гуляева