АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156000, 

<

...>

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-9580/2024

г. Кострома

01 ноября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 01 ноября 2025 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Смирновой Екатерины Николаевны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Маклаковой А.А., рассмотрев исковое заявление муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Мантуровского муниципального округа Костромской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Грэйтстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 73 776 906 руб. 64 коп. неустойки по муниципальному контракту №0841600001323000004 от 15.03.2023, а также 65 826 руб. расходов по оплате государственной пошлины (с учетом уточненных требований), 

при участии в заседании: 

от истца: не явился, извещён, 

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 18.04.2025 (онлайн), 

установил:

муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Мантуровского муниципального округа Костромской области (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Грэйтстрой» (далее - ответчик) о взыскании 73 776 906 руб. 64 коп. неустойки по муниципальному контракту №0841600001323000004 от 15.03.2023, а также 65 826 руб. расходов по оплате государственной пошлины (с учетом уточненных требований).

Ответчик иск оспорил.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся материалам.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как указал истец, 15.03.2023 между Администрацией городского округа город Мантурово и обществом с ограниченной ответственностью "Грэйтстрой" был заключен Контракт №0841600001323000004, по условиям которого общество обязалось выполнить работы по 1-го этапа реконструкции объекта капитального строительства: «Водозаборные и водоочистные сооружения г. Мантурово. Реконструкция 1 этап».

21.11.2023 сторонами подписано соглашение о замене Заказчика на МБУ «Благоустройство» с принятием всех прав и обязанностей по условиям Контракта с момента его подписания.

В ходе исполнения контракта сторонами заключались многочисленные дополнительные соглашения, которыми стороны меняли количество этапов, их начальные и конечно сроки выполнения, а также их стоимость. 

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как указал истец, ответчик регулярно нарушал сроки выполнения отдельных этапов.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Так, пунктом 11.4. контракта Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Руководствуясь названными нормой права и положениями контракта, истец начислил и просит взыскать с ответчика неустойку в размере 73 776 906 руб. 64 коп. 

Досудебные претензии были оставлены без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик иск оспорил по мотиву некорректности расчета неустойки, отсутствия его вины в ряде просрочек.

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Как видно из материалов дела и не оспаривается сторонами, 15.03.2023 между Администрацией городского округа город Мантурово и обществом с ограниченной ответственностью "Грэйтстрой" был заключен Контракт №0841600001323000004 (ИКЗ 233440400068444040100100020014221414), по условиям которого общество обязалось выполнить работы по 1-го этапа реконструкции объекта капитального строительства: «Водозаборные и водоочистные сооружения г. Мантурово. Реконструкция 1 этап».

21.11.2023 сторонами подписано соглашение о замене Заказчика на МБУ «Благоустройство» с принятием всех прав и обязанностей по условиям Контракта с момента его подписания.

В ходе исполнения контракта сторонами заключались многочисленные дополнительные соглашения, которыми стороны меняли количество этапов, их начальные и конечно сроки выполнения, а также их стоимость.

Проанализировав условия контракта, суд приходит к выводу, что он соответствует критериям договора подряда, регулируемого Главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из норм главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 названного Кодекса). 

Определяющим элементом подрядных правоотношений результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком, при этом сдача и приемка результата - основные обязанности подрядчика и заказчика.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

С учетом последних уточнений исковых требований, истцом отыскивается неустойка по контракту в редакции дополнительного соглашения № 25 от 09.07.2025.

Неоднократное, по мнению истца, нарушение сроков выполнения отдельных этапов послужило основанием для обращения в суд с требованием о взыскании неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Так, пунктом 11.4. контракта Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Истец неоднократно уточнял исковые требования, в окончательной редакции иска просит суд взыскать неустойку в размере 73 776 906 руб. 64 коп.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться в числе прочего неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Так, пунктом 11.4. контракта Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Руководствуясь названными нормой права и положениями договора, истец начислил и просит взыскать с ответчика, как было указано ранее, неустойку в размере 73 776 906 руб. 64 коп.

Размер неустойки определен истцом как арифметическое сложение неустойки из изначальной редакции иска (по претензиям от 29.03.2024 № исх. 73, от 01.08.2024 № исх. 233 на сумму 8 565 206 руб. 26 коп.) и двух уточнений исковых требований (уточнение иска от 13.01.2025 по претензии от 30.10.2024 № 336 на сумму 10 178 227 руб. 62 коп.; уточнение иска от 15.08.2025 по претензии от 14.07.2025 № 183 на сумму 55 033 472 руб. 21 коп.).

Суд считает целесообразным отдельно проверить каждый из 3 расчетов неустойки, сумма которых и дает цену иска.

При этом суд полагает правильным проверять расчет в обратном порядке, нежели хронологически было заявлено, поскольку самые последние уточнения иска могут включать в себя отдельные этапы, неустойка за которые почитана истцом в более ранних уточнениях, что будет возможно заметить только если проверять неустойку от более поздних требований к более ранним, и тем  самым исключить возможное взыскание неустойки за один и тот же отдельный этап дважды.

Поскольку сторонами в материалы дела дополнительное соглашение № 25 со всеми приложениями не представлено, суд для проверки расчета неустойки в части стоимости отдельных этапов и сроков их исполнения воспользовался информацией, полученной из открытых источников в сети Интернет по адресу:

 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=101439405.

Проверив расчет неустойки (уточнение иска от 15.08.2025 по претензии от 14.07.2025 № 183 на сумму 55 033 472 руб. 21 коп.), суд пришел к следующим выводам.

Неустойку в размере 55 033 472 руб. 21 коп. истец отыскивает в соответствии со следующим расчетом:

1.                       на 18.10.2024 г., должны быть выполнены следующие виды работ: Подготовка территории строительства (п/н выполнения контракта 32) на сумму 22 376,40 руб. С 19.10.2024г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 259 календарных дней.

22 376,40 Р х 20 % х (1/300) х 259 = 3 863,66 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 г х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

2.                       на 01.07.2025 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Рекультивация (п/н выполнения контракта 13) на сумму 3 476 011,56 руб. С 02.07.2025 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 3 календарных дней.

3 476 011,56 Р х 20 % х (1/300) х 3 = 6 952,02 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 г х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

3.                       на 30.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (п/н выполнения контракта 20) на сумму 48 855 828,62 руб. С 01.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 277 календарных дней.

48 855 282,62 Р х 20 % х (1/300) х 277 = 9 022 042,46 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 г х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

4.                       на 06.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (нащельники) (п/н выполнения контракта 58) на сумму 720 933,60 руб. С 07.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 271 календарных дней.

720 933,60 Р х 20 % х (1/300) х 271 = 130 248,67 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 07.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

5.                       на 07.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (цоколь) (п/н выполнения контракта 59) на сумму 1449 63,0 руб. С 08.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 270 календарных дней.

1 449 630,0 Р х 20 % х (1/300) х 270 = 260 933,40 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

6.                       на 01.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (п/н выполнения контракта 26) на сумму 2 329 674,89 руб. С 02.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 276 календарных дней.

2 329 674,89 Р х 20 % х (1/300) х 276 = 428 660,18 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

7.                       на 19.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (крыльца) (п/н выполнения контракта 63) на сумму 14 671,20 руб. С 20.09.2024 г. по 04.07.2025г. количество дней просрочки составляет 289 календарных дней.

14 671,20 Р х 20 % х (1/300) х 289 = 2 826,65 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

8.                       на 22.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП

(стены) (п/н выполнения контракта 66) на сумму 232 093,20 руб. С 23.09.2024 г. по

04.07.2025                 г. количество дней просрочки составляет 285 календарных дней.

232 093,20 Р х 20 % х (1/300) х 285 = 44 097,71 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х [1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

9.                       на 23.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (окно, двери] (п/н выполнения контракта 67] на сумму 325 161,60 руб. С 24.09.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 284 календарных дней.

325 161,60 Р х 20 % х (1/300] х 284 = 61 563,93 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

10.                  на 10.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание насосной станции 1 подъема (п/н выполнения контракта 28] на сумму 11 230 315,10 руб. С 11.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 267 календарных дней. 11 230 315,10 Р х 20 % х (1/300] х 267 = 1 998 996,09 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

11.                  на 01.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (БОС]. Устройство установки для очистки поверхностных вод. Оборудование ( 1] Сетчатые фильтры - 2 шт., 2] отстойник осветлитель для промывных вод из полипропилена - 1 шт., 3]Контактные осветлители напорные — 4 шт. с индивидуальной обвязкой и запорной арматурой с электроприводом, с фильтрующей загрузкой , 4] Воздуходувки - 2 шт. 5] Сорбционные фильтры с загрузкой - 3 шт. 6] Шнековые обезвоживатели осадка - 2 шт.]7 7] Вихревые смесители+ отстойники-осветлители-1+3 шт 8]комплект трубопроводов ПВХ обвязки технологического оборудования,9]винтовой насос-1шт (п/н выполнения контракта 21] на сумму 104 958 646,80 руб. С 02.09.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 306 календарных дней.

104 958 646,80 Р х 20 % х (1/300] х 306 = 21 411 563,95 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

12.                  на 20.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Устройство установки для очистки поверхностных вод. Монтаж оборудования и ПНР (п/н выполнения контракта 23] на сумму 36 331 557,55 руб. С 21.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 257 календарных дней.

36 331 557,55 Р х 20 % х (1/300] х 257 = 6 224 806,86 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

13.                  на 13.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Насосная станция 2 подъема (п/н выполнения контракта 29] на сумму 1 211 492,21 руб. С 14.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 264 календарных дней.

1 211 492,21 Р х 20 % х (1/300] х 264 = 213 222,63 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

14.                  на 29.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Сети связи .наружная охрана (п/н выполнения контракта 35] на сумму 6 481 200,54 руб. С 30.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 258 календарных дней.

6 481 200,54 Р х 20 % х (1/300] х 258 = 1114 766,49 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

15.                  на 16.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения,канализации и теплоснабжения (п/н выполнения контракта 31] на сумму 18 794 377,21 руб. С 17.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 261 календарных дней.

18 794 377,21 Р х 20 % х (1/300] х 261 = 3 270 221,63 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300] х количество дней просрочки = сумма выплаты

16.                  на 16.12.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети канализации. Канализация дождевая К2. Регулирующая емкость дождевого стока V=60m3, Накопительная емкость V=20m3 (п/н выполнения контракта 4) на сумму 7 849 820,0 руб. С 17.12.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 200 календарных дней.

7 849 820,0 Р х 20 % х (1/300) х 200 = 1 046 642,67 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

17.                  на 02.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Котельная. Монтаж, (п/н выполнения контракта 24) на сумму 753 620,0 руб. С 03.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 276 календарных дней.

753 620,0 Р х 20 % х (1/300) х 276 = 138 666,08 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

18.                  на 19.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Котельная. ПНР. (п/н выполнения контракта 33) на сумму 164 103,48 руб. С 20.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 258 календарных дней.

164 103,48 Р х 20 % х (1/300) х 258 = 28 225,80 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

19.                  на 27.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Вертикальная планировка (п/н выполнения контракта 54) на сумму 4 752 862,80 руб. С 28.10.2024 г. по 04.07.2025 количество дней просрочки составляет 250 календарных дней.

4 752 862,80 Р х 20 % х (1/300) х 250 = 792 143,80 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

20.                  на 28.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Вертикальная планировка и благоустройство (п/н выполнения контракта 34) на сумму 42 451 971,31 руб. С 29.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 249 календарных дней.

42 451 971,31,80 Р х 20 % х (1/300) х 249 = 7 047 027,24 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

21.                  на 09.01.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Утилизация непригодного грунта (п/н выполнения контракта 17) на сумму 1 812 989,74 руб. С 10.01.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 249 календарных дней. 1 812 989,74 Р х 20 % х (1/300) х 542 = 655 093,63 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

22.                  на 25.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Утилизация непригодного грунта (п/н выполнения контракта 27) на сумму 188 995,0 руб. С 26.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 252 календарных дней.

188 995,0 Р х 20 % х (1/300) х 252 = 31 751,16 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

23.                  на 05.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Утилизация непригодного грунта (3 этап) (п/н выполнения контракта 81) на сумму 1 208 531,56 руб. С 06.09.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 302 календарных дней. 1 208 531,56 Р х 20 % х (1/300) х 302 = 243 317,69 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

24.                  на 14.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Архитектурно-строительные работы ворота (п/н выполнения контракта 90) на сумму 69 765,32 руб. С 15.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 232 календарных дней.

69 765,32 Р х 20 % х (1/300) х 232 = 10 790,37 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

25.                  на 22.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (двери метал.) (п/н выполнения контракта 96) на сумму 1 353 495,60 руб. С 23.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 224 календарных дней.

1 353 5495,60 Р х 20 % х (1/300) х 224 = 202 122,01 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

26.                  на 23.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (двери блоки ПВХ) (п/н выполнения контракта 97) на сумму 661470,0 руб. С 24.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 223 календарных дней.

661 470,0 Р х 20 % х (1/300) х 223 = 98 338,54 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

27.                  на 24.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (ворота) (п/н выполнения контракта 98) на сумму 563 562,0 руб. С 25.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 222 календарных дней. 563 562,0 Р х 20 % х (1/300) х 222 = 83 407,18 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

28.                  на 25.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (снегозадержатель) (п/н выполнения контракта 99) на сумму 701 038,80 руб. С 26.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 221 календарных дней.

701 038,0 Р х 20 % х (1/300) х 221 = 103 286,38 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

29.                  на 27.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (ГКЛ) (п/н выполнения контракта 101) на сумму 683 576,40 руб. С 28.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 219 календарных дней. 683 576,40 Р х 20 % х (1/300) х 219 = 99 802,15 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты

30.                  на 28.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (ГКЛ) (п/н выполнения контракта 102) на сумму 881 798,40 руб. С 29.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 218 календарных дней. 881 798,40 Р х 20 % х (1/300) х 218 = 128 154,70 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) * количество дней просрочки = сумма выплаты

31.                  на 29.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание насосной станции 1 подъема. Архитектурно-строительные работы .(проемы: двери, ворота)

(п/н выполнения контракта 103) на сумму 898 178,40 руб. С 30.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 217 календарных дней.

898 178,40 Р х 20 % х (1/300) х 217 = 129 936,48 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 04.07.2025 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты.

Проверив расчет, суд признает его частично неверным.

Так, в порядковых номерах расчета 3, 4, 8, 15, 25, 27, 30, 31 неверно определена цена соответствующего отдельного этапа.

В порядковом номере расчета 7, 14, 17 неверно определено количество дней просрочки.

Суд произвел перерасчет неустойки по указанным номерам.

3.                 на 30.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (п/н выполнения контракта 20) на сумму 48 358 333,80 руб. С 01.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 277 календарных дней.

48 358 333,80 руб. х 20 % х (1/300) х 277 = 8 930 172, 31 руб.

4.                       на 06.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (нащельники) (п/н выполнения контракта 58) на сумму 506 155,20 руб. С 07.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 271 календарных дней.

506 155,20 руб. х 20 % х (1/300) х 271 = 91 445, 37 руб.

7.                 на 19.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (крыльца) (п/н выполнения контракта 63) на сумму 14 671,20 руб. С 20.09.2024 г. по 04.07.2025г. количество дней просрочки составляет 288 календарных дней.

14 671,20 руб. х 20 % х (1/300) х 288 = 2 816,87 руб.

8.                 на 22.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (стены) (п/н выполнения контракта 66) на сумму 74 168,40 руб. С 23.09.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 285 календарных дней.

74 168,40 руб. х 20 % х (1/300) х 285 = 14 092 руб.

14.             на 29.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Сети связи .наружная охрана (п/н выполнения контракта 35] на сумму 6 481 200,54 руб. С 30.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 248 календарных дней.

6 481 200,54 руб. х 20 % х (1/300] х 248 = 1 071 558, 49 руб.

15.                  на 16.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения (п/н выполнения контракта 31] на сумму 18 740 908, 20 руб. С 17.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 261 календарных дней.

18 740 908, 20 руб. х 20 % х (1/300] х 261 = 3 260 918, 03 руб.

17.             на 02.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Котельная. Монтаж, (п/н выполнения контракта 24) на сумму 753 620,0 руб. С 03.10.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 275 календарных дней.

753 620,0 руб. х 20 % х (1/300) х 275 = 138 163, 67 руб.

25.             на 22.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (двери метал.) (п/н выполнения контракта 96) на сумму 795 715,20 руб. С 23.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 224 календарных дней.

795 715,20 руб. х 20 % х (1/300) х 224 = 118 826, 80 руб.

27.             на 24.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (ворота) (п/н выполнения контракта 98) на сумму 391 749,60 руб. С 25.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 222 календарных дней. 

391 749,60 руб.  х 20 % х (1/300) х 222 = 57 978,94 руб.

30.             на 28.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) Архитектурно- строительные работы (ГКЛ) (п/н выполнения контракта 102) на сумму 881 443,20 руб. С 29.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 218 календарных дней. 

881 443,20 руб.  х 20 % х (1/300) х 218 = 128 103,08 руб.

31.                  на 29.11.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание насосной станции 1 подъема. Архитектурно-строительные работы .(проемы: двери, ворота)

(п/н выполнения контракта 103) на сумму 117 696 руб. С 30.11.2024 г. по 04.07.2025 г. количество дней просрочки составляет 217 календарных дней.

117 696 руб. х 20 % х (1/300) х 217 = 17 026, 69 руб.

Итого, с учетом произведенного судом расчета, размер обоснованно предъявленной ко взысканию неустойки по уточнению иска от 15.08.2025 по претензии от 14.07.2025 № 183 составляет 54 598 084 руб. 40 коп.

Проверив расчет неустойки (уточнение иска от 13.01.2025 по претензии от 30.10.2024 № 336 на сумму 10 178 227 руб. 62 коп.), суд пришел к следующим выводам.

Неустойку в размере 10 178 227 руб. 62 коп. истец отыскивает в соответствии со следующим расчетом:

1.                 на 17.12.2023г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети канализации. Канализация дождевая К2. Регулирующая емкость дождевого стока V=60m3, Накопительная емкость V=20m3 (п/н выполнения контракта 4) на сумму 7 849 820,0 руб. С 18.12.2023 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 317 календарных дней.

7 849 820,00 Р х 21 % х (1/300) х 317 = 1 741 875,06 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

2.                 на 19.12.2023 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание насосной станции 1 подъема (шпунты) (п/н выполнения контракта 6) на сумму 4 211 803,20 руб. С 20.12.2023 г. по 29.10.2024г. количество дней просрочки составляет 315 календарных дней.

4 211 803,20 Рх 21 % х (1/300) х 315 = 928 702,61 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

3.                 на 05.01.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Рекультивация (п/н выполнения контракта 13) на сумму 3 405 102,83 руб. С 06.01.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 298 календарных дней.

3 405 102,83 Р х 21 % х (1/300) х 298 = 710 304,45 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

4.                 на 09.01.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Утилизация непригодного грунта (п/н выполнения контракта 17) на сумму 1 812 989,74 руб. С 10.01.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 294 календарных дней.

1 812 989,74 Р х 21 % х (1/300) х 294 = 373 113,29 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

5.                 на 31.07.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения (плита коагулянта) (п/н выполнения контракта 22) на сумму 223 323 руб. С 01.08.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 90 календарных дней.

223 323,60 Р х 21 % х (1/300) х 90 = 14 069,39 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

6.                 на 01.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС). Устройство установки для очистки поверхностных вод. Оборудование ( 1) Сетчатые фильтры - 2 шт., 2) отстойник осветлитель для промывных вод из полипропилена - 1 шт., 3))Контактные осветлители напорные — 4 шт. с индивидуальной обвязкой и запорной арматурой с электроприводом, с фильтрующей загрузкой , 4) Воздуходувки - 2 шт. 5) Сорбционные фильтры с загрузкой - 3 шт. 6) Шнековые обезвоживатели осадка - 2 шт.) 7) Вихревые смесители+ отстойники-осветлители 8)комплект трубопроводов ПВХ обвязки технологического оборудования,9)винтовой насос-1шт (п/н выполнения контракта 21) на сумму 104 958 646,80 руб. Работы выполнены частично на сумму 40 948 677,37 руб. Не исполнены обязательства на сумму 64 009 969,42 руб. С 02.09.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 58 календарных дней.

64 009 969,42 Р х 21 % х (1/300) х 58 = 2 598 804,76 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

7.                 на 15.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (отмостка,крыльца) (п/н выполнения контракта 42) на сумму 113 199,60 руб. С 16.09.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 45 календарных дней.

113 199,60 Р х 21 % х (1/300) х 45 = 3 565,79 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) количество дней просрочки = сумма выплаты)

8.                 на 17.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Насосная станция 2 подъема Конструкции металлические (п/н выполнения контракта 44) на сумму 291 057,60 руб. С 18.09.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 42 календарных дней.

291 057,60 Р х 21 % х (1/300) х 42 = 8 557,09 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

9.                 на 02.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание водоочистных сооружений с административно-бытовым корпусом (ВОС) (п/н выполнения контракта 20) на сумму 80 992 522,23 руб. С 03.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 27 календарных дней.

80 992 522,23 Р х 21 % х (1/300) х 27 = 1 530 758,67 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

10.             на 03.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Устройство установки для очистки поверхностных вод. Монтаж оборудования и ПНР (п/н выполнения контракта 23) на сумму 36 331 557,55 руб. С 04.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 26 календарных дней.

36 331 557,55 Р х 21 % х (1/300) х 26 = 661 234,35 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

11.             на 04.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Котельная. Монтаж (п/н выполнения контракта 24). На сумму 753 620,0 руб. С 05.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 25 календарных дней.

753 620,00 Р х 21 % х (1/300) х 25 = 13 188,35 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

12.             на 05.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Устройство установки для очистки поверхностных вод. Монтаж крана(п/н выполнения контракта 25). На сумму 1 164 536,40 руб. С 06.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 24 календарных дней.

1 164 536,40 Р х 21 % х (1/300) х 24 = 19 564,21 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

13.             на 06.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (п/н выполнения контракта 26) на сумму 3 294 784,49 руб. С 07.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 23 календарных дней.

3 294 784,49 Р х 21 % х (1/300) х 23 = 53 046,03 Р

(сумма          невыполненных      обязательств           х          ключевая      ставка            ЦБ      на            29.10.2024    х          (1/300)          х

количество дней просрочки = сумма выплаты)

14.             на 07.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Утилизация непригодного грунта (п/н выполнения контракта 27) на сумму 1 397 526,56 руб. С 08.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 22 календарных дней.

1 397 526,56 Р х 21 % х (1/300) х 22 = 21 521,91 Р

(сумма          невыполненных      обязательств           х          ключевая      ставка            ЦБ      на            29.10.2024    х          (1/300)          х

количество дней просрочки = сумма выплаты)

15.             на 10.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ Здание насосной станции 1 подъема (п/н выполнения контракта 28) на сумму 27 545 788,80 руб. С 11.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 19 календарных дней.

27 545 788,80 Р х 21 % х (1/300) х 19 = 366 358,99 Р

(сумма          невыполненных      обязательств           х          ключевая      ставка            ЦБ      на            29.10.2024    х          (1/300)          х

количество дней просрочки = сумма выплаты)

16.             на 11.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Насосная станция 2 подъема (п/н выполнения контракта 29) на сумму 14 564 468,72 руб. С 12.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 18 календарных дней.

14 564 468,72 Р х 21 % х (1/300) х 18 = 183 512,31 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

17.             на 15.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети электроснабжения (п/н выполнения контракта 30) на сумму 63 714 292,60 руб. С 16.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 14 календарных дней.

63 714 292,60 Р х 21 % х (1/300) х 14 = 624 400,07 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

18.             на 16.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Наружные сети водоснабжения,канализации и теплоснабжения (п/н выполнения контракта 31) на сумму 35 706 811,96 руб. С 17.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 13 календарных дней.

35 706 811,96 Р х 21 % х (1/300) х 13 = 324 931,99 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты)

19.             на 18.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Подготовка территории строительства (п/н выполнения контракта 32) на сумму 93 285,13 руб. С 19.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 11 календарных дней.

93 285,13 Р х 21 % х (1/300) х 11 = 718,30 Р

(сумма невыполненных обязательств х ключевая ставка ЦБ на 29.10.2024 х (1/300) х количество дней просрочки = сумма выплаты).

Как видно из уточнения иска от 15.08.2025, истцом уже рассчитана неустойка за нарушение п/н выполнения контракта 4, 13, 17, 21, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, в связи с чем оснований для двойного взыскания неустойки по данным п/н выполнения контракта не имеется, суд исключает порядковые номера расчета 1, 3, 4, 6, 9-11, 13-16, 18 и 19 из расчета к уточнению иска от 13.01.2025.

Проверив расчет в оставшейся части, суд признает его частично неверным.

Так, в порядковом номере расчета 7 неверно определена цена соответствующего отдельного этапа.

В порядковом номере расчета 12 неверно определено количество дней просрочки.

Суд произвел перерасчет неустойки по указанным номерам.

7.                 на 15.09.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Здание КПП (отмостка,крыльца) (п/н выполнения контракта 42) на сумму 97 874,40 руб. С 16.09.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 45 календарных дней.

97 874,40  руб. х 21 % х (1/300) х 45 = 3 014, 53 руб.

12.             на 21.10.2024 г. должны быть выполнены следующие виды работ: Устройство установки для очистки поверхностных вод. Монтаж крана(п/н выполнения контракта 25). На сумму 1 164 536,40 руб. С 22.10.2024 г. по 29.10.2024 г. количество дней просрочки составляет 8 календарных дней.

1 164 536,40 Р х 21 % х (1/300) х 8 = 6 521, 40 руб.

Итого, с учетом произведенного судом расчета, размер обоснованно предъявленной ко взысканию неустойки по уточнению иска от 13.01.2025 по претензии от 30.10.2024 № 336 составляет 1 585 265 руб. 09 коп.

Проверив расчет неустойки из изначальной редакции иска (по претензиям от 29.03.2024 № исх. 73, от 01.08.2024 № исх. 233 на сумму 8 565 206 руб. 26 коп.), суд пришел к следующим выводам.

В отличии от уточнений иска, расчет неустойки в начальной редакции иска не содержит разбивки на отдельные п/н выполнения контракта, в связи с чем суд не усматривает целесообразности приводить в полной объеме расчет истца как это было сделано ранее.

Проверив расчет, судом установлено, что в первоначальной редакции иска истцом отыскивается неустойка за нарушение п/н выполнения контракта 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 38. 

Как видно из уточнений иска, истцом уже рассчитана неустойка за нарушение п/н выполнения контракта 4, 6, 13, 17 в связи с чем оснований для двойного взыскания неустойки по данным п/н выполнения контракта не имеется.

Суд отказывает во взыскании неустойки по данному расчету по п/н выполнения контракта 15 и 19, поскольку с учетом дополнительного соглашения № 25 срок их исполнения 15.04.2024 и 18.09.2024, что превышает предельные даты расчета неустойки истцом 29.03.2024 и 26.07.2024 соответственно.

Суд произвел расчет неустойки по п/н выполнения контракта 7, 10, 11, 12, 14, 16, 38 учитывая стоимость данных этапов, сроки их выполнения с учетом дополнительного соглашения № 25, а также предельные даты расчета неустойки истцом 29.03.2024 и 26.07.2024, поскольку суд в силу положений ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации за пределы заявленных требований выйти не может.

п/н выполнения контракта 7

период

дней

формула

неустойка

31.12.2023 – 29.03.2024

90

468 079,20 ? (1/300 ? 16%) ? 90

22 467,80

Неустойка: 22 467,80 ?

Сумма основного долга: 468 079,20 ?

Сумма неустойки: 22 467,80 ?

п/н выполнения контракта 10

период

дней

формула

неустойка

03.01.2024 – 26.07.2024

206

2 093 935,25 ? (1/300 ? 16%) ? 206

230 053,69

Неустойка: 230 053,69 ?

Сумма основного долга: 2 093 935,25 ?

Сумма неустойки: 230 053,69 ?

п/н выполнения контракта 11

период

дней

формула

неустойка

04.01.2024 – 26.07.2024

205

1 634 890,44 ? (1/300 ? 16%) ? 205

178 748,02

Неустойка: 178 748,02 ?

Сумма основного долга: 1 634 890,44 ?

Сумма неустойки: 178 748,02 ?

п/н выполнения контракта 12

период

дней

формула

неустойка

05.01.2024 – 29.03.2024

85

1 996 395,60 ? (1/300 ? 16%) ? 85

90 503,27

Неустойка: 90 503,27 ?

Сумма основного долга: 1 996 395,60 ?

Сумма неустойки: 90 503,27 ?

п/н выполнения контракта 14

период

дней

формула

неустойка

07.01.2024 – 26.07.2024

202

12 829 809,60 ? (1/300 ? 16%) ? 202

1 382 198,15

Неустойка: 1 382 198,15 ?

Сумма основного долга: 12 829 809,60 ?

Сумма неустойки: 1 382 198,15 ?

п/н выполнения контракта 16

период

дней

формула

неустойка

09.01.2024 – 29.03.2024

81

38 361 693,60 ? (1/300 ? 16%) ? 81

1 657 225,16

Неустойка: 1 657 225,16 ?

Сумма основного долга: 38 361 693,60 ?

Сумма неустойки: 1 657 225,16 ?

п/н выполнения контракта 38

период

дней

формула

неустойка

01.03.2024 – 26.07.2024

148

902 972,40 ? (1/300 ? 16%) ? 148

71 274,62

Неустойка: 71 274,62 ?

Сумма основного долга: 902 972,40 ?

Сумма неустойки: 71 274,62 ?

Итого, с учетом произведенного судом расчета, размер обоснованно предъявленной ко взысканию неустойки из изначальной редакции иска по претензиям от 29.03.2024 № исх. 73, от 01.08.2024 № исх. 233 составляет 3 632 468 руб. 38 коп.

С учетом изложенного, размер исчисленной судом неустойки составляет 59 815 817 руб. 90 коп. (3 632 468 руб. 38 коп. + 1 585 265 руб. 09 коп. + 54 598 084 руб. 40 коп.).

Доводы ответчика о некорректности расчета судом учтены при проведении указанных выше расчетов, а также при исключении некоторых этапов из расчета.

Представленные ответчиком КС-2 в отношении отдельных этапов судом учтены быть не могут, поскольку в них зафиксирована дата выполнения работ превышающая предельные даты расчета неустойки истцом.

Суд отклоняет доводы ответчика о том, что истцом нарушены встречные обязательства по договору ввиду непредставления рабочей документации.

Как видно из материалов дела, по отдельным этапам, оспаривая начисление неустойки по которым ответчик указывает на отсутствие рабочей документации, стороны неоднократно изменяли сроки выполнения этих этапов, а значит определенные трудности и препятствия сторонами учитывались совместно.

Доказательств того, что в ходе заключения многочисленных дополнительных соглашений ответчик возражал против указанных в них сроков выполнения отдельных этапов материалы дела не содержат, а значит, даже обладая информацией об отсутствии рабочей документации, своими действиями ответчик подтвердил возможность выполнить этапы в сроки, указанные в дополнительных соглашениях.

Кроме того судом учтено, что в отдельных этапах, по которым ответчиком указано несвоевременное представление рабочей документации, из его же пояснений следует что разница во времени между предоставлением документации и приемкой работ либо вообще отсутствовала, либо составляла до 10 календарных дней.

Суд скептически относится к выполнению работ в указанные короткие сроки, а значит отсутствие документации не являлось препятствием в выполнении принятых на себя обязательств, особенно в разрезе заключения сторонами многочисленных дополнительных соглашений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Однако учитывая фактические сроки выполнения работ по отдельным этапам, в отношении которых ответчиком указано на отсутствие рабочей документации, суд приходит к выводу, что ответчик в нарушение указанной нормы материального права приступил к выполнению работ в рамках спорного контракта и дополнительных соглашений, о невозможности их выполнения в связи с указанными обстоятельствами не заявил, начатые работы не приостановил.

Более того, как следует, например, из письма ответчика № 385 от 04.04.2023 отсутствие рабочей документации ответчик считает основанием для заключения дополнительного соглашения, а не для приостановления проведения работ, либо же вообще невозможности выполнения данных работ.

Как было указано судом ранее, сторонами были заключены многочисленные дополнительные соглашения в части увеличения сроков работ по отдельным этапам, а значит замечания ответчика были учтены.

Срок выполнения работ по этапу 6 также неоднократно корректировался сторонами, то есть, зная о наличии трудностей в его выполнении, ответчик со сроками был согласен и принял на себя обязательства, а значит от гражданско-правовой ответственности освобожден быть не может.

Суд отклоняет контррасчет ответчика в соответствии с дополнительным соглашением № 15, поскольку на момент рассмотрения иска оно уже не является актуальным.

Иные трудности в период выполнения контракта являются предпринимательским риском ответчика и не могут свидетельствовать о наличии оснований для освобождения его от гражданско-правовой ответственности в виде неустойки.

Наличие риска - один из признаков предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Поскольку приведенные ответчиком обстоятельства относятся к его предпринимательскому риску и не могут продлить для него срок исполнения обязательств по договору, суд отклоняет доводы ответчика.

Ходатайства о снижении неустойки ответчик не заявил.

Поэтому с учетом положений  пункта 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», предусматривающих, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, суд находит требование о взыскании неустойки обоснованным и подлежащим удовлетворению в исчисленном судом размере 59 815 817 руб. 90 коп.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 65 826  руб.

Поскольку исходя из размера удовлетворенных требований и даты подачи иска (07.09.2024) размер государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет, не может превышать 200 000 руб., с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 134 174 руб.

В соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Грэйтстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Мантуровского муниципального округа Костромской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 59 815 817 руб. 90 коп. неустойки по муниципальному контракту №0841600001323000004 от 15.03.2023, а также 65 826  руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Грэйтстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 134 174 руб.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и  приобщена к делу.

Судья                                                                  Е.Н. Смирнова