16_5296850  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-4808/2023

г. Белгород

12 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области:  

 в составе судьи Танделовой З. М., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и  видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО  "Промстальконструкция-центр" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>)  

к ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 115 000 руб. и встречному иску о взыскании 628 059,44 руб. 

при участии в судебном заседании: 

от истца/ответчика: ФИО2, доверенность 31 АБ 1667632 от 08.12.2022,  диплом;  

от ответчика/истца: ФИО3, доверенность от 02.03.2023, диплом, паспорт 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Первоначальный иск ООО "Промстальконструкция-центр" удовлетворить  частично.  

2.Взыскать с ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" (ИНН 9110017765, ОГРН  1169102066572) в пользу ООО "Промстальконструкция-центр" (ИНН 3123071134,  ОГРН 1023101671845) задолженность по оплате стоимости выполненных работ по  договору подряда № 54035-11-21 от 30.11.2021 в размере 1000 000 руб., неустойку  за просрочку оплаты стоимости работ за период с 22.12.2023 по 19.04.2023 в сумме  100 000 руб. и судебные расходы по госпошлине 23 667 руб. , а всего 1 123 667 руб.  

 3.В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

 4.Судебные расходы по госпошлине в сумме 483 руб. отнести на ООО  "Промстальконструкция-центр".  

5.ООО "Промстальконструкция-центр" возвратить 2 087 руб. излишне  оплаченной госпошлины из федерального бюджета.  

6.Встречный иск ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" удовлетворить частично.  

7.Взыскать с ООО "Промстальконструкция-центр" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> в пользу ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку за просрочку выполнения раб от по договору подряда №  54035-11-21 от 30.11.2021 в размере 90 000 руб. и судебные расходы по  госпошлине в сумме 2179 руб., а всего 92 179 руб.  

 8. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

 9.Судебные расходы по госпошлине в сумме 13 382 руб. отнести на ООО  "СТРОЙИНВЕСТГРУПП".  

 10.Произвести взаимозачет удовлетворенных требований.  

 11. Взыскать с ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Промстальконструкция-центр" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) 1 031 488 руб. 

 12.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.