АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-46312/23-143-351

г. Москва

21 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2023 года  Мотивированное решение изготовлено 21 сентября 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы  в составе судьи Гедрайтис О.С.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 с использованием средств аудиозаписи рассматривает в судебном заседании дело по иску ФКР Москвы (ИНН 

<

***>) к ООО «ПРОМИНТЕХ» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 1 525 424 руб. 88 коп.  

при участии: от истца: ФИО2 дов. от 28.12.2022г. от ответчика: не явка, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ФКР Москвы обратилось в суд с исковым заявлением к ООО  «ПРОМИНТЕХ» о взыскании штрафа в размере 1 525 424 руб. 88 коп. договору № ПКР- 003123-19 от 18.09.2019г.  

Представитель ответчика извещенный надлежащим образом о месте и времени  судебного разбирательства в порядке ст. 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился,  дело рассмотрено в отсутствие ответчика.  

В представленном письменном отзыве ответчик возражал против  удовлетворения исковых требований.  

Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск  удовлетворить.  

Оценив материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу  об отказе в удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, 18.09.2019г. между ФКР Москвы  (заказчик) и ООО "ПРОМИНТЕХ" (генподрядчик) заключен договор № ПКР-003123-19  на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному  

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г.  Москвы, САО, Шебашевский пр. 4 к.1.  

По условиям п.4.1. договора генподрядчик обязуется выполнить работы по  договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому  объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания  в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к  настоящему договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут  служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения  работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки  выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением  случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных  нормами действующего законодательства РФ.  

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам  (системам) здания по каждому объекту, включая сроки выполнения этапов работ по  отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными  для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков  производства Работ.  

В соответствии с п.14.7.6 договора заказчик вправе расторгнуть договор в  одностороннем порядке в случае нарушения генподрядчиком сроков выполнения работ  продолжительностью более 15 дней по любому из объектов.  

В связи с нарушением сроков производства работ заказчиком договор  расторгнут в одностороннем порядке на основании решения от 29.06.2022 и  уведомления о расторжении договора от 05.07.2022 № ФКР-ПИР-4576/22, которые  направлены в адрес генподрядчика.  

В силу п.14.12 договора решение заказчика об одностороннем расторжении  договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета  выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении  договора генподрядчику.  

В соответствии с положениями п. 12.7.12 договора в случае досрочного  расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе заказчика по  основаниям, указанным в п.14.7 договора, генподрядчик уплачивает заказчику штраф в  размере, предусмотренном п.228 постановления Правительства РФ № 615-ПП.  Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые генподрядчик обязан будет  возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).  

Согласно расчету истца размер штрафа составляет 1 525 424 руб. 88 коп. 

В силу п.1 ст.329 ГК РФ неустойка является одним из способов обеспечения  исполнения обязательств.  

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения  (п. 1 ст. 330 ГК РФ).  

В обеспечение исполнения обязательств стороны включили в контракт  соглашение о неустойке.  

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться  надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением  случаев, предусмотренных законом.  

Согласно п. 3 ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом  исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось  невозможным вследствие непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относится,  в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника.  

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям  оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.  

Из материалов дела следует, что в соответствии с п.7 договора от 18.09.2019 №  ПКР-003123-19 окончательная приемка работ по указанному договору истцом  производится по акту приемки выполненных работ по объекту (г.Москва,  Шебашевский пр.4, к.1 (многоквартирный дом), который является неотъемлемым  приложением к указанному договору.  

Акт приемки всех выполненных работ по объекту (г.Москва, Шебашевский пр.4,  к.1 (многоквартирный дом) подписан без замечаний приемочной комиссией 18.10.2021.  Так же без замечаний и в сроки, установленные договором от 18.09.2019 № ПКР- 003123-19 и дополнительным соглашением № 5 от 11.11.2021, подписаны акты  выполненных работ по отдельным этапам (ремонт подъездов, ремонт внутридомовых  систем холодного водоснабжения, замена окон, ремонт внутридомовых систем  энергоснабжений).  

По независящим от ответчика причинам, а именно отказ жителей в допуске  представителей подрядчика для производства работ, работы по договору от 18.09.2019   № ПКР-003123-19 неоднократно приостанавливались. Приостановление работ по  указанному договору регламентировалось распоряжениями департамента  коммунального ремонта г. Москвы (от 06.08.2021 № 07-14-320/21, от 04.10.2021 № 0714-772/21).  

Согласно акту приемки всех выполненных работ по объекту (г. Москва,  Шебашевский пр.4, к.1 (многоквартирный дом), подписанному без замечаний  приемочной комиссией 18.10.2021, то есть в срок, предусмотренный договором от  18.09.2019 № ПКР-003123-19 и дополнительным соглашением № 5 от 11.11.2021,  работы выполнены в полном объеме.  

Таким образом, материалами дела подтверждено надлежащее выполнение  спорных работ в полном объеме, в установленные сроки, и как следствие, основания  для взыскания штрафа отсутствуют.  

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном  процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в  обоснование своих требований или возражений.  

В связи с изложенным исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Стороны согласно ст.ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на  представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не  совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств  обоснованности и законности своих требований или возражений.  

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены в  порядке ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, ст. ст. 106, 110, 167-170,  176 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать. 

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

Судья О.С. Гедрайтис