306/2019-46275(1) 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-95389/18

27 мая 2019 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2019 года  Постановление изготовлено в полном объеме 27 мая 2019 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Ханашевича С.К., судей Игнахиной М.В., Мищенко Е.А., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: 

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Пароль" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>): представитель не явился, извещен,  

от ответчика, акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Атолл"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>): представитель не явился, извещен,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества  "Научно-исследовательский институт "Атолл" на решение Арбитражного суда  Московской области от 12 марта 2019 года по делу № А41-95389/18, принятое судьей  Кондратенко Н.А., по иску общества с ограниченной ответственностью "Пароль" к  акционерному обществу "Научно-исследовательский институт "Атолл" о взыскании  денежных средств,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Пароль" (далее - ООО "Пароль", истец)  обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к акционерному обществу  "Научно-исследовательский институт "Атолл" (далее - АО "НИИ "Атолл", ответчик) о  взыскании основного долга сумме 4 135 130 руб., пени за неисполнение обязательства  по договору в размере 1 038 850 руб. 16 коп. (т.1 л.д. 1-6).  

 Решением Арбитражного суда Московской области от 12.03.2019 по делу № А41- 95389/18 с АО "НИИ "Атолл" в пользу ООО "Пароль" взыскано 4 135 130 руб.  задолженности, 519 425 руб. 08 коп. неустойки (т. 2 л.д. 99-101).  

 Не согласившись с решением суда, АО "НИИ "Атолл" обратилось в Десятый  арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемый  судебный акт подлежит отмене в связи с нарушением норм материального права.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта  проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 АПК РФ в отсутствие  представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте  рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации в картотеке  арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела  письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный  апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого  судебного акта в силу следующего.  

 Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между  истцом и ответчиком заключен контракт № 97-658/15 от 05.10.2016, согласно которому,  подрядчик обязался своевременно и надлежащим образом выполнить для заказчика  работы в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 2 к  контракту) и локальной сметы (приложение № 3).  

 Из искового заявления следует, что истцом (подрядчиком) работы были  полностью выполнены в сроки, предусмотренные договором на сумму 11 224 201 руб.  

 Как указал истец, ответчик, свои обязательства по оплате выполненных работ  осуществил не в полном объеме, в результате чего за ответчиком образовалась  задолженность в сумме 4 135 130 руб.  

 Задолженность подтверждена ответчиком в акте сверки взаимных расчётов. 

 В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора 23 декабря  2016 года ответчику было направлено требование о погашении задолженности перед  истцом.  

 11 января 2017 года АО "НИИ "АТОЛЛ" направило в адрес истца гарантийное  письмо, в котором подтвердило сумму основного долга, предоставило график  погашения задолженности.  

 Как указал истец, указанные в гарантийном письме обязательства ответчиком не  исполнены, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим  иском.  

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции, в  связи с чем полагает, что оснований для отмены принятого по делу решения не имеется.   Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании контракта № 97658/15 от 05.10.2016, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ) об обязательствах и специальными нормами,  содержащимися в главе 37 ГК РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

На основании п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.  

 В соответствии с положениями указанных норм права и разъяснений,  содержащихся в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства  заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

 Факт выполнения работ на спорную сумму подтверждается представленными в  материалы дела актами (т. 1 л.д. 98-127).  

 Указанные акты подписаны в двустороннем порядке без каких-либо замечаний и  скреплены печатями сторон.  

 Согласно расчету истца, с учетом частичной оплаты, задолженность ответчика за  выполненные работы составляет 4 135 130 руб.  

 Наличие указанной задолженности подтверждено сторонами в акте сверки на  30.09.2018 (т. 1 л.д. 9).  

 Доказательств оплаты принятых работ ответчиком не представлено.  

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании 4 135 130 руб.  задолженности за принятые, но не оплаченные работы является обоснованным и  правомерно удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере.  

 В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

 Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

 За нарушение срока оплаты выполненных работ истец, руководствуясь п. 10.8  договора, начислил ответчику неустойку в размере 1 038 850 руб. 16 коп.  

 В ходе рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции ответчик  представил отзыв на иск, в котором обосновал несоразмерность начисленной неустойки  и просил применить ст. 333 ГК РФ.  

 Суд первой инстанции, установив факт нарушения ответчиком срока оплаты  выполненных работ и наличие оснований для уменьшения размера неустойки,  удовлетворил требования истца в размере 519 425 руб. 08 коп.  

 Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

 Таким образом, законодатель, предусмотрев неустойку в качестве способа  обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, предоставил суду право снижения  размера неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям  нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или  договорной.  

 В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 17 "Обзор  применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации" основанием для применения названной нормы может служить только явная  несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для  установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно  высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сумме  возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения  обязательства и другие обстоятельства.  

 Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7) установлено, что подлежащая уплате  неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности  последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке  (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

 В соответствии с п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность  выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65  АПК РФ).  

 Согласно пунктам 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 N 7 возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор  не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но  вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные  нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах  разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по  рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды  товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.). При этом при оценке  соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо  учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами  не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования  (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

 Как разъяснено в Определении Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 263- О предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним  из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. Поэтому в п. 1 ст.  333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить  баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными  последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства.  

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных  обстоятельств дела.  

Арбитражный апелляционный суд соглашается с приведенным ответчиком  обоснованием относительно несоразмерности начисленной неустойки, в связи с чем  приходит к выводу о правомерности выводов суда первой инстанции о наличии  оснований для уменьшения размера неустойки до 519 425 руб. 08 коп.  

Доводы ответчика о том, что в силу положений раздела 9 контракта обязательство  по оплате не наступило, признаются судом апелляционной инстанции  несостоятельными.  

В соответствии с положениями ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными  правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной  датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами,  неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие,  которое должно неизбежно наступить.  

Следовательно, в силу статьи 190 ГК РФ срок может определяться указанием  лишь на такое событие, которое должно неизбежно наступить, то есть не зависит от  воли и действий сторон.  

Таким образом, невыполнение требования п. 2 ст. 190 ГК РФ о неизбежности  наступления события не позволяет считать срок установленным.  

Кроме того, поскольку обязательство в силу положений п. 3 ст. 308 ГК РФ не  создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих  лиц), то, с учетом изложенного выше, срок исполнения обязательства не может быть  поставлен в зависимость от неопределенных во времени и не являющихся неизбежными  действий таких третьих лиц, не обязанных к чему-либо договором между истцом и  ответчиком.  

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе,  признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить  основанием для отмены состоявшегося решения.  

 Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к  отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены  обжалуемого судебного акта не имеется.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи  269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 12.03.2019 года по делу № А41- 95389/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.  

Председательствующий С.К. Ханашевич  

Судьи М.В. Игнахина  Е.А. Мищенко