АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-62629/2022

10 марта 2023 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2023 года. Полный текст решения изготовлен 10 марта 2023 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи С.Ю. Григорьевой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.А. Мкртичян, рассмотрел в судебном заседании 02.03.2023г. дело по иску Администрации города Екатеринбурга (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третье лицо, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, ООО СК «Интех» (ИНН 

<

***>) об обязании восстановить нарушенное благоустройство,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 24.06.2022г.;

от ответчика: ФИО2, доверенность от 13.09.2022г.;

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Администрации города Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд свердловской области с исковым заявлением АО «ЕТК» об обязании: 

- восстановить в незавершенном (зимнем) варианте благоустройство, нарушенное при проведении работ по разрешениям №2282/07 от 30.08.2022г. и №1602/07 от 06.07.2022г.; 

- до 01.06.2023г. восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении работ по разрешениям №2282/07 от 30.08.2022г. и №1602/07 от 06.07.2022г. 

Ответчик представил отзыв, заявил о чрезмерности судебной неустойки. 

Истец заявил об уточнении исковых требований и просит обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении работ по разрешениям

- от 30.08.2022 № 2282/07 по адресу: 

<

...>, на участке от т. А до т. В; 

- 06.07.2022 № 1602/07 по адресу: 

<

...>, на участке от т. А-В, т. C-D, т. E-F, т. G-H. 

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000 руб. по каждому разрешению за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:

06.07.2022г. АО «ЕТК» (ответчик)  получено разрешение (ордер) №1602/07  на производство земляных работ по адресу 

<

...>, на участке от т. А-В, т. C-D, т. E-F, т. G-H на срок с 12.07.2022г. по 29.09.2022г.

30.08.2022г. АО «ЕТК» получено разрешение (ордер) №2282/07 на производство земляных работ по адресу 

<

...>, на участке от точки А до точки В на срок с 06.09.2022г. по 01.11.2022г.

В соответствии с п. 153 Правил благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург", утв. решением Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 N 29/61, производство земляных работ на территории муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляется на основании разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Сроки начала и окончания работ, указанные в разрешении (ордере) на производство земляных работ, определяются графиком производства работ в соответствии с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Пунктом 158 Правил благоустройства предусмотрена возможность продления срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ) (п. 175).

По состоянию на 10.11.2022г. работы по выданным разрешениям не завершены, благоустройство не восстановлено, что явилось основанием для подачи настоящего иска в арбитражный суд.

Согласно п. 182 Правил благоустройства при проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) на производство земляных работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

По актам №2282/07 от 08.02.2023г. и №1602/07 от 10.02.2023г. ответчиком благоустройство в незавершенном (зимнем) варианте сдано, следовательно, окончательное благоустройство должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 01.06.2023г.

Принимая во внимание отсутствие доказательств продления срока действия разрешения на производство земляных работ, восстановление благоустройства в незавершенном (зимнем) варианте, суд требование истца о возложении на ответчика обязанности по восстановлению в окончательном варианте благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ по разрешениям (ордерам) №2282/07 от 08.02.2023г. и №1602/07 от 10.02.2023г. по адресам 

<

...>, на участке от т. А-В, т. C-D, т. E-F, т. G-H и 

<

...>, на участке от точки А до точки В удовлетворяет.

В соответствии с п. 181 Правил благоустройства восстановленные элементы благоустройства сдаются по акту приемки работ по восстановлению элементов благоустройства.

На случай неисполнения суд взыскивает с ответчика денежные средства (судебную неустойку) в целях побуждения к своевременному исполнению обязательства в натуре (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

При определении размера судебной неустойки в размере 20 000 руб. в день судом учтено, что период бездействия со стороны ответчика до восстановления благоустройства в зимнем варианте превышает более полугода, благоустройство нарушено на путях следования пешеходов, отсутствие благоустройства препятствует их передвижению и создает опасную ситуацию, поэтому исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение, а также достаточный срок для исполнения судебного акта - после окончания зимнего периода, но не позднее 01.06.2023г.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета (ст. 110 АПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023г. восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) №1602/07 от 06.07.2022г. по адресу 

<

...>, на участке от т. А-В, т. C-D, т. E-F, т. G-H,  по разрешению (ордеру) №2282/07 от 08.02.2023г. по адресу 

<

...>, на участке от т. А до т. В.

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 20 000 руб. за каждый день неисполнения обязательства по каждому разрешению с 01.06.2023г. по день фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте.

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                                  С.Ю. Григорьева