Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-85350/23

г. Москва

07 мая 2024 года

Судья Арбитражного суда Московской области Узденов А.У., при ведении протокола помощником судьи Еремян Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-85350/23 по иску по иску ООО "УИР 701" (ОГРН 

<

***>) 

к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  (ОГРН 

<

***>)  

при участии третьего лица: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской  области (ОГРН 

<

***>)  

о внесении изменений в муниципальный контракт № 0148200005419000379 от 27.09.2019  при участии в судебном заседании: согласно протоколу,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Внести в Муниципальный контракт № № 0148200005419000379 от 27.09.2019 г.  «Модернизация КНС «Соколовская», г. Щёлково» следующие изменения:  

пункт 3.1 контракта изложить в редакции: «3.1. Срок выполнения работ на Объекте: с  момента заключения контракта по «20» декабря 2024 г., в соответствии с графиком  производства работ (далее – график производства работ) (Приложение № 8 к контракту)».  

Срок выполнения работ в Техническом задании (Приложение № 5 к контракту)  изложить в редакции: «Срок выполнения: с момента заключения контракта по «20» декабря  2024 г.».  

Изменить график производства работ (Приложение № 8 к контракту), изложив его  

согласно приложению к уточнению иска. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  

течение одного месяца со дня принятия. 

Судья А.У. Узденов